Арбитражный суд Краснодарского края 

350063, г. Краснодар, ул. Постовая, 32 

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Резолютивная часть решения

 суда от 04.10.2023г.  

по делу № А32-11631/2022 

Суд в составе: судьи Миргородской О.П., руководствуясь ст. ст. 65, 68, 71, 167-170  АПК РФ, суд  

Р Е Ш И Л:

Обязать НУО «Краснодарский краевой фонд капитального ремонта  многоквартирных домов» в течение 30 календарных дней с момента вступления решения в  законную силу безвозмездно устранить недостатки и провести капитальный ремонт  крыши многоквартирного дома № 24 по улице Полевая в городе Геленджике в  соответствии со строительно-техническими нормами:  

 № п/п 

Наименование работ и затрат 

Единица  

Количество  

измерения 

на единицу  

1 

2 

3 

4 

Раздел 1. Демонтажные работы 

1 

Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов 

100 м2 

6,3 

2 

Ремонт цементной стяжки площадью заделки: до 1,0 м2  

100 мест  

4,5 

3 

Раствор готовый кладочный, цементный, Ml 50 

м3 

9,63 

4 

Огрунтовка оснований из бетона или раствора под  

100 м2 

6,3 

водоизоляционный кровельный ковёр: готовой эмульсией  

битумной 

5 

Устройство кровель плоских из наплавляемых  

100м2 

6,3 

материалов: в два слоя 

6 

Унифлекс: Экстра ТКП 

м2 

730,8 

7 

Унифлекс: Экстра ТПП 

м2 

718,2 

8 

Устройство кровель плоских из наплавляемых  

100м2 

3 

материалов: в один слой 

9 

Унифлекс: Экстра ТПП 

м2 

348 

10 

Устройство примыканий рулонных и мастичных кровель  

100 м 

1,62 

к стенам и парапетам высотой: до 600 мм без фартуков  

11 

Унифлекс: Экстра ТПП 

м2 

408,24 

12 

Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты,  

100 м2 

0,162 

свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали  

(прижимная планка) 

Раздел 2. Выходы на кровлю 

13 

Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и  

100м2 

0,02 

бетону цементно-известковым раствором: 

прямолинейных 

Раздел 3. Прочие работы 

14 

Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных 

1 т груза  

5,922 

перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой  

вручную 

15 

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами  

1 т груза  

5,922 

грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на 

расстояние: I класс груза до 53 км 

Взыскать с НУО «Краснодарский краевой фонд капитального ремонта  

многоквартирных домов» (ИНН 

<

***>) г. Краснодар в пользу ООО «Комфортстрой»  (ИНН 

<

***>) г. Геленджик 6 000 рублей возмещения судебных расходов по оплате  государственной пошлины.  

Решение может быть обжаловано в течение месяца после его принятия в порядке  апелляционного производства и в порядке кассационного производства в срок, не  превышающий двух месяцев со дня вступления в законную силу решения, через  принявший решение в первой инстанции Арбитражный суд Краснодарского края.  

Вступившее в законную силу решение арбитражного суда первой инстанции может  

быть обжаловано в кассационном порядке, если было предметом рассмотрения в  арбитражном суде апелляционной инстанции или если арбитражный суд апелляционной  инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.  

Судья О. П. Миргородская