АРБИТРАЖНЫЙ СУД СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

620000, 

<

...> стр. 1,

www.ekaterinburg.arbitr.ru e-mail: info@ekaterinburg.arbitr.ru 

Именем Российской Федерации

МОТИВИРОВАННОЕ 

РЕШЕНИЕ

Дело №А60-40029/2025

22 сентября 2025 года

г. Екатеринбург

 

Арбитражный суд Свердловской области в составе судьи С.С. Павловой рассмотрел дело по исковому заявлению акционерного общества «Екатеринбурггаз» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) к обществу с ограниченной ответственностью «Оптима» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) о взыскании задолженности, неустойки по договору в размере 347 598 руб. 25 коп.

Дело рассмотрено в порядке упрощенного производства без вызова сторон после истечения сроков, установленных судом для представления доказательств и иных документов в соответствии с главой 29 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Лица, участвующие в деле, о принятии искового заявления, возбуждении производства по делу и рассмотрении дела в порядке упрощенного производства извещены арбитражным судом надлежащим образом, в том числе публично, путем размещения информации на сайте суда.

Отводов суду не заявлено.

Судом 08.09.2025 путем подписания резолютивной части вынесено решение.  Ответчик 19.09.2025 обратился в суд с  заявлением о составлении мотивированного решения. Учитывая, что заявление подано с соблюдением установленного ст. 229 Арбитражного процессуального кодекса срока, изготовлено мотивированное решение.

Акционерное общество «Екатеринбурггаз»  09.07.2025 обратилось в Арбитражный суд Свердловской области с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью «Оптима»  с требованием о взыскании задолженности, неустойки по договору в размере 347 598 руб. 25 коп.

Определением суда от 10.07.2025 исковое заявление принято к рассмотрению в порядке упрощенного производства.

От ответчика 22.07.2025 поступил отзыв на иск.

Истцом 20.08.2025 представлены возражения на отзыв.

От ответчика 26.08.2025 поступили дополнение к отзыву.

Документы, поступившие от сторон, приобщены к материалам дела.

Рассмотрев материалы дела, арбитражный суд

установил:

Между ООО «Оптима» (Заявитель, Ответчик) и АО «Екатеринбурггаз» (Исполнитель, Истец) заключен договор о подключении (технологическом присоединении) объектов капитального строительства к сети газораспределения 11901 от 29.06.2018 (подписан Заявителем 09.07.2018) (далее-Договор).

По условиям Договора Исполнитель обязался осуществить подключение (технологическое присоединение) объекта капитального строительства Заявителя - Две генераторные установки для выработки электроэнергии к сети газораспределения с учетом максимальной нагрузки (часовым расходом газа) газоиспользующего оборудования 131 куб. м. в час, а Заявитель обязался обеспечить готовность объекта капитального строительства к подключению (технологическому присоединению) в пределах границ принадлежащего ему земельного участка, расположенного по адресу: 

<

...>, № 66:41:0608013:43, и оплатить услуги по подключению (технологическому присоединению).

Согласно п. 10 Договора в редакции дополнительного соглашения от 06.02.2020, размер платы за подключение (технологическое присоединение) определяется исходя из стандартизированных тарифных ставок, установленных решением Региональной энергетическом комиссии Свердловской области от 25.12.2019 №257-ГПС «Об установлении стандартизированных тарифных ставок, используемых для определения величины платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям газораспределительных организаций на территории Свердловской области» и составляет 169 893 руб. 56 коп. в т.ч. НДС 20%.

Согласно п. 3 Договора в редакции дополнительного соглашения от 06.02.2020, срок выполнения мероприятий по подключению (технологическому присоединению) объекта капитального строительства и пуску газа - 1,5 года (лет) со дня заключения настоящего дополнительного соглашения.

Дополнительное соглашение от 06.02.2020 подписано сторонами с протоколом согласования разногласий от 12.03.2020. Таким образом, срок выполнения мероприятий по подключению - не позднее 13.09.2021.

Исполнитель выполнил мероприятия по технологическому присоединению в части создания сети газораспределения до границ земельного участка Заявителя, что подтверждается Актом приемки законченного строительством объекта сети газораспределения от 17.09.2020.

Однако, в нарушение условий Договора, Заявитель мероприятия по обеспечению готовности объекта капитального строительства к подключению (технологическому присоединению) в пределах границ принадлежащего ему земельного участка не выполнил.

Исполнитель направил Заявителю уведомление (исх. № 1901 от 03.02.2025) о завершении выполнения мероприятий в своей части, а также о необходимости внесения 100% платы за технологическое присоединение по Договору. Уведомление было получено Заявителем 17.03.2025, однако, требование исполнено не было.

В рамках договора Заявителем произведена частичная оплата на сумму 9 739 руб. 72 коп., следовательно, остаток задолженности по внесению платы по Договору составляет 160 153 руб. 84 коп.

Заявитель должен был выполнить мероприятия по обеспечению готовности объекта капитального строительства к подключению (технологическому присоединению) в пределах границ принадлежащего ему земельного участка в срок не позднее 13.09.2021. Начиная с 14.09.2021 на стороне Заявителя возникла просрочка.

В соответствии с п. 18 Договора, в случае нарушения одной из сторон сроков исполнения своих обязательств по настоящему договору такая сторона в течение 10 рабочих дней со дня наступления срока исполнения обязательств уплачивает, другой стороне неустойку, рассчитанную как произведение 0,014 ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации, установленной на дату заключения настоящего договора, и общего размера платы по настоящему договору за каждый день просрочки.

Размер неустойки за нарушение Заявителем сроков исполнения обязательств по обеспечению готовности объекта капитального строительства к подключению (технологическому присоединению) в пределах границ принадлежащего ему земельного участка, рассчитанный в соответствии с п. 18 Договора за период с 14.07.2022 по 04.07.2025 (дата подготовки искового заявления) составляет 187 444 руб. 41 коп.

Ссылаясь на указанные обстоятельства, истец с соблюдением претензионного порядка урегулирования спора обратился в арбитражный суд с рассматриваемым иском.

Ответчик в своих возражениях поясняет, что договор прекратил действие 19.09.2021, следовательно, срок исковой давности истек 13.09.2024. В связи с этим ответчик просит отказать в удовлетворении иска в части взыскания долга и неустойки за период с 14.07.2022 по 04.07.2025. Утверждение истца о том, что договор является действующим и не расторгнут сторонами является неверным, при наличии письма об окончании срока действия договора ввиду того, что обязательства на дату получения уведомления (19.10.2020) об окончании выполнения АО «Екатероинбурггаз» мероприятий, ответчиком исполнены не были.

Также ответчик считает, что заявленная ко взысканию неустойка является несоразмерной и подлежит снижению в порядке, предусмотренном ст. 333 ГК РФ.

Исследовав материалы дела, оценив представленные доказательства в соответствии с положениями ст. 71 АПК РФ, суд считает заявленные требования подлежащими удовлетворению ввиду следующего.

В силу ст. ст. 309, 310 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом, в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями. Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускается, за исключением случаев, предусмотренных законом.

К правоотношениям сторон по договору технологического присоединения применяются, помимо специальных норм, положения главы 39 ГК РФ, а также общие положения об обязательствах и о договоре (раздел III ГК РФ).

В силу п. 1 ст. 779 ГК РФ по договору возмездного оказания услуг исполнитель обязуется по заданию заказчика оказать услуги (совершить определенные действия или осуществить определенную деятельность), а заказчик обязуется оплатить эти услуги.

Заказчик обязан оплатить оказанные ему услуги в сроки и в порядке, которые указаны в договоре возмездного оказания услуг (п. 1 ст. 781 ГК РФ).

Согласно п. 1 ст. 424 ГК РФ в предусмотренных законом случаях применяются цены (тарифы, расценки, ставки и т.п.), устанавливаемые или регулируемые уполномоченными на то государственными органами и (или) органами местного самоуправления.

В соответствии со ст. 23.2 Федерального закона от 31.03.1999 N 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации» (далее - ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации») и подп. «з» п. 4 Основных положений формирования и государственного регулирования цен на газ и тарифов на услуги по его транспортировке на территории Российской Федерал и, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 29.12.2000 № 1021 (далее - Основные положения № 1021), государственному регулированию на территории Российской Федерации подлежит плата за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям и (или) стандартизированные тарифные ставки, определяющие ее величину.

Размер платы за технологическое присоединение и (или) стандартизированные тарифные ставки, определяющие ее величину, устанавливаются органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области государственного регулировании тарифов в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, и в соответствии с методическими указаниями по расчету размера данной платы и (или) размеров данных стандартизированных тарифных ставок, утвержденными федеральным органом исполнительной власти в области регулирования тарифов.

Согласно п. 59 Правил подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям газораспределения, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 30.12.2013 № 1314 (далее - Правила подключения N 1314), подключение объектов капитального строительства к сети газораспределения осуществляется на основании договора о подключении.

В силу п. 87 Правил подключения № 1314 в случае, если размер платы за технологическое присоединение зависит от технических параметров, указанных в проектной документации, и (или) устанавливается впоследствии органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов по индивидуальному проекту при заключении договора о подключении, в договоре о подключении указывается предварительный размер платы за технологическое присоединение, определяемый исходя из действующих на тот момент стандартизированных тарифных ставок, определяющих размер платы за технологическое присоединение, и предварительных технических параметров подключения (технологического присоединения). При этом расчет предварительного размера платы за технологическое присоединение является осязательным приложением к договору о подключении. Впоследствии размер платы в договоре о подключении корректируется путем заключения дополнительного соглашения в частности, для случая, когда размер платы за технологическое присоединение устанавливается органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов по индивидуальному проекту, - после утверждения размера платы за технологическое присоединение таким органом.

На основании п. 69 Правил подключения № 1547 в случае нарушения заявителем срока осуществления мероприятий по подключению (технологическому присоединению) исполнитель, выполнивший мероприятия согласно подп. «а» п. 72 настоящих Правил, то есть осуществивший действия по созданию (реконструкции) сети газораспределения до точек подключения, предусмотренные договором о подключении, а также по подготовке сети газораспределения к подключению объектов капитального строительства заявителя и пуску газа не позднее установленного договором о подключении дня подключения, вправе требовать от заявителя исполнения обязательства по внесению платы за подключение (технологическое присоединение) в соответствии с договором о подключении и по истечении 10 рабочих дней со дня нарушения заявителем срока осуществления мероприятий по подключению(технологическому присоединению) направить в адрес заявителя уведомление с требованием внести 100 процентов платы за подключение (технологическое присоединение), а заявитель обязан в течение 10 рабочих дней со дня получения такого уведомления исполнить требование исполнителя. Указанная обязанность исполняется заявителем без внесения изменений в договор о подключении и вне зависимости от последующего выполнения иных мероприятий, предусмотренных договором о подключении.

В соответствии с ч. 1 ст. 65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

Как следует из материалов дела, истец провел работы по строительству системы газораспределения до точек подключения, что подтверждается актом приемки законченного строительством объекта сети газораспределения от 17.09.2020.

Однако ответчик в установленный договором срок не осуществил мероприятия по подготовке к подключению, доказательств иного в материалы дела не представлено.

В связи с чем истец, согласно п. 95 Правил подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям газораспределения, утв. Постановлением Правительства РФ от 30.12.2013г. № 1314, вправе требовать от ответчика исполнения обязательства по внесению платы за подключение (технологическое присоединение) в соответствии с договором о подключении.

Поскольку ответчик доказательств оплаты исполненных обязательств истцом по подключению (технологическому присоединению) объекта капитального строительства к сети газораспределения не представил, требования истца в данной части подлежат удовлетворению в полном объеме, в размере 160 153,84 руб.

Довод ответчика о пропуске истцом срока исковой давности судом отклонен на основании следующего.

Согласно п. 1 ст. 196 Гражданского кодекса Российской Федерации общий срок исковой давности составляет три года со дня, определяемого в соответствии со ст. 200 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

Согласно п. 1 ст. 200 Гражданского кодекса Российской Федерации, если законом не установлено иное, течение срока исковой давности начинается со дня, когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении своего права и о том, кто является надлежащим ответчиком по иску о защите этого права.

Вопреки мнению Ответчика, договор №11901 от 29.06.2018  не прекратил свое действие, не расторгнут, является действующим. Обязательства сторон по нему продолжаются. Срок выполнения мероприятий по подключению (13.09.2021) не является датой прекращения действия договора.

Срок исковой давности по основному долгу начинает течь со дня вручения письма ответчику с требованием истца о внесении 100% платы, то есть с 31.03.2025.

Срок исковой давности по требованию о взыскании неустойки за просрочку исполнения обязательств по подключению (строительство сети газопотребления, подготовка ОКС к подключению) начинает течь со 14.09.2021, так как срок выполнения мероприятий по подключению по условиям договора не позднее 13.09.2021. К указанной дате обе стороны обязаны были завершить исполнение своих обязательств по строительству объектов газоснабжения.

Таким образом, исковые требования истца заявлены в пределах срока исковой давности.

Истцом также заявлено требование о взыскании неустойки за период с 14.07.2022 по 04.07.2025 в размере 187 444,41 руб.

В соответствии со ст. 329 Гражданского кодекса Российской Федерации исполнение обязательства может обеспечиваться, в том числе неустойкой. 

Согласно ст. 330 Гражданского кодекса Российской Федерации неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения. 

В соответствии со ст. 331 Гражданского кодекса Российской Федерации соглашение о неустойке должно быть совершено в письменной форме независимо от формы основного обязательства, при этом несоблюдение письменной формы влечет недействительность соглашения о неустойке. 

По своей правовой природе неустойка представляет собой средство упрощенной компенсации потерь кредитора, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением должником своих обязательств. 

В силу подп. «и» п. 83 Правил № 1314, каждая из сторон обязана при нарушении ею сроков исполнения обязательств уплатить другой стороне в течение 10 рабочих дней со дня наступления просрочки неустойку, рассчитанную как произведение 0,014 ключевой ставки Банка России, установленной на день заключения договора о подключении, и платы за технологическое присоединение по договору о подключении за каждый день просрочки, если договором о подключении не предусмотрен больший размер неустойки; 

В соответствии с п. 18 Договора, в случае нарушения одной из сторон сроков исполнения своих обязательств по настоящему договору такая сторона в течение 10 рабочих дней со дня наступления срока исполнения обязательств уплачивает, другой стороне неустойку, рассчитанную как произведение 0,014 ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации, установленной на дату заключения настоящего договора, и общего размера платы по настоящему договору за каждый день просрочки.

Поскольку ответчик нарушил обязательства в части оплаты по договору, истцом начислена неустойка в размере 187 444 руб. 41 коп. 

Период неустойки заявлен истцом с учетом истечения срока исковой давности.

Суд, проверив расчет истца в части взыскания неустойки, признает его арифметически верным.

С учетом изложенного, требования истца о взыскании с ответчика неустойки в размере 187 444,41 руб. подлежит удовлетворению.

Ответчиком также заявлено ходатайство о снижении размера неустойки.

Согласно п. 2 ст. 333 Гражданского кодекса Российской Федерации уменьшение неустойки, определенной договором и подлежащей уплате лицом, осуществляющим предпринимательскую деятельность, допускается в исключительных случаях, если будет доказано, что взыскание неустойки в предусмотренном договором размере может привести к получению кредитором необоснованной выгоды.

С учетом подлежащей применению ставки рефинансирования ЦБ РФ, действующей на дату заключения Договора – 7,25 %, размер неустойки составляет 0,1015% за каждый день просрочки исполнения обязательства по выполнению мероприятий. Соответствующий размер договорной неустойки не является завышенным и не выходит за рамки обычной деловой практики, требований разумности и справедливости. Иного ответчиком в нарушение статьи 65 АПК РФ не доказано.

Оснований для применения ст. 333 Гражданского кодекса Российской Федерации судом не установлено. 

На основании изложенного требования истца в части взыскания неустойки подлежат удовлетворению в размере 187 444,41 руб.

В соответствии с ч. 1 ст. 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебные расходы, понесенные лицом, участвующим в деле, в пользу которого принят судебный акт, взыскиваются со стороны. 

Расходы по оплате государственной пошлины подлежат взысканию с ответчика в пользу истца.

На основании статей 309, 310, 486, 516, 330 Гражданского кодекса Российской Федерации, руководствуясь статьями 110, 167-171, 229 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд 

РЕШИЛ:

1.                  Иск удовлетворить.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Оптима» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в пользу акционерного общества «Екатеринбурггаз» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) 347 598,25 руб., в том числе: 160 153,84 руб. долга по договору о подключении (технологическом присоединении) объектов капитального строительства к сети газораспределения №11901 от 29.06.2018, 187 444,41 руб. неустойки за период с 14.07.2022 по 04.07.2025, а также 22 380 руб. в возмещение расходов по уплате государственной пошлины.

2. По заявлению лица, участвующего в данном деле, может быть составлено мотивированное решение. Заявление о составлении мотивированного решения может быть подано в течение пяти дней со дня размещения данной резолютивной части на официальном сайте арбитражного суда в сети «Интернет».

Мотивированное решение арбитражного суда изготавливается в течение пяти дней со дня поступления от лица, участвующего в деле, соответствующего заявления.

3. Решение по настоящему делу подлежит немедленному исполнению. Указанное решение вступает в законную силу по истечении пятнадцати дней со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба.

В случае составления мотивированного решения арбитражного суда такое решение вступает в законную силу по истечении срока, установленного для подачи апелляционной жалобы.

В случае подачи апелляционной жалобы, если решение не отменено или не изменено, оно вступает в законную силу со дня принятия арбитражным судом апелляционной инстанции постановления.

Решение может быть обжаловано в порядке апелляционного производства в Семнадцатый арбитражный апелляционный суд в срок, не превышающий пятнадцати дней со дня его принятия, а в случае составления мотивированного решения арбитражного суда - со дня принятия решения в полном объеме.

Апелляционная жалоба подается в арбитражный суд апелляционной инстанции через арбитражный суд, принявший решение. Апелляционная жалоба также может быть подана посредством заполнения формы, размещенной на официальном сайте арбитражного суда в сети «Интернет» http://ekaterinburg.arbitr.ru.

В случае обжалования решения в порядке апелляционного производства информацию о времени, месте и результатах рассмотрения дела можно получить на интернет-сайте Семнадцатого арбитражного апелляционного суда http://17aas.arbitr.ru.

4. Исполнительный лист выдается взыскателю только по его ходатайству независимо от подачи в суд заявления о составлении мотивированного решения или подачи апелляционной жалобы (абзац 2 пункта 46 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации  от 18 апреля 2017 г. № 10 «О некоторых вопросах применения судами положений Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации и Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации об упрощенном производстве»).

С информацией о дате и времени выдачи исполнительного листа канцелярией суда можно ознакомиться в сервисе «Картотека арбитражных дел».

По заявлению взыскателя дата выдачи исполнительного листа (копии судебного акта) может быть определена (изменена) в соответствующем заявлении.

В случае неполучения  взыскателем исполнительного листа в здании суда в назначенную дату, исполнительный лист не позднее следующего рабочего дня будет направлен по юридическому адресу взыскателя заказным письмом с уведомлением о вручении.

Судья                                                                                   С.С. Павлова