АРБИТРАЖНЫЙ  СУД  КРАСНОЯРСКОГО  КРАЯ

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Р Е Ш Е Н И Е

18 февраля 2019 года

Дело № А33-35021/2018

Красноярск

Резолютивная часть решения объявлена в судебном заседании 12 февраля 2019 года.

В полном объёме решение изготовлено 18 февраля 2019 года.

Арбитражный суд Красноярского края в составе судьи Мальцевой А.Н., рассмотрев в судебном заседании дело по иску общества с ограниченной ответственностью «Строительная компания «М-Строй» (ИНН 2466269459, ОГРН 1142468003787, г. Красноярск)

к обществу с ограниченной ответственностью Красноярская Строительная Компания «Лидер Прогресс» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>, г. Красноярск)

о взыскании задолженности, процентов за пользование чужими денежными средствами,

в присутствии:

от истца: ФИО1 – представитель по доверенности от 20.11.2018, 

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО2,

установил:

общество с ограниченной ответственностью «Строительная компания «М-Строй» (далее – истец) обратилось в Арбитражный суд Красноярского края с иском к обществу с ограниченной ответственностью Красноярская Строительная Компания «Лидер Прогресс» (далее – ответчик) о взыскании задолженности по договору субподряда от 03.12.2014 № 02/02/14-Ш-ЛП в размере 10 282 859 руб. 84 коп., процентов, начисленных в порядке статьи 395 Гражданского кодекса Российской Федерации на сумму основного долга, в размере 2 613 716 руб. 72 коп. 

Исковое заявление принято к производству суда. Определением от 14.12.2018 возбуждено производство по делу.

Ответчик, надлежащим образом извещенный о времени и месте судебного заседания, в судебное заседание не явился. Согласно статье 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации  судебное заседание проводится в его отсутствие.

Истцом в судебном заседании исковые требования поддержаны.

При рассмотрении дела установлены следующие, имеющие значение для рассмотрения спора, обстоятельства.

Между истцом (субподрядчик) и ответчиком (генподрядчик) подписан договор субподряда орт 03.12.2014 №02/02/14-Ш-ЛО (далее – договор), по условиям которого субподрядчик обязуется выполнить по заданию генподрядчика указанную в договоре работу и сдать ее результат генподрядчику, а генподрядчик обязуется принять результат работы и оплатить его (пункт 1.1).

Пунктом 1.2 договора предусмотрена работа, выполняемая субподрядчиком: строительный подряд на строительство объекта - «Многоэтажные жилые дома по ул. Шевченко, 1 в г. Красноярске. Многоэтажный жилой дом №2» (далее - работы).

Согласно пункту 1.4 договора, состав работ и объемы (комплекс работ по устройству монолитных железобетонных конструкций, порученные субподрядчику, выполняются в соответствии с действующими строительными нормами и правилами, в соответствии с утвержденной проектно-сметной документацией, указываются в локальных сметных расчетах (приложение № 1).

Место выполнения работ: 

<

...> (пункт 1.5 договора).

Пунктом 2.1 договора установлено, что начальный и конечный сроки выполнения работ, а также сроки завершения отдельных этапов работ согласовываются сторонами в графике производства работ (приложение № 2 к договору) Начальный срок производства работ в соответствии с графиком производства работ: декабрь 2014 г., но не ранее даты передачи строительной площадки. Срок окончания работ - 30 августа 2015 г.

Субподрядчик обязался выполнить работы своими силами либо с письменного согласия генподрядчика с участием субподрядчиков в соответствие с технической, нормативной документацией, условиями договора (пункт 4.2.1 договора),  соблюдать график выполнения работ (пункт 4.2.4 договора), выполнить работу, предусмотренную договором в соответствии с рабочей документацией, графиком выполнения работ, а также требованиями действующего законодательства Российской Федерации (пункт 4.2.5 договора).

Генподрядчик обязался произвести приемку работ в сроки и в порядке, предусмотренные Договором (пункт 4.4.8 договора), производить оплату в соответствии с условиями договора (пункт 4.4.7 договора).

В пункте 8.1 стороны согласовали, что субподрядчик ежемесячно, не позднее 25 числа отчетного календарного месяца представляет генподрядчику акт о приемке выполненных работ по форме № КС-2 (в текущих ценах) и составленную на его базе справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3 (в текущих ценах), а также исполнительную документацию относительно выполненных работ (в количестве 2 экземпляров - 1 оригинала и 1 копии, подписанных уполномоченным лицом). Акт о приемке выполненных работ (по форме № КС-2), справка о стоимости выполненных работ и затрат (по форме № КС-3) подтверждают выполнение субподрядчиком промежуточных работ в отчетном месяце для целей расчетов.

Генподрядчик обязан подписать справку о стоимости выполненных работ и затрат и акт о приемке выполненных работ, либо представить мотивированный отказ от подписания справки о стоимости выполненных работ и затрат и акта о приемки выполненных работ в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня их получения (пункт 8.2 договора).

Осмотр и приемка работ сопровождается оформлением и подписанием сторонами акта о выполненных работах по договору и предоставлением субподрядчиком счета-фактуры, оформленного в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации (пункт 8.4 договора).

Цена договора включает цену работ, а также прочие затраты, не включаемые в единичные расценки на строительные работы и в ценники на монтажные работы в соответствии с перечнем и в размере, согласованном сторонами. Цена работ по договору указывается в локальных сметных расчетах и составляет 81 509 564 руб. 636 коп., в том числе НДС 18% -12 433 66236 руб. 

Пунктом 3.2 договора предусмотрено, что оплата по договору производится за фактически выполненные и принятые работы, на основании форм КС-2, КС-3, которые должны быть подписаны генподрядчиком в течение 5-ти рабочих дней с момента получения, за вычетом 10% резерва от суммы актов выполненных работ. Выплата зарезервированной суммы производится в следующем порядке в течение 30 дней после сдачи объекта в эксплуатацию. Оплата осуществляется при условии предоставления субподрядчиком генподрядчику счета на оплату, исполнительной документации (в том числе актов на скрытые работы), справок о смонтированном оборудовании, отчета об использовании давальческих материалов. При этом обязанность по оплате работ возникает у генподрядчика при условии предоставления всех оригиналов вышеуказанных документов. В случае задержки предоставления субподрядчиком хотя бы одного из вышеуказанных документов, либо предоставления ненадлежащим образом оформленных документов, срок оплаты задерживается соразмерно времени задержки предоставления документов, либо устранения недостатков в оформлении документов акт о приемке выполненных работ (по форме № КС-2), справка о стоимости выполненных работ и затрат (по форме № КС-3) подтверждают выполнение субподрядчиком промежуточных работ в отчетном месяце для целей расчетов.

Согласно пункту 3.5 договора, оплата выполняемых субподрядчиком работ по договору осуществляется путём передачи прав на объекты долевого строительства (путем заключения соглашения о переводе долга (статья 391 Гражданского кодекса Российской Федерации), о прекращении обязательств зачетом (статья 410 Гражданского кодекса Российской Федерации). Передача прав на объекты долевого строительства (соответствующий перевод долга и зачёт) осуществляется по заявке субподрядчика с указанием номеров квартир в течение 10 рабочих дней с момента полного выполнения субподрядчиком и принятия генподрядчиком работ по очередному этажу объекта на сумму не превышающей стоимости данных работ. Остаток стоимости выполненных и принятых работ по конкретному этажу, не покрытый квартирами, погашается после сдачи работ по следующему этажу объекта. По соглашению сторон оплата может производиться в любой форме, не противоречащей действующему законодательству Российской Федерации.

Пунктом 1.1 договора предусмотрено, что генподрядчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть действие договора, с предварительным письменным уведомлением об этом субподрядчика, в течение 30 календарных дней со дня получения субподрядчиком такого уведомления в следующих случаях:

- систематические нарушения (более пяти раз, при условии их фиксации в порядке, предусмотренном договором) субподрядчиком условий договора, ведущее к снижению качества работ, предусмотренных проектом, увеличению сроков строительства;

- аннулирование лицензии или допусков на строительную деятельность, другие акты, налагаемые государственными органами в рамках действующего законодательства, лишающие субподрядчика права на производство работ;

- срыв сроков работ более чем на 14 рабочих дней по причинам, зависящим от субподрядчика.                           

В этом случае, если генподрядчик оплачивает субподрядчику часть установленной договором стоимости работ пропорционально части работ, выполненной до получения извещения об отказе от исполнения договора.

Споры, возникающие из настоящего договора, разрешаются путем переговоров Сторон. Претензионный порядок обязателен (пункт 13.1 договора).

Сторонами утвержден к договору локальный ресурсный сметный расчет №1, согласно которому стоимость работ составляет 81 509 564 руб. 636 коп., а также график производства работ. 

Согласно дополнительному соглашению от 25.12.2014 №1 к договору, за выполненные подрядчиком надлежащего качества и в установленный срок работы инвестор (обществом с ограниченной ответственностью «Монтаж-Строй») по указанию заказчика (ответчика) вправе передать, а подрядчик (истец) обязан принять в качестве расчета права требования по договору долевого участия в строительстве жилого дома № 2 (строительный номер), расположенного на земельном участке с кадастровым номером 24:50:0500333:927, по адресу: 

<

...>. Договор уступки права требования доли заключается в срок, установленный заказчику для расчёта по договору подряда, после выполнения работ на сумму уступаемого права. В пункте 2 приведена характеристика жилых помещений, расположенных в жилом доме № 2, по адресу: 

<

...>, право требования на которые подлежат уступке. Стороны установили, что соглашение не является переводом долга и до оформления договора уступки прав требования и перевода долга заказчик оставляет за собой обязательство по расчёту с подрядчиком и вправе в любой момент осуществить расчет с подрядчиком за выполненные работы путем перечисления денежных средств на расчетный счет подрядчика (без взыскания штрафных сумм санкций, предусмотренных законодательством Российской Федерации).  При передаче подрядчику прав на указанные квартиры между сторонами заключается договор о переводе долга, с последующим проведением взаимозачета указанной суммы в счет оплаты выполненных заказчиком работ по договору подряда на строительство многоэтажного дома (между инвестором и заказчиком) и в счет оплаты указанной суммы за уступленное право (между подрядчиком и инвестором). Размер компенсации инвестору за перевод долга от заказчика устанавливается дополнительным соглашением сторон. В случае, реализации прав на указанные жилые помещения подрядчиком третьим лицам, он гарантирует реализовать полученное имущественное право по цене не ниже чем на 5% от цены по договору долевого участия в строительстве, в противном случае обязуется уплатить инвестору штраф в размере разницы от цены, указанной в настоящем пункте и ценой фактической реализации.

Во исполнение условий договора истец выполнил работы и передал результат выполнения работ ответчику по актам о приемке выполненных работ и справкам о стоимости выполненных работ и затрат от 31.01.2015 №1 на сумму 2 004 609 руб. 96 коп., от 30.06.2015 №2 на сумму 3 733 738 руб. 30 коп., от 02.04.2015 №3 на сумму 146 607 руб. 92 коп., от 30.06.2015 №5 на сумму 1 636 204 руб. 52 коп., от 30.06.2015 №4 на сумму 2 761 699 руб. 14 коп. 

Уведомлением от 09.11.2015 ответчик расторгнул договор в одностороннем порядке в связи с нарушением истцом графика выполнения работ.

В претензии от 22.11.2018, направленной в адрес ответчика 23.11.2018, согласно квитанции ФГУП «Почта России», истец просил оплатить 10 639 694 руб. 06 коп. долга и 2 669 440 руб. 65 коп. процентов за пользование чужими денежными средствами.

При изложенных обстоятельствах, ссылаясь на то, что выполненные истцом работы ответчиком не оплачены, истец обратился в суд с настоящим иском.

Исследовав представленные доказательства, оценив доводы лиц, участвующих в деле, арбитражный суд пришел к следующим выводам.

В соответствии со статьей 123 Конституции Российской Федерации, статьями 8, 9 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судопроизводство осуществляется на основе состязательности и равенства сторон. Согласно пункту 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

Статья 9 Гражданского кодекса Российской Федерации устанавливает, что граждане и юридические лица по своему усмотрению осуществляют принадлежащие им гражданские права.

В силу положений статьей 4 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации заинтересованное лицо вправе обратиться в арбитражный суд за защитой своих нарушенных или оспариваемых прав и законных интересов.

В соответствии со статьей 8 Гражданского кодекса Российской Федерации, гражданские права и обязанности возникают из оснований, предусмотренных законом и иными правовыми актами, а также из действий граждан и юридических лиц, которые хотя и не предусмотрены законом или такими актами, но в силу общих начал и смысла гражданского законодательства порождают гражданские права и обязанности. В том числе гражданские права и обязанности могут возникать из договоров и иных сделок, предусмотренных законом, а также из договоров и иных сделок, хотя и не предусмотренных законом, но не противоречащих ему.

Согласно статье 307 Гражданского кодекса Российской Федерации, в силу обязательства одно лицо (должник) обязано совершить в пользу другого лица (кредитора) определенное действие, как то: передать имущество, выполнить работу, оказать услугу, внести вклад в совместную деятельность, уплатить деньги и т.п., либо воздержаться от определенного действия, а кредитор имеет право требовать от должника исполнения его обязанности. Обязательства возникают из договоров и других сделок, вследствие причинения вреда, вследствие неосновательного обогащения, а также из иных оснований, указанных в настоящем Кодексе.

В силу статьи 309 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями. Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом, другими законами или иными правовыми актами (статья 310 Гражданского кодекса Российской Федерации).

По своей правовой природе заключенный сторонами договор является договором строительного подряда, отношения сторон регулируются его положениями, а также нормами параграфов 1 и 3 главы 37 Гражданского кодекса Российской Федерации, общими нормами об обязательствах части первой Гражданского кодекса Российской Федерации.

В соответствии со статьей 702 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

Согласно частям 1, 2 статьи 740 Гражданского кодекса Российской Федерации, по договору строительного подряда подрядчик обязуется в установленный договором срок построить по заданию заказчика определенный объект либо выполнить иные строительные работы, а заказчик обязуется создать подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную цену. Договор строительного подряда заключается на строительство или реконструкцию предприятия, здания (в том числе жилого дома), сооружения или иного объекта, а также на выполнение монтажных, пусконаладочных и иных неразрывно связанных со строящимся объектом работ. Правила о договоре строительного подряда применяются также к работам по капитальному ремонту зданий и сооружений, если иное не предусмотрено договором.

Пунктом 1 статьи 720 Гражданского кодекса Российской Федерации установлено, что заказчик обязан в сроки и в порядке, которые предусмотрены договором подряда, с участием подрядчика осмотреть и принять выполненную работу (ее результат), а при обнаружении отступлений от договора, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе немедленно заявить об этом подрядчику.

Сдача результата работ подрядчиком и приемка его заказчиком оформляются актом, подписанным обеими сторонами. При отказе одной из сторон от подписания акта в нем делается отметка об этом и акт подписывается другой стороной (часть 4 статьи 753 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Факт выполнения работ на сумму 10 282 859 руб. 84 коп. подтверждается подписанными сторонами актами о приемке выполненных работ и справкам о стоимости выполненных работ и затрат от 31.01.2015 №1, от 30.06.2015 №2, от 02.04.2015 №3, от 30.06.2015 №5, от 30.06.2015 №4, ответчиком не оспорен.

В соответствии с пунктом 1 статьи 746 Гражданского кодекса Российской Федерации оплата выполненных подрядчиком работ производится заказчиком в размере, предусмотренном сметой, в сроки и в порядке, которые установлены законом или договором строительного подряда. При отсутствии соответствующих указаний в законе или договоре оплата работ производится в соответствии со статьей 711 настоящего Кодекса.

Пункт 1 статьи 711 Гражданского кодекса Российской Федерации определяет, что если договором подряда не предусмотрена предварительная оплата выполненной работы или отдельных ее этапов, заказчик обязан уплатить подрядчику обусловленную цену после окончательной сдачи результатов работы при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в согласованный срок, либо с согласия заказчика досрочно.

Доказательства оплаты выполненных истцом и принятых ответчиком работ в материалы дела не представлены.

Согласно  пункту 3.1 статьи 70 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации обстоятельства, на которые ссылается сторона в обоснование своих требований или возражений, считаются признанными другой стороной, если они ею прямо не оспорены или несогласие с такими обстоятельствами не вытекает из иных доказательств, обосновывающих представленные возражения относительно существа заявленных требований.

В соответствии с положениями части 2 статьи 9 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации на соответствующую сторону относится риск последствий совершения или несовершения ею процессуальных действий.

Факт неисполнения ответчиком денежного обязательства подтвержден истцом документально.

Иного не доказано, материалами настоящего дела не установлено.

Таким образом, как следует из представленных в материалы дела доказательств, у ответчика перед истцом образовалась задолженность по оплате выполненных истцом на общую сумму  10 282 859 руб. 84 коп. 

Учитывая, что доказательств оплаты долга в указанном размере ответчиком в материалы дела не представлены, по существу наличие и правомерность требований истца ответчиком не оспаривается, требования истца суд считает обоснованными и подлежащими удовлетворению.

Согласно пункту 1 статьи 395 Гражданского кодекса Российской Федерации в редакции, действовавшей в период с 01.06.2015 по 31.07.2016 размер процентов за пользование чужими денежными средствами определяется существующими в месте жительства кредитора или, если кредитором является юридическое лицо, в месте его нахождения, опубликованным Банком России и имевшими место в соответствующие периоды средними ставками банковского процента по вкладам физических лиц. Эти правила применяются, если иной размер процентов не установлен законом или договором. В силу части 6 данной статьи, если подлежащая уплате сумма процентов явно несоразмерна последствиям нарушения обязательства, суд по заявлению должника вправе уменьшить предусмотренные договором проценты, но не менее чем до суммы, определенной исходя из ставки, указанной в пункте 1 настоящей статьи.

За период с 01.06.2015 по 31.07.2016 подлежит применению существующая в месте нахождения кредитора, опубликованная Банком России и имевшая место в соответствующий период средняя ставка банковского процента по вкладам физических лиц, то есть ставка по Сибирскому федеральному округу.

В соответствии с пунктом 1 статьи 395 Гражданского кодекса Российской Федерации в редакции, вступившей в силу с 01.08.2016 в случаях неправомерного удержания денежных средств, уклонения от их возврата, иной просрочки в их уплате подлежат уплате проценты на сумму долга. Размер процентов определяется ключевой ставкой Банка России, действовавшей в соответствующие периоды. Эти правила применяются, если иной размер процентов не установлен законом или договором.

Таким образом, проценты за пользование чужими денежными средствами за заявленный истцом период с  подлежат расчету по ключевой ставке Банка России, действующей в соответствующие периоды просрочки.

Проценты, предусмотренные пунктом 1 статьи 395 ГК РФ, подлежат уплате независимо от основания возникновения обязательства (договора, других сделок, причинения вреда, неосновательного обогащения или иных оснований, указанных в ГК РФ) (п. 1 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24.03.2016 N 7 (ред. от 07.02.2017) "О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств").

В связи с неисполнением ответчиком обязательства по оплате принятых работ, истцом заявлено о взыскании с ответчика 2 613 716 руб. 72 коп. процентов за пользование чужими денежными средствами за период с 10.12.2015 (с момента расторжения договора ответчиком) по 14.12.2015.

Расчет процентов, представленный истцом, проверен судом, признан верным. Примененные при расчете ставки и периоды исчисления не противоречат действующему законодательству и соответствует фактическим обстоятельствам дела. Арифметика расчета ответчиком не оспорена, в связи с чем требование в данной части признается судом обоснованным.

Согласно положениям статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, судебные расходы по уплате государственной пошлины относятся на ответчика. Поскольку истцом при обращении с иском заявлено о предоставлении отсрочки уплаты государственной пошлины, государственная пошлина в сумме 87 483 руб., исчисленная в соответствии с положениями статьи 333.21 Налогового кодекса Российской Федерации, подлежит взысканию с ответчика в доход федерального бюджета.

Настоящее  решение  выполнено в форме электронного документа, подписано усиленной квалифицированной электронной подписью судьи и считается направленным лицам, участвующим в деле, посредством размещения на официальном сайте суда в сети «Интернет» в режиме ограниченного доступа (код доступа -  ). 

По ходатайству лиц, участвующих в деле, копии решения на бумажном носителе могут быть направлены им в пятидневный срок со дня поступления соответствующего ходатайства заказным письмом с уведомлением о вручении или вручены им под расписку.

Руководствуясь статьями 110, 167 – 170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Красноярского края

РЕШИЛ:

иск удовлетворить.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью Красноярская Строительная Компания «Лидер Прогресс» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>, г. Красноярск) в пользу общества с ограниченной ответственностью «Строительная компания «М-Строй» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>, г. Красноярск) 12 896 576 рублей 56 копеек, из них: 10 282 859 руб. 84 коп. основной долг, 2 613 716 руб. 72 коп. проценты за пользование чужими денежными средствами.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью Красноярская Строительная Компания «Лидер Прогресс» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>, г. Красноярск) в доход федерального бюджета 87 483 рубля государственной пошлины.

Разъяснить лицам, участвующим в деле, что настоящее решение может быть обжаловано в течение месяца после его принятия путём подачи апелляционной жалобы в Третий арбитражный апелляционный суд.

Апелляционная жалоба на настоящее решение подаётся через Арбитражный суд Красноярского края.

Судья

А.Н. Мальцева