Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области

191124, Санкт-Петербург, ул. Смольного, д.6

http://www.spb.arbitr.ru

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

Дело № А56-43073/2025

14 августа 2025 года

г.Санкт-Петербург

Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области в составе: судьи Дороховой Н.Н., рассмотрев в порядке упрощенного производства дело по иску:

публичного акционерного общества «Россети Ленэнерго» (197349, г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ озеро Долгое, ул. Гаккелевская, д. 21, литера А, ОГРН: 

<

***>, Дата присвоения ОГРН: 22.07.2002, ИНН: 

<

***>); 

к обществу с ограниченной ответственностью «Русрегион» (191124, г. СанктПетербург, пр-кт смольный, д. 6, литер а, помещ. 27н комната 1,2,3, ОГРН: 

<

***>, Дата присвоения ОГРН: 18.06.2015, ИНН: 

<

***>); 

о взыскании, 

установил:

Публичное акционерное общество «Россети Ленэнерго» (далее – истец) обратился в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью «Русрегион» (далее – ответчик) о взыскании пени в размере 511 518 руб. 54 коп.

Определением от 25.05.2025 исковое заявление принято судом к рассмотрению в порядке упрощенного производства без вызова сторон в соответствии со статьей 228 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ). Ответчику предложено представить письменный мотивированный отзыв на исковое заявление; документы в обоснование своих доводов.

Стороны надлежащим образом извещены о принятии искового заявления к производству и рассмотрении дела в порядке упрощенного производства. Поступившее в арбитражный суд исковое заявление с приложением размещены в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу www.kad/arbitr.ru в режиме ограниченного доступа.

Решением от 18.07.2025, принятым в виде резолютивной части, исковые требования удовлетворены частично. Мотивированное решение изготавливается в связи с подачей апелляционной жалобы.

Исследовав и оценив представленные в материалы дела доказательства в соответствии с требованиями статьи 71 АПК РФ, суд  пришел к следующему.

Между ПАО «Россети Ленэнерго» (Заказчик) и ООО «РусРегион» (Подрядчик) заключен договор подряда от 31.10.2023 № 23-33962. 

Как указывает истец, во исполнение данного договора заключена заявка № 24-377 от 29.01.2024.

Цена заявки составляет: 949 977,49 руб.

Согласно календарному плану, срок выполнения работ по заявке:

Разработка проектно-сметной документации - не позднее 31.03.2024

Выполнение строительно-монтажных работ - не позднее 29.05.2024

По состоянию на 25.04.2025 работы не выполнены и не сданы.

В соответствии с пунктом 8.1 Договора при нарушении Подрядчиком своих обязательств по Договору, а равно и по каждой Заявке, Заказчик вправе требовать от Подрядчика уплаты санкций, перечисленных в настоящем пункте, а Подрядчик, в случае наличия соответствующего требования Заказчика обязан уплатить:

За нарушение сроков выполнения работ, в том числе по Заявкам, указанных в Календарном плане (в том числе работ по этапам) - пени в размере 0,1% (ноля целых одной десятой процента) от стоимости невыполненных работ за каждый день просрочки до фактического исполнения обязательства (пункт 8.1.1. Договора).

В случае превышения сроков выполнения работ свыше 30 (тридцати) календарных дней или неоднократного превышения сроков выполнения работ, штраф в размере 10% (десяти процентов) от стоимости невыполненных работ (пункт 8.1.2. Договора).

В случае превышения сроков выполнения работ свыше 60 (шестидесяти) календарных дней штраф в размере 5% (пяти процентов) от стоимости работ (пункт 8.1.3. Договора).

По расчету истца, пени за просрочку 1 этапа составляют: по 8.1.1 Договора – 39 225 руб. 20 коп.; по 8.1.2 Договора: 10 083,6 (штраф 10 % от стоимости этапа), по 8.1.3 Договора: 47 498, 87 (штраф 5 % от стоимости заявки). Итого за первый этап: 96 807,67 руб.

Пени за просрочку 2 этапа: по п.8.11 Договора – 282 012 руб.; п. 8.1.2: 85 200 (штраф 10 % от стоимости этапа); п. 8.1.3 Договора: 47 498, 87 (штраф 5 % от стоимости заявки). Итого за второй этап: 414 710.87 руб.

Общий размер пени, по расчету истца, составляет 511 518,54 руб.

В целях досудебного урегулирования спора в адрес ответчика была направлена претензия № ЛЭ/06-21/1376 от 20.12.2024. Ответчик добровольно претензию не удовлетворил.

Статьями 309 - 310 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) предусмотрено, что обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями. Односторонний отказ от исполнения обязательства не допускается.

Согласно положениям статей 329 и 330 ГК РФ исполнение обязательств может обеспечиваться, в том числе, неустойкой (штрафом, пеней), которой признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения. По требованию об уплате неустойки кредитор не обязан доказывать причинение ему убытков.

Поскольку факт нарушения ответчиком сроков выполнения работ подтвержден материалами дела, суд находит обоснованным требования истца о взыскании 39 225 рублей 20 копеек неустойки за нарушение сроков выполнения работ по первому этапу за период с 02.04.2024 по 25.04.2025, 282 012 рублей 00 копеек неустойки за нарушение сроков выполнения работ по второму этапу за период с 30.05.2024 по 25.04.2025.

Поскольку в спорном договоре фактически установлена двойная ответственность за одно и тоже нарушение, суд не находит правовых оснований для взыскания штрафа по пункту 8.1.2, 8.1.3 Договора, которые по сути является применением двойной меры ответственности за одно и то же нарушение, что в силу закона недопустимо.

В соответствии с пунктом 1 статьи 110 АПК РФ в случае, если иск удовлетворен частично, судебные расходы относятся на лиц, участвующих в деле, пропорционально размеру удовлетворенных исковых требований.

руководствуясь статьями 110, 229 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации 

решил:

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Русрегион» (191124, г. Санкт-Петербург, пр-кт смольный, д. 6, литер а, помещ. 27н комната 1,2,3, ОГРН: 

<

***>, Дата присвоения ОГРН: 18.06.2015, ИНН: 

<

***>) в пользу публичного акционерного общества «Россети Ленэнерго» (197349, г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ озеро Долгое, ул. Гаккелевская, д. 21, литера А, ОГРН: 

<

***>, Дата присвоения ОГРН: 22.07.2002, ИНН: 

<

***>) 39 225 рублей 20 копеек неустойки за нарушение сроков выполнения работ по первому этапу за период с 02.04.2024 по 25.04.2025, 282 012 рублей 00 копеек неустойки за нарушение сроков выполнения работ по второму этапу за период с 30.05.2024 по 25.04.2025, 19 202 рубля 00 копеек расходов по уплате государственной пошлины по иску. 

В остальной части иска отказать. 

Решение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в Тринадцатый арбитражный апелляционный суд в течение пятнадцати дней со дня принятия. 

Судья Дорохова Н.Н.