Арбитражный суд Амурской области

675023, г. Благовещенск, ул. Ленина, д. 163

тел. (4162) 59-59-00, факс (4162) 51-83-48

http://www.amuras.arbitr.ru

Именем Российской Федерации

 

РЕШЕНИЕ

Дело  №

А04-6374/2022

г. Благовещенск

06 октября 2022 года

В соответствии с частью 2 статьи 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации решение изготовлено 06.10.2022. Резолютивная часть решения объявлена 29.09.2022.

Арбитражный суд Амурской области в составе судьи Сутыриной М.В.,

при ведении протокола и аудиозаписи секретарем судебного заседания ФИО1,

рассмотрев в открытом судебном заседании исковое заявление 

Федерального казенного учреждения «Восточное управление дорожного хозяйства» Министерства обороны Российской Федерации (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) к обществу с ограниченной ответственностью «Корсар» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) об обязании устранить дефекты выполненных работ,

при участии в судебном заседании: 

от истца: ФИО2 по доверенности от 01.12.2021 № 46/2021, диплом ВСГ 1936938 от 19.12.2008, паспорт;

от ответчика: не явился, извещен,

установил:

в Арбитражный суд Амурской области обратилось Федеральное казенное учреждение «Восточное управление дорожного хозяйства» Министерства обороны Российской Федерации (далее – истец, ФКУ Востоквоендор) с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью «Корсар» (далее – ответчик, ООО   «Корсар») в рамках гарантийных обязательств по государственному контракту № 0323100004019000014-0323100004019000014-16510-5 от 03.12.2019.

Требование мотивировано невыполнением подрядчиком гарантийных обязательств по устранению дефектов.

В предварительном судебном заседании 07.09.2022 судом в порядке ст. 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ) приняты к рассмотрению уточненные исковые требования,  согласно которым истец указал каждый вид дефектов, требующих исправления,  расположение и площадь участка по ним.

От ответчика поступило ходатайство с возражением рассмотрения дела по существу, в связи с ведением переговоров об урегулировании спора путем заключения мирового соглашения, указал, что возможно к судебному разбирательству недостатки будут исправлены.

В судебном заседании 29.09.2022 истец на требованиях настаивал в полном объеме, привёл доводы, изложенные в исковом заявлении. Сообщил о том, что ответчик   по вопросу заключения мирового соглашения не обращался, работы по устранению дефектов не начинал.

В судебное заседание 29.09.2022 ответчик не явился, о времени и месте проведения заседания извещен надлежащим образом в соответствии со ст. 123  АПК РФ.

От ответчика повторно поступило ходатайство об отложении судебного разбирательства в связи с ведением переговоров об урегулировании спора путем заключения мирового соглашения. Также в ходатайстве ответчик сообщает о том, что он фактически приступил к выполнению работ по устранению выявленных дефектов.

В соответствии с ч. 5 ст. 158 АПК РФ арбитражный суд может отложить  судебное разбирательство, если признает, что оно не может быть рассмотрено в  данном судебном заседании, в том числе вследствие неявки кого-либо из лиц, участвующих  в деле, других участников арбитражного процесса, в случае возникновения технических неполадок при использовании технических средств ведения  судебного заседания, в том числе систем видеоконференц-связи, а также при удовлетворении ходатайства стороны об отложении  судебного разбирательства в связи с необходимостью представления ею дополнительных доказательств, при совершении иных процессуальных действий.

Исходя из содержания указанной нормы права, отложение  судебного  разбирательства  является правом, а не обязанностью суда, и производится только в том случае, если суд сочтет уважительными причины для совершения данного процессуального действия.

Вместе с тем, мотивируя ходатайство выполнением работ и ведением переговоров по заключению сторонами мирового соглашения, ответчик соответствующих доказательств в обоснование не представил. Тогда как истец сообщил суду о том, что ответчик не связывался с истцом ни по вопросу устранения недостатков, ни с предложением заключить мировое соглашение,  к устранению   дефектов выполненных работ не приступал.

На основании изложенного, рассмотрев соответствующее ходатайство ответчика, арбитражный суд пришел к выводу об отказе в его удовлетворении.

Дело рассмотрено в соответствии со статьей 156 АПК РФ в отсутствие ответчика.

Исследовав материалы дела, заслушав пояснения истца, суд пришёл к выводу, что  исковые требования  подлежат удовлетворению по следующим основаниям.

Судом установлено, что между ФКУ Востоквоендор (заказчик) и ООО «Корсар» (подрядчик) был заключен контракт на выполнение ремонта автомобильной дороги необщего пользования МО РФ № 0323100004019000014-0323100004019000014-16510-5 от 03.12.2019, по условиям которого подрядчик обязуется  в установленные контрактом сроки выполнить ремонт автомобильной дороги необщего пользования. 

Заказчик поручает, а подрядчик принимает на себя обязательства выполнить Работы в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1 к контракту), являющимся неотъемлемой частью контракта, а заказчик обязуется принять выполненные Работы и оплатить их в порядке и на условиях, предусмотренных контрактом. 

Объем выполняемых Работ установлен в Техническом задании (Приложение № 1 к контракту) (пункт 2.2.).

Согласно пункту 5.1, срок выполнения (завершения) работ: с 18.05.2020 до 12.10.2020. 

Отношения сторон возникли из контракта на выполнение работ для муниципальных нужд и регулируются нормами главы 37 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ), общими положениями ГК РФ об обязательствах и нормами Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ (ред. от 29.07.2017) «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», применимого к отношениям по спорному контракту.

Согласно пункту 2 статьи 763 ГК РФ по государственному или муниципальному контракту на выполнение подрядных работ для государственных или муниципальных нужд подрядчик обязуется выполнить строительные, проектные и другие связанные со строительством и ремонтом объектов производственного и непроизводственного характера работы и передать их государственному или муниципальному заказчику, а государственный или муниципальный заказчик обязуется принять выполненные работы и оплатить их или обеспечить их оплату. 

По смыслу  статьи 721 ГК РФ качество выполненной подрядчиком  работы должно соответствовать условиям договора подряда, а при отсутствии или неполноте условий договора требованиям, обычно предъявляемым к работам соответствующего рода. Если иное не предусмотрено законом, иными правовыми актами или договором, результат выполненной  работы  должен в момент передачи заказчику обладать свойствами, указанными в договоре или обычно предъявляемым требованиям, и в пределах разумного срока быть пригодным для установленного договором использования, а если такое использование договором не предусмотрено, для обычного использования результата работы такого рода.

В пункте 1 статьи 722 ГК РФ установлено, что в случае, когдадля результата  работы  предусмотрен гарантийный срок, результат работы долженв течение всего гарантийного срока соответствовать условиям договора о качестве.

Согласно ст.ст. 307, 309 ГК РФ в силу обязательства должник обязан совершить в пользу кредитора определенное действие, а кредитор имеет право требовать от должника исполнения его обязанности; обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона. Статья 310 ГК РФ предусматривает недопустимость одностороннего отказа от исполнения обязательства.

Как установлено судом, работы ответчиком выполнены и приняты истцом без замечаний, что подтверждается  представленными в материалы дела актами о приемке выполненных работ № 1 от 22.10.2020,   комиссионным актом приемки выполненных работ от 22.10.2020.

Согласно положениям Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» к автомобильным дорогам необщего пользования относятся автомобильные дороги, находящиеся в собственности, во владении или в пользовании исполнительных органов государственной власти, местных администраций (исполнительно-распорядительных органов муниципальных образований), физических или юридических лиц и используемые ими исключительно для обеспечения собственных нужд либо для государственных или муниципальных нужд. 

В процессе эксплуатации дороги в рамках ежегодного весеннего осмотра покрытия  были   выявлены трещины и выкрашивание асфальтобетонного покрытия, выбоины,  о чём составлен акт осмотра дефектов асфальтобетонного покрытия от 30.04.2021   с указанием размера характера, размера и расположения дефектов с приложением  фотоматериалов установленных недостатков.

Поскольку недостатки выявлены в пределах гарантийного срока,   учреждение направило в адрес ООО «Корсар» претензию № 1382 от 24.05.2021 об устранении выявленных дефектов в срок до 30.06.2021 с приложением Акта осмотра дефектов асфальтобетонного покрытия от 30.04.2021.

В ответ на претензию № 1382 от 24.05.2021  с требованием об устранении  недостатков в срок до 30.06.2021 ответчик в письме № ДР53 от 24.08.2021 сообщил о невозможности устранить недостатки по причине полной загрузки всей техники  и персонала, в связи с чем указал, что планирует  устранить   недостатки до 28.09.2021.

В связи с поступившим ответом ООО «Корсар» истцом  был установлен новый срок устранения выявленных дефектов до 01.11.2021 (претензия об устранении выявленных нарушений от 28.09.2021  № 2293/1).

06.04.2022  комиссией ФКУ Востоквоендор был проведен повторный осмотр объекта, в результате которого выявлены многочисленные дефекты асфальтобетонного покрытия, общей площадью 161.31 м². Составлен Акт осмотра дефектов асфальтобетонного покрытия от 06.04.2022 с перечислением выявленных дефектов.

В указанный срок подрядчик выявленные дефекты не устранил.

Повторная претензия № 683 от 28.04.2022  с требованием об устранении недостатков  в срок до 01.06.2022 также оставлена без исполнения.

14.06.2022 в адрес ФКУ Востоквоендор поступил рапорт начальника дистанции (дорожной) обособленного подразделения Дорожной дистанции № 291 от 14.06.2022 о том, что на объекте «Автомобильная дорога от 2.5 км автомобильной дороги «Князе-Волконское- 1 - Знаменка» до КПП № 1 в/ч 16802. Хабаровский край. Хабаровский район, с. Анастасьевка», идентификационный 

<

***> НП ЧС 08 255-0097, протяженность  1,337 км» к устранению недостатков, указанных в акте осмотра дефектов асфальтобетонного покрытия от 06.04.2022 ООО «КОРСАР» не приступило.

Указывая на то, что в период гарантийного срока заказчиком были выявлены недостатки в выполненных ответчиком работах, в установленный срок не устранены, истец обратился в суд с настоящим иском.

Согласно пункту 1 статьи 723  ГК РФ в случаях, когда работа выполнена подрядчиком с отступлениями от договора подряда, ухудшившими результат работы, или с иными недостатками, которые делают его не пригодным для предусмотренного в договоре использования, либо при отсутствии в договоре соответствующего условия, непригодным для обычного использования, заказчик вправе, если иное не установлено законом или договором, по своему выбору потребовать от подрядчика, безвозмездного устранения  недостатков в разумный срок; соразмерного уменьшения установленной за работу цены; возмещения своих расходов на устранение недостатков, когда право заказчика.

Заказчик вправе предъявить требования, связанные с недостатками результата работы, обнаруженными в течение гарантийного срока (пункт 3 статьи 724 ГК РФ).

В соответствии с абзацем 8 статьи 12 ГК РФ защита гражданских прав осуществляется путем присуждения к исполнению обязанности в натуре.

В силу п. 2 ст. 401 ГК РФ отсутствие вины доказывается лицом, нарушившим обязательство.

Согласно части 1 статьи 65 АПК РФ каждое лицо, участвующее деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений. 

С учетом установленного контрактом трехлетнего гарантийного срока на работы по устройству покрытия недостатки выявлены в пределах указанного срока.

Согласно пункту 7.4 раздела 7 «Гарантийные обязательства» Контракта при обнаружении дефектов в течение действия гарантийного срока. Заказчик назначает комиссию для расследования причин случившегося, письменно извещает Подрядчика об обнаружении дефектов с указанием сроков прибытия представителей Подрядчика на объект для осмотра выявленных дефектов и подписания акта о выявленных дефектах.

В случае необоснованного неприбытия представителей Подрядчика, либо их отказа от подписания акта, действительным считается акт о выявленных дефектах, подписанный Заказчиком в одностороннем порядке. Течение срока устранения дефектов начинается с даты вручения указанного акта о недостатках непосредственно Подрядчику, либо с даты направления акта посредством почтовой или факсимильной связи.

Согласно гарантийному паспорту от 22.10.2020, гарантийный срок на выполненные работы по устройству покрытия из асфальтобетонных смесей составляет 3 года.

Абзацем 7 пункта 7.4 контракта установлено, что в течение гарантийного срока подрядчик обязан по письменному требованию заказчика в срок, установленный Заказчиком своими силами и за свой счет выполнить работы по исправлению и устранению дефектов, являющихся следствием нарушения подрядчиком обязательств по контракту, включая замену дефектного оборудования и материалов поставки подрядчика либо их частей, а также в случае необходимости, повторно выполнить отдельные виды работ.

Таким образом, по смыслу указанных правовых норм и условий контракта, ответчик обязан устранить недоставки, выявленные в пределах гарантийного срока, либо представить доказательства, что выявленные недостатки возникли по причине ненадлежащей эксплуатации, не являются следствием работ.

Гарантийный срок на дату обращения истца с  иском  в суд не истек.

Предложение устранить недостатки, как и уведомление о комиссионном осмотре направлялось в адрес ответчика неоднократно. Ответчик подписал без замечаний  акт осмотра дефектов а/б покрытия объекта от 30.04.2021, но устранился от участия в проведении осмотра объекта в 2022 году, возражений относительно заявленных требований не предъявил.

В этой связи заказчик вправе потребовать от подрядчика безвозмездного устранения недостатков (пункт 1 статьи 723 ГК РФ).

По смыслу статьи 12 ГК РФ, устанавливающей такой способ защиты права как понуждение в судебном порядке к исполнению обязанности в натуре, в предмет доказывания по данному спору входят следующие обстоятельства:

- наличие у ответчика обязанности, о понуждении к исполнению которой заявлен иск; 

- реальная возможность исполнения ответчиком этой обязанности;

- отказ ответчика от ее исполнения.

Действующим законодательством в пределах гарантийного срока установлена презумпция вины подрядчика в  недостатках (дефектах) выполненных работ, в связи с чем бремя доказывания указанных в приведенной норме обстоятельств лежитна  ООО «Корсар». 

Арбитражный суд,  руководствуясь требованиями части 1 статьи 64 и статей 71, 168 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, на основании представленных сторонами документов устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, обосновывающих требования и возражения лиц, участвующих в деле, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности 

В силу требований статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации  арбитражный суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств. 

Согласно п. 5 ст. 720 ГК РФ при возникновении между заказчиком и подрядчиком спора по поводу недостатков выполненной работы или их причин по требованию любой из сторон должна быть назначена экспертиза. 

В связи с отсутствием между сторонами спора относительно недостатков выполненных работ, экспертиза судом не проводилась.

Ответчик направил ходатайство об отложении судебного разбирательства с указанием на то, что приступил к устранению недостатков, а также ведет переговоры о заключении с истцом мирового соглашения, что дает основания полагать, что общество не имеет возражений относительно  выявленных недостатков и требования об их устранении.

Конституционный Суд Российской Федерации в Постановлениях от 14.02.2002 № 4-П, от 16.07.2004 № 15-П, от 30.11.2012 № 29-П неоднократно отмечал, что материально-правовой природой субъективных прав, подлежащих судебной защите, обусловлено диспозитивное начало гражданского судопроизводства; диспозитивность означает, что процессуальные отношения возникают, изменяются и прекращаются главным образом по инициативе непосредственных участников спора, которые имеют возможность с помощью суда распоряжаться процессуальными правами и спорным материальным правом, а принцип диспозитивности в совокупности с другими принципами судебного процесса, в том числе равенством всех перед законом и судом, состязательностью и равноправием сторон, выражают цели правосудия по гражданским делам, прежде всего конституционную цель защиты прав и свобод человека и гражданина (статья 2; статья 17, часть 1; статья 18 Конституции Российской Федерации).

В силу части 3.1 статьи 70 Арбитражного процессуального кодекса РФ, если сторона не  представляет письменных возражений против обстоятельств, на которые ее оппонент ссылается как на основание своих требований или возражений, такие обстоятельства считаются признанными, и в случае принятия судом такого признания не проверяются в ходе дальнейшего производства по делу на основании части 5 статьи 70 названного Кодекса (постановления Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 17.09.2013 № 5793/13 и от 15.10.2013 № 8127/13).

Следовательно, в части 3.1 статьи 70 Арбитражного процессуального кодекса РФ установлена возможность совершения стороной распорядительного действия путем бездействия, в связи с чем вводится фикция признания обстоятельств, на которые указывает оппонент, приравненную по правовым последствиям к их активному признанию.

Конституционный Суд Российской Федерации в постановлении от 19.03.2010 № 7-П отметил, что подобное регулирование продиктовано принципами процессуальной экономии и эффективности судопроизводства, не предполагающими неоправданное и лишенное смысла использование временных, финансовых и кадровых ресурсов государства.

Согласно части 1 статьи 9 Арбитражного процессуального кодекса РФ судопроизводство в арбитражном суде осуществляется на основе состязательности. Следовательно, нежелание представить доказательства должно квалифицироваться исключительно как отказ от опровержения того факта, на наличие которого аргументированно со ссылкой на конкретные документы указывает процессуальный оппонент. Участвующее в деле лицо, не совершившее процессуальное действие, несет риск наступления последствий такого своего поведения (постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 06.03.2012 № 12505/11).

Наряду с этим, как следует из упомянутой статьи, а также статей 9, 10, 64 - 68  Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, решение принимается судом на основании доказательств, представляемых лицом, утверждающим о наличии определенных обстоятельств.

Ответчиком, в силу части 2 статьи 755 ГК РФ, не представлено доказательств, что все вышеперечисленные выявленные заказчиком недостатки  произошли вследствие нормального износа или неправильной эксплуатации, в связи с чем он обязан нести ответственность за выявленные недостатки.

Принимая во внимание вышеизложенное, суд полагает, что истец доказал наличие у ответчика обязанности о понуждении к исполнению которой заявлен иск, обязанности в гарантийный период устранять выявленные недостатки, так как ответчиком не доказано обратное. Суд признает требования обоснованными и подлежащими удовлетворению в полном объеме.

Статьей 174 АПК РФ установлено, что при принятии решения, обязывающего ответчика совершить определенные действия, не связанные со взысканием денежных средств или с передачей имущества, арбитражный суд в резолютивной части решения указывает лицо, обязанное совершить эти действия, а также место и срок их совершения. 

Учитывая характер и объемы выявленных недостатков, суд считает  необходимым в рамках части 2 статьи 174 АПК РФ установить для ответчика срок устранения недостатков  в течение 30 дней с момента вступления судебного акта в законную силу.

Согласно подпункту 4 пункта 1 статьи 333.21 Налогового кодекса Российской Федерации при подаче исковых заявлений неимущественного характера размер государственной пошлины составляет 6 000 руб.  

В соответствии с п. 1 ст. 110 АПК РФ судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны.

Истец от уплаты государственной пошлины освобожден в силу положений статьи 333.37 Налогового кодекса Российской Федерации, в связи с чем с ответчика подлежит взысканию   в доход федерального бюджета государственная пошлина в сумме 6000 руб.

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 180 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

решил:

иск удовлетворить.

Обязать общество с ограниченной ответственностью «Корсар» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) в рамках гарантийных обязательств по государственному контракту № 0323100004019000014-0323100004019000014-16510-5 от 03.12.2019 в течение 30 дней с момента вступления решения в законную силу устранить недостатки асфальтобетонного дорожного покрытия автомобильной дороги необщего пользования МО РФ «Автомобильная дорога от 2.5 км автомобильной дороги «Князе-Волконское- 1 - Знаменка» до КПП № 1 в/ч 16802. Хабаровский край. Хабаровский район, с. Анастасьевка», идентификационный 

<

***> НП ЧС 08 255-0097, протяженность  1,337 км», в соответствии с актом от 06.04.2022:

место

измерения

ПК+м

Местоположение

дефекта относительно

оси

Площадь

участков

с дефектами,

кв.м.

Вид дефектов

Мероприятия по устранению

начало участка

конец участка

 

1

2

3

4

5

ПК0+71

справа

0,004

поперечная трещина

заделка мастикой с расшивкой шва

ПК0+81

слева

0.001

поперечная трещина

заделка мастикой с расшивкой шва

ПК0+85

ПК0+92

справа

0,02

продольная трещина

заделка мастикой с расшивкой шва

ПК0+99

слева

0,09

вырубка

(частично

заделана)

ямочный ремонт

а/бетонной смесью

ПК1+14

ПК1+21

по середине

2,80

выкрошен асфальт

ямочный ремонт а/бетонной

смесью

ПК1+85

слева

0,01

выбоина

ямочный ремонт

а/бетонной

смесью

ПK1+85

ПК 1+92

слева

0.04

трещина

заделка мастикой с расшивкой шва

ПК2+01

ПК2+02

по середине

0.00

продольная

трещина

заделка мастикой с расшивкой шва

ПК2+12

слева

0.01

поперечная

трещина

заделка мастикой с расшивкой шва

ПК2+14 ПК2+15

слева

0,004

поперечная трещина.

заделка мастикой с расшивкой шва

ПК2+18

справа

0.09

вырубка (не заделана)

ямочный ремонт

а/бетонной

смесью

ПК2+18

ПК2+22

слева

0.01

продольная трещина

заделка мастикой

с расшивкой шва

ПК2+24

по середине

0.00

поперечная трещина.

заделка мастикой

с расшивкой шва

ПК2+24

ПК2 + 28

слева

1,60

выкрошен асфальт

ямочный ремонт

а/бетонной

смесью

ПK2+31

ПК2+35

слева

1,20

сетка мелких трещин

ямочный ремонт а/бетонной

смесью

ПK2+38

ПК2+44

слева

2.40

сетка мелких трещин

ямочный ремонт

а/бетонной смесью

ПК2+46

ПК2+50

слева

0,01

продольная трещина

заделка мастикой с расшивкой шва

 

ПК2+55

ПК2+56

слева

0.003

продольная трещина

заделка мастикой с расшивкой шва

ПК2+65

ПК2+78

слева

2.60

выкрошен асфальт

ямочный ремонт а/бетонной

смесью

ПК2+80

ПК2+82

справа

3,00

сетка мелких трещин

ямочный ремонт

а/бетонной смесью

ПК2+85

справа

0,03

выкрошен асфальт

ямочный ремонт

а/бетонной смесью

ПК2+91

ПК2+94

слева

1,20

сетка мелких трещин

ямочный ремонт

а/бетонной смесью

ПК2+95

слева

0,03

выкрошен асфальт

ямочный ремонт

а/бетонной

смесью

ПК3+05

ПК3+39

слева

0,07

продольная трещина

заделка мастикой с расшивкой шва

ПК3+24

ПК3+42

справа

18.00

выкрошен асфальт

ямочный ремонт а/бетонной

смесью

ПК3+46

ПК3+54

слева

0,02

продольная

трещина

заделка мастикой с расшивкой шва

ПК3+54

поперечн.

0,14

поперечная трещина.

заделка мастикой с расшивкой шва

ПК3+65

ПК3+75

слева

10.00

мелкие трещины

с

выкрашиванием

ямочный ремонт а/бетонной

смесью

ПК3+80

ПК3+85

слева

7.50

сетка мелких трещин

ямочный ремонт

а/бетонной смесью

ПК3+91

ПК3+94

слева

0,01

продольная трещина

заделка мастикой

с расшивкой шва

ПК3+91

ПК3+96

справа

7,50

сетка мелких трещин

ямочный ремонт

а/бетонной

смесью

ПК3+99

слева

0,90

вырубка, плохо заделана

ямочный ремонт а/бетонной смесью

ПК3+99

ПК4+03

по середине

4,00

выкрошен асфальт

ямочный ремонт

а/бетонной

смесью

ПK4+01

ПК4+02

справа

0.50

выкрошен

асфальт

ямочный ремонт   

а/бетонной

смесью

ПК4+08

ПК4+31

по середине

11,50

выкрошен асфальт

ямочный ремонт

а/бетонной смесью

ПК4+13

ПК4+18

слева

0,05

продольная трещина

заделка мастикой с расшивкой шва

ПК4+31

ПК4+40

справа

13,50

 

выкрошен асфальт

ямочный ремонт

а/бетонной

смесью

ПК4+40

справа

0.00

поперечная трещина

заделка мастикой с расшивкой шва

ПК4+38

ПK4+55

по середине

0,05

продольная трещина по середине

заделка мастикой    с расшивкой шва

ПК4+57

ПК4+62

по середине

5,00

выкрошен асфальт

ямочный ремонт    а/бетонной

смесью

ПК4+58

ПК4+61

слева

0,02

продольная трещина вдоль края

заделка мастикой  с расшивкой шва

ПК4+75

поперечи.

0,14

поперечная трещина 

заделка мастикой с расшивкой шва

ПК4+88

поперечн.

0,14

поперечная трещина

заделка мастикой с расшивкой шва

ПК4+86

ПК4+88

справа

0.01

продольная трещина

заделка мастикой

с расшивкой шва

ПК5+11

слева

0.09

вырубка, не заделана

ямочный ремонт а-бетонной смесью

ПK5+15

ПК5-19

справа

0,02

продольная трещина

заделка мастикой

с расшивкой шва

ПК5+21

ПK5+33

справа

0,05

продольная трещина

заделка мастикой

с расшивкой шва

ПК5+25

по середине

0,03

поперечная трещина 

заделка мастикой с расшивкой шва  

ПК5+31

поперечн.

0,11

поперечная трещина .

заделка мастикой с расшивкой шва

ПК5+26

|ПК5+32

слева, край проезжей

части

0,02

продольная трещина

заделка мастикой с расшивкой шва

ПК5+38

ПК5+46

справа

0.03

продольная трещина

заделка мастикой   с расшивкой шва

ПК5+43

ПК5+48

слева, край проезжей части

0.03

продольная трещина

заделка мастикой с расшивкой шва

ПК5+47

ПК5+50

справа

0,01

продольная трещина

заделка мастикой с расшивкой шва

ПК5+54

ПK5+59

справа

7.50

выкрошен асфальт

ямочный ремонт

а/бетонной

смесью

ПК5+62

ПК5+70

слева

0,02

продольная трещина

заделка мастикой с расшивкой шва

ПК5+72

ПК5+79

по середине

3.50

выкрошен асфальт

ямочный ремонт

а/бетонной

смесью

ПК5+93

ПК6+00

слева

7.00               

выкрошен асфальт,

выбоины

ямочный ремонт

а/бетонной

смесью

ПК6+20

ПК6+23

справа

0,01

продольная трещина

заделка мастикой с расшивкой шва

ПК6+66

ПК6+74

слева

0,02

продольная 

трещина

заделка мастикой с расшивкой шва

ПK6+75

ПК6+80

справа

0,01

продольная трещина

заделка мастикой с расшивкой шва

ПК6+75

ПК6+79

слева

0,01

продольная трещина

заделка мастикой с расшивкой шва

ПK6+76

ПК6+85

слева

3,60

сетка мелких

трещин

ямочный ремонт а/бетонной

смесью

ПК7+01

ПК7+05

слева

0.01

продольная трещина

заделка мастикой с расшивкой шва

ПК7+15

ПК7+18

справа

0.01

продольная

трещина

заделка мастикой с расшивкой шва

ПК 7+29

ПК7+30

справа

0,00

продольная трещина

заделка мастикой с расшивкой шва

ПК7+40

ПК7+41

справа

0,40

сетка мелких трещин

ямочный ремонт а/бетонной

смесью

ПК7+47

ПК7+52

справа

0,015

продольная трещина

заделка мастикой с расшивкой шва

ПK7+74

слева

0,06

выкрошен асфальт

ямочный ремонт

а/бетонной смесью

ПК7+99

справа

0,09

вырубка заделана

заделка мастикой с расшивкой шва

ПК8+05

ПК8+07

справа

4,00

выкрошен асфальт

ямочный ремонт

а/бетонной смесью

ПК8+08

справа

0.04

выбоина

ямочный ремонт

а/бетонной смесью

ПК8-14

справа

0,09

вырубка (не заделана)

ямочный ремонт а/бетонной  смесью

ПК8+45 

ПК8+56     

справа

0,03

продольная трещина

заделка мастикой

с расшивкой шва

ПК8+64

ПК8+69

слева

0.02

продольная

трещина

заделка мастикой

с расшивкой шва

ПК8+89

справа

0.00

поперечная  

трещина   

заделка мастикой  с расшивкой шва

ПК9+26

ПК9+30

;                                                                                       ■    ■

слева

8,00

выкрошен асфальт

ямочный ремонт

а/бетонной смесью

ПК9+17

ПК9+27

справа

20,00

выкрошен

асфальт

ямочный ремонт

а/бетонной смесью

ПК 10+20

ПК 10+30

по середине

10.00

выкрошен

асфальт

ямочный ремонт

а/бетонной смесью

ПК10+99

справа

0,09

вырубка

(частично

заделана)

ямочный ремонт

а/бетонной смесью

ПК11+01

ПК11+10

справа

0,04

продольная   трещина

заделка мастикой

с расшивкой шва

ПК 12+11

слева

0.09

вырубка

не заделана

ямочный ремонт

а/бетонной смесью

ПК 12+24

ПК 12+26

справа

2,00

выкрошен

асфальт

ямочный ремонт

а/бетонной смесью

ПК12+50

ПК 12+52

слева

0 01

продольная

трещина

заделка мастикой с расшивкой шва

ПК 12+91

слева

0.09

вырубка (не заделана)

ямочный ремонта/бетонной смесью

 

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Корсар» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) в доход федерального бюджета государственную пошлину в размере 6 000 руб.

Исполнительный лист выдается по ходатайству взыскателя или по его ходатайству направляется для исполнения непосредственно арбитражным судом. 

Для направления исполнительного листа на взыскание денежных средств в доход бюджета ходатайство взыскателя не требуется.

Решение вступает в законную силу по истечении месяца со дня его принятия,  если не подана апелляционная жалоба.

Решение может быть обжаловано в течение месяца со дня его принятия в Шестой арбитражный апелляционный суд (г. Хабаровск) через Арбитражный суд Амурской области.

Судья                                                                                                      М.В. Сутырина