Арбитражный суд Московской области

107053, ГСП 6, г. Москва, проспект Академика Сахарова, д.18 

http://asmo.arbitr.ru/

Именем Российской Федерации

МОТИВИРОВАННОЕ 

РЕШЕНИЕ

по делу, рассмотренному в порядке упрощенного производства

Дело №А41-49363/23

г. Москва

14 августа 2023 года

Резолютивная часть решения изготовлена 28 июля 2023 года.

Мотивированное решение изготовлено 14 августа 2023 года.

Арбитражный суд Московской области в составе судьи О.С. Гузеевой, рассмотрев в порядке упрощенного производства дело по заявлению ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БАЙКАЛТЕХНОСТРОЙ" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) к АО "АРСЕНАЛ" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) о взыскании задолженности по договорам субподряда №МФ_ПБК_БС_АМС №42-12/05/18 от 07.05.2018г, №МФ_ПБК_БС_АМС №10- 02/04/18 от 02.04.2018г в размере 10 000 руб., расходов по оплате госпошлины в размере 2 000 руб., без вызова сторон, 

с учетом отказа в удовлетворении ходатайства об уточнении исковых требований в порядке части 1 статьи 49 АПК РФ до 2 439 374,89 руб., ввиду отсутствия доказательств доплаты государственной пошлины, отсутствия ходатайства об отсрочке уплаты государственной пошлины; с учетом заявления ответчика о пропуске срока исковой давности, произведенном зачете встречных однородных требований,

УСТАНОВИЛ:

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БАЙКАЛТЕХНОСТРОЙ" обратилось в Арбитражный суд Московской области с иском к АО "АРСЕНАЛ" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) о взыскании части задолженности по договорам субподряда №МФ_ПБК_БС_АМС №42-12/05/18 от 07.05.2018г, №МФ_ПБК_БС_АМС №10- 02/04/18 от 02.04.2018г в размере 10 000 руб., расходов по оплате госпошлины в размере 2 000 руб. 

В соответствии со статьей 227 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее-АПК РФ) дело рассматривается в порядке упрощенного производства.

Стороны о принятии искового заявления в порядке упрощенного производства извещены надлежащим образом в порядке статей 121, 123 АПК РФ.

Рассмотрев ходатайство истца об увеличении исковых требований в порядке части 1 статьи 49 АПК РФ с 10 000 руб. до 2 439 374,89 руб., суд отказывает в его удовлетворении ввиду отсутствия доказательств доплаты государственной пошлины в размере 33 196,87 руб., отсутствия ходатайства об отсрочке уплаты государственной пошлины.

Ответчик представил письменный отзыв, в удовлетворении исковых требований просил отказать, в том числе, ввиду пропуска срока исковой давности, заявил о произведенном зачете встречных однородных требований.

Резолютивная часть решения об отказе в удовлетворении исковых требований принята судом 28 июля 2023 года и размещена на официальном сайте арбитражного суда.

Ответчиком в порядке части 2 статьи 229 АПК РФ, подано заявление о составлении мотивированного текста решения суда.

Рассмотрев материалы дела, полно и всесторонне исследовав представленные доказательства, изучив их в совокупности, суд находит исковые требования не подлежащими удовлетворению по следующим основаниям. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 11 Гражданского кодекса Российской Федерации арбитражный суд осуществляет защиту нарушенных или оспоренных гражданских прав. 

Согласно части 1 статьи 4 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации заинтересованное лицо вправе обратиться в арбитражный суд за защитой своих нарушенных или оспариваемых прав и законных интересов в порядке, установленном названным Кодексом. 

Как следует из искового заявления и материалов дела, между ООО «Байкалтехнострой» (Субподрядчик) и АО «Арсенал» (Подрядчик) заключены Договоры субподряда №МФ_ПБК_БС_АМС №42-12/05/18 от 07.05.2018г, №МФ_ПБК_БС_АМС №10- 02/04/18 от 02.04.2018г на выполнение землеустроительных, проектно-изыскательских, проектных, строительно-монтажных и иных работ по сооружению (монтажу/строительству) объектов связи (далее по тексту – Договор), в соответствии с которым Субподрядчик обязуется выполнять Заказу на Работы в сроки, указанные в Графике выполнения работ, по ценам, указанным в соответствующем Заказе. Подрядчик обязуется при отсутствии недостатков принять результат надлежащим образом выполненные Работы и уплатить установленную стоимость Работ (п. 2.1. Договора).

Согласно п.4.2.4.1. договоров  оплата стоимости выполненных работ, производится при условии оплаты в адрес Подрядчика со стороны Заказчика в ближайший платежный день по истечении 30 календарных дней с даты подписания сторонами без замечаний акта сдачи приемки выполненных работ, а при подписании такого акта с ведомостью выявленных недостатков, после подписания акта, подтверждающего устранение недостатков, перечисленных в ведомости выявленных недостатков, при условии своевременного предоставления подписанных сторонам подлинников документов. указанных в статье 3 договора.

Согласно пунктам 5.3.1. договоров №МФ_ПБК_БС_АМС №42-12/05/18 от 07.05.2018г, №МФ_ПБК_БС_АМС №10-02/04/18 от 02.04.2018г окончательная оплата выполненных строительномонтажных работ, не связанных с созданием объекта капитального строительства (проведение ремонтных работ, а равно, но не ограничиваясь, работ по демонтажу оборудования), производится при условии оплаты в адрес подрядчика со стороны заказчика, в ближайший платежный день по истечении 30 (тридцать)календарных дней с даты подписания акта сдачи-приемки выполненных работ по форме Приложения №13 к настоящему договору без недостатков, а при подписании такого акта с ведомостью выявленных недостатков, после подписания акта, подтверждающего устранения недостатков, перечисленных в ведомости выявленных недостатков, при условии своевременного предоставления подписанных сторонами подлинников документов, указанных в статье 3 настоящего договора.

В соответствии с п. 3.4.23. Договора, строительство Объекта (ов) связи может считаться завершенным только тогда, когда все Строительно- монтажные работы выполнены и завершены с надлежащим качеством в полном соответствии с условиями Договора, утвержденной Подрядчиком Проектной и Рабочей документацией, требованиями Применимого Законодательства, когда все необходимые индивидуальные и комплексные испытания смонтированных инженерных систем проведены в полном объеме и успешно, за исключением незначительных дефектов и недоделок, позволяющих (согласно требованиям Применимого Законодательства и решению Подрядчика) использовать Объект(ы) связи по целевому назначению и после подготовки и оформления всех документов, предусмотренных Применимым Законодательством и настоящим Договором.

В пункте 5.3. Договора указано следующее, в случае предоставления Субподрядчиком не полного комплекта приемо-сдаточных документов, предусмотренных статьей 3 настоящего Договора, Подрядчик имеет право без начисления пеней со стороны Субподрядчика, предусмотренных в статье 7 настоящего Договора, задержать оплату Работ на срок до получения недостающих документов. Согласно п. 7.13. Договора, в случае непредставления документов в количестве и в сроки, определенные статьей 3 настоящего Договора, до срока очередного платежа последний может быть задержан Подрядчиком до получения вышеуказанных документов без применения санкций со стороны Субподрядчика. 

В целях исполнения условий заключенного Договора Сторонами были подписаны Заказы на выполнение работ с установленными сроками окончания работ и их стоимостью:

1. Заказ БТС 15-2.03-3063 Республика Бурятия, 

<

...> км юго западнее с. Баргузин, башня ОАО "Мегафон" - Республика Бурятия, Баргузинский рн., с. Гусиха/ПИР, СМР. Дата начала выполнения работ 22.03.2018 г. Дата окончания работ 25.12.2018 г. Стоимость работ 163150,69 руб. в т.ч. НДС. Неоплаченная задолженность по акту 44 386,84 руб. в т.ч. НДС. Стороны подписали Акт сдачи-приемки выполненных работ №БТС 15 от 25.12.2018 г. 

2. Заказ БТС 152-2.03-3111-3166.14 Республика Бурятия, Тункинский рн, 

<

...>, Тункинский РЭС - Республика Бурятия, Тункинский рн, 

<

...> севернее изб.уч. № 618/ПИР, СМР. Дата начала выполнения работ 28.05.2019 г. Дата окончания работ 23.12.2019 г. Стоимость работ 94 452,96 руб. в т.ч. НДС. Неоплаченная задолженность по акту 28 335,89 руб. в т.ч. НДС Стороны подписали Акт сдачи-приемки выполненных работ № БТС 152 от 23.12.2019 г. 

3. Заказ БТС 153-2.03-3090-3147.22 Республика Бурятия, с. Мухоршибирь, 9км сев-западнее с. Мухоршибирь, АМС ОАО "Мегафон" М-55 - Республика Бурятия, Мухоршибирский рн, п. Саган-Нур, холм 700м северо-восточнее /ПИР, СМР. Дата начала выполнения работ 28.05.2019 г. Дата окончания работ 23.12.2019 г. Стоимость работ 138 828,48 руб. в т.ч. НДС. Неоплаченная задолженность по акту 41 648,54 руб. в т.ч. НДС. Стороны подписали Акт сдачи-приемки выполненных работ № БТС 153 от 23.12.2019 г. 

4. Заказ БТС 157-2.03-3090.23 Республика Бурятия, Мухоршибирский рн, с. Мухоршибирь, 9км северо-западнее с. Мухоршибирь, АМС ОАО "Мегафон", М-55/СМР. Дата начала выполнения работ 20.04.2019 г. Дата окончания работ 27.12.2019 г. Стоимость работ 36 388,80 руб. в т.ч. НДС. Неоплаченная задолженность по акту 10 916,64 руб. в т.ч. НДС. Стороны подписали Акт сдачи-приемки выполненных работ № БТС 157 от 27.12.2019г. 

5. Заказ БТС 16-2.03-3138 Республика Бурятия, Баргузинский рн, с. Гусиха - Республика Бурятия, Баргузинский рн, пгт. ФИО1, ул. Кагальницкого, 1/ПИР,СМР. Дата начала выполнения работ 22.03.2018 г. Дата окончания работ 25.12.2018 г. Стоимость работ 159 492,34 руб. в т.ч. НДС. . Неоплаченная задолженность по акту 43 351,45 руб. в т.ч. НДС. Стороны подписали Акт сдачи-приемки выполненных работ № БТС 16 от 25.12.2018 г. 

6. Заказ БТС 161-2.03-3106-3923 Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, п. Аршан, 200м северо-вост.ул. Крамского, 3б - Республика Бурятия, Иволгинский рн, 

<

...> км на ю-з от с. Иволгинск/ПИР, СМР. Дата начала выполнения работ 28.05.2019 г. Дата окончания работ 19.05.2020 г. Стоимость работ 147 142,80 руб. в т.ч. НДС. Неоплаченная задолженность по акту 44 142,84 руб. в т.ч. НДС. Акт сдачиприемки выполненных работ №БТС 161 от 19.05.2020г. направлен ответчику 07.07.2022 г., повторно16.12.2022 г. 

7. Заказ БТС 162-2.03-3090-3086.21 Республика Бурятия, Мухоршибирский рн, с. Мухоршибирь, 9км сев.зап.с. Мухоршибирь АМС ОАО "Мегафон"- Республика Бурятия, Тарбагатайский рн, 

<

...> км юго-восточнее с.Тарбагатай, Башня РТПЦ/ПИР, СМР. Дата начала выполнения работ 20.03.2019 г. Дата окончания работ 26.06.2020 г. Стоимость работ 143 767,68 руб. в т.ч. НДС. Неоплаченная задолженность по акту 43 130,31 руб. в т.ч. НДС. Акт сдачи-приемки выполненных работ № БТС 162 от 29.06.2020г. направлен ответчику 07.07.2022 г., повторно16.12.2022 г.

8. Заказ БТС 163-2.03-3172.18-3146 Республика Бурятия, Кяхтинский рн, 

<

...> км западнее с. Киран, башня ОАО "Мегафон, гора Халзан - Республика Бурятия, Бичурский рн, 

<

...> км северо-западнее с. Окино-к/ПИР, СМР. Дата начала выполнения работ 20.03.2019 г. Дата окончания работ 28.07.2020 г. Стоимость работ 104 925,24 руб. в т.ч. НДС. Неоплаченная задолженность по акту 31 477,54 руб. в т.ч. НДС. Акт сдачи-приемки выполненных работ № БТС 163 от 28.07.2020г. направлен ответчику 07.07.2022 г., повторно16.12.2022 г. 

9. Заказ БТС 164-2.03-3172.17-4019 Республика Бурятия, Кяхтинский рн, 

<

...> км западнее с. Киран, башня ОАО "Мегафон, гора Халзан - Республика Бурятия, Кяхтинский рн, 

<

...> км южнее с. Кудара-Сомон, башня ОАО "МегаФон"/ПИР, СМР. Дата начала выполнения работ 20.03.2019 г. Дата окончания работ 28.07.2020 г. Стоимость работ 83 625,36 руб. в т.ч. НДС. Неоплаченная задолженность по акту 25 087,61 руб. в т.ч. НДС. Акт сдачи-приемки выполненных работ № БТС 164 от 28.07.2020г. направлен ответчику 07.07.2022 г., повторно16.12.2022 г. 

10. Заказ БТС 165-2.03-4004-3089 Республика Бурятия, Бичурский рн, 

<

...> км западнее с. Бичура, башня ОАО "Мегафон" - Республика Бурятия, Бичурский рн, у. Шибертуй, пол.ст. Мулцугуны, гора Тарбагаш, башня ОАО "Мегафон" /ПИР, СМР. Дата начала выполнения работ 29.06.2019 г. Дата окончания работ 20.04.2020 г. Стоимость работ 85 490,16 руб. в т.ч. НДС. Неоплаченная задолженность по акту 25 647,05 руб. в т.ч. НДС. Акт сдачи-приемки выполненных работ № БТС 165 от 20.04.2020г. направлен ответчику 07.07.2022 г., повторно16.12.2022 г. 

11. Заказ БТС 166-2.03-3272-3283.13 Республика Бурятия, Закаменский рн, 2 км на с-з от с. Михайловка - Республика Бурятия, Закаменский рн, 4 кс на с-в от с. Хамней/ПИР, СМР. Дата начала выполнения работ 28.05.2019 г. Дата окончания работ 20.04.2020 г. Стоимость работ 133 590,24 руб. в т.ч. НДС. Неоплаченная задолженность по акту 40 077,08 руб. в т.ч. НДС. Акт сдачи-приемки выполненных работ № БТС 166 от 20.04.2020г. направлен ответчику 07.07.2022 г., повторно16.12.2022 

12. Заказ БТС 167-2.03-3283.14-3902 Республика Бурятия, Закаменский рн, с. Хамней, 4км на с-в от с. Хамней - Республика Бурятия, Закаменский рн, у. Дутулур, 2км на север от с. Дутулур, Башня ОАО "МегаФон"/ПИР, СМР. Дата начала выполнения работ 01.11.2019 г. Дата окончания работ 28.07.2020 г. Стоимость работ 120 304,80 руб. в т.ч. НДС. Неоплаченная задолженность по акту 36 091,44 руб. в т.ч. НДС. Акт сдачи-приемки выполненных работ № БТС 167 от 28.07.2020г. направлен ответчику 07.07.2022 г., повторно16.12.2022 г. 

13. Заказ БТС 168-2.03-3902-3992 Республика Бурятия, Закаменский рн, 2км на север от с. Дутулур - Республика Бурятия, Закаменский рн, 

<

...>/ПИР, СМР. Дата начала выполнения работ 12.09.2019 г. Дата окончания работ 15.04.2020 г. Стоимость работ 76 675,20 руб. в т.ч. НДС. Неоплаченная задолженность по акту 23 002,56 руб. в т.ч. НДС. Акт сдачи-приемки выполненных работ № БТС 168 от 15.04.2020г. направлен ответчику 07.07.2022 г., повторно16.12.2022 г. 

14. Заказ БТС 170-2.03-3082.11-3090 Республика Бурятия, с. Новый Заган (перевал Заган), мачта РТПЦ - Республика Бурятия, Мухоршибирский рн, с.Мухоршибирь, 9км северо-западнее с. Мухоршибирь, АМС ОАО "Мегафон"/СМР. Дата начала выполнения работ 20.03.2019 г. Дата окончания работ 27.08.2020 г. Стоимость работ 56 977,20 руб. в т.ч. НДС. Неоплаченная задолженность по акту 17 093,16 руб. в т.ч. НДС. Акт сдачи-приемки выполненных работ № БТС 170 от 27.08.2020г. направлен ответчику 07.07.2022 г., повторно16.12.2022 г. 

15. Заказ БТС 180-2.03-4145.12 Республика Бурятия, Селенгинский рн, у. Тохой, ул. Ленина, 21/СМР. Дата начала выполнения работ 25.05.2019 г. Дата окончания работ 20.11.2020 г. Стоимость работ 15 321,60 руб. в т.ч. НДС. Неоплаченная задолженность по акту 15 321,60 руб. в т.ч. НДС. Акт сдачиприемки выполненных работ № БТС 180 от 20.11.2020г. направлен ответчику 07.07.2022 г., повторно16.12.2022 г. 

16. Заказ БТС 185-2.03-3166-4018 Республика Бурятия, Тункинский рн, 

<

...> свер избирательного уч № 618 - Республика Бурятия, Тункинский рн, 

<

...> /ПИР, СМР. Дата начала выполнения работ 28.05.2019 г. Дата окончания работ 19.05.2020 г. Стоимость работ 107 120,16 руб. в т.ч. НДС. Неоплаченная задолженность по акту 107 120,16 руб. в т.ч. НДС. Акт сдачи-приемки выполненных работ № БТС 185 от 19.05.2020г. направлен ответчику 07.07.2022 г., повторно16.12.2022 г. 

17. Заказ БТС 188-2.03-3045.18-3063 Республика Бурятия, Баргузинский рн, 

<

...> км юго западнее с. Баргузин. Башня ОАО "МегаФон"- Республика Бурятия, Баргузинский рн, 

<

...>/ПИР, СМР. Дата начала выполнения работ 17.02.2020 г. Дата окончания работ 28.07.2020 г. Стоимость работ 136 809,96 руб. в т.ч. НДС. Неоплаченная задолженность по акту 136 809,96 руб. в т.ч. НДС. Акт сдачи-приемки выполненных работ № БТС 188 от 28.07.2020г. направлен ответчику 07.07.2022 г., повторно16.12.2022 г.

18. Заказ БТС 02.03-3163 Республика Бурятия, п.Самарта, Окинский рн, Рудник "Холбинский", 150м западнее столовой рудника/ПИР ,СМР. Дата начала выполнения работ 05.04.2018 г. Дата окончания работ 28.05.2018 г. Стоимость работ 119 479,26 руб. в т.ч. НДС. Неоплаченная задолженность по акту 35 843,78 руб. в т.ч. НДС Стороны подписали Акт сдачи-приемки выполненных работ № БТС 2.1 от 28.05.2018 г. 

19. Заказ БТС 24-2.03-3994.11 Республика Бурятия, Северобайкальский рн., 11 км юго зап. г. Северобайкальск, мыс Онокочанский/ПИР, СМР. Дата начала выполнения работ 31.07.2018 г. Дата окончания работ 21.12.2018 г. Стоимость работ 137 015,72 руб. в т.ч. НДС. Неоплаченная задолженность по акту 41 104,72 руб. в т.ч. НДС. Стороны подписали Акт сдачи-приемки выполненных работ № БТС 24 от 21.12.2018 г. 

20. Заказ БТС 28-2.03-3261.13 Республика Бурятия, Северобайкальский рн, 200м западнее турбазы, горячие источники/ПИР, СМР. Дата начала выполнения работ 31.07.2018 г. Дата окончания работ 21.12.2018 г. Стоимость работ 120 732,90 руб. в т.ч. НДС. Неоплаченная задолженность по акту 36 219,87 руб. в т.ч. НДС. Стороны подписали Акт сдачи-приемки выполненных работ № БТС 28 от 21.12.2018 г. 

21. Заказ БТС 32-2.03-3160.16 Республика Бурятия, Муйский рн, пгт. Таксимо, 1 км сев-зап. п. Таксимо/ПИР, СМР. Дата начала выполнения работ 31.07.2018 г. Дата окончания работ 25.12.2018 г. Стоимость работ 136 909,43 руб. в т.ч. НДС. Неоплаченная задолженность по акту 41 072,83 руб. в т.ч. НДС. Стороны подписали Акт сдачи-приемки выполненных работ № БТС 32 от 25.12.2018 г.

 22. Заказ БТС 34-2.03-3033.17 

<

...>/ПИР, СМР. Дата начала выполнения работ 31.07.2018 г. Дата окончания работ 20.12.2018 г. Стоимость работ 140 841,28 руб. в т.ч. НДС. Неоплаченная задолженность по акту 42 252,38 руб. в т.ч. НДС. Стороны подписали Акт сдачи-приемки выполненных работ № БТС 34 от 20.12.2018 г. 2

24. Заказ БТС 44-2.03-3106-3038.18 Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, 

<

...> - Республика Бурятия, Иволгинский рн, 

<

...> Бурятии, 6/ПИР, СМР. Дата начала выполнения работ 04.04.2018 г. Дата окончания работ 29.12.2018 г. Стоимость работ 155 185,58 руб. в т.ч. НДС. Неоплаченная задолженность по акту 77 592,79 руб. в т.ч. НДС. Стороны подписали Акт сдачи-приемки выполненных работ № БТС 44 от 29.12.2018 г. 

25. Заказ БТС 45-2.03-4307-3098.11 Тарбагатайский рн, пн. СТ Ручеек, 150 м южнее СТ "Ручеек" - РБ, 

<

...> км трассы Улан-Удэ Николаевский, строение 1, корпус 23, Моторостроительный завод /ПИР, СМР. Дата начала выполнения работ 02.04.2018 г. Дата окончания работ 17.12.2018 г. Стоимость работ 207 482,94 руб. в т.ч. НДС. Неоплаченная задолженность по акту 62 244,88 руб. в т.ч. НДС. Стороны подписали Акт сдачи-приемки выполненных работ № БТС 45 от 17.12.2018 г. 

26. Заказ БТС 48-2.03-3063-3074.21 Республика Бурятия, 

<

...> км юго западнее с. Баргузин, башня ОАО "Мегафон" - БС 03074 Республика Бурятия, Баргузинский рн., с. Максимиха, башня ОАО "Мегафон", 7 км юго вост.п. Максимиха /ПИР, СМР. Дата начала выполнения работ 22.03.2018 г. Дата окончания работ 25.12.2018 г. Стоимость работ 203 921,23 руб. в т.ч. НДС. Неоплаченная задолженность по акту 61 176,37 руб. в т.ч. НДС. Стороны подписали Акт сдачи-приемки выполненных работ № БТС 48 от 25.12.2018 г. 

27. Заказ БТС 53-2.03-3075.21 Республика Бурятия, Баргузинский рн, у. Баянгол, 3,5 км южнее у. Баянгол, Башня ОАО/ПИР, СМР. Дата начала выполнения работ 30.07.2018 г. Дата окончания работ 20.12.2018 г. Стоимость работ 151 318,27 руб. в т.ч. НДС. Неоплаченная задолженность по акту 45 395,48 руб. в т.ч. НДС. Стороны подписали Акт сдачи-приемки выполненных работ № БТС 53 от 20.12.2018 г.

28. Заказ БТС 58-2.38-3159.22 Республика Бурятия, Курумканский рн, 

<

...> Администрация/ПИР, СМР. Дата начала выполнения работ 01.08.2018 г. Дата окончания работ 25.12.2018 г. Стоимость работ 131 618,14 руб. в т.ч. НДС. Неоплаченная задолженность по акту 39 485,44 руб. в т.ч. НДС. Стороны подписали Акт сдачи-приемки выполненных работ № БТС 58 от 25.12.2018 г. 

29. Заказ БТС 65-2.03-3059-3075.20 Республика Бурятия, Курумканский рн, с. Курумкан, 4км юго западнее п. Курумкан башня ОАО "Мегафон" - Республика Бурятия, Баргузинский рн., у. Баянгол, 3,5 км южнее у. Баянгол/ПИР, СМР. Дата начала выполнения работ 04.04.2018 г. Дата окончания работ 29.12.2018 г. Стоимость работ 40 490,52 руб. в т.ч. НДС. Неоплаченная задолженность по акту 12 147,16 руб. в т.ч. НДС. Стороны подписали Акт сдачи-приемки выполненных работ № БТС 65 от 29.12.2018 г. 

30. Заказ БТС 73-2.03-3299-3942.20 

<

...> - Республика Бурятия, Северобайкальский рн, пгт. Нижнеангарск, 600м ю-в пгт. Нижнеангарска, башня ОАО Мегафон/ПИР, СМР. Дата начала выполнения работ 04.04.2018 г. Дата окончания работ 29.12.2018 г. Стоимость работ 82 486,84 руб. в т.ч. НДС. Неоплаченная задолженность по акту 24 746,05 руб. в т.ч. НДС. Стороны подписали Акт сдачи-приемки выполненных работ № БТС 73 от 29.12.2018 г. 

31. Заказ БТС 80-2.03-3184.17-3055 Республика Бурятия, Джидинский рн, с. Белоозерск, холм 10км юго зап. с. Белоозерск- Республика Бурятия, г. Кяхта, мачта РТПЦ/ПИР, СМР. Дата начала выполнения работ 01.02.2019 г. Дата окончания работ 28.07.2020 г. Стоимость работ 149 311,68 руб. в т.ч. НДС. Неоплаченная задолженность по акту 74 655,84 руб. в т.ч. НДС. Акт сдачи-приемки выполненных работ № БТС 80 от 28.07.2020г. направлен ответчику 07.07.2022 г., повторно16.12.2022 г. 

32. Заказ БТС 85-10АМС18 03-57862 В.Саянтуй Республика Бурятия, Тарбагатайский рн, с. Верх.Саянтуйская санаторная школа интернат/ПИР. Дата начала выполнения работ 09.02.2019 г. Дата окончания работ 09.09.2020 г. Стоимость работ 62 736,00 руб. в т.ч. НДС. Неоплаченная задолженность по акту 15 924,60 руб. в т.ч. НДС. Акт сдачи-приемки выполненных работ № БТС 85 от 09.09.2020г. направлен ответчику 07.07.2022 г., повторно16.12.2022 г. 

33. Заказ БТС 88-2.03-3086-3115 Республика Бурятия, Тарбагатайский рн, 

<

...> км юговосточнее с.Тарбагатай, Башня РТПЦ - Республика Бурятия, Иволгинский рн, п. Оронгой, гора около с. Оронгой, башня ОАО "Мегафон" /СМР. Дата начала выполнения работ 20.03.2019 г. Дата окончания работ 13.05.2020 г. Стоимость работ 18 194,40 руб. в т.ч. НДС. Неоплаченная задолженность по акту 9 097,20 руб. в т.ч. НДС. Акт сдачи-приемки выполненных работ № БТС 88 от 13.05.2020г. направлен ответчику 07.07.2022 г., повторно16.12.2022 г. 

34. Заказ БТС/И1/2.38-1004.12 

<

...>/ПИР, СМР. Дата начала выполнения работ 01.03.2019 г. Дата окончания работ 29.03.2019 г. Стоимость работ 160 271,50 руб. в т.ч. НДС. Неоплаченная задолженность по акту 48 081,45 руб. в т.ч. НДС. Стороны подписали Акт сдачи-приемки выполненных работ № БТС И1 от 29.03.2019 г. 

35. Заказ БТС 118-03144.14/4G Республика Бурятия, Мухоршибирский рн, п. Мухоршибирь, 50 м на запад от ул. Увальная, д.3/ПИР, СМР. Дата начала выполнения работ 01.04.2019 г. Дата окончания работ 27.05.2019 г. Стоимость работ 86 063,72 руб. в т.ч. НДС. Неоплаченная задолженность по акту 25 819,12 руб. в т.ч. НДС. Стороны подписали Акт сдачи-приемки выполненных работ № БТС 118 от 27.05.2019 г. 

36. Заказ БТС 120-2.03 -03061.17 Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, 

<

...>/ПИР, СМР. Дата начала выполнения работ 15.05.2019 г. Дата окончания работ 31.05.2019 г. Стоимость работ 91 764,91 руб. в т.ч. НДС. Неоплаченная задолженность по акту 45 882,45 руб. в т.ч. НДС. Стороны подписали Акт сдачи-приемки выполненных работ № БТС 120 от 31.05.2019 г. 

37. Заказ БТС 121-2.03 -03152.17 

<

...>/ПИР, СМР. Дата начала выполнения работ 15.05.2019 г. Дата окончания работ 31.05.2019 г. Стоимость работ 44 014,08 руб. в т.ч. НДС. Неоплаченная задолженность по акту 13 204,22 руб. в т.ч. НДС. Стороны подписали Акт сдачиприемки выполненных работ № БТС 121 от 31.05.2019 г. 

38. Заказ БТС 122-2.03 -03252.18 Республика Бурятия, 

<

...> м юв. Ул. Залесная 1в, башня ОАО "Мегафон"/ПИР, СМР. Дата начала выполнения работ 15.05.2019 г. Дата окончания работ 31.05.2019 г. Стоимость работ 102 868,20 руб. в т.ч. НДС. Неоплаченная задолженность по акту 30 860,46 руб. в т.ч. НДС. Стороны подписали Акт сдачи-приемки выполненных работ № БТС 122 от 31.05.2019 г. 

39. Заказ БТС 123-2.03 -3286.18 

<

...>/ПИР, СМР. Дата начала выполнения работ 21.05.2019 г. Дата окончания работ 31.05.2019 г. Стоимость работ 106 430,67 руб. в т.ч. НДС. Неоплаченная задолженность по акту 31 929,20 руб. в т.ч. НДС. Стороны подписали Акт сдачи-приемки выполненных работ № БТС 123 от 31.05.2019 г. 

40. Заказ БТС 124-2.03 -4003.15 Республика Бурятия, 

<

...> вост. Ул. Борсоева, 3, рынок Динамо/ПИР, СМР. Дата начала выполнения работ 21.05.2019 г. Дата окончания работ 31.05.2019 г. Стоимость работ 103 462,82 руб. в т.ч. НДС. Неоплаченная задолженность по акту 31 038,85 руб. в т.ч. НДС. Стороны подписали Акт сдачи-приемки выполненных работ № БТС 124 от 31.05.2019 г. 

41. Заказ БТС 125-2.03 -4011.16 Республика Бурятия, 

<

...> восточнее ул. Брянской, 62/ПИР, СМР. Дата начала выполнения работ 21.05.2019 г. Дата окончания работ 31.05.2019 г. Стоимость работ 104 808,84 руб. в т.ч. НДС. Неоплаченная задолженность по акту 31 442,65 руб. в т.ч. НДС. Стороны подписали Акт сдачи-приемки выполненных работ № БТС 125 от 31.05.2019 г. 

42. Заказ БТС 127-2.03 -03951.16 

<

...>/ПИР, СМР. Дата начала выполнения работ 15.05.2019 г. Дата окончания работ 31.05.2019 г. Стоимость работ 103 107,60 руб. в т.ч. НДС. Неоплаченная задолженность по акту 30 932,28 руб. в т.ч. НДС. Стороны подписали Акт сдачи-приемки выполненных работ № БТС 127 от 31.05.2019 г. 

43. Заказ БТС 128-2.03 -4010.16 

<

...>/ПИР, СМР. Дата начала выполнения работ 30.04.2019 г. Дата окончания работ 28.06.2019 г. Стоимость работ 101 457,72 руб. в т.ч. НДС. Неоплаченная задолженность по акту 30 437,32 руб. в т.ч. НДС. Стороны подписали Акт сдачиприемки выполненных работ № БТС 128 от 28.06.2019 г. 

44. Заказ БТС 129-2.03 -4012.15 

<

...>/ПИР, СМР. Дата начала выполнения работ 30.04.2019 г. Дата окончания работ 28.06.2019 г. Стоимость работ 98 577,72 руб. в т.ч. НДС. Неоплаченная задолженность по акту 29 573,32 руб. в т.ч. НДС. Стороны подписали Акт сдачи-приемки выполненных работ № БТС 129 от 28.06.2019 г. 

45. Заказ БТС 130-2.03 -3900.16 

<

...>, Центральные электрические сети/ПИР, СМР. Дата начала выполнения работ 01.05.2019 г. Дата окончания работ 28.06.2019 г. Стоимость работ 103 836,60 руб. в т.ч. НДС. Неоплаченная задолженность по акту 31 150,98 руб. в т.ч. НДС. Стороны подписали Акт сдачи-приемки выполненных работ № БТС 130 от 28.06.2019 г. 

46. Заказ БТС 131-2.03 -3953.15 

<

...>/ПИР, СМР. Дата начала выполнения работ 01.05.2019 г. Дата окончания работ 28.06.2019 г. Стоимость работ 99 192,56 руб. в т.ч. НДС. Неоплаченная задолженность по акту 29 757,67 руб. в т.ч. НДС. Стороны подписали Акт сдачи-приемки выполненных работ № БТС 131 от 28.06.2019 г. 

47. Заказ БТС 132-2.03 -4150.14 

<

...>/ПИР, СМР. Дата начала выполнения работ 01.05.2019 г. Дата окончания работ 28.06.2019 г. Стоимость работ 103 166,28 руб. в т.ч. НДС. Неоплаченная задолженность по акту 30 949,88 руб. в т.ч. НДС. Стороны подписали Акт сдачиприемки выполненных работ № БТС 132 от 28.06.2019 г. 

48. Заказ БТС 133-2.03 -3993.22 Республика Бурятия, Кабанский рн, 

<

...>/ПИР, СМР. Дата начала выполнения работ 01.05.2019 г. Дата окончания работ 28.06.2019 г. Стоимость работ 91 740,29 руб. в т.ч. НДС. Неоплаченная задолженность по акту 27 522,09 руб. в т.ч. НДС. Стороны подписали Акт сдачи-приемки выполненных работ № БТС 133 от 28.06.2019 г. 

49. Заказ БТС 134-2.03 -4257.13 

<

...>/ПИР, СМР. Дата начала выполнения работ 01.05.2019 г. Дата окончания работ 28.06.2019 г. Стоимость работ 14 411,88 руб. в т.ч. НДС. Неоплаченная задолженность по акту 4 323,56 руб. в т.ч. НДС. Стороны подписали Акт сдачиприемки выполненных работ № БТС 134 от 28.06.2019 г. 

50. Заказ БТС 135-2.03 -4350.12 Республика Бурятия, Тарбагатайский рн, 

<

...>/ПИР, СМР. Дата начала выполнения работ 01.05.2019 г. Дата окончания работ 28.06.2019 г. Стоимость работ 130 259,52 руб. в т.ч. НДС. Неоплаченная задолженность по акту 39 077,86 руб. в т.ч. НДС. Стороны подписали Акт сдачи-приемки выполненных работ № БТС 135 от 28.06.2019 г. 

51. Заказ БТС 136-2.03 -4002.15 

<

...>/ПИР, СМР. Дата начала выполнения работ 01.05.2019 г. Дата окончания работ 28.06.2019 г. Стоимость работ 98 836,96 руб. в т.ч. НДС. Неоплаченная задолженность по акту 29 651,09 руб. в т.ч. НДС. Стороны подписали Акт сдачи-приемки выполненных работ № БТС 136 от 28.06.2019 г. 

52. Заказ БТС 137-2.03 -3202.16 

<

...> ООО "Байкалагротех"/ПИР, СМР. Дата начала выполнения работ 01.05.2019 г. Дата окончания работ 28.06.2019 г. Стоимость работ 96 558,84 руб. в т.ч. НДС. Неоплаченная задолженность по акту 28 957,65 руб. в т.ч. НДС. Стороны подписали Акт сдачи-приемки выполненных работ № БТС 137 от 28.06.2019 г. 

53. Заказ 138-2.03 -4007.18 

<

...> /ПИР, СМР. Дата начала выполнения работ 01.05.2019 г. Дата окончания работ 28.06.2019 г. Стоимость работ 8 235,66 руб. в т.ч. НДС. Неоплаченная задолженность по акту 2 470,61 руб. в т.ч. НДС. Стороны подписали Акт сдачиприемки выполненных работ № БТС 138 от 28.06.2019 г 

54. Заказ БТС 140-2.03-3039.19 Республика Бурятия, Заиграевский рн, пгт. Онохой, ул. Терешковой, д.1/ПИР, СМР. Дата начала выполнения работ 20.02.2019 г. Дата окончания работ 27.08.2019 г. Стоимость работ 41 530,32 руб. в т.ч. НДС. Неоплаченная задолженность по акту 12 459,10 руб. в т.ч. НДС. Акт сдачиприемки выполненных работ № БТС 140 от 27.08.2019 г. направлен ответчику 07.07.2022 г., повторно16.12.2022 г. 

55. Заказ БТС 141-2.03 -4344.14 Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, СНТ Солнечный, ул. 0 км Заиграеваского тракта, 4/ПИР, СМР. Дата начала выполнения работ 30.04.2019 г. Дата окончания работ 27.08.2019 г. Стоимость работ 68 078,16 руб. в т.ч. НДС. Неоплаченная задолженность по акту 20 423,45 руб. в т.ч. НДС. Стороны подписали Акт сдачи-приемки выполненных работ № БТС 141 от 27.08.2019 г. 

56. Заказ БТС 142-2.03 -57169/4307.13 Республика Бурятия, Тарбагатайский рн, 150м южнее СТ "Ручеек"/ПИР, СМР. Дата начала выполнения работ 01.07.2019 г. Дата окончания работ 16.08.2019 г. Стоимость работ 67 482,08 руб. в т.ч. НДС. Неоплаченная задолженность по акту 20 244,62 руб. в т.ч. НДС. Стороны подписали Акт сдачи-приемки выполненных работ № БТС 142 от 16.08.2019 г. 

57. Заказ БТС 144-2.03 -4252.14 

<

...>/ПИР, СМР. Дата начала выполнения работ 30.04.2019 г. Дата окончания работ 30.07.2019 г. Стоимость работ 9 193,20 руб. в т.ч. НДС. Неоплаченная задолженность по акту 2 757,96 руб. в т.ч. НДС. Стороны подписали Акт сдачиприемки выполненных работ № БТС 144 от 30.07.2019 г. 

58. Заказ БТС 145-2.03 -3200.15 Республика Бурятия, Кяхтинский рн, п. Октябрьский, 3км сев.вост. ФИО2/ПИР, СМР. Дата начала выполнения работ 15.03.2019 г. Дата окончания работ 17.10.2019 г. Стоимость работ 20 349,00 руб. в т.ч. НДС. Неоплаченная задолженность по акту 6 104,70 руб. в т.ч. НДС. Стороны подписали Акт сдачи-приемки выполненных работ № БТС 145 от 17.10.2019 г. 

59. Заказ БТС 174-2.03-3941.11 Республика Бурятия, Кяхтинский рн, п. Хоронхой, 90м от дома 18 ул. Титова/СМР. Дата начала выполнения работ 01.05.2020 г. Дата окончания работ 09.06.2020 г. Стоимость работ 27 650,70 руб. в т.ч. НДС. Неоплаченная задолженность по акту 8 295,21 руб. в т.ч. НДС. Акт сдачиприемки выполненных работ № БТС 174 от 09.06.2020г. направлен ответчику 07.07.2022 г., повторно16.12.2022 г. 

60. Заказ БТС 179-2.03-3215.16 Республика Бурятия, Заиграевский рн, 

<

...>, башня ОАО "Мегафон"/СМР. Дата начала выполнения работ 01.05.2020 г. Дата окончания работ 09.06.2020 г. Стоимость работ 27 650,70 руб. в т.ч. НДС. Неоплаченная задолженность по акту 8 295,21 руб. в т.ч. НДС. Акт сдачи-приемки выполненных работ № БТС 179 от 09.06.2020г. направлен ответчику 07.07.2022 г., повторно16.12.2022 г. 

61. Заказ БТС 182-2.03-3913-14 Республика Бурятия, Селенгинский рн, у. Ташир, 100 м западнее башни РТПЦ/СМР. Дата начала выполнения работ 01.11.2019 г. Дата окончания работ 20.05.2020 г. Стоимость работ 27 553,20 руб. в т.ч. НДС. Неоплаченная задолженность по акту 8 265,96 руб. в т.ч. НДС. Акт сдачи-приемки выполненных работ № БТС 182 от 20.05.2020г. направлен ответчику 07.07.2022 г., повторно16.12.2022 г. 

62. Заказ БТС 184-2.03-3055 Республика Бурятия, Кяхтинский рн, г. Кяхта, мачта РТПЦ /ПИР, СМР. Дата начала выполнения работ 01.11.2019 г. Дата окончания работ 20.05.2020 г. Стоимость работ 139 832,38 руб. в т.ч. НДС. Неоплаченная задолженность по акту 41 949,68 руб. в т.ч. НДС. Акт сдачиприемки выполненных работ № БТС 184 от 20.05.2020г. направлен ответчику 07.07.2022 г., повторно16.12.2022 г. 

63. Заказ БТС 186-2.03-3056.18 Республика Бурятия, Кяхтинский рн, пгт. Наушки, 1 км восточнее ЖД станции/ПИР, СМР. Дата начала выполнения работ 01.11.2019 г. Дата окончания работ 10.06.2020 г. Стоимость работ 72 808,28 руб. в т.ч. НДС. Неоплаченная задолженность по акту 22 342,48 руб. в т.ч. НДС. Акт сдачи-приемки выполненных работ № БТС 186 от 10.06.2020г. направлен ответчику 07.07.2022 г., повторно16.12.2022 г. 

64. Заказ БТС 187-2.03-3152.16 Республика Бурятия, 

<

...> от дома ул. Жердева, 90а/ПИР, СМР. Дата начала выполнения работ 30.04.2019 г. Дата окончания работ 27.05.2020 г. Стоимость работ 35 360,98 руб. в т.ч. НДС. Неоплаченная задолженность по акту 10 608,30 руб. в т.ч. НДС. Акт сдачиприемки выполненных работ № БТС 187 от 27.05.2020 г. направлен ответчику 07.07.2022 г., повторно16.12.2022 г. 

65. Заказ БТС 23-2.03-4245.15 

<

...>. 150м южнее д. 103/ПИР, СМР. Дата начала выполнения работ 27.05.2018 г. Дата окончания работ 29.12.2018 г. Стоимость работ 22 834,77 руб. в т.ч. НДС. Неоплаченная задолженность по акту 6 850,43 руб. в т.ч. НДС. Стороны подписали Акт сдачи-приемки выполненных работ № БТС 23 от 29.12.2018 г. 

66. Заказ БТС 36-20АМС18 03-3267 Республика Бурятия, Прибайкальский рн, 

<

...> башня ПАО "Мегафон"/ПИР, СМР. Дата начала выполнения работ 15.08.2018 г. Дата окончания работ 07.10.2019 г. Стоимость работ 23 770,10 руб. в т.ч. НДС. Неоплаченная задолженность по акту 7 131,03 руб. в т.ч. НДС. Акт сдачи-приемки выполненных работ № БТС 36 от 07.10.2019г. направлен ответчику 07.07.2022 г., повторно16.12.2022 г. 

67. Заказ БТС 46-2.03-3913-3912 Республика Бурятия, Селенгинский рн, у. Ташир, гора Харуха, 13 км восточнее у. Ташир, Башня ОАО "Мегафон" - Республика Бурятия, Селенгинский рн, 

<

...> км ю-восточнее г. Гусиноозерск/ПИР, СМР. Дата начала выполнения работ 29.06.2018 г. Дата окончания работ 29.12.2018 г. Стоимость работ 133 671,58 руб. в т.ч. НДС. Неоплаченная задолженность по акту 40 101,47 руб. в т.ч. НДС. Стороны подписали Акт сдачи-приемки выполненных работ № БТС 46 от 29.12.2018 г. 

68. Заказ БТС 70-2.03-3184-4116 Республика Бурятия, Джидинский рн, с. Белоозерск, холм 10км юго зап с. Белоозерск - Республика Бурятия, Джидинский рн, 

<

...>, РТК/ПИР, СМР. Дата начала выполнения работ 28.05.2018 г. Дата окончания работ 29.12.2018 г. Стоимость работ 209 134,94 руб. в т.ч. НДС. Неоплаченная задолженность по акту 62 740,48 руб. в т.ч. НДС. Стороны подписали Акт сдачи-приемки выполненных работ № БТС 70 от 29.12.2018 г. 

69. Заказ БТС 71-2.03-3297-3111 Республика Бурятия, Тункинский рн, 

<

...> АМС ОАО "Ростелеком" - Республика Бурятия, Тункинский рн, 

<

...>, Тункинский РЭС/ПИР, СМР. Дата начала выполнения работ 28.05.2018 г. Дата окончания работ 21.12.2018 г. Стоимость работ 199 778,84 руб. в т.ч. НДС. Неоплаченная задолженность по акту 99 889,42 руб. в т.ч. НДС. Стороны подписали Акт сдачи-приемки выполненных работ № БТС 71 от 21.12.2018 г. 

70. Заказ БТС 76-2.03-4185.12 Республика Бурятия, Селенгинский рн, г. Гусиноозерск, п. Тухум, квл 1, уч. 1/1/ПИР, СМР. Дата начала выполнения работ 10.11.2018 г. Дата окончания работ 30.11.2018 г. Стоимость работ 95 569,37 руб. в т.ч. НДС. Неоплаченная задолженность по акту 28 670,81 руб. в т.ч. НДС. Стороны подписали Акт сдачи-приемки выполненных работ № БТС 76 от 30.11.2018 г. 

71. Заказ БТС 78-2.03-3146-4004 Республика Бурятия, Бичурский рн, 

<

...> км северозападнее с. Окино-Ключи - Республика Бурятия, Бичурский рн, 2 км западнее с. Бичура, башня ОАО "Мегафон" /ПИР, СМР. Дата начала выполнения работ 01.06.2020 г. Дата окончания работ 28.07.2020 г. Стоимость работ 85 144,08 руб. в т.ч. НДС. Неоплаченная задолженность по акту 42 572,04 руб. в т.ч. НДС. Акт сдачи-приемки выполненных работ № БТС 78 от 28.07.2020 г. направлен ответчику 07.07.2022 г., повторно16.12.2022 г. 

72. Заказ БТС 79-2.03-3089.17-3082 Республика Бурятия, Бичурский рн, по.ст.Мулцугуны, гора Тарбагаш, Башня ОАО "Мегафон"- Республика Бурятия, около с. Новый Заган (перевал Заган), мачта РТПЦ/ПИР, СМР. Дата начала выполнения работ 01.02.2019 г. Дата окончания работ 28.07.2020 г. Стоимость работ 66 074,40 руб. в т.ч. НДС. Неоплаченная задолженность по акту 33 037,20 руб. в т.ч. НДС. Акт сдачи-приемки выполненных работ № БТС 79 от 28.07.2020 г. направлен ответчику 07.07.2022 г., повторно16.12.2022 г. 

73. Заказ БТС/И2/2.38-1119.14 

<

...>/ПИР, СМР. Дата начала выполнения работ 24.08.2019 г. Дата окончания работ 28.02.2019 г. Стоимость работ 171 889,49 руб. в т.ч. НДС. Неоплаченная задолженность по акту 51 566,85 руб. в т.ч. НДС. Стороны подписали Акт сдачи-приемки выполненных работ № БТС И2 от 28.02.2019 г 

74. Заказ БТС 35-3.1.03-3267.15.14 Республика Бурятия, Прибайкальский рн, 

<

...> башня ПАО "Мегафон"/ПИР, СМР. Дата начала выполнения работ 25.07.2018 г. Дата окончания работ 30.11.2018 г. Стоимость работ 103 244,87 руб. в т.ч. НДС. Неоплаченная задолженность по акту 30 973,46 руб. в т.ч. НДС. Стороны подписали Акт сдачи-приемки выполненных работ № БТС 35 от 30.11.2018 г. 

75. Заказ БТС 42-2.03-3267.16 

<

...> /ПИР, СМР. Дата начала выполнения работ 14.08.2018 г. Дата окончания работ 30.11.2018 г. Стоимость работ 113 464,30 руб. в т.ч. НДС. Неоплаченная задолженность по акту 34 039,29 руб. в т.ч. НДС. Стороны подписали Акт сдачи-приемки выполненных работ № БТС 42 от 30.11.2018 г. 

Общая сумма выполненных работ составила 7 272 919 рублей 96 копеек. Сумма задолженности ответчика перед истцом составила 2 439 374 рублей 89 копеек. 

В рамках вышеуказанных договоров ООО «Байкалтехнострой» надлежащим образом исполнило свои обязательства. До настоящего времени оплата в полном объеме не произведена. 

В рамках настоящего дела истец заявил о взыскании части задолженности по договорам субподряда в размере 10 000 руб.

Поскольку инициированный и реализованный истцом досудебный порядок урегулирования спора не принес положительного результата, истец обратился с настоящим иском в суд. 

Отказывая в удовлетворении исковых требований, суд указывает следующее. 

Спорные правоотношения регулируются общими нормами Гражданского кодекса Российской Федерации, специальными нормами материального права, содержащимися в параграфе 1 главы 37 Гражданского кодекса Российской Федерации (статья 702 - 729). 

Согласно пункту 1 статьи 702 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 740 ГК РФ по договору строительного подряда подрядчик обязуется в установленный договором срок построить по заданию заказчика определенный объект либо выполнить иные строительные работы, а заказчик обязуется создать подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную цену.

 Согласно пункту 1 статьи 746 ГК РФ оплата выполненных подрядчиком работ производится заказчиком в размере, предусмотренном сметой, в сроки и в порядке, которые установлены законом или договором строительного подряда. 

При отсутствии соответствующих указаний в законе или договоре оплата работ производится в соответствии со статьей 711 настоящего Кодекса.

В соответствии со статьями 309, 310 Гражданского кодекса Российской Федерации, обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями, при том, что односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом, другими законами или иными правовыми актами.

Согласно частью 1 статьи 314 ГК РФ если обязательство предусматривает или позволяет определить день его исполнения либо период, в течение которого оно должно быть исполнено (в том числе в случае, если этот период исчисляется с момента исполнения обязанностей другой стороной или наступления иных обстоятельств, предусмотренных законом или договором), обязательство подлежит исполнению в этот день или соответственно в любой момент в пределах такого периода. 

Статьей 65 АПК РФ предусмотрено, что каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать те обстоятельства, на которые оно ссылается, как на основание своих требований или возражений. 

Положениями части 1 статьи 65, статьей 68 АПК РФ предусмотрена обязанность лиц, участвующих в деле, представлять доказательства в обоснование их доводов и позиций по делу. Обстоятельства дела, которые согласно закону должны быть подтверждены определенными доказательствами, не могут подтверждаться в арбитражном суде иными доказательствами.

В соответствии с пунктом 1 статьи 64 АПК РФ доказательствами по делу являются полученные в предусмотренном настоящим Кодексом и другими федеральными законами порядке сведения о фактах, на основании которых арбитражный суд устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, обосновывающих требования и возражения лиц, участвующих в деле, а также иные обстоятельства, имеющие значение для правильного рассмотрения дела. В качестве доказательств допускаются письменные и вещественные доказательства, объяснения лиц, участвующих в деле, заключения экспертов, показания свидетелей, аудио- и видеозаписи, иные документы и материалы. 

Арбитражный суд принимает только те доказательства, которые имеют отношение к рассматриваемому делу (статья 67 АПК РФ). 

В соответствии со статьей 71 АПК РФ арбитражный суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств. Арбитражный суд оценивает относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности.

Основанием для возникновения обязательства заказчика по оплате обусловленных договором работ является сдача работ заказчику путем подписания акта выполненных работ (пункт 8 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 24.01.2000 №51 «Обзор практики разрешения споров по договору строительного подряда» (далее - информационное письмо №51). 

Сдача результата работ подрядчиком и приемка его заказчиком оформляются актом, подписанным обеими сторонами. При отказе одной из сторон от подписания акта в нем делается отметка об этом и акт подписывается другой стороной. Односторонний акт сдачи или приемки результата работ может быть признан судом недействительным лишь в случае, если мотивы отказа от подписания акта признаны им обоснованными (часть 4 статьи 753 ГК РФ).

Рассмотрев доводы отзыва, суд признает их обоснованными.

ООО «БТС» утверждает, что Работы Субподрядчиком были выполнены в полном объеме и предоставлен полный комплект приемо-сдаточной документации, в свою очередь, данное утверждение противоречит фактическим обстоятельствам дела.

В адрес АО «АРСЕНАЛ» поступил комплект документов от ООО «БТС» (вх.  № 325 от 15.07.2022 г.), в свою очередь, согласно приложенной к вышеуказанному письму почтовой описи отправления ООО «БТС» представлены только Заказы, КС-2, КС-3, счета-фактуры (без предоставления недостающей проектной документации).

В связи с чем, АО «АРСЕНАЛ» направило требование (исх. № 833/08/22 от 09.08.2022 г, трек 10739269012352, получено 25.08.2022 г.) о представлении недостающих документов в сроки, указанные в Актах выявленных недостатков (приложение к письму исх. № 833/08/22 от 09.08.2022 г.).

Позднее, в адрес АО «АРСЕНАЛ» 22 декабря 2022 г. (вх. № 606) поступил пакет приемо-сдаточных документов ООО «БТС» в рамках исполнения договоров подряда № МФ_ПБК_АМС №10-02/04/18 от 02.04.2018 и №МФ_ПБК_АМС №42-12/05/18 от 07.05.2018 г.

Ознакомившись с представленными документами, АО «АРСЕНАЛ» письмом исх. № 24/01/2023 от 18.01.2023г. (трек 12741076017503, выслано обратно отправителю 28.02.2023г.) повторно сообщило, что ООО «БТС» не представлен полный комплект приемо-сдаточных документов, согласно описи документов, приложенных к письму, ООО «БТС» направлены Заказы, Счета-фактуры, КС-2, КС-3. В свою очередь, ООО «БТС» не выполнены принятые на себя договорные обязательства в полном объеме по предоставлению полного комплекта приемо-сдаточных документов, указанных в ст. 3 Договора.

По заказам, указанным в нижеприведенной таблице, ООО «БТС» не представлен полный комплект приемо-сдаточных документов, в нарушение положений ст. 3 Договора.

1.

Заказ № 85-10АМС18 03-57862 от 19.02.2019 Бурятия, Тарбагатайский р-он, Саянтуйская санаторная школа интернат                        

Не представлен РНР, межевое дело

2.

Заказ № 88-2.03-3086-3115/БС 3086/Модернизация ТС от 20.03.2019 Бурятия, 

<

...> км юго восточнее с.Тарбагатай

Не представлен АПП оборудования

3.

Заказ № БТС170-2.03-3082.11-3090/БС 03-3082 МФ Бурятия 03082.11/Монтаж от 20.03.2019

Не представлен АПП оборудования

4.

Заказ №144-2.03-4252.14/БС 4252/СМР/ПНР от 30.04.2019 Бурятия, 

<

...> З

Сдать демонтированное оборудование,предоставить справку о выполнении ТУ

5.

Заказ №145-2.03-3200.15/БС 3200/Модернизация ЭКС от 15.03.2019 Бурятия, п.Октябрьский

Не представлен АПП оборудования

6.

Заказ №152-2.03-3111-3166.14/БС 03111/Модернизация ТС | от 28.05.2019 Бурятия, 

<

...>

Не представлен АПП оборудования

7.

Заказ №153-2.03-3090-3147.22/БС 03090/Модернизация ТС  от 20.03.2019 Бурятия, с.Мухоршибирь

Не представлен АПП оборудования

8.

Заказ №161-2.03-3106-3923/БС 31 Об/Модернизация ТС от 28.05.2018 Бурятия, г.Улан-Удэ, п.Аршан

Не представлен АПП оборудования

9.

Заказ №162-2.03-3090-3086.21/БС 3090-3086/Модернизация     ТС от 20.03.2018 Бурятия, с.Мухоршибирь

Не представлен АПП оборудования

 

10.

Заказ №163-2.03-3172.18-3146/БС 3172/Модернизация ТС от \ 20.03.2019 Бурятия, Кяхтинский р-он, с.Киран

Не представлен АПП оборудования

11.

Заказ №164-2.03-3172.17-4019/БС 3172/Модернизация ТС от I 20.03.2019 Бурятия, с.Кударо-Сомон

Не представлен АПП оборудования

12.

Заказ №165-2.03-4004-3089/БС 4004/Модернизация ТС от 29.06.2018 Бурятия, п.Бичура

Не представлен АПП оборудования

13.

Заказ №166-2.03-3272-3283.13/БС 3272/Модернизация ТС от   I 28.05.2019 Бурятия, с. Михайловка

Не представлен АПП оборудования

14.      

Заказ №167-2.03-3283.14-3902/БС 3283/Модернизация ТС от I 01.11.2019 Бурятия, Закаменский р-он, у.Дутулур

Не представлен АПП оборудования

15.

Заказ №168-2.03-3902-3992/БС 3902/Модернизация ТС от 12.09.2019 Бурятия, у.Дутулур

Не представлен АПП оборудования

16.

Заказ №180-2.03-4145.12/БС4145/МонтажАСТУЭ от 25.05.2019 Бурятия, у.Тихой, ул.Ленина,21

Не предоставлен фотоотчет выполняемых работ

17.

Заказ №185-2.03-3166-4018/БС 3166/Модернизация ТС от 28.05.2018 Бурятия, р-он Тункинский, 

<

...>

Не предоставлен ПИР в бумажном экземпляре, не представлен АПП оборудования

 

18.

Заказ №186-2.03-3056.18/БС 3056/SWAP БС от 01.11.2019  в Бурятия, пгт.Наушки                                                                         

Не предоставлен РНС в бумажном экземпляре

19.

Заказ №187-2.03-3152.16/БС 3152/Модернизация ТС от 30.04.2019 Бурятия, г.Улан-Удэ, 70км от дома ул.Жердева,90а  

Не предоставлен КМ, не представлены АПП оборудования,

ПИР в бумажном экземпляре

20.

Заказ №188-2.03-3045.18-3063/БС 3063/Модернизация ТС от  17.02.2020 Бурятия, 

<

...>                          

Не представлен ПИР в бумажном экземпляре, не

представлены ПТР

21.

Заказ № 36-20 АМС 18 03-3267/Монтаж ограждения от 15.08.2018

Не представлен ПИР в бумажном экземпляре

22.

Заказ № 78-2.03-3146-4004/Модернизация ТС от 30.06.2018

Не предоставлен АПП оборудования

23.

Заказ № 79-2.03-3089.17-3082/Модернизация ТС от 30.06.2018

Не предоставлен АПП оборудования

24.

Заказ № 179-2.03-3215.16/БС 3215/Монтаж АСТУЭ от : 01.05.2020 Бурятия, с.Петропавловка, ул.Центральная.6

Не представлен акт сдачи в электросети

25.

Заказ № 80-2.03-3184.17-3055/Модернизация ТС от 01.02.2019 Бурятия, г.Кяхта

Не предоставлен АПП оборудования

26.

Заказ № 140-2.03-3039.19/БС 3039/ПИР/СМР Бурятия,                          

пгт.Онохой, ул.Терешковой,

Не сдан DCDU на склад

27.

Заказ № 142-2.03-57169/4307.13/БС 57169/4307/ПИР/СМР от 01.07.2019 Бурятия, Тарбагатайский р-н                                                        

Не предоставлена справка о выполнении ТУ

 

В силу п. 5.7 и п. 7.13 Договора в случае непредоставления документов в количестве и в сроки, определенные статьей 3 настоящего Договора, до срока очередного платежа последний может быть задержан Подрядчиком до получения вышеуказанных документов без применения санкций со стороны Субподрядчика, в том числе по Заказам, Работы по которым выполнены без недостатков, до устранения Субподрядчиком всех недостатков выполненных Работ по Объекту связи.

Ввиду недобросовестного исполнения обязательств по своевременному завершению работ по Договору, в адрес ООО «БТС» была направлена Претензия о нарушении сроков сдачи работ исх. № 834/08/22 от 09.08.2022 г. (трек 10739269012345, 16.09.2022 г. возврат отправителю). Сумма начисленной неустойки, согласно указанной в Претензии, составила 893 509,76 рублей. 

Согласно п.7.14. Подрядчик имеет право без ущерба для любых иных способов взыскания удержать сумму штрафа или/и пени из любой суммы, которая причитается или может стать подлежащей уплате Субподрядчику по настоящему Договору на основании письменной Претензии, предъявленной Субподрядчику по факту соответствующего нарушения последним обязательств по настоящему Договору.

Ответ на вышеуказанную претензию не поступил, денежные средства в добровольном порядке уплачены не были, в связи с чем, АО «АРСЕНАЛ» проведен зачет встречных требований исх.№ 1039/10/22 от 04.10.2022 г. (трек 12708375046917, возврат отправителю 11.11.2022 г.) по следующим заказам на сумму 848 564,80 руб., в соответствии со ст. 410 ГК РФ и п.7.14 Договора.

1.   Заказ № 180-2.03-4145.12/БС 4145/Монтаж АСТУЭ от 25.05.2019 г. Бурятия, у. Тихой, ул.Ленина,21. (Сумма 15 321,60 руб.);

2.   Заказ № 184-2.03-3055.19/БС 3055/SWAP БС от 01.11.2019 г. Бурятия, г. Кяхта, мачта РТПЦ. (Сумма 41 949,68 руб.);

3.   Заказ № 174-2.03-3941.11/БС 3941/Монтаж АСТУЭ от 01.05.2020 г. Бурятия, п. Хоронхой. (Сумма 8 295,21 руб.);

4.   Заказ № 182-2.03-3913-14/БС 3913/Монтаж АСТУЭ от 01.11.2019 г. Бурятия, у. Ташир. (Сумма 8 265,96 руб.);

5.   Заказ № 185-2.03-3166-4018/БС 3166/Модернизация ТС от 28.05.2018 г. Бурятия, р-он Тункинский, 

<

...>. (Сумма 107120,16 руб.);

6.   Заказ № 187-2.03-3152.16/БС 3152/Модернизация ТС от 30.04.2019 г. Бурятия, г. Улан Удэ, 70км от дома ул.Жердева,90а. (сумма 10 608,30 руб.);

7.   Заказ № 186-2.03-3056.18/БС 3056/SWAP БС от 01.11.2019 г. Бурятия, пгт. Наушки 36. (сумма 22 342,48 руб.);

8.   Заказ № БТС170-2.03-3082.11-3090/БС 03-3082 МФ Бурятия 03082.11/ Монтаж от 20.03.2019 г. (Сумма 17 093,16 руб.);

9.   Заказ № 88-2.03-3086-3115/БС 3086/Модернизация ТС от 20.03.2019 г. Бурятия, 

<

...> км юго - восточнее с. Тарбагатай. (Сумма 9 097,20 руб.);

Ю.Заказ № 168-2.03-3902-3992/БС 3902/Модернизация ТС от 12.09.2019 г. Бурятия, у. Дутулур. (Сумма 23 002,56 руб.);

11.Заказ № 167-2.03-3283.14-3902/БС 3283/Модернизация ТС от 01.11.2019 г. Бурятия, Закаменский р-он, у. Дутулур. (Сумма 36 091,44 руб.);

12.3аказ № 80-2.03-3184.17-3055/Модернизация ТС от 01.02.2019 г. Бурятия, г. Кяхта. (Сумма 74 655,84 руб.);

13.3аказ № 161-2.03-3106-3923/БС 31 Об/Модернизация ТС от 28.05.2018 г. Бурятия, г. Улан-Удэ, п. Аршан. (Сумма 44 142,84 руб.);

14.3аказ № 162-2.03-3090-3086.21/БС 3090-3086/Модернизация ТС от 20.03.2018 г. Бурятия, с. Мухоршибирь. (Сумма 43 130,31 руб.);

15.3аказ №163-2.03-3172.18-3146/БС 3172/Модернизация ТС от 20.03.2019 Бурятия, Кяхтинский р-он, с. Киран. (Сумма 31 477,54 руб.);

16.3аказ №164-2.03-3172.17-4019/БС 3172/Модернизация ТС от 20.03.2019 Бурятия, с. Кударо-Сомон. (Сумма 25 087,61 руб.);

17.3аказ №166-2.03-3272-3283.13/БС 3272/Модернизация ТС от 28.05.2019 Бурятия, с. Михайловка. (Сумма 40 077,08 руб.);

18.3аказ №145-2.03-3200.15/БС 3200/Модернизация ЭКС от 15.03.2019 Бурятия, Октябрьский. (Сумма 6 104,70 руб.);

19.3аказ № 36-20 АМС 18 03-3267/Монтаж ограждения от 15.08.2018. (Сумма 7 131,03 руб.);

20.3аказ №153-2.03-3090-3147.22/БС 03090/Модернизация ТС от 20.03.2019 Бурятия, с. Мухоршибирь. (Сумма 41 648,54 руб.);

21.Заказ №152-2.03-3111 -3166.14/БС 03111/Модернизация ТС от 28.05.2019 Бурятия, 

<

...>. (сумма 28 335,89 руб.);

22.3аказ №165-2.03-4004-3089/БС 4004/Модернизация ТС от 29.06.2018 Бурятия, п. Бичура. (Сумма 25 647,05 руб.);

23.3аказ № 78-2.03-3146-4004/Модернизация ТС от 30.06.2018. (Сумма 42 572,04 руб.);

24.3аказ № 85-10АМС18 03-57862 от 19.02.2019 Бурятия, Тарбагатайский р-он, Саянтуйская санаторная школа интернат (сумма 15 924,60 руб.);

25.3аказ № 179-2.03-3215.16/БС 3215/Монтаж АСТУЭ от 01.05.2020 Бурятия, с.Петропавловка, ул.Центральная.6 (сумма 8 295,21 руб.);

26.3аказ № 79-2.03-3089.17-3082/Модернизация ТС от 30.06.2018 (сумма 33 037,20 руб.)

27.3аказ №188-2.03-3045.18-3063/БС 3063/Модернизация ТС от 17.02.2020 Бурятия, 

<

...> (сумма 71 192,93 руб.);

28.3аказ №157-2.03-30 90.23/БС 03-3090/Замена СКК от 20.04.2019 Бурятия, с. Мухоршибирь (сумма 10 916,64 руб.).

Письма АО «АРСЕНАЛ» исх. № 834/08/22 от 09.08.2022 г. и исх. № 1039/10/22 от 04.10.2022 г., исх. № 24/01/23 от 18.01.2023 г. оставлены без внимания и возвращены отправителю, в свою очередь, в силу ст. 165.1 ГК РФ Сообщения считаются доставленным и в тех случаях, если оно поступило лицу, которому оно направлено (адресату), но по обстоятельствам, зависящим от него, не было ему вручено или адресат не ознакомился с ним.

В силу п. 13 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 11.06.2020 № 6 "О некоторых вопросах применения положений Гражданского кодекса Российской Федерации о прекращении обязательств" для зачета в силу статьи 410 ГКРФ необходимо, чтобы по активному требованию наступил срок исполнения, за исключением случаев, когда такой срок не указан или определен моментом востребования. По смыслу статей 410, 315 ГК РФ для зачета не является необходимым наступление срока исполнения пассивного требования, если оно в соответствии с законом или договором может быть исполнено досрочно.

Если лицо получило заявление о зачете от своего контрагента до наступления срока исполнения пассивного требования при отсутствии условий для его досрочного исполнения или до наступления срока исполнения активного требования, то после наступления соответствующих сроков зачет считается состоявшимся в момент, когда обязательства стали способны к зачету, то есть наступили установленные законом условия для зачета.

В соответствии с п. 7 Информационного письма Президиума ВАС РФ от 29.12.2001 № 65 ст. 410 ГК РФ не требует, чтобы предъявляемое к зачету требование вытекало из того же обязательства или из обязательств одного вида.

Таким образом, суд приходит к выводу о правомерности прекращения обязательств ответчика перед истцом на спорную сумму путем зачёта встречных однородных (денежных) требования об уплате штрафных санкций за нарушение условий договоров в части просрочки.

Исходя из представленных в материалы дела доказательств, судом установлено, что задолженность ответчика перед истцом погашена зачетом взаимных требований в порядке статей 410, 421 Гражданского кодекса Российской Федерации и п.7.14 Договора в соответствии с уведомлением ответчика о зачете на сумму 848 564,80 руб.

По остальным заказам, заключенным между АО «АРСЕНАЛ» и ООО «БТС», а именно:

1. Заказ БТС 02.03-3163 от 05.04.2018 г., сроки выполнения работ 05.04.2018 г. по 30.10.2018 г. Стороны подписали Акт сдачи-приемки выполненных работ № БТС 2.1 от 28.05.2018 г.

2. Заказ БТС 28-2.03-3261.13 от 31.07.2018 г. сроки выполнения работ с 31.07.2018 г. по 30.12.2018 г., Стороны подписали Акт сдачи-приемки выполненных работ № БТС 28 от 21.12.2018 г.

3. Заказ БТС 32-2.03-3160.16 от 31.07.2018 г., сроки выполнения работ с 31.07.2018 г. по 30.12.2018 г., Стороны подписали Акт сдачи-приемки выполненных работ № БТС 32 от 25.12.2018 г.

4. Заказ БТС 34-2.03-3033.17 от 31.07.2018 г., сроки выполнения работ с 31.07.2018 г. по 30.12.2018 г., Стороны подписали Акт сдачи-приемки выполненных работ № БТС 34 от 20.12.2018 г.

5. Заказ БТС 44-2.03-3106-3038.18 от 02.04.2018 г., сроки выполнения работ с 04.04.2018 г. по 30.12.2018 г., Стороны подписали Акт сдачи-приемки выполненных работ № БТС 44 от 29.12.2018 г.

6. Заказ БТС 45-2.03-4307-3098.11 от 02.04.2018 г., сроки выполнения работ с 02.04.2018 г. по 30.10.2018 г., Стороны подписали Акт сдачи-приемки выполненных работ № БТС 45 от 17.12.2018 г.

7. Заказ БТС 53-2.03-3075.21 от 30.07.2018 г., сроки выполнения работ с 30.07.2018 г. по 30.12.2018 г., Стороны подписали Акт сдачи-приемки выполненных работ № БТС 53 от 20.12.2018 г.

8. Заказ БТС 58-2.38-3159.22 от 01.08.2018 г., сроки выполнения работ с 01.08.2018 г. по 30.12.2018 г., Стороны подписали Акт сдачи-приемки выполненных работ № БТС 58 от 25.12.2018 г.

9. Заказ БТС 65-2.03-3059-3075.20 от 04.04.2018, сроки выполнения работ с 04.04.2018 по 30.10.2018, Стороны подписали Акт сдачи-приемки выполненных работ № БТС 65 от 29.12.2018 г.

10.Заказ БТС 73-2.03-3299-3942.20 от 04.04.2018 г., сроки выполнения работ с 04.04.2018 г. по 30.10.2018 г., Стороны подписали Акт сдачи-приемки выполненных работ № БТС 73 от 29.12.2018 г.

11.Заказ БТС 124-2.03 -4003.15 от 21.05.2019 г., сроки выполнения работ с 21.05.2019 по 30.12.2019 г., Стороны подписали Акт сдачи-приемки выполненных работ № БТС 124 от 31.05.2019 г. 

12.3аказ БТС 125-2.03 -4011.16 от 21.05.2019 г., сроки выполнения работ с 21.05.2019 г. по 30.12.2019 г., Стороны подписали Акт сдачи-приемки выполненных работ № БТС 125 от 31.05.2019 г.

13.3аказ БТС 128-2.03 -4010.16 от 30.04.2019 г., сроки выполнения работ с 30.04.2019 по 30.10.2019 г., Стороны подписали Акт сдачи- приемки выполненных работ № БТС 128 от 28.06.2019 г.

14. Заказ БТС 129-2.03 -4012.15 от 30.04.2019 г., сроки выполнения работ с 30.04.2019 г. 30.110.2019 г., Стороны подписали Акт сдачи-приемки выполненных работ № БТС 129 от 28.06.2019 г.

15.  Заказ БТС 130-2.03 -3900.16 от 01.05.2019 г., сроки выполнения работ 01.05.2019 г. по 30.06.2019, Стороны подписали Акт сдачи-приемки выполненных работ № БТС 130 от 28.06.2019 г.

16. Заказ БТС 131-2.03 -3953.15 от 01.05.2019, сроки выполнения работ с 01.05.2019 по 30.06.2019, Стороны подписали Акт сдачи-приемки выполненных работ № БТС 131 от 28.06.2019 г.

17. Заказ БТС 132-2.03 -4150.14 от 01.05.2019 г., сроки выполнения работ с 01.05.2019 г. по 30.06.2019 г., Стороны подписали Акт сдачи- приемки выполненных работ № БТС 132 от 28.06.2019 г.

18. Заказ БТС 133-2.03 -3993.22 от 01.05.2019 г., сроки выполнения работ с 01.05.2019 г. по 30.06.2019 г., Стороны подписали Акт сдачи-приемки выполненных работ № БТС 133 от 28.06.2019 г.

19. Заказ БТС 134-2.03 -4257.13 от 01.05.2019 г., сроки выполнения работ с 01.05.2019 г. по 30.06.2019 г., Стороны подписали Акт сдачи- приемки выполненных работ № БТС 134 от 28.06.2019 г.

20.  Заказ БТС 135-2.03 -4350.12 от 01.05.2019 г., сроки выполнения работ с 01.05.2019 по 30.06.2019 г., Стороны подписали Акт сдачи-приемки выполненных работ № БТС 135 от 28.06.2019 г.

21.Заказ БТС 136-2.03 -4002.15 от 01.05.2019 г., сроки выполнения работ с 01.05.2019 г. по 30,06.2019 г., Стороны подписали Акт сдачи-приемки выполненных работ № БТС 136 от 28.06.2019 г.

22. Заказ БТС 137-2.03 -3202.16 от 01.05.2019 г., сроки выполнения работ с 01.05.2019 г. по 30.06.2019 г., Стороны подписали Акт сдачи-приемки выполненных работ № БТС 137 от 28.06.2019 г.

23.3аказ 138-2.03 -4007.18 от 01.05.2019, сроки выполнения работ с 01.05.2019 г. по 30.06.2019 г., Стороны подписали Акт сдачи- приемки выполненных работ № БТС 138 от 28.06.2019 г.

24.3аказ БТС 140-2.03-3039.19 от 20.02.2019 г., сроки выполнения работ с 20.02.2019 по 30.12.2019 г., Акт сдачи- приемки выполненных работ № БТС 140 от 27.08.2019 г.

25.  Заказ БТС 23-2.03-4245.15 от 27.05.2018 г., сроки выполнения работ с 27.05.2018 по 30.10.2018 г., Стороны подписали Акт сдачи-приемки выполненных работ № БТС 23 от 29.12.2018 г.

26. Заказ БТС 46-2.03-3913-3912 от 29.06.2018 г., сроки выполнения работ с 29.06.2018 г. по 30.10.2018 г., Стороны подписали Акт сдачи-приемки выполненных работ № БТС 46 от 29.12.2018 г.

27.3аказ БТС 70-2.03-3184-4116 от 28.05.2018 г., сроки выполнения работ с 28.05.2018 по 30.10.2018 г., Стороны подписали Акт сдачи-приемки выполненных работ № БТС 70 от 29.12.2018 г.

28.3аказ БТС 71-2.03-3297-3111 от 28.05.2018 г., сроки выполнения работ от 28.05.2018 по 30.10.2018 г., Стороны подписали Акт сдачи-приемки выполненных работ № БТС 71 от 21.12.2018 г. 29.3аказ БТС 42-2.03-3267.16 от 14.08.2018 г., сроки выполнения работ с 14.08.2018 по 30.12.2018 г., Стороны подписали Акт сдачи-приемки выполненных работ № БТС 42 от 30.11.2018 г.

30. Заказ БТС 15-2.03-3063 от 22.03.2018 г., сроки выполнения работ с 22.03.2018 г. по 30.10.2018 г., Акт сдачи-приемки выполненных работ № БТС 15 от 25.12.2018 г.

31. Заказ БТС 16-2.03-3138 от 22.03.2018, сроки выполнения работ с 22.03.2018 г. по 30.10.2018 г., Акт сдачи-приемки выполненных работ № БТС 16 от 25.12.2018 г.

32.   Заказ БТС 76-2.03-4185.12 от 10.11.2018 г., сроки выполнения работ с 10.11.2018 г. по 30.03.2019 г., Акт сдачи-приемки выполненных работ № БТС 76 от 30.11.2018 г.

33.  Заказ БТС/И2/2.38-1119.14 

<

...>/ПИР, СМР. Дата начала выполнения работ 24.08.2019 г. Дата окончания работ 28.02.2019 г. Акт сдачи-приемки выполненных работ № БТС И2 от 28.02.2019 г.

34. Заказ БТС 35-3.1.03-3267.15.14 Республика Бурятия, Прибайкальский рн, 

<

...> башня ПАО "Мегафон'УПИР, СМР. Дата начала выполнения работ 25.07.2018 г. Дата окончания работ 30.11.2018 г. Акт сдачи-приемки выполненных работ № БТС 35 от 30.11.2018 г.

35. Заказ БТС 141-2.03 4344.14 от 30.04.2019 г., сроки выполнения работ с 30.04.2019 г. по 30.10.2019 г., Акт сдачи-приемки выполненных работ № БТС 141 от 27.08.2019 г.

36. Заказ БТС 142-2.03 -57169/4307.13 от 01.07.2019, сроки выполнения работ с 01.07.2019 г. по 30.09.2019, Акт сдачи-приемки выполненных работ № БТС 142 от 16.08.2019 г.

37. Заказ БТС 144-2.03 -4252.14 от 30.04.2019 г., сроки выполнения работ с 30.04.2019 г. по 30.12.2019 г., Акт сдачи- приемки выполненных работ № БТС 144 от 30.07.2019 г.

38. Заказ БТС 127-2.03 -03951.16 от 15.05.2019 г., сроки выполнения работ с 15.05.2019 г. по 30.12.2019 г., Акт сдачи-приемки выполненных работ № БТС 127 от 31.05.2019 г.

39. Заказ БТС/И1/2.38-1004.12 

<

...>/ПИР, СМР. Дата начала выполнения работ 01.03.2019 г. Дата окончания работ 29.03.2019 г. Акт сдачи-приемки выполненных работ № БТС И1 от 29.03.2019 г.

40. Заказ БТС 118-03144.14/4G ОТ 01.04.2019 г., сроки выполнения работ с 01.04.2019 г. по 30.06.2019, Акт сдачи-приемки выполненных работ № БТС 118 от 27.05.2019 г.

41. Заказ БТС 120-2.03 -03061.17 от 15.05.2019 г., сроки выполнения работ с 15.05.2019 г. по 31.12.2019 г., Акт сдачи-приемки выполненных работ № БТС 120 от 31.05.2019 г.

42. Заказ БТС 121-2.03 -03152.17 

<

...>/ПИР, СМР. Дата начала выполнения работ 15.05.2019 г. Акт сдачи- приемки выполненных работ № БТС 121 от 31.05.2019 г.

43. Заказ БТС 122-2.03 -03252.18 от 15.05.2018, сроки выполнения работ с 15.05.2019 г. по 30.12.2019 г., Акт сдачи-приемки выполненных работ № БТС 122 от 31.05.2019 г.

44. Заказ БТС 123-2.03 -3286.18 

<

...>/ПИР, СМР. Дата начала выполнения работ 21.05.2019 г. Акт сдачи-приемки выполненных работ № БТС 123 от 31.05.2019 г.

45. Заказ БТС 48-2.03-3063-3074.21 от 22.03.2018 г., сроки выполнения работ с 22.03.2018 г. по 30.10.2018 г., Акт сдачи-приемки выполненных работ № БТС 48 от 25.12.2018 г.

46.  Заказ БТС 24-2.03-3994.11 от 31.07.2018 г., сроки выполнения работ с 31.07.2018 г. по 30.12.2018 г., Стороны подписали Акт сдачи-приемки выполненных работ № БТС 24 от 21.12.2018 г., ответчиком заявлено о пропуске истцом срока исковой давности в соответствии со статьями 196, 200 ГК РФ. Акты выполненных работ подписаны сторонами в 2018-2019 годах. 

В соответствии со статьей 195 ГК РФ исковой давностью признается срок для защиты права по иску лица, право которого нарушено. 

Согласно пункту 1 статьи 196 ГК РФ общий срок исковой давности составляет три года со дня, определяемого в соответствии со статьей 200 Кодекса.

В силу пункта 1 статьи 200 ГК РФ, если законом не установлено иное, течение срока исковой давности начинается со дня, когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении своего права и о том, кто является надлежащим ответчиком по иску о защите этого права. 

В пункте 3 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 29.09.2015 г. № 43 «О некоторых вопросах, связанных с применением норм Гражданского кодекса Российской Федерации об исковой давности» разъяснено, что течение исковой давности по требованиям юридического лица начинается со дня, когда лицо, обладающее правом самостоятельно или совместно с иными лицами действовать от имени юридического лица, узнало или должно было узнать о нарушении права юридического лица и о том, кто является надлежащим ответчиком (п. 1 ст. 200 ГК РФ). Вышеуказанные обстоятельства исключают возможность предъявления ООО «БТС» требований по оплате к АО «АРСЕНАЛ».

Судом установлено, что ООО «БТС» не представлено достаточных и бесспорных доказательств, на который истец основывает свои требования по истечению срока исковой давности.

С учетом изложенного, оценив представленные в материалы дела доказательства в их совокупности и взаимной связи, учитывая произведенный зачет встречных однородных требований, пропуск срока исковой давности, суд отказывает в удовлетворении исковых требований.

В силу статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации госпошлина за рассмотрение дела возлагается на истца.

Руководствуясь статьями 110, 112, 167-171, 229 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд 

РЕШИЛ:

В иске отказать. 

Решение подлежит немедленному исполнению. 

Решение может быть обжаловано в арбитражный суд апелляционной инстанции в срок, не превышающий пятнадцати дней со дня его принятия.

Судья                                                                                                       О.С. Гузеева