АРБИТРАЖНЫЙ СУД КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

РЕШЕНИЕ

25 июля 2025 года

Дело № А33-34297/2024

Красноярск

Резолютивная часть решения вынесена 15 июля 2025 года.

В полном объеме решение изготовлено 25 июля 2025 года.

Арбитражный суд Красноярского края в составе судьи Антроповой О.А., рассмотрев в судебном заседании дело по иску общества с ограниченной ответственностью "Проминвест" (ИНН 2462069508, ОГРН 1202400026950) 

к обществу с ограниченной ответственностью "Монолитстрой" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) 

о взыскании задолженности,

в присутствии в судебном заседании:

от истца: ФИО1, представитель по доверенности от 17.06.2025, личность удостоверена паспортом, в подтверждение высшего юридического образования представлен диплом (до и после перерыва - 18 июня 2025 года, 01 июля 2025 года, 15 июля 2025 года);

в отсутствие лиц, участвующих в деле (после перерыва - 15 июля 2025 года),

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Ершовой В.Е., 

установил:

общество с ограниченной ответственностью "Проминвест" (далее – истец) обратилось в Арбитражный суд Красноярского края с иском к обществу с ограниченной ответственностью "Монолитстрой" (далее – ответчик) о взыскании задолженности за выполненные работы в размере 1 187 273,91 руб.

Определением от 13.11.2024 исковое заявление оставлено судом без движения.

Определением от 09.12.2024 исковое заявление принято к производству суда в порядке упрощенного производства.

Определением от 17.02.2025 суд назначил судебное заседание по делу, рассматриваемому в порядке упрощенного производства, без перехода к рассмотрению дела по общим правилам искового производства.

Определением от 17.03.2025 суд перешел к рассмотрению дела по общим правилам искового производства.

В судебном заседании 27.05.2025 суд завершил предварительное судебное заседание и продолжил рассмотрение дела в стадии судебного разбирательства.

Ответчик в судебное заседание своих представителей не направил, о времени и месте его проведения извещен надлежащим образом путем направления определения и размещения информации в Картотеке арбитражных дел (http://kad.arbitr.ru/). Согласно части 3 статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации дело рассматривается в отсутствие ответчика.

17.06.2025 в материалы дела от ответчика через систему «Мой Арбитр» поступило ходатайство об отложении судебного разбирательства или объявлении перерыва, и дополнительный отзыв на исковое заявление, ходатайство о снижении неустойки на основании ст. 333 Гражданского кодекса Российской Федерации. В соответствии со статьей 66 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, поступившие документы судом приобщены к материалам дела.

Представитель истца изложил позицию по делу, с учетом представленного отзыва и ходатайства ответчика, в материалы дела представил дополнительные документы. В соответствии со статьей 66 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, поступившие документы судом приобщены к материалам дела.

В судебном заседании, в соответствии со статьей 163 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, объявлен перерыв до 13 час. 20 мин. 01 июля 2025 года. Судебное заседание будет продолжено по адресу: 

<

...>, зал № 437. Информация о перерыве в судебном заседании размещена на сайте «Картотека арбитражных дел» в сети Интернет.

После перерыва судебное заседание продолжено в 13 час. 23 мин. 01 июля 2025 года в присутствии в судебном заседании того же представителя истца.

Ответчик в судебное заседание своих представителей не направил, о времени и месте его проведения извещен надлежащим образом путем направления определения и размещения информации в Картотеке арбитражных дел (http://kad.arbitr.ru/). Согласно части 3 статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации дело рассматривается в отсутствие ответчика.

Представитель истца исковые требования поддержал с учетом уточнений, рассмотрение ходатайства ответчика о снижении неустойки на основании статьи 333 Гражданского кодекса Российской Федерации оставил на усмотрение суда.

В судебном заседании, в соответствии со статьей 163 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, объявлен перерыв до 16 час. 00 мин. 01 июля 2025 года. Судебное заседание будет продолжено по адресу: 

<

...>, зал № 437. Информация о перерыве в судебном заседании размещена на сайте «Картотека арбитражных дел» в сети Интернет.

После перерыва судебное заседание продолжено в 16 час. 00 мин. 01 июля 2025 года в отсутствие лиц, участвующих в деле (после перерыва - 01 июля 2025 года).

Лица, участвующие в деле, в судебное заседание своих представителей не направили, о времени и месте его проведения извещены надлежащим образом путем направления определения и размещения информации в Картотеке арбитражных дел (http://kad.arbitr.ru/). Согласно части 3 статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации дело рассматривается в их отсутствие.

До даты судебного заседания от истца поступило уточнение исковых требований в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, согласно которому просит взыскать с ответчика задолженность за выполненные работы в размере 1 154 126,97 руб.

Ходатайство принято судом в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.  

Рассмотрение дела продолжено с учетом уточнений.

В судебном заседании, в соответствии со статьей 163 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, объявлен перерыв до 11 час. 10 мин. 15 июля 2025 года. Судебное заседание будет продолжено по адресу: 

<

...>, зал № 437. Информация о перерыве в судебном заседании размещена на сайте «Картотека арбитражных дел» в сети Интернет.

После перерыва судебное заседание продолжено в 11 час. 11 мин. 15 июля 2025 года в присутствии в судебном заседании того же представителя истца.

Ответчик в судебное заседание своих представителей не направил, о времени и месте его проведения извещен надлежащим образом путем направления определения и размещения информации в Картотеке арбитражных дел (http://kad.arbitr.ru/). Согласно части 3 статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации дело рассматривается в отсутствие ответчика.

01.07.2025 в материалы дела от ответчика через систему «Мой Арбитр» поступило ходатайство об отложении судебного разбирательства или об объявлении перерыва. В соответствии со статьей 66 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, поступившие документы судом приобщены к материалам дела.

Суд определил отклонить ходатайство об отложении судебного разбирательства. 

В силу части 1 статьи 158 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд откладывает судебное разбирательство в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, а также в случае неявки в судебное заседание лица, участвующего в деле, если в отношении этого лица у суда отсутствуют сведения об извещении его о времени и месте судебного разбирательства.

Арбитражный суд может отложить судебное разбирательство по ходатайству лица, участвующего в деле, в связи с неявкой в судебное заседание его представителя по уважительной причине (часть 4 статьи 158 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Из изложенных норм следует, что арбитражный суд может отложить судебное разбирательство, то есть, у суда есть соответствующее право, а не обязанность.

В обоснование ходатайства об отложении судебного заседания, представленного в суд 18.06.2025, ответчик указал на нахождение представителя ООО «Монолитстрой» ФИО2 в командировке в Ростовской области в городе Ростове на Дону до 25.06.2025.

Судом, учитывая указанные обстоятельства, объявлен перерыв в судебном заседании до 01.07.2025.

В обоснование ходатайства об отложении судебного заседания, представленного в суд 01.07.2025, ответчик указал на невозможность участия представителя ответчика в судебном разбирательстве по причине временной нетрудоспособности (нахождение на больничном по уходу за ребенком), при этом указав, что представление больничного не представляется возможным, так как больничные листы в электронном виде.

Вместе с тем, доказательств, подтверждающих объективную невозможность участия представителя ответчика в судебном разбирательстве, в материалы дела не представлено.

В силу статьи 158 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации отложение судебного разбирательства является правом, а не обязанностью суда, при этом суд объявил перерыв в судебном заседании, однако представитель ответчика в судебное заседание после объявленного перерыва не явился.

Ходатайство об отложении рассмотрении дела мотивировано невозможностью явки представителя ответчика в судебное заседание по причине его временной нетрудоспособности. При этом доказательств в обоснование данного довода ответчик суду не представил, не обосновал невозможность участия в судебном заседании иного представителя, а также не привел обстоятельства, свидетельствующие о невозможности рассмотрения дела в отсутствие представителя, не указал какие дополнительные пояснения и доказательства намеревался представить представитель ответчика в случае отложения судебного разбирательства.

Арбитражный суд полагает, что отказывая в удовлетворении ходатайства об отложении судебного заседания, права ответчика не нарушает, поскольку после объявленного перерыва, новых доказательств представлено не было.

При таких обстоятельствах, руководствуясь статьями 158, 159 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд отказывает в удовлетворении ходатайства об отложении судебного заседания.

Представитель истца исковые требования с учетом уточнения поддержал.

В судебном заседании, в соответствии со статьей 163 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, объявлен перерыв до 12 час. 30 мин. 15 июля 2025 года. Судебное заседание будет продолжено по адресу: 

<

...>, зал № 437. Информация о перерыве в судебном заседании размещена на сайте «Картотека арбитражных дел» в сети Интернет.

После перерыва судебное заседание продолжено в 12 час. 30 мин. 15 июля 2025 года в отсутствие лиц, участвующих в деле (после перерыва - 15 июля 2025 года).

Лица, участвующие в деле, в судебное заседание своих представителей не направили, о времени и месте его проведения извещены надлежащим образом путем направления определения и размещения информации в Картотеке арбитражных дел (http://kad.arbitr.ru/). Согласно части 3 статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации дело рассматривается в их отсутствие.

При рассмотрении дела установлены следующие, имеющие значение для рассмотрения спора, обстоятельства.

Между обществом с ограниченной ответственностью "Монолитстрой" (далее – генподрядчик) и обществом с ограниченной ответственностью "Проминвест" (далее – субподрядчик) заключен ряд договоров субподряда. 

Договор субподряда № 1/2021 от 01.11.2021.

Согласно пункту 2.1 договора № 1/2021, субподрядчик обязан собственными силами, материалами и средствами либо силами, материалами и средствами привлеченных субподрядных организаций в соответствии с утвержденной проектно-сметной документацией, графиком производства работ выполнить работы, указанные в п. 1.2 договора, в также выполнить иные работы, определенно в договоре не упомянутые, но необходимые для полного сооружения и/или нормальной эксплуатации объекта в соответствии с его целевым назначением; сдать результаты работ генподрядчику, а генподрядчик обязуется принять результат работ субподрядчика и оплатить его в порядке и на условиях договора.

В соответствии с пунктом 1.1 договора № 1/2021, объект производства работ расположен по адресу: Красноярский край, Емельяновский район, поселок «Солонцы», жилой массив «Новалэнд», квартал № 10, жилой дом №1. 

По условиям пункта 1.2 договора № 1/2021, субподрядчик обязуется выполнить работы по устройству террас, входных групп, спусков в подвал. 

Пунктом 3.1 договора № 1/2021 установлено, что цена договора определяется согласно локально сметному расчету (Приложение № 1), утвержденному генеральным подрядчиком и являющемуся неотъемлемой частью договора и составляет: 345 994,07 руб., в том числе НДС 20 %.

Согласно пункту 4.1 договора № 1/2021, начальный срок выполнения работ – 01.11.2021, конечный срок выполнения работ – 20.12.2021.

Порядок сдачи и приемки выполненных работ согласован сторонами в разделе 7 договора № 1/2021, согласно которому субподрядчик в период выполнения работ по договору ежемесячно за текущий отчетный период (календарный месяц) подготавливает акты о приемке выполненных работ по форме КС-2 в двух экземплярах и справку о стоимости выполненных работ по форме КС-3 в трех экземплярах и до 25 числа отчетного месяца согласовывает их у уполномоченного представителя генподрядчика, отвечающего за строительный контроль на объекте, и до 28 числа отчетного месяца предоставляет в производственно-технический отдел генподрядчика для их рассмотрения и согласования (пункт 7.1 договора № 1/2021).

Порядок оплаты выполненных работ согласован сторонами в разделе 8 договора № 1/2021, согласно которому генподрядчик осуществляет оплату субподрядчику стоимость выполненных работ на основании актов приемки выполненных работ по форме КС-2 и справки о стоимости выполненных работ по форме КС-3 за вычетом суммы гарантийного удержания в размере 10 % от полной стоимости работ и затрат в течение 45 дней с даты подписания генподрядчиком акта выполненных работ по форме КС-2 (пункт 8.6 договора № 1/2021). 

ООО «ПромИнвест» исполнило обязательства по договору на сумму 345 994,07 руб., что подтверждается представленными в материалы дела подписанными сторонами актом о приемке выполненных работ по форме КС-2 от 03.03.2022 на сумму 345 994,07 руб.; справкой о стоимости выполненных работ по форме КС-3 от 03.03.2022 на сумму 345 994,07 руб. 

01.11.2021 стороны заключили дополнительное соглашение № 1 к договору субподряда № 1/2021 от 01.11.2021 в котором согласовали аванс в размере 50 % на сумму 171 997 рублей и определили исключить из договора положения п. 8.4. - 8.12 о гарантийном удержании.

15.03.2022 стороны заключили дополнительное соглашение № 2 к договору субподряда № 1/2021 от 01.11.2021 в котором согласовали выполнение дополнительных работ на сумму 584 640 рублей, согласно ресурсных сметных расчетов (Приложение №1 к дополнительному соглашению).

ООО «ПромИвест» исполнило обязательства по вышеуказанному дополнительному соглашению на сумму 584 640 рублей, что подтверждается актом о приемке выполненных работ по форме КС-2 от 25.05.2022 на сумму 584 640 рублей; справкой о стоимости выполненных работ по форме КС-3 от 25.05.2022 на сумму 584 640 рублей.

21.06.2022 стороны заключили дополнительное соглашение № 3 к договору субподряда № 1/2021 от 01.11.2021, в котором согласовали выполнение дополнительных работ на сумму 250 002 рублей, согласно локально ресурсных сметных расчетов (Приложение № 1 к дополнительном соглашению).

ООО «ПромИнвест» исполнило обязательства по вышеуказанному дополнительному соглашению на сумму 250 001 руб., что подтверждается следующими первичными документами: актом о приемке выполненных работ по форме КС-2 от 25.12.2022 на сумму 213 756 рублей; актом о приемке выполненных работ по форме КС-2 от 25.12.2022 на сумму 12 116 рублей; актом о приемке выполненных работ по форме КС-2 от 25.12.2022 на сумму 3 030 рублей; актом о приемке выполненных работ по форме КС-2 от 25.12.2022 на сумму 6 058 рублей; актом о приемке выполненных работ по форме КС-2 от 25.12.2022 на сумму 6 058 рублей; актом о приемке выполненных работ по форме КС-2 от 25.12.2022 на сумму 8 983 рублей; справкой о стоимости выполненных работ по форме КС-3 от 25.12.2022 на 250 001 рублей. Общая сумма выполненных работ по вышеуказанному дополнительному соглашению составила 250 001 руб.

27.06.2022 стороны заключили дополнительное соглашение № 4 к договору субподряда № 1/2021 от 01.11.2021, в котором согласовали дополнительные работы на сумму 362 101 рублей 20 копеек, согласно локальных ресурсных сметных расчетов (Приложение № 1 к дополнительному соглашению).

ООО «ПромИнвест» исполнило обязательства по вышеуказанному дополнительному соглашению на сумму 362 100 руб., что подтверждается: актом о приемке выполненных работ по форме КС-2 от 25.12.2022 на сумму 18 074 рублей; актом о приемке выполненных работ по форме КС-2 от 25.12.2022 на сумму 25 466 рублей; актом о приемке выполненных работ по форме КС-2 от 25.12.2022 на сумму 8 832 рублей; актом о приемке выполненных работ по форме КС-2 от 25.12.2022 на сумму 8 832 рублей; актом о приемке выполненных работ по форме КС-2 от 25.12.2022 на сумму 8 832 рублей; актом о приемке выполненных работ по форме КС-2 от 25.12.2022 на сумму 8 832 рублей; актом о приемке выполненных работ по форме КС-2 от 25.12.2022 на сумму 25 466 рублей; актом о приемке выполненных работ по форме КС-2 от 25.12.2022 на сумму 52 987 рублей; актом о приемке выполненных работ по форме КС-2 от 25.12.2022 на сумму 40 031 рублей; актом о приемке выполненных работ по форме КС-2 от 25.12.2022 на сумму 164 748 рублей; справкой о стоимости выполненных работ по форме КС-3 от 25.12.2022 на сумму 362 100 рублей; УПД № 152 от 26.12.2022 на сумму 362 100 рублей. Общая сумма выполненных работ по вышеуказанному дополнительному соглашению составляет 362 100 рублей.

25.11.2022 стороны заключили дополнительное соглашение № 5 к договору субподряда № 1/2021 от 01.11.2021, в котором согласовали дополнительные работы на сумму 360 454 рублей 80 копеек, согласно локальных ресурсных сметных расчетов (Приложение № 1 к дополнительному соглашению).

ООО «ПромИнвест» исполнило обязательства по вышеуказанному дополнительному соглашению на сумму 360 454, 80 руб., что подтверждается актом о приемке выполненных работ по форме КС-2 от 25.02.2023 на сумму 360 454 рублей 80 копеек.

22.11.2022 стороны заключили дополнительное соглашение № 6 к договору субподряда № 1/2021 от 01.11.2021, в котором согласовали дополнительные работы на сумму 179 621 рублей 25 копеек, согласно локальных ресурсных сметных расчетов (Приложение № 1 к дополнительному соглашению).

ООО «ПромИнвест» выполнило обязательства по вышеуказанному дополнительному соглашению на сумму 179 621,25 руб., что подтверждается: актом о приемке выполненных работ по форме КС-2 от 25.02.2023 на сумму 43 013 рублей; актом о приемке выполненных работ по форме КС-2 от 25.02.2023 на сумму 10 309 рублей; актом о приемке выполненных работ по форме КС-2 от 25.02.203 на сумму 12 754 рублей; актом о приемке выполненных работ по форме КС-2 от 25.02.2023 на сумму 50 518 рублей; актом о приемке выполненных работ по форме КС-2 от 25.02.2023 на сумму 26 354 рублей; актом о приемке выполненных работ по форме КС-2 от 25.02.2023 на сумму 24 722 рублей; актом о приемке выполненных работ по форме КС-2 от 25.02.2023 на сумму 11 949 рублей. Общая стоимость выполненных работ по вышеуказанному дополнительному соглашению составляет 179 621 рублей 25 копеек.

05.12.2022 стороны заключили дополнительное соглашение № 7 к договору субподряда № 1/2021 от 01.11.2021, в котором согласовали дополнительные работы на сумму 21 646 рублей 80 копеек, согласно локальных ресурсных сметных расчетов (Приложение № 1 к дополнительному соглашению).

ООО «ПромИнвест» выполнило обязательства по вышеуказанному дополнительному соглашению на сумму 21 646,80 руб., что подтверждается актом о приемке выполненных работ по форме КС-2 от 25.02.2023 на сумму 21 646 рублей 80 копеек.

20.01.2023 стороны заключили дополнительное соглашение № 8 к договору субподряда № 1/2021 от 01.11.2021, в котором согласовали дополнительные работы на сумму 47 587 рублей 20 копеек, согласно локальных ресурсных сметных расчетов (Приложение № 1 к дополнительному соглашению).

ООО «ПромИнвест» исполнило обязательства по вышеуказанному дополнительному соглашению на сумму 47 587,20 руб., что подтверждается актом о приемке выполненных работ по форме КС-2 от 25.02.2023 на сумму 47 587 рублей 20 копеек.

Также ООО «ПромИнвест» в рамках вышеуказанного договора выполнило дополнительные работы на сумму 102 264 рублей, что подтверждается актом о приемке выполненных работ по форме КС-2 от 17.05.2023 на сумму 102 264 рублей; справкой о стоимости выполненных работ по форме КС-3 от 17.05.2023 на сумму 102 264 рублей.

Общая сумма выполненных ООО «ПромИнвест» работ по договору субподряда № 1/2021 от 01.11.2021 составляет 2 254 309,12 руб. (345994,07 + 584640 + 250001 + 362100 + 360454,80 + 179621,25 + 21646,80 + 47587,20 + 102264).

ООО «Монолитстрой» произвело оплату в пользу ООО «ПромИнвест» на сумму в размере 2 722 997,03 руб., что подтверждается следующими платежными поручениями: платежное поручение № 9848 от 25.11.2021 на сумму 172 997 рублей 03 копейки; платежное поручение № 681 от 28.01.2022 на сумму 150 000 рублей; платежное поручение № 1391 от 24.02.2022 на сумму 150 000 рублей; платежное поручение № 2514 от 30.03.2022 на сумму 200 000 рублей; платежное поручение № 4107 от 06.05.2022 на сумму 250 000 рублей; платежное поручение № 4917 от 30.05.2022 на сумму 300 000 рублей; платежное поручение № 5616 от 20.06.2022 на сумму 300 000 рублей; платежное поручение № 6969 от 03.08.2022 на сумму 200 000 рублей; платежное поручение № 7416 от 17.08.2022 на сумму 500 000 рублей; платежное поручение № 8083 от 13.09.2022 на сумму 200 000 рублей; платежное поручение от 30.11.2022 на сумму 300 000 рублей;

Общая сумма оплат в пользу ООО «ПромИнвест» за выполненные работы по договору составила 2 722 997,03 руб.

Договор субподряда № 10/2 от 01.05.2022.

Согласно пункту 2.1 договора № 10/2, субподрядчик обязан собственными силами, материалами и средствами либо силами, материалами и средствами привлеченных субподрядных организаций в соответствии с утвержденной проектно-сметной документацией, графиком производства работ выполнить работы, указанные в п. 1.2 договора, в также выполнить иные работы, определенно в договоре не упомянутые, но необходимые для полного сооружения и/или нормальной эксплуатации объекта в соответствии с его целевым назначением; сдать результаты работ генподрядчику, а генподрядчик обязуется принять результат работ субподрядчика и оплатить его в порядке и на условиях договора.

В соответствии с пунктом 1.1 договора № 10/2, объект производства работ расположен по адресу: Красноярский край, Емельяновский район, поселок «Солонцы», жилой массив «Новалэнд», квартал № 10, жилой дом №2. 

По условиям пункта 1.2 договора № 10/2, субподрядчик обязуется выполнить работы по устройству монолитных спусков в подвал, монолитных плит перекрытия подвала под лестничными маршами, перегородки из кирпича в районе лестничных маршей, устройство перемычки. 

Пунктом 3.1 договора № 10/2 установлено, что цена договора определяется согласно локально сметному расчету (Приложение № 1), утвержденному генеральным подрядчиком и являющемуся неотъемлемой частью договора и составляет: 861 068,40 руб., в том числе НДС 20 %.

Согласно пункту 4.1 договора № 10/2, начальный срок выполнения работ – 01.05.2022, конечный срок выполнения работ – 31.05.2022.

Порядок сдачи и приемки выполненных работ согласован сторонами в разделе 7 договора № 10/2, согласно которому субподрядчик в период выполнения работ по договору ежемесячно за текущий отчетный период (календарный месяц) подготавливает акты о приемке выполненных работ по форме КС-2 в двух экземплярах и справку о стоимости выполненных работ по форме КС-3 в трех экземплярах и до 25 числа отчетного месяца согласовывает их у уполномоченного представителя генподрядчика, отвечающего за строительный контроль на объекте, и до 28 числа отчетного месяца предоставляет в производственно-технический отдел генподрядчика для их рассмотрения и согласования (пункт 7.1 договора № 10/2).

Порядок оплаты выполненных работ согласован сторонами в разделе 8 договора № 10/2, согласно которому генподрядчик осуществляет оплату субподрядчику стоимость выполненных работ на основании актов приемки выполненных работ по форме КС-2 и справки о стоимости выполненных работ по форме КС-3 за вычетом суммы гарантийного удержания в размере 10 % от полной стоимости работ и затрат в течение 45 дней с даты подписания генподрядчиком акта выполненных работ по форме КС-2 (пункт 8.6 договора № 10/2). 

ООО «ПромИнвест» исполнило обязательства по выполнению работ на сумму 861 068,40 руб., что подтверждается актом о приемке выполненных работ по форме КС-2 от 25.07.2022 на сумму 12 326 рублей; актом о приемке выполненных работ по форме КС-2 от 25.07.2022 на сумму 848 742 рублей; справкой о стоимости выполненных работ по форме КС-3 от 25.07.2022 на сумму 861 068 рублей 40 копеек.

02.12.2022 стороны заключили дополнительное соглашение № 1 к договору субподряда № 10/2 от 01.11.2022, в котором согласовали дополнительные работы на сумму 106 406 рублей 40 копеек, согласно локальных ресурсных сметных расчетов (Приложение № 1 к дополнительному соглашению).

ООО «ПромИнвет» исполнило обязательства по настоящему дополнительному соглашению, что подтверждается следующим: актом о приемке выполненных работ по форме КС-2 от 13.03.2023 на сумму 26 730 рублей, справкой о стоимости выполненных работ по форме КС-3 от 13.03.2023 на сумму 26 730 рублей; актом о приемке выполненных работ по форме КС-2 от 17.05.2023 на сумму 26 356 рублей; актом о приемке выполненных работ по форме КС-2 от 17.05.2023 на сумму 10 309 рублей; актом о приемке выполненных работ по форме КС-2 от 17.05.2023 на сумму 43 012 рублей; справка о стоимости выполненных работ по форме КС-3 от 17.05.2023 на сумму 79 676 рублей 40 копеек; актом о приемке выполненных работ по форме КС-2 от 19.06.2023 на сумму 33 937 рублей; актом о приемке выполненных работ по форме КС-2 от 19.06.2023 на сумму 13 831 рублей; актом о приемке выполненных работ по форме КС-2 от 19.06.2023 на сумму 7 852 рублей.

Также ООО «ПромИнвест» выполнило дополнительные работы на сумму 55 620 рублей 47 копеек, что подтверждается следующим: актом о приемке выполненных работ по форме КС-2 от 19.06.2023 на сумму 33 937 рублей; актом о приемке выполненных работ по форме КС-2 от 19.06.2023 на сумму 13 831 рублей; актом о приемке выполненных работ по форме КС-2 от 19.06.2023 на сумму 7 852 рублей; справкой о стоимости выполненных работ по форме КС-3 от 19.06.2023 на сумму 55 620 рублей 47 копеек.

Общая сумма выполненных работ по договору № 10/2 от 01.05.2022, дополнительному соглашению к нему и дополнительных работ составила 1 023 095,27 руб. (861068,40 + 106406,40 + 55620,47).

Договор субподряда № 3/302112022_ от 02.11.2022.

Согласно пункту 2.1 договора № 3/302112022_, субподрядчик обязан собственными силами, материалами и средствами либо силами, материалами и средствами привлеченных субподрядных организаций в соответствии с утвержденной проектно-сметной документацией, графиком производства работ выполнить работы, указанные в п. 1.2 договора, в также выполнить иные работы, определенно в договоре не упомянутые, но необходимые для полного сооружения и/или нормальной эксплуатации объекта в соответствии с его целевым назначением; сдать результаты работ генподрядчику, а генподрядчик обязуется принять результат работ субподрядчика и оплатить его в порядке и на условиях договора.

В соответствии с разделом 1 договора № 3/302112022_, объект производства работ расположен по адресу: Красноярский край, Емельяновский район, поселок «Солонцы», жилой массив «Новалэнд», микрорайон «Живем», квартал № 3, жилой дом №4. 

По условиям пункта 1.2 договора № 3/302112022_, субподрядчик обязуется выполнить работы по устройству отмостки, на основании рабочей документации и проектно-рабочей документации. 

Пунктом 3.1 договора № 3/302112022_установлено, что цена договора определяется согласно локально сметному расчету (Приложение № 1), утвержденному генеральным подрядчиком и являющемуся неотъемлемой частью договора и составляет: 95 938,86 руб., в том числе НДС 20 %.

Согласно пункту 4.1 договора № 3/302112022_, начальный срок выполнения работ – 02.11.2022, конечный срок выполнения работ – 14.11.2022.

Порядок сдачи и приемки выполненных работ согласован сторонами в разделе 7 договора № 3/302112022_, согласно которому субподрядчик в период выполнения работ по договору ежемесячно за текущий отчетный период (календарный месяц) подготавливает акты о приемке выполненных работ по форме КС-2 в двух экземплярах и справку о стоимости выполненных работ по форме КС-3 в трех экземплярах и до 25 числа отчетного месяца согласовывает их у уполномоченного представителя генподрядчика, отвечающего за строительный контроль на объекте, и до 28 числа отчетного месяца предоставляет в производственно-технический отдел генподрядчика для их рассмотрения и согласования (пункт 7.1 договора № 3/302112022_).

Порядок оплаты выполненных работ согласован сторонами в разделе 8 договора № 3/302112022_, согласно которому генподрядчик осуществляет оплату субподрядчику стоимость выполненных работ на основании актов приемки выполненных работ по форме КС-2 и справки о стоимости выполненных работ по форме КС-3 за вычетом суммы гарантийного удержания в размере 10 % от полной стоимости работ и затрат в течение 45 дней с даты подписания генподрядчиком акта выполненных работ по форме КС-2 (пункт 8.6 договора № 3/302112022_). 

ООО «ПромИнвест» исполнило обязательства по указанному договору на сумму 95 938,86 руб., что подтверждается актом о приемке выполненных работ по форме КС-2 от 25.12.2022 на сумму 95 938 рублей 86 копеек; справкой о стоимости выполненных работ по форме КС-3 от 25.12.2022 на сумму 95 938 рублей 86 копеек. Общая стоимость выполненных ООО «ПромИнвест» работ по договору № 3/302112022_ от 02.11.2022 составила 95 938 рублей 86 копеек.

Договор субподряда № 5/1 от 12.01.2023.

Согласно пункту 2.1 договора № 5/1, субподрядчик обязан собственными силами, материалами и средствами либо силами, материалами и средствами привлеченных субподрядных организаций в соответствии с утвержденной проектно-сметной документацией, графиком производства работ выполнить работы, указанные в п. 1.2 договора, в также выполнить иные работы, определенно в договоре не упомянутые, но необходимые для полного сооружения и/или нормальной эксплуатации объекта в соответствии с его целевым назначением; сдать результаты работ генподрядчику, а генподрядчик обязуется принять результат работ субподрядчика и оплатить его в порядке и на условиях договора.

В соответствии с пунктом 1.1 договора № 5/1, объект производства работ расположен по адресу: Красноярский край, Емельяновский район, поселок «Солонцы», жилой массив «Новалэнд», микрорайон «Живем», квартал № 5, жилой дом №1. 

По условиям пункта 1.2 договора № 5/1, субподрядчик обязуется выполнить работы по устройству сети канализации на основании рабочей документации и проектно-рабочей документации. 

Пунктом 3.1 договора № 5/1 установлено, что цена договора определяется согласно локально сметному расчету (Приложение № 1), утвержденному генеральным подрядчиком и являющемуся неотъемлемой частью договора и составляет: 21 969,20 руб., в том числе НДС 20 %.

Согласно пункту 4.1 договора № 5/1, начальный срок выполнения работ – 12.01.2023, конечный срок выполнения работ – 30.06.2023.

Порядок сдачи и приемки выполненных работ согласован сторонами в разделе 7 договора № 5/1, согласно которому субподрядчик в период выполнения работ по договору ежемесячно за текущий отчетный период (календарный месяц) подготавливает акты о приемке выполненных работ по форме КС-2 в двух экземплярах и справку о стоимости выполненных работ по форме КС-3 в трех экземплярах и до 25 числа отчетного месяца согласовывает их у уполномоченного представителя генподрядчика, отвечающего за строительный контроль на объекте, и до 28 числа отчетного месяца предоставляет в производственно-технический отдел генподрядчика для их рассмотрения и согласования (пункт 7.1 договора № 5/1).

Порядок оплаты выполненных работ согласован сторонами в разделе 8 договора № 5/1, согласно которому генподрядчик осуществляет оплату субподрядчику стоимость выполненных работ на основании актов приемки выполненных работ по форме КС-2 и справки о стоимости выполненных работ по форме КС-3 за вычетом суммы гарантийного удержания в размере 10 % от полной стоимости работ и затрат в течение 45 дней с даты подписания генподрядчиком акта выполненных работ по форме КС-2 (пункт 8.6 договора № 5/1). 

ООО «ПромИнвест» исполнил обязательства по выполнению строительных работ, что подтверждается актом о приемке выполненных работ по форме КС-2 от 25.02.2023 на сумму 131 815 рублей 20 копеек; справкой о стоимости выполненных работ по форме КС-3 от 25.02.2023 на сумму 131 815 рублей 20 копеек.

20.01.2023 стороны заключили дополнительное соглашение № 1 к договору субподряда № 5/1 от 12.01.2023, в котором согласовали дополнительные работы на сумму 532 161 рублей 60 копеек, согласно локальных ресурсных сметных расчетов (Приложение № 1 к дополнительному соглашению).

ООО «ПромИнвет» исполнило обязательства по указанному дополнительному соглашению, что подтверждается следующим: актом о приемке выполненных работ по форме КС-2 от 01.11.2023 на сумму 100 312 рублей 80 копеек; актом о приемке выполненных работ по форме КС-2 от 01.11.2023 на сумму 31 285 рублей 20 копеек; актом о приемке выполненных работ по форме КС-2 от 01.11.2023 на сумму 117 600 рублей; актом о приемке выполненных работ по форме КС-2 от 01.11.2023 на сумму 45 003 рублей 60 копеек; актом о приемке выполненных работ по форме КС-2 от 01.11.2023 на сумму 132 660 рублей; актом о приемке выполненных работ по форме КС-2 от 01.11.2023 на сумму 105 300 рублей; справкой о стоимости выполненных работ по форме КС-3 от 01.11.2023 на сумму 532 161 рублей 60 копеек.

Общая сумма выполненных ООО «ПромИнвест» работ по договору № 5/1 от 12.01.2023 и дополнительному соглашению к нему составила 663 976 рублей 80 копеек (532161,60 +131815,20).

Ответчик произвел оплату в пользу истца на сумму 1 000 000 руб., что подтверждается платежным поручением от 24.01.2023. Также в рамках данного договора ООО «ПромИнвест» приобрело у ООО «Монолитстрой» строительные материалы на сумму 1 350 681 рублей 62 копейки, данное обстоятельство не оспаривается истцом и подтверждается актом сверки взаимных расчетов от 30.10.2024.

Договор субподряда № 5/2 от 12.01.2023.

Согласно пункту 2.1 договора № 5/2, субподрядчик обязан собственными силами, материалами и средствами либо силами, материалами и средствами привлеченных субподрядных организаций в соответствии с утвержденной проектно-сметной документацией, графиком производства работ выполнить работы, указанные в п. 1.2 договора, в также выполнить иные работы, определенно в договоре не упомянутые, но необходимые для полного сооружения и/или нормальной эксплуатации объекта в соответствии с его целевым назначением; сдать результаты работ генподрядчику, а генподрядчик обязуется принять результат работ субподрядчика и оплатить его в порядке и на условиях договора.

В соответствии с пунктом 1.1 договора № 5/2, объект производства работ расположен по адресу: Красноярский край, Емельяновский район, поселок «Солонцы», жилой массив «Новалэнд», микрорайон «Живем», квартал № 5, жилой дом №2. 

По условиям пункта 1.2 договора № 5/2, субподрядчик обязуется выполнить работы по устройству сети канализации на основании рабочей документации и проектно-рабочей документации. 

Пунктом 3.1 договора № 5/2 установлено, что цена договора определяется согласно локально сметному расчету (Приложение № 1), утвержденному генеральным подрядчиком и являющемуся неотъемлемой частью договора и составляет: 149 176,80 руб., в том числе НДС 20 %.

Согласно пункту 4.1 договора № 5/2, начальный срок выполнения работ – 12.01.2023, конечный срок выполнения работ – 30.06.2023.

Порядок сдачи и приемки выполненных работ согласован сторонами в разделе 7 договора № 5/2, согласно которому субподрядчик в период выполнения работ по договору ежемесячно за текущий отчетный период (календарный месяц) подготавливает акты о приемке выполненных работ по форме КС-2 в двух экземплярах и справку о стоимости выполненных работ по форме КС-3 в трех экземплярах и до 25 числа отчетного месяца согласовывает их у уполномоченного представителя генподрядчика, отвечающего за строительный контроль на объекте, и до 28 числа отчетного месяца предоставляет в производственно-технический отдел генподрядчика для их рассмотрения и согласования (пункт 7.1 договора № 5/2).

Порядок оплаты выполненных работ согласован сторонами в разделе 8 договора № 5/2, согласно которому генподрядчик осуществляет оплату субподрядчику стоимость выполненных работ на основании актов приемки выполненных работ по форме КС-2 и справки о стоимости выполненных работ по форме КС-3 за вычетом суммы гарантийного удержания в размере 10 % от полной стоимости работ и затрат в течение 45 дней с даты подписания генподрядчиком акта выполненных работ по форме КС-2 (пункт 8.6 договора № 5/2). 

ООО «ПромИнвест» обязательства по выполнению работ исполнило, что подтверждается актом о приемке выполненных работ по форме КС-2 от 25.02.2023 на сумму 149 176 рублей 80 копеек; справкой о стоимости выполненных работ по форме КС-3 от 25.02.2023 на сумму 149 176 рублей 80 копеек. Общая сумма выполненных работ по договору № 5/2 от 12.01.2023 составила 149 176 рублей 80 копеек.

Договор субподряда № 12012023 от 12.01.2023.

Согласно пункту 2.1 договора № 12012023, субподрядчик обязан собственными силами, материалами и средствами либо силами, материалами и средствами привлеченных субподрядных организаций в соответствии с утвержденной проектно-сметной документацией, графиком производства работ выполнить работы, указанные в п. 1.2 договора, в также выполнить иные работы, определенно в договоре не упомянутые, но необходимые для полного сооружения и/или нормальной эксплуатации объекта в соответствии с его целевым назначением; сдать результаты работ генподрядчику, а генподрядчик обязуется принять результат работ субподрядчика и оплатить его в порядке и на условиях договора.

В соответствии с пунктом 1.1 договора № 12012023, объект производства работ расположен по адресу: Красноярский край, Емельяновский район, поселок «Солонцы», жилой массив «Новалэнд», микрорайон «Живем общий сети». 

По условиям пункта 1.2 договора № 12012023, субподрядчик обязуется выполнить работы по устройству наружные сети водоснабжения на основании рабочей документации и проектно-рабочей документации. 

Пунктом 3.1 договора № 12012023 установлено, что цена договора определяется согласно локально сметному расчету (Приложение № 1), утвержденному генеральным подрядчиком и являющемуся неотъемлемой частью договора и составляет: 1 532 367,42 руб., в том числе НДС 20 %.

Согласно пункту 4.1 договора № 12012023, начальный срок выполнения работ – 12.01.2023, конечный срок выполнения работ – 30.06.2023.

Порядок сдачи и приемки выполненных работ согласован сторонами в разделе 7 договора № 12012023, согласно которому субподрядчик в период выполнения работ по договору ежемесячно за текущий отчетный период (календарный месяц) подготавливает акты о приемке выполненных работ по форме КС-2 в двух экземплярах и справку о стоимости выполненных работ по форме КС-3 в трех экземплярах и до 25 числа отчетного месяца согласовывает их у уполномоченного представителя генподрядчика, отвечающего за строительный контроль на объекте, и до 28 числа отчетного месяца предоставляет в производственно-технический отдел генподрядчика для их рассмотрения и согласования (пункт 7.1 договора № 12012023).

Порядок оплаты выполненных работ согласован сторонами в разделе 8 договора № 12012023, согласно которому генподрядчик осуществляет оплату субподрядчику стоимость выполненных работ на основании актов приемки выполненных работ по форме КС-2 и справки о стоимости выполненных работ по форме КС-3 за вычетом суммы гарантийного удержания в размере 10 % от полной стоимости работ и затрат в течение 45 дней с даты подписания генподрядчиком акта выполненных работ по форме КС-2 (пункт 8.6 договора № 12012023). 

ООО «ПромИнвест» исполнило обязательства по договору субподряда, что подтверждается следующим: актом о приемке выполненных работ по форме КС-2 от 15.05.2023 на сумму 446 094 рублей; справкой о стоимости выполненных работ по форме КС-3 от 15.05.2023 на сумму 446 094 рублей 12 копеек; актом о приемке выполненных работ по форме КС-2 от 21.04.2023 на сумму 709 851 рублей; актом о приемке выполненных работ по форме КС-2 от 25.03.2023 на сумму 419 731 рублей; актом о приемке выполненных работ по форме КС-2 от 21.04.2023 на сумму 402 785 рублей; справкой о стоимости выполненных работ по форме КС-3 от 21.04.2023 на сумму 1 532 367 рублей 42 копейки. Общая сумма выполненных ООО «ПромИнвест» работ по договору № 12012023 от 12.01.2023 составила 1 978 461 рублей 54 копейки (1532367,42 + 446094,12).

Договор субподряда № 02112022 от 02.11.2022.

Согласно пункту 2.1 договора № 02112022, субподрядчик обязан собственными силами, материалами и средствами либо силами, материалами и средствами привлеченных субподрядных организаций в соответствии с утвержденной проектно-сметной документацией, графиком производства работ выполнить работы, указанные в п. 1.2 договора, в также выполнить иные работы, определенно в договоре не упомянутые, но необходимые для полного сооружения и/или нормальной эксплуатации объекта в соответствии с его целевым назначением; сдать результаты работ генподрядчику, а генподрядчик обязуется принять результат работ субподрядчика и оплатить его в порядке и на условиях договора.

В соответствии с пунктом 1.1 договора № 02112022, объект производства работ расположен по адресу: Красноярский край, Емельяновский район, поселок «Солонцы», жилой массив «Новалэнд», микрорайон «Живем», квартал № 3, жилой дом №1. 

По условиям пункта 1.2 договора № 02112022, субподрядчик обязуется выполнить работы по устройству отмостки на основании рабочей документации и проектно-рабочей документации. 

Пунктом 3.1 договора № 02112022 установлено, что цена договора определяется согласно локально сметному расчету (Приложение № 1), утвержденному генеральным подрядчиком и являющемуся неотъемлемой частью договора и составляет: 95 994,17 руб., в том числе НДС 20 %.

Согласно пункту 4.1 договора № 02112022, начальный срок выполнения работ – 02.11.2022, конечный срок выполнения работ – 14.11.2022.

Порядок сдачи и приемки выполненных работ согласован сторонами в разделе 7 договора № 02112022, согласно которому субподрядчик в период выполнения работ по договору ежемесячно за текущий отчетный период (календарный месяц) подготавливает акты о приемке выполненных работ по форме КС-2 в двух экземплярах и справку о стоимости выполненных работ по форме КС-3 в трех экземплярах и до 25 числа отчетного месяца согласовывает их у уполномоченного представителя генподрядчика, отвечающего за строительный контроль на объекте, и до 28 числа отчетного месяца предоставляет в производственно-технический отдел генподрядчика для их рассмотрения и согласования (пункт 7.1 договора № 02112022).

Порядок оплаты выполненных работ согласован сторонами в разделе 8 договора № 02112022, согласно которому генподрядчик осуществляет оплату субподрядчику стоимость выполненных работ на основании актов приемки выполненных работ по форме КС-2 и справки о стоимости выполненных работ по форме КС-3 за вычетом суммы гарантийного удержания в размере 10 % от полной стоимости работ и затрат в течение 45 дней с даты подписания генподрядчиком акта выполненных работ по форме КС-2 (пункт 8.6 договора № 02112022). 

ООО «ПромИнвест» исполнило обязательства по указанному договору, что подтверждается актом о приемке выполненных работ по форме КС-2 от 12.03.2024 на сумму 95 994 рублей 17 копеек; справкой о стоимости выполненных работ по форме КС-3 от 12.03.2024 на сумму 95 994 рублей 17 копеек. Общая сумма выполненных ООО «ПромИнвест» работ по договору № 02112022 от 02.11.2022 составила 95 994 рублей 17 копеек.

Согласно расчету истца, ООО «Монолитстрой» оплатил в пользу ООО «ПромИнвест» денежные средства в размере 3 722 997 рублей 03 копеек, исходя из следующих платежных документов: платежное поручение № 681 от 28.01.2022 на сумму 150 000 рублей; платежное поручение № 1391 от 24.02.2022 на сумму 150 000 рублей; платежное поручение № 2514 от 30.03.2022 на сумму 200 000 рублей; платежное поручение № 4107 от 06.05.20222 на сумму 250 000 рублей; платежное поручение № 4917 от 30.05.2022 на сумму 300 000 рублей; платежное поручение № 5616 от 20.06.2022 на сумму 300 000 рублей; платежное поручение № 6969 от 03.08.2022 на сумму 200 000 рублей; платежное поручение № 7416 от 17.08.2022 на сумму 500 000 рублей; платежное поручение № 8083 от 13.09.2022 на сумму 200 000 рублей; платежное поручение от 30.11.2022 на сумму 300 000 рублей; платежное поручение от 24.01.2023 на сумму 1 000 000 рублей; (150 000 +150 000 + 200 000 + 250 000 + 300 000 + 300 000 + 200 000 + 500 000 + 200 000 + 300 000 +1 000 000).

ООО «Монолитстрой» реализовал строительные материалы в пользу ООО «ПромИвест» на общую сумму в размере 1 350 681 рублей 62 копейки, что признается истцом и отражено в акте сверки взаимных расчетов.

ООО «ПромИнвест» выполнило строительные работы в пользу ООО «Монолитстрой» на общую сумму в размере 6 260 952 рублей 56 копеек, согласно следующему учету

- договор № 1/2021 от 01.11.2021 на сумму 2 254 309 рублей 12 копеек;

- договор № 10/2 от 01.05.2022 на сумму 1 023 095 рублей 27 копеек;

- договор № 3/302112022 от 02.11.2022 на сумму 95 938 рублей 86 копеек;

- договор № 5/1 от 12.01.2023 на сумму 663 976 рублей 80 копеек;

- договор № 5/2 от 12.01.2023 на сумму 149 176 рублей 80 копеек;

- договор № 12012023 от 12.01.2023 на сумму 1 978 461 рублей 54 копейки;

- договор № 02112022 от 02.11.2022 на сумму 95 994 рублей 17 копеек.

(2 254 309,12 + 1 023 095,27 + 95 938,86 + 663 976,80 + 149 176,80 + 1 978 461,54 + 95 994,17)

Итоговый расчет задолженности ООО «Монолитстрой» в пользу ООО «ПромИнвест» выглядит следующим образом:

6 260 960,09 – 3 722 997,03 – 1 350 681,62 = 1 187 273 рублей 91 копейка. Данная сумма отражена в акте сверки взаимных расчетов от 30.10.2024, согласно которому ООО «Монолитстрой» имеет задолженность перед ООО «ПромИнвест» в размере 1 187 273 рублей 91 копейка, поскольку стороны произвели сальдирование встречных обязательств по всем вышеуказанным договорам субподряда. 

В целях соблюдения досудебного порядка урегулирования спора истцом в адрес ответчика направлена претензия исх. № 13П от 13.08.2024 с требованием произвести оплату задолженности в размере 1 187 273,91 руб. Претензия получена ответчиком 13.08.2024, согласно отметке на документе о входящей корреспонденции.

В связи с неисполнением ответчиком обязанности по оплате стоимости выполненных работ в полном объеме, истец обратился в суд с иском о взыскании задолженности за выполненные работы в размере 1 187 273,91 руб.

Позиция ответчика. ООО «Монолитстрой» заявило о сальдировии встречных однородных требований в размере 2 778 236,05 руб., что является неустойкой за нарушение сроков выполнения работ по договору субподряда № 1/2021 от 01.11.2021.

ООО «ПромИнвест» соглашается с позицией ответчика о возможности провести сальдирование в отношении однородных денежных требований в рамках одного договора и дополнительных соглашениях к нему, в связи с чем, сумма исковых требований в размере 1 187 273 рублей 91 копейка подлежит снижению на сумму неустойки в размере 33 146,94 руб. (1 187 273,91-33 146,94) = 1 154 126 рублей 97 копеек.

Судом в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации приято уточнение размера исковых требований. Требование рассматривается судом с учетом принятого уточнения.

Исследовав представленные доказательства, оценив доводы лиц, участвующих в деле, арбитражный суд пришел к следующим выводам.

Согласно статье 123 Конституции Российской Федерации, статьям 7, 8, 9 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, судопроизводство осуществляется на основе состязательности и равенства сторон.

Из положений части 1 статьи 4 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации следует, что заинтересованное лицо вправе обратиться в арбитражный суд за защитой своих нарушенных или оспариваемых прав и законных интересов в порядке, установленном кодексом.

В соответствии со статьей 8 Гражданского кодекса Российской Федерации, гражданские права и обязанности возникают из оснований, предусмотренных законом и иными правовыми актами, а также из действий граждан и юридических лиц, которые хотя и не предусмотрены законом или такими актами, но в силу общих начал и смысла гражданского законодательства порождают гражданские права и обязанности. В том числе гражданские права и обязанности могут возникать из договоров и иных сделок, предусмотренных законом, а также из договоров и иных сделок, хотя и не предусмотренных законом, но не противоречащих ему.

Согласно статье 307 Гражданского кодекса Российской Федерации, в силу обязательства одно лицо (должник) обязано совершить в пользу другого лица (кредитора) определенное действие, как то: передать имущество, выполнить работу, оказать услугу, внести вклад в совместную деятельность, уплатить деньги и т.п., либо воздержаться от определенного действия, а кредитор имеет право требовать от должника исполнения его обязанности. Обязательства возникают из договоров и других сделок, вследствие причинения вреда, вследствие неосновательного обогащения, а также из иных оснований, указанных в настоящем Кодексе.

В силу статьи 309 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями. Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом, другими законами или иными правовыми актами (ст. 310 ГК РФ).

Из материалов дела следует, что между сторонами заключен ряд договоров №1/2021 от 01.11.2021, № 10/2 от 01.05.2022, № 3/30211 от 02.11.2022, № 5/1 от 12.01.2023, № 5/2 от 12.01.2023, № 12012023 от 12.01.2023, № 02112022 от 02.11.2022, которые, исходя из их содержания, относятся к договорам подряда. Отношения сторон, возникшие вследствие заключения названных договоров, регулируются положениями главы 37 Гражданского кодекса Российской Федерации.

В соответствии со статьей 702 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

Материалами дела подтверждается и ответчиком не оспаривается, что в результате взаимодействия между сторонами по договорам №1/2021 от 01.11.2021, № 10/2 от 01.05.2022, № 3/30211 от 02.11.2022, № 5/1 от 12.01.2023, № 5/2 от 12.01.2023, № 12012023 от 12.01.2023, № 02112022 от 02.11.2022, по выполнению работ и их оплате, на стороне ответчика состоялся долг на сумму 1 187 273,91 руб.

Ответчик заявил о сальдировии встречного требования в размере 2 778 236,05 руб., что является неустойкой за нарушение сроков выполнения работ по договору субподряда № 1/2021 от 01.11.2021.

Ответчиком произведен расчет неустойки за нарушение сроков выполнения работ по договору № 1/2021 от 01.11.2021 и дополнительным соглашениям к нему в соответствии с пунктом 13.2.1 договора №1/2021 от 01.11.2021 исходя из ставки 1% от стоимости несвоевременно выполненных работ.

Правоотношения сторон спора возникли из одного и того же договора подряда. Имеющиеся у сторон друг к другу требования являются с одной стороны требованием об оплате работ, а с другой стороны - требованием об уплате финансовых санкций.

Согласно сложившейся судебной практике сальдирование имеет место тогда, когда в рамках одного договора (либо нескольких взаимосвязанных договоров) определяется завершающая обязанность сторон при прекращении договорных отношений полностью (либо их отдельного этапа). Сопоставление обязанностей сторон из одних отношений и осуществление арифметических (расчетных) операций с целью определения лица, на которое возлагается завершающее исполнение (с суммой такого исполнения), не может быть квалифицировано как зачет.

Таким образом, механизм сальдирования, каким его знает судебная практика, выражается в двух самостоятельных и последовательных явлениях.

С одной стороны, на определенном этапе взаимоотношения сторон договора у них возникают взаимные сальдоспособные требования. По мере возникновения такие требования автоматически взаимопоглащаются (то есть по существу - прекращаются полностью или в части наименьшего), чем снижают объективно существующую долговую нагрузку обоих сторон. Это процесс взаимопоглащения требований ("схлапывание") является содержанием сальдирования.

С другой стороны, есть и чисто информационный момент, который заключается в том, что стороны или суд должны вычислить остаток (сальдо) долговой нагрузки после уже произошедшего взаимопоглащения долгов. То есть математическое выведение результата (сальдо) с одновременной констатацией факта взаимного прекращения в прошлом требований является конечной стадией сальдирования.

Однако нужно понимать, что на этой стадии прекращение обязательств не происходит, а лишь удостоверяется факт, сколько всего и у кого из сторон осталось долговой нагрузки.

Именно по этой причине прекратившие свое существование в результате сальдирования долги (требования) не могут быть предметом иска (встречного иска), так как не существуют к текущий момент времени (по крайней мере в полном объеме).

Таким образом, в рамках одних и тех же завершившихся подрядных правоотношений заказчик и подрядчик имели денежные притязания друг к другу, взаимный учет которых привел бы к определению итогового обязательства (его размера и обязанной стороны), а надлежащее исполнение прекратило бы его и разрешило все финансовые претензии сторон.

Так, в соответствии со статьями 702, 708, 709 и 720 ГК РФ обязательственное правоотношение по договору подряда состоит из двух основных встречных обязательств, определяющих тип этого договора (далее - основные обязательства): обязательства подрядчика выполнить в натуре работы надлежащего качества в согласованный срок и обязательства заказчика уплатить обусловленную договором цену в порядке, предусмотренном сделкой (статья 328 ГК РФ).

Нарушение подрядчиком своих обязательств порождает необходимость перерасчета итогового платежа заказчика путем уменьшения цены договора на сумму начисленной неустойки за просрочку выполнения работ. Подобное сальдирование вытекает из существа подрядных отношений и происходит в силу встречного характера основных обязательств заказчика и подрядчика, при этом сальдо складывается автоматически, дополнительного волеизъявления на сальдирование не требуется.

Так, согласно пункту 13.2.1 договора № 1/2021 от 01.11.2021, субподрядчик на основании требования генподрядчика несет ответственность за просрочку выполнения промежуточных (ежемесячных) сроков выполнения работ согласно разделу 4 договора – неустойку в размере 1% от стоимости несвоевременно выполненных работ, но не более 10 000 руб. 

Пунктом 4.1 договора № 1/2021 от 01.11.2021 предусмотрено, что начальный и конечный сроки выполнения работ, а также сроки завершения отдельных этапов работ (промежуточные сроки) согласовываются сторонами и фиксируются в графике производства работ (приложение № 2) составленном по форме, указанной в приложении № 2.1 к договору. Начальный срок выполнения работ – 01.11.2021, конечный срок выполнения работ – 20.12.2021.

Проанализировав условия пункта о согласовании ответственности в совокупности с условиями договора в целом, суд, руководствуясь статьей 431 Гражданского кодекса Российской Федерации, пришел к выводу о не согласованной сторонами возможности взыскания неустойки за нарушение конечного срока выполнения работ.

Исходя из буквального толкования условий спорного договора, сторонами не согласована неустойка за просрочку выполнения именно конечного срока.

Поскольку договором условие о начислении неустойки не согласовано, учитывая, что судом установлен и истцом не опровергнут факт нарушения сроков выполнения работ по договору № 1/2021 от 01.11.2021 и дополнительным соглашениям к нему, к сальдированию подлежит сумма ответственности за нарушение сроков выполнения работ, рассчитанная по правилам статьи 395 Гражданского кодекса Российской Федерации.

В случаях неправомерного удержания денежных средств, уклонения от их возврата, иной просрочки в их уплате подлежат уплате проценты на сумму долга. Размер процентов определяется ключевой ставкой Банка России, действовавшей в соответствующие периоды. Эти правила применяются, если иной размер процентов не установлен законом или договором (пункт 1 статьи 395 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Суд, проверив произведенный истцом расчет процентов за пользование чужими денежными средствами, установил правомерность применения статьи 395 Гражданского кодекса Российской Федерации. Расчет проверен судом и признан верным. Установлено, что расчет процентов произведен истцом в соответствии с фактическими обстоятельствами дела и условиями договора.

ООО «ПромИнвест» соглашается с позицией ответчика о возможности провести сальдирование в отношении однородных денежных требований в рамках одного договора и дополнительных соглашениях к нему, в связи с чем, сумма исковых требований в размере 1 187 273 рублей 91 копейка подлежит снижению на сумму ответственности в размере 33 146,94 руб. (1 187 273,91-33 146,94) = 1 154 126 рублей 97 копеек.

Судом в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации приято уточнение размера исковых требований. Требование рассматривается судом с учетом принятого уточнения.

Из положений пункта 1 статьи 711 ГК РФ следует, что, если договором подряда не предусмотрена предварительная оплата выполненной работы или отдельных ее этапов, заказчик обязан уплатить подрядчику обусловленную цену после окончательной сдачи результатов работы при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в согласованный срок, либо с согласия заказчика досрочно.

Доказательств оплаты 1 154 126 рублей 97 копеек долга в материалы дела не представлено.

В силу статьи 309 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями. Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом, другими законами или иными правовыми актами (ст. 310 ГК РФ).

При указанных обстоятельствах, суд пришел к выводу о том, что обязательство по оплате выполненных работ на момент рассмотрения спора является наступившим, требование истца о взыскании задолженности в размере 1 154 126,97 руб. законным и обоснованным, и подлежащим удовлетворению.

В соответствии с частью 2 статьи 168 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при принятии решения арбитражный суд распределяет судебные расходы. 

В силу статьи 101 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебные расходы состоят из государственной пошлины и судебных издержек, связанных с рассмотрением дела арбитражным судом.

Согласно пункту 1 статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны.

Государственная пошлина по настоящему спору (ценой 1 154 126,97 руб.) составляет 59 624 руб.

Истцом понесены судебные расходы по уплате государственной пошлины в размере 60 618 руб., что подтверждается платежным поручением от 04.12.2024 № 543.

С учетом результатов рассмотрения дела, суд приходит к выводу о наличии оснований для взыскания с ответчика в пользу истца 59 624 руб. судебных расходов по уплате государственной пошлины.

Излишне уплаченная государственная пошлина подлежит возврату истцу из федерального бюджета на основании статьи 333.40 Налогового кодекса Российской Федерации.

Настоящее решение выполнено в форме электронного документа, подписано усиленной квалифицированной электронной подписью судьи и считается направленным лицам, участвующим в деле, посредством его размещения в установленном порядке в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в режиме ограниченного доступа.

По ходатайству лиц, участвующих в деле, копии решения на бумажном носителе могут быть направлены им в пятидневный срок со дня поступления соответствующего ходатайства заказным письмом с уведомлением о вручении или вручены им под расписку.

Руководствуясь статьями 110, 167 – 170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Красноярского края

РЕШИЛ:

иск удовлетворить.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Монолитстрой" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью "Проминвест" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) 1 154 126,97 руб. долга, 59 624 руб. расходов по уплате государственной пошлины. 

Возвратить обществу с ограниченной ответственностью "Проминвест" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) из федерального бюджета 994 руб. государственной пошлины, уплаченной по платежному поручению от 04.12.2024 № 543

Разъяснить лицам, участвующим в деле, что настоящее решение может быть обжаловано в течение месяца после его принятия путем подачи апелляционной жалобы в Третий арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Красноярского края.

Судья

О.А. Антропова