6_43001505 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ 

115225, г.Москва, ул. Большая Тульская, д. 17 

http://www.msk.arbitr.ru 

Именем Российской Федерации Р Е Ш Е Н И Е (в порядке ст. 176 АПК РФ)

Дело № А40-155742/24-6-1149

07 апреля 2025 года

город Москва

 Арбитражный суд города Москвы в составе: судьи Коршиковой Е.В., при ведении протокола судебного заседания секретарем Муртазалиевым Р.Р., рассмотрев в открытом судебном заседании 

дело по иску ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УРАЛЬСКИЕ ЛОКОМОТИВЫ" (624093, СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ВЕРХНЯЯ ПЫШМА, УЛ. ПАРКОВАЯ, Д.36, ОГРН: 

<

***>, Дата присвоения ОГРН: 05.05.2010, ИНН: 

<

***>)  

к ответчику ОБЩЕСТВУ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИМЕНС МОБИЛЬНОСТЬ" (115184, Г.МОСКВА, УЛ. БОЛЬШАЯ ТАТАРСКАЯ, Д. 9, ЭТ/ПОМ/КОМ 5/I/55, ОГРН: 

<

***>, Дата присвоения ОГРН: 10.08.2018, ИНН: 

<

***>)  

о признании недействительным односторонний отказ от поставок и гарантийного обслуживания комплектов оборудования по договору № 642/534-11 от 07.09.2011 (уведомление № УЛ-FM-Desiro-310322-005 от 31.03.2022); признании недействительным дополнительное соглашение № 26 от 30.09.2022 к договору № 642/534-11 от 07.09.2011; признании недействительным дополнительное соглашение № 27 от 25.08.2022 к договору № 642/534-11 от 07.09.2011; обязании исполнить договор № 642/534-11 от 07.09.2011г. в редакции дополнительного соглашения № 24 от 25.10.2021, а именно осуществить поставку комплектов оборудования №№ 256, 264-273 для электропоездов и выполнить все обязательства, предусмотренные договором № 642/534-11 от 07.09.2011г.; взыскании неустойку за просрочку поставки комплектов оборудования для электропоездов ЭС2Г, ЭС1П «Ласточка» в размере 25 454 929,79 рубль по состоянию на 30.08.2024, в том числе: 451 977,61 рубль за период с 10.06.2021 по 17.01.2022 (по комплектам оборудования, поставленным с просрочкой до получения уведомления о форс-мажоре);12 128 579,91 рубль за период с 10.05.2022 по 09.11.2022(по комплектам оборудования, поставленным с просрочкой после получения уведомления о форс-мажоре); 12 874 372,27 рублей за период с 14.08.2022 по 30.08.2024 (по непоставленным комплектам оборудования).  

третьи лица: Московская межрегиональная транспортная прокуратура, ОАО «РЖД», ООО «ТД СТМ»  

при участии: 

от истца – ФИО1 по дов. от 16.10.2023г. (дип. от 30.06.2005г.)  

от ответчика – не явился, извещен 

от третьих лиц – 1. ФИО2 по дов. 02.08.2025 (удост.) 2,3. не явились, извещены  

Р Е Ш И Л:

Признать недействительным односторонний отказ ООО «Сименс Мобильность» (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>) от поставок и гарантийного обслуживания комплектов оборудования по договору № 642/534-11 от 07.09.2011 (уведомление № УЛ-FM-Desiro-310322-005 от 31.03.2022).  

 Признать недействительным дополнительное соглашение № 26 от 30.09.2022 к договору № 642/534-11 от 07.09.2011.  

 Признать недействительным дополнительное соглашение № 27 от 25.08.2022 к договору № 642/534-11 от 07.09.2011.  

 Обязать ООО «Сименс Мобильность» (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>) исполнить договор № 642/534-11 от 07.09.2011г. в редакции дополнительного соглашения № 24 от 25.10.2021, а именно осуществить поставку Комплектов оборудования № 256, 264-273 для электропоездов и выполнить все обязательства, предусмотренные договором № 642/534-11 от 07.09.2011г.  

 Взыскать с ООО "СИМЕНС МОБИЛЬНОСТЬ" (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>) в пользу ООО "УРАЛЬСКИЕ ЛОКОМОТИВЫ" (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>) неустойку в размере 25 454 929 руб. 79 коп., а также расходы по оплате государственной пошлины в размере 109 903 руб.  

 Взыскать с ООО "СИМЕНС МОБИЛЬНОСТЬ" (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>) в доход федерального бюджета РФ госпошлину в размере 52 372 руб.  

 Решение суда может быть обжаловано в течение месяца в Девятый арбитражный апелляционный суд.  

Судья Е.В. Коршикова