Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области

191124, Санкт-Петербург, ул. Смольного, д.6

http://www.spb.arbitr.ru

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

Дело № А56-27306/2021

09 сентября 2021 года

г.Санкт-Петербург

Резолютивная часть решения объявлена  05 июля 2021 года.

Полный текст решения изготовлен  09 сентября 2021 года.

Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области в составесудьи  Дороховой Н.Н.,

при ведении протокола судебного заседания ФИО1, 

рассмотрев в судебном заседании дело по иску

публичного акционерного общества «Россети Ленэнерго» (196247, город Санкт-Петербург, площадь Конституции, 1, ОГРН: 

<

***>, Дата присвоения ОГРН: 22.07.2002, ИНН: 

<

***>)

к обществу с ограниченной ответственностью «Штаб» (195279, Санкт-Петербург город, шоссе Революции, дом 69, литер А, офис 403, ОГРН: 

<

***>, Дата присвоения ОГРН: 03.10.2012, ИНН: 

<

***>)

о расторжении договора, взыскании неустойки,

по встречному иску об обязании выполнить технологическое присоединение, взыскании неустойки, 

при участии

от истца: ФИО2 по доверенности от 21.11.2019, 

от ответчика: ФИО3 по доверенности от 01.06.2021, 

установил:

публичное акционерное общество «Россети Ленэнерго», адрес: 196247,                          Санкт-Петербург, пл. Конституции, 1, ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***> (далее – ПАО «Россети Ленэнерго»), обратилось в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области с иском к обществу с ограниченной ответственностью «Штаб», адрес: 195279, Санкт-Петербург, шоссе Революции,  д. 69, лит. А, офис 403, ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***> (далее –   ООО «Штаб»), о расторжении договора от 29.12.2017 № ОД-ГтЭС-35303-17/50438-Э-17, о взыскании 99 976,24 руб. неустойки за нарушение сроков выполнения мероприятий по технологическому присоединению за период с 25.12.2018 по 09.03.2021.

ООО «Штаб» заявило встречный иск, уточненный в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее –  АПК РФ), об обязании ПАО «Россети Ленэнерго» осуществить технологическое присоединение к электрическим сетям по договору от 29.12.2017 № ОД-ГтЭС-35303-17/50438-Э-17 в течение 60 календарных дней с момента вступления решения в законную силу, а также взыскании 202 691,55 руб. неустойки за нарушение сроков осуществления технологического присоединения к электрическим сетям. 

В судебном заседании представители сторон продержали заявленные ими требования. 

Как следует из материалов дела, 29.12.2017 между ПАО «Ленэнерго» (сетевая организация) и ООО «Штаб» (заявитель) заключен договор  № ОД-ГтЭС-35303-17/50348-Э-17 об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям для энергоснабжения объекта «жилые дома», расположенного (который будет располагаться) на земельном участке по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, ЗАО «Лопухинка», квартал 2, урочище Старая Буря, рабочий поселок 17, кадастровый номер: 47:14:0802002:356 (далее – Договор), по условиям которого сетевая организация приняла на себя обязательство по осуществлению технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя.

Пунктом 8 Договора установлена обязанность заявителя исполнить надлежащим образом в определенный Договором срок мероприятия по технологическому присоединению в пределах границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства заявителя, а также обязанность по оплате расходов на технологическое присоединение.

Согласно пункту 5 Договора срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению составляет 6 месяцев со дня заключения Договора.

В соответствии с пунктом 10 Договора размер платы за технологическое присоединение определяется в соответствии с Приказом Комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области от 21.09.2017 № 115-п и составляет      109 563, 00 руб., включая НДС 18% (16 713 руб.).

Внесение платы за технологическое присоединение осуществляется заявителем в следующем порядке:

- 15 % платы за технологическое присоединение, что составляет 16 434, 45 руб., в том числе НДС 18%, вносятся в течение 15 дней со дня заключения Договора;

- 30 % платы за технологическое присоединение, что составляет                           32 868, 90 руб., в том числе НДС 18%, вносятся в течение 60 дней со дня заключения Договора;

- 45 % платы за технологическое присоединение, что составляет                           56 119,62 руб., в том числе НДС 18%, вносятся в течение 15 дней со дня фактического присоединения;

- 10 % платы за технологическое присоединение, что составляет                            10 956, 30 руб., в том числе НДС 18%, вносятся в течение 15 дней со дня подписания акта об осуществлении технологического присоединения.

Датой исполнения обязательства заявителя по оплате расходов за технологическое присоединение считается дата внесения денежных средств в кассу или на расчетный счет сетевой организации (пункт 12 Договора).

Обязанность заявителя по внесению платежа в установленный Договором срок не исполнена.

При этом сетевой организацией были в полном объеме исполнены обязательства по технологическому присоединению объекта заявителя, в связи с чем, в адрес ООО «Штаб» направлено соответствующее уведомление от 25.12.2018 № ГтЭС/032/4814.

В соответствии с пунктом 5 Договора мероприятия по технологическому присоединению должны быть выполнены заявителем в срок до 29.06.2018.

Подпунктом «в» пункта 16 Правил № 861 и пунктом 17 Договора предусмотрена обязанность одной из сторон Договора при нарушении ею сроков осуществления мероприятий по технологическому присоединению в случае если плата за технологическое присоединение по договору превышает 550 руб., уплатить другой стороне неустойку, равную 0,25 процента от указанного общего размера платы за технологическое присоединение по договору за каждый день просрочки. При этом совокупный размер такой неустойки при нарушении срока осуществления мероприятий по технологическому присоединению заявителем не может превышать размер неустойки, определенной в предусмотренном названным абзацем порядке за год просрочки.

ПАО «РоссЛенэнерго» направило ООО «Штаб» претензию от 27.03.2020                 № ГтЭС/032-П/371, в которой предложило заявителю направить в адрес сетевой организации уведомление о выполнении со своей стороны технических условий, а также предложило уплатить неустойку за нарушение сроков выполнения мероприятий по технологическому присоединению.

Оставление ООО «Штаб» указанной претензии без исполнения послужило основанием для обращения ПАО «Россети Ленэнерго» в арбитражный суд с рассматриваемым в рамках настоящего дела иском. 

ООО «Штаб», полагая свои права нарушенными, предъявило встречный иск об обязании ПАО «Россети Ленэнерго» осуществить технологическое присоединение к электрическим сетям по Договору и взыскании 202 691,55 руб. неустойки за нарушение сроков осуществления технологического присоединения к электрическим сетям. ООО «Штаб» настаивает на том, что ПАО «Россети Ленэнерго» не исполнена обязанность по выполнению мероприятий по технологическому присоединению, заявителю не выдан акт технологического присоединения. 

Суд рассмотрел заявленные исковые требования и пришел к следующим выводам.

В соответствии с пунктом 3 статьи 405 Гражданского кодекса Российской Федерации должник не считается просрочившим, пока обязательство не может быть исполнено вследствие просрочки кредитора.

В силу пункта 1 статьи 406 Гражданского кодекса Российской Федерации кредитор считается просрочившим, если он отказался принять предложенное должником надлежащее исполнение или не совершил действий, предусмотренных законом, иными правовыми актами или договором либо вытекающих из обычаев или из существа обязательства, до совершения которых должник не мог исполнить своего обязательства.

Техническими условиями предусмотрены следующие мероприятия, выполняемые ПАО «Ленэнерго»: 

10.1. Объем работ по распределительной сети 0,4-10 кВ:

10.1.1. Установить и оборудовать новую ТП-10/0,4 кВ, с установкой трансформатора необходимой мощности. На стадии разработки проекта место установки ТП, комплектацию и тип устанавливаемого оборудования согласовать с филиалом ПАО «Ленэнерго» «ГтЭС». Выполнить подъездные пути к ТП. Место установки ТП согласовать с землевладельцем.

10.1.2. Построить новую ВЛ-10 кВ направлением от ближайшей опоры ВЛ-10 кВ фид.1 от ПС-257 до проектируемой ТГТ. Конфигурацию сети, марку, сечение и протяженность ЛЭП-10 кВ уточнить проектом. Трассу новой ЛЭП-10 кВ определить проектом и согласовать с землевладельцем.

10.2. Указание к проектированию.

10.2.1.Разработать проектную документацию и согласовать в установленном порядке.

10.2.2.Проектирование выполнить в соответствии с требованиями действующихнормативно-технических документов. Окончательные параметры электрической сетиопределить при проектировании, при необходимости выполнить корректировку технических условий.

Для выполнения своей части мероприятий, сетевая организация привлекла подрядную организацию, акты выполненных работ датированы 29.01.2019.

Мероприятия со стороны заявителя в финальной части содержат требования к сдаче приборов учета в эксплуатацию (пункт 11.4.7 ТУ).

Стороны подписали Акт проверки расчетного прибора учета электрической энергии от 26.06.2019 № П-017793, в пункте 10 которого содержится отметка сетевой организации: не подано напряжение и не включена нагрузка для проверки схемы подключения ПУ. 

Согласно пункту 26 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 « 861, требования, указанные в пп. «в» - «д» п.25 данных Правил, обязательны для выполнения как заявителем, так и сетевой организацией. При этом разграничение обязательств по выполнению этих требований определяется в договоре и учитывается соответственно при расчете платы за технологическое присоединение.

В связи с изложенным, суд заключил об отсутствии просрочки со стороны заявителя в выполнении своей части мероприятий по технологическому присоединению и признал просрочку сетевой организации. 

За период просрочки с 27.06.2019 (следующий день после дня составления акта проверки расчетного прибора учета) по 05.07.2021 неустойка в пользу заявителя составила 202 691,55 руб, которая подлежит взысканию с ответчика по встречному иску без учета снижения. Проанализировав условия пункта 17 договора, суд пришел к выводу, что заявитель вправе произвести расчет неустойки, применив порядок исчисления, установленный соглашением сторон, что не противоречит статье 332 ГК РФ и разъяснениям, изложенным в пункте 61 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24.03.2016 № 7.

Односторонний отказ от исполнения обязательства допускается в случаях, установленных Гражданским кодексом Российской Федерации, другими законами и иными правовыми актами (пункт 1 статьи 310 ГК РФ).

Согласно пункту 1 статьи 779 ГК РФ по договору возмездного оказания услуг исполнитель обязуется по заданию заказчика оказать услуги (совершить определенные действия или осуществить определенную деятельность), а заказчик обязуется оплатить эти услуги.

В силу пункта 1 статьи 782 ГК РФ заказчик вправе отказаться от исполнения договора возмездного оказания услуг при условии оплаты исполнителю фактически понесенных им расходов.

Договор технологического присоединения действующий и подлежит исполнению в пользу заявителя. 

В соответствии с частями 1 и 3 статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны. 

Руководствуясь статьями 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области 

решил:

В удовлетворении первоначального иска отказать.

По встречному иску обязать ПАО «Россети Ленэнерго» осуществить технологическое присоединение к электрическим сетям по договору от 29.12.2017 № ОД-ГтЭС-35303-17/50438-Э-17 в течение 60 календарных дней с момента вступления решения в законную силу, а также взыскать с публичного акционерного общества «Россети Ленэнерго»в пользу обществу с ограниченной ответственностью «Штаб»202 691,55 руб. неустойки за нарушение сроков осуществления технологического присоединения к электрическим сетям, 13 054 рубля расходов по уплате государственной пошлины по встречному иску.

Возвратить обществу с ограниченной ответственностью «Штаб» из федерального бюджета 1 682 рубля государственной пошлины, излишне уплаченной по платежному поручению от 25.05.2021 № 332 за подачу встречного искового заявления. 

Решение может быть обжаловано в Тринадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия Решения.

Судья Дорохова Н.Н.