АРБИТРАЖНЫЙ  СУД  ВОРОНЕЖСКОЙ  ОБЛАСТИ

ИМЕНЕМ   РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ

Р Е Ш Е Н И Е

г. Воронеж                                                                      Дело NА14-1308/2019 

« 06 » марта 2019 г.

Резолютивная часть решения объявлена 05.03.2019.

Решение изготовлено в полном объеме  06.03.2019.                                           

Арбитражный суд Воронежской области в составе судьи Завидовской Е.С., 

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Бобро К.А., 

рассмотрев дело по исковому заявлению общества с ограниченной ответственностью «СТРОЙ РЕСУРС», г. Воронеж (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) 

к обществу с ограниченной ответственностью СК «СУМ-31», г. Воронеж (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>)

о взыскании 694 266, 96 руб. задолженности 

при участии в судебном заседании:

от истца:   ФИО1, директор, решение №01/05 от 07.05.2018;

от ответчика:  явка представителя не обеспечена, извещен;

установил:

общество с ограниченной ответственностью «СТРОЙ РЕСУРС» (далее - истец) обратилось в арбитражный суд с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью СК «СУМ-31» (далее - ответчик) о взыскании 220 379, 97 руб. задолженности по договору №7/17-10 от 04.10.2017, 152 326, 75 руб. задолженности по договору №2/18-1 от 12.01.2018, 278 360, 24 руб. задолженности по договору №8/18 от 01.03.2018, 43 200 руб. задолженности по договору №01-18/п от 12.01.2018.

Ответчик, надлежащим образом уведомленный о дате и месте судебного заседания, в судебное заседание не явился. На основании статей 123, 156 АПК РФ судебное разбирательство проводится в отсутствие представителя ответчика, извещенного надлежащим образом о времени и месте судебного заседания.

От ответчика в материалы дела поступил отзыв на исковое заявление, согласно которому ответчик признал наличие и размер задолженности заявленный ко взысканию истцом.

Из материалов дела следует, что между сторонами заключены договоры №7/17-10 от 04.10.2017, №2/18-1 от 12.01.2018, №8/18 от 01.03.2018, №01-18/п от 12.01.2018.

Предметом договора №7/17-10 от 04.10.2017 является выполнение работ по изготовлению и монтажу металлоконструкций (наименование работ и объемы работ в соответствии с приложением №1) на строительстве : «Мусоросортировочный завод мощностью 440 тыс. тонн отходов в год ( при работе в одну смену)» на объектах :  «ПНС пожаротушения»; «Котельная» (п.1.2 договора).

Между сторонами  к договору №7/17-10 от 04.10.2017 на выполнение дополнительных работ заключены дополнительные соглашения №1 от 24.10.2017, №2 от 01.12.2017, №3 от 10.01.2018. 

Предметом договора №2/18-1 от 12.01.2018 является выполнение работ по установке сэндвич-панелей (наименование работ и объемы работ в соответствии с приложением №1) на строительстве : «Мусоросортировочный завод мощностью 440 тыс. тонн отходов в год  (при работе в одну смену)» на объектах:  «ПНС пожаротушения»; «Котельная» (п.1.2 договора).

Между сторонами  к договору №2/18-1 от 12.01.2018  на выполнение дополнительных работ заключено дополнительное соглашение №1 от 05.02.2018. 

Предметом договора №8/18 от 01.03.2018 является выполнение работ  по устройству кровли (наименование работ и объемы работ в соответствии с приложением №1 и ПД КР-3) административно-бытового корпуса на строительстве Мусоросортировочного завода мощностью 440 тыс. тонн отходов в год (при работе в одну смену) (п.1.2 договора).

В соответствии с условиями договора №01-18/п от 12.01.2018 поставщик обязуется поставить покупателю материалы в соответствии со спецификацией (приложение №1), согласованной покупателем и поставщиком в обусловленный договором срок, а покупатель обязуется принять и произвести оплату на условиях настоящего договора (п.1.1 договора).

Сроки выполнения работ по договору №7/17-10 от 04.10.2017 установлены в п.6.1: 

-на объекте «ПНС пожаротушения»: начало работ: 30 октября 2017 года; окончание работ: 10 ноября 2017 года;

- на объекте «Котельная»: начало работ: 10 октября 2017 года, окончание работ: 26 октября 2017 года.

Сроки выполнения работ по дополнительному  соглашению  №1 от 24.10.2017: начало выполнения работ – 24 октября 2017г., окончание выполнения работ – 03 ноября 2017 г.

Сроки выполнения работ по дополнительному  соглашению  №2 от 01.12.2017: начало выполнения работ – 01 декабря 2017г., окончание выполнения работ – 04 декабря 2017 г.

Сроки выполнения работ по дополнительному  соглашению  №3 от 10.01.2018: начало выполнения работ –10 января 2018г., окончание выполнения работ – 31 января 2018 г.

Сроки выполнения работ по договору №2/18-1 от 12.01.2018 установлены в п.6.1: 

-на объекте «ПНС пожаротушения» : начало работ: 15 января 2018 года; окончание работ : 24 января 2018 года;

- на объекте «Котельная»: начало работ: 25 января  2018 года, окончание работ:  31 января 2018 года.

Сроки выполнения работ по дополнительному  соглашению  №1 от 05.02.2018: начало выполнения работ – 05 февраля 2018г., окончание выполнения работ –09 февраля 2018 г.

Сроки выполнения работ по договору №8/18 от 01.03.2018 установлены в п.6.1: начало работ – с момента подписания договора, окончание работ – 20 августа 2018 г.

Срок поставки по договору №01-18/п от 12.01.2018: с 12.01.2018 по 31.01.2018 (п.4.2 договора).

Стоимость работ согласно п.2.1  договора №7/17-10 от 04.10.2017 является твердой, определяется протоколом согласования договорной цены (приложение №1), являющимся неотъемлемой частью договора и составляет (с учетом дополнительных соглашений №1 от 24.10.2017, №2 от 01.12.2017, №3 от 10.01.2018)  2 095 051, 2 руб.,  с учетом НДС.

Стоимость работ согласно п.2.1  договора №2/18-1 от 12.01.2018  является твердой, определяется протоколом согласования договорной цены (приложение №1), являющимся неотъемлемой частью договора и составляет (с учетом дополнительного соглашения №1 от 05.02.2018)  374 109, 95 руб.,  с учетом НДС.

Стоимость работ согласно п.2.1 договора №8/18 от 01.03.2018  является твердой, определяется протоколом согласования договорной цены (приложение №1), являющимся неотъемлемой частью договора и составляет 1 403 891, 48 руб., в том числе НДС 18%- 214 152, 94 руб.

Во исполнение условий договора №7/17-10 от 04.10.2017  и дополнительных соглашений №1 от 24.10.2017, №2 от 01.12.2017, №3 от 10.01.2018 истец выполнил работы и сдал их результат ответчику по актам о приемке выполненных работ № 1 от 29.11.2017, №2 от 30.11.2017, №3 от 04.12.2017 , №4 от 31.07.2018, №5 от 31.07.2018, №6 от 31.07.2018  на сумму   2 052 899  руб.

Во исполнение условий договора №2/18-1 от 12.01.2018  и дополнительного соглашения №1 от 05.02.2018 истец выполнил работы и сдал их результат ответчику по актам о приемке выполненных работ №1 от 31.01.2018 , №1 от 09.02.2018, №3 от 31.07.2018 на сумму   374 109, 94 руб.

Во исполнение условий договора  №8/18 от 01.03.2018  истец выполнил работы и сдал их результат ответчику по акту о приемке выполненных работ №1 от 30.07.2018 на сумму   1 403 891, 48 руб.

Во исполнение условий договора №01-18/п от 12.01.2018  истец передал материалы по товарным накладным №13 от 31.01.2018, №27 от 10.07.2018 на сумму 203 170, 25 руб.

Ссылаясь на ненадлежащее исполнение ответчиком обязательств по оплате выполненных работ (поставке материалов), истец обратился к последнему с претензией от 14.11.2018 №151. 

Неисполнение требований претензии послужило основанием для предъявления настоящего иска  в суд.

Исследовав представленные в материалы дела доказательства, оценив все в совокупности, суд находит исковые требования подлежащими удовлетворению в полном объеме.

Согласно положениям статей 309, 310 Гражданского кодекса РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, односторонний отказ от исполнения обязательства не допускается.

Исходя  из правовой природы отношений, вытекающих из договоров №7/17-10 от 04.10.2017, №2/18-1 от 12.01.2018, №8/18 от 01.03.2018, №01-18/п от 12.01.2018, к возникшему спору подлежат применению нормы главы 37 ГК РФ о договорах подряда (строительного подряда) и нормы главы  30 ГК РФ о договорах купли-продажи (поставка товаров).

Согласно пункту 1 статьи 740 ГК РФ по договору строительного подряда подрядчик обязуется в установленный договором срок построить по заданию заказчика определенный объект либо выполнить иные строительные работы, а заказчик обязуется создать подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную цену.

В соответствии с пунктом 1 статьи 746  ГК РФ  оплата выполненных подрядчиком работ производится заказчиком в размере, предусмотренном сметой, в сроки и в порядке, которые установлены законом или договором строительного подряда. При отсутствии соответствующих указаний в законе или договоре оплата работ производится в соответствии со статьей 711 настоящего Кодекса.

В соответствии со статьи 506 ГК РФ по договору поставки поставщик-продавец, осуществляющий предпринимательскую деятельность, обязуется передать в обусловленный срок или сроки производимые или закупаемые им товары покупателю для использования в предпринимательской деятельности или в иных целях, не связанных с личным, семейным, домашним и иным подобным использованием.

Согласно пункту 1 статьи 516 ГК РФ покупатель оплачивает поставляемые товары с соблюдением порядка и формы расчетов, предусмотренных договором поставки. Если соглашением сторон порядок и форма расчетов не определены, то расчеты осуществляются платежными поручениями.

Если договором поставки предусмотрено, что оплата товаров осуществляется получателем (плательщиком) и последний неосновательно отказался от оплаты либо не оплатил товары в установленный договором срок, поставщик вправе потребовать оплаты поставленных товаров от покупателя (п.2 ст. 516 ГК РФ).

Заказчик принимает фактически выполненные подрядчиком работы по акту приемки выполненных работ установленной формы КС-2 и справки КС-3 и производит оплату выполненных работ не позднее 10 банковских дней со дня подписания акта приемки выполненных работ и получения счета от подрядчика. Окончательный расчет заказчик производит в течение 10 банковских дней после подписания акта приемки выполненных работ и выполнения п.4.8 договора (п.3.1 -3.3 договоров).

В соответствии с п.3.2  договора №01-18/п от 12.01.2018  оплата за поставляемые материалы осуществляется в течение 2-х дней с момента поставки.

Согласно статье 65 АПК РФ, каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

Факт выполнения работ по договору №7/17-10 от 04.10.2017  и дополнительным соглашениям  №1 от 24.10.2017, №2 от 01.12.2017, №3 от 10.01.2018 подтверждается представленными в материалы дела, актами о приемке выполненных работ № 1 от 29.11.2017, №2 от 30.11.2017, №3 от 04.12.2017, №4 от 31.07.2018, №5 от 31.07.2018, №6 от 31.07.2018 и справками о стоимости выполненных работ за аналогичными номерами,  подписанными  ответчиком без возражений относительно объема, качества и стоимости работ.

Факт выполнения работ по договору №2/18-1 от 12.01.2018  и дополнительному соглашению №1 от 05.02.2018 подтверждается представленными в материалы дела, актами о приемке выполненных работ №1 от 31.01.2018 , №1 от 09.02.2018, №3 от 31.07.2018 и справками о стоимости выполненных работ за аналогичными номерами,  подписанными  ответчиком без возражений относительно объема, качества и стоимости работ.

Факт выполнения работ по договору №8/18 от 01.03. подтверждается представленными в материалы дела, актом  о приемке выполненных работ №1 от 30.07.2018 и справкой о стоимости выполненных работ за аналогичными номерами,  подписанными  ответчиком без возражений относительно объема, качества и стоимости работ.

Факт получения и принятия товара по договору №01-18/п от 12.01.2018  подтверждается представленными в материалы дела товарными накладными  №13 от 31.01.2018, №27 от 10.07.2018, подписанными  ответчиком без возражений относительно объема, качества и срока оказания услуг.

По каждому договору истцом представлены двусторонние акты сверки взаимных расчетов.

Ответчик в отзыве  на исковое заявление требования не оспорил.

Частью 3.1 статьи 70 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации предусмотрено, что обстоятельства, на которые ссылается сторона в обоснование своих требований или возражений, считаются признанными другой стороной, если они ею прямо не оспорены или несогласие с такими обстоятельствами не вытекает из иных доказательств, обосновывающих представленные возражения относительно существа заявленных требований.

Поскольку заявленная истцом сумма долга подтверждена перечисленными доказательствами и ответчиком не оспорена, суд считает, что требования истца о взыскании 694 266, 96 руб. задолженности подлежат удовлетворению.

Истцом при подаче иска уплачена государственная пошлина в размере 16 885 руб. по платежному поручению №35 от 25.01.2019, что составляет размер государственной пошлины по делу.

На основании статьи 110 АПК РФ, с ответчика в пользу истца следует взыскать 16 885 руб. расходов по государственной пошлине. 

Руководствуясь статьями 65, 102, 110, 167-171, 176, 180, 181 АПК РФ, арбитражный суд

РЕШИЛ:

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью СК «СУМ-31», г. Воронеж (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью «СТРОЙ РЕСУРС», г. Воронеж (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) 694 266, 96 руб. задолженности и 16 885 руб. расходов по оплате государственной пошлины.

Исполнительный лист выдать после вступления решения в законную силу.             

Решение может быть обжаловано в течение месяца со дня его принятия в Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд и в течение двух месяцев со дня вступления в законную силу в Арбитражный суд Центрального округа путем подачи жалобы, через арбитражный суд, принявший решение.

 

Судья Арбитражного суда

Воронежской области                                                 Е.С. Завидовская