Именем Российской Федерации

Арбитражный суд Тульской области

300041, Россия, 

<

...>

 

Р Е Ш Е Н И Е

город Тула                                                                                            Дело № А68-13297/2024

Резолютивная часть решения принята 24 марта 2025 года

Решение изготовлено в полном объеме 27 марта 2025 года

Арбитражный суд Тульской области, в составе: судьи Гулимовой Г.Н.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем Щепелевым М.А.,

рассмотрев в судебном заседании дело по исковому заявлению общества с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик «Квартал» (далее – ООО СЗ «Квартал») (ИНН: 

<

***>, ОГРН: 

<

***>) к индивидуальному предпринимателю ФИО1 (далее – ИП ФИО1) (ИНН: 

<

***>, ОГРН: 

<

***>) о взыскании неустойки в размере 1 032 486 руб. 07 коп.

при участии в заседании:

от истца: представитель по доверенности ФИО2 от 30.01.2025, диплом;

от ответчика: не явился, извещен.

УСТАНОВИЛ:

ООО СЗ «Квартал» обратилось в арбитражный суд с исковым заявлением к ИП ФИО1 о взыскании неустойки в размере 1 036 699 руб. 37 коп.

Определением суда от 07.11.2024 исковое заявление принято к производству.

От истца 18.02.2025 поступило ходатайство об уточнении исковых требований, в котором заявитель просил взыскать с ответчика неустойку в размере 1 032 486 руб. 07 коп. 

Указанное ходатайство принято судом к рассмотрению.

Представитель истца в судебном заседании уточненные исковые требования поддержал.

ИП ФИО1 отзыв на исковое заявление не представил, извещен надлежащим образом, что подтверждается уведомлением № 30000001359603 (вручено 12.02.2025 по адресу: Чувашская Республика – Чувашия, 

<

...>).

Суд обращает внимание, что согласно выписке из ЕГРИП, на дату подачи иска – 31.10.2024 ИП ФИО1 был зарегистрирован по адресу: 

<

...>, однако в ходе судебного разбирательства 22.11.2024 в ЕГРИП внесены изменения в адресе регистрации на Чувашская Республика – Чувашия, 

<

...>.

Дело рассмотрено арбитражным судом по существу в отсутствие представителя ответчика на основании ст.156 АПК РФ.

Изучив материалы дела, суд установил, что 27.10.2023 года между ООО СЗ «Квартал» (далее – заказчик) ИП ФИО1 (далее – подрядчик) заключен договор №27/10/23.

Согласно п. 1.1 договора, заказчик поручает, а подрядчик принимает на себя выполнение следующих работ: срубка свай, устройство бетонной подготовки, устройство монолитных ростверков, доработка грунта вручную, устройство песчаной подготовки, Монтаж ФБС, кладка перегородок (пазогребневый блок, керамический кирпич) на следующем объекте: «Многоквартирные жилые дома по адресу: Тульская область, Ленинский район, п. Молодежный, земельный участок с кадастровым номером: 71:14:020701:3491, многоквартирные жилые дома №4, №5. №6 по ГП».

В соответствии с п. 2.1 договора, установлены следующие сроки выполнения работ:

Подрядчик приступает к выполнению работ на объекте: многоквартирный жилой дом №4 по ГП – 01.11.2023; многоквартирный жилой дом №5 по ГП – 05.11.2023; многоквартирный жилой дом №6 по ГП – 10.11.2024.

Окончание работ по договору – 30.04.2024.

Сроки завершения отдельных этапов работы (промежуточные сроки) определяются в соответствии с графиком производства работ (приложение №2 к договору).

Срок завершения работ по устройству фундаментов до 15.01.2024.

В соответствии с графиком производства работ, установленным в приложении №2 к договору установлены следующие сроки выполнения работ:

Срубка свай – по дому №4 - с 05.11.2023 по 01.12.2023; по дому №5 - с 10.11.2023 по 06.12.2023; по дому №6 - с 11.12.2023 по 04.12.2023.

Устройство бетонной подготовки – по дому №4 - с 05.11.2023 по 01.12.2023; по дому №5 - с 10.11.2023 по 06.12.2023; по дому №6 - с 11.12.2023 по 04.12.2023.

Армирование ростверков - по дому №4 - с 17.11.2023 по 22.12.2023; по дому №5 - с 22.11.2023 по 27.12.2023; по дому №6 - с 27.11.2023 по 10.01.2024.

Бетонирование  ростверков – по дому №4 - с 17.11.2023 по 29.12.2023; по дому №5 - с 22.11.2023 по 10.01.2024; по дому №6 - с 27.11.2023 по 17.01.2024.

В пунктах 4.1 - 4.3 стороны согласовали порядок расчетов по договору на следующих условиях:

Стоимость работ по срубке свай подлежащая оплате Подрядчику, определяется из расчета: 

С-Р1 х К, где

С - стоимость работ, подлежащая оплате Подрядчику, в рублях,

Р1 = стоимость работ за срубку одной сваи, согласно протоколу согласования договорной цены. Приложение №1,

К - количество фактически срубленных свай в соответствии с проектом. Определенная путем указанного расчета стоимость работ включает сумму вознаграждения Подрядчика, стоимость всех расходов Подрядчика, связанных с исполнением настоящего Договора, работу геодезиста, привлеченного Подрядчиком за его счет с необходимой документацией, стоимость расходных материалов, необходимых для выполнения работ, и предоставляемых Подрядчиком. 

Стоимость работ по устройству бетонной подготовки подлежащая оплате Подрядчику, определяется из расчета:

С = Р2 х К, где

С - стоимость работ, подлежащая оплате Подрядчику, в рублях,

Р2 = стоимость работ за 1 м3 бетонной подготовки, согласно протоколу согласования договорной цены. Приложение №1,

К - количество кубических метров фактически уложенного бетона в соответствии с проектом и технологией укладки. Определенная путем указанного расчета стоимость работ включает сумму вознаграждения Подрядчика, стоимость всех расходов Подрядчика, связанных с исполнением настоящего Договора, устройство опалубки, уход за бетоном, работу геодезиста, привлеченного Подрядчиком за его счет с необходимой документацией, стоимость расходных материалов, необходимых для выполнения работ и предоставляемых Подрядчиком.

Стоимость работ по устройству монолитных ростверков, подлежащая оплате Подрядчику, определяется из расчета:

С = РЗ х К, где

С — стоимость работ, подлежащая оплате Подрядчику, в рублях,

РЗ = стоимость работ за 1 м3 монолитных ростверков, согласно протоколу согласования договорной цены, Приложение №1,

К - количество кубических метров фактически уложенного бетона в соответствии с проектом и технологией укладки. Определенная путем указанного расчета стоимость работ включает сумму вознаграждения Подрядчика, стоимость всех расходов Подрядчика, связанных с исполнением настоящего Договора, стоимость расходных материалов, необходимых для выполнения работ и предоставляемых Подрядчиком.

Согласно п. 6.1.8 договора подрядчик обязался выполнять работы в строгом соответствии с проектно-сметной документацией и действующими СНиП, ТУ, техническими регламентами, а также иной нормативно-технической документацией в области строительства, обеспечивать надлежащее качество работ и своевременное устранение недостатков и дефектов.

Таким образом, объем работ, подлежащий выполнению по договору, определяется в соответствии с объемами, указанными в проектно-сметной документации на указанные работы, а именно:

По дому№4 - рабочей документации «Конструкции железобетонные (фундаменты) Многоквартирный жилой дом №4 по ГП № 03.09/2021-ПР-12-КЖ 1.4;

По дому№5 - рабочей документации «Конструкции железобетонные (фундаменты) Многоквартирный жилой дом №5 по ГП № 03.09/2021-ПР-12-КЖ 1.5;

По дому№6 - рабочей документации «Конструкции железобетонные (фундаменты) Многоквартирный жилой дом №6 по ГП № 03.09/2021-ПР-12-КЖ 1.6.

Как указывает истец, к выполнению этих работ подрядчик не приступил, списки работников для осуществления пропускного режима заказчику в нарушение п. 6.1.3 предоставлены не были.

Согласно п. 7.3 договора в случае нарушения одной из сторон обязательств по настоящему договору (в т.ч. промежуточных сроков выполнения работ), подлежащих денежной оценке, в том числе сроков выполнения работ, другая сторона имеет право начислить пени в размере 0,1% от размера несвоевременно исполненного (неисполненного) обязательства за каждый день просрочки.

В связи с нарушением сроков выполнения работ как промежуточных, так и в целом по договору истец начислил неустойку исходя из следующего расчета (с учетом утоснений):

Работы по срубке свай:

- по дому №4 – с 05.11.2023 по 01.12.2023; дней просрочки с 02.12.2023 по 24.06.2024=205. Стоимость работ – 1600 руб./шт. объем работ по проекту 275 шт. (242+33), лист 4 рабочей документации). 275*1600=440000 руб. Пени – 0,1% за каждый день просрочки. 440000/100/10=440 руб. за каждый день просрочки. Итого 440*205=90200 руб.

- по дому №5 - с 10.11.2023 по 06.12.2023; дней просрочки с 07.12.2023 по 24.06.2024=200. Стоимость работ - 1600 руб./шт. объем работ по проекту 221 шт. (167+15+39), лист 4 рабочей документации) 221*1600=353600 руб. Пени – 0,1% за каждый день просрочки. 353600/100/10=353,6 руб. за каждый день просрочки. Итого 353,6*200=70720 руб.

- по дому №6 - с 15.11.2023 по 11.12.2023. Дней просрочки с 12.12.2023 по 24.06.2024=195. Стоимость работ - 1600 руб./шт. объем работ по претензии 300 шт. (количество свай по проекту – 301 (26+235+40), лист 4 рабочей документации) 300*1600=480000 руб. Пени – 0,1% за каждый день просрочки. 480000/100/10=480 руб. за каждый день просрочки. Итого 480*195=93600 руб.

2) Работы по устройству бетонной подготовки (подбетонка, бетон В7,5):

- по дому №4 - с 05.11.2023 по 01.12.2023; дней просрочки с 02.12.2023 по 24.06.2024=205. Стоимость работ - 3500 руб./м3. объем работ по проекту 33,21 м3 (21,5+11,71, лист 6 рабочей документации «Спецификация монолитных ростверков»). 33,21*3500=116235 руб. Пени – 0,1% за каждый день просрочки. 116235/100/10=116,23 руб. за каждый день просрочки. Итого 116,23*205=23827,15 руб.

- по дому №5 - с 10.11.2023 по 11.12.2023; дней просрочки с 07.12.2023 по 24.06.2024=200. Стоимость работ - 3500 руб./м3. объем работ по проекту 26,14 м3 (17,3+8,84 лист 6 рабочей документации «Спецификация монолитных ростверков»). 26,14*3500=91490 руб. Пени – 0,1% за каждый день просрочки. 91490/100/10=91,49 руб. за каждый день просрочки. Итого 91,49*200=18298 руб.

- по дому №6 - с 15.11.2023 по 11.12.2023. дней просрочки с 12.12.2023 по 24.06.2024=195. Стоимость работ - 3500 руб./м3. объем работ по проекту 34,83 м3(22,87+11,96 лист 6 рабочей документации «Спецификация монолитных ростверков»). 34,83*3500=121905 руб. Пени – 0,1% за каждый день просрочки. 121905/100/10=121,90 руб. за каждый день просрочки. Итого 121,90*195=23770,50 руб. 

3) Работы по устройству монолитных ростверков (армирование и бетонирование ростверков):

- по дому №4 с 17.11.2023 (по 22.12.2023 - Армирование; по 29.12.2023 – бетонирование); дней просрочки с 30.12.2023 по 24.06.2024=177. Стоимость работ - 10500 руб./м3. объем работ по претензии 106,76 м3 (по проекту 106,76+34,10=149,86, лист 6 рабочей документации «Спецификация монолитных ростверков»). 106,76*10500=1120980 руб. Пени – 0,1% за каждый день просрочки. 1120980/100/10=1120,98 руб. за каждый день просрочки. Итого 1120,98*177=198413,46 руб.

- по дому №5 - с 22.11.2023 (по 27.12.2023-армирование; по 10.01.2024 – бетонирование); дней просрочки с 11.01.2024 по 24.06.2024=165. Стоимость работ - 10500 руб./м3. объем работ по претензии 86,41 м3 (по проекту: 86,41+31,30=117,71, лист 6 рабочей документации «Спецификация монолитных ростверков»). 86,41*10500=907305 руб. Пени – 0,1% за каждый день просрочки. 907305/100/10=907,30 руб. за каждый день просрочки. Итого 907,30*165=149704,50 руб.

- по дому №6 - с 27.11.2023 (по 10.01.2024 – армирование; по 17.01.2024 – бетонирование); дней просрочки с 18.01.2024 по 24.06.2024=158. Стоимость работ - 10500 руб./м3. объем работ по проекту 159,75 м3 (115,64+44,11, лист 6 рабочей документации «Спецификация монолитных ростверков»). 159,75*10500=1677375 руб. Пени – 0,1% за каждый день просрочки. 1677375/100/10=1677,37 руб. за каждый день просрочки. Итого 1677,37*158=265024,46 руб.

4) Работы по монтажу ФБС:

- дом 4 - с 01.05.2023 по 24.06.2024 – дней просрочки =54. Стоимость работ - 1600 шт. объем работ по проекту 376шт. (316 (спецификация блоков стен техподполья, лист 25 рабочей документации)+34+4 (спецификация блоков стен под вент. каналы, лист 25 рабочей документации)+2+20 (спецификация изделий и материалов спуска в техподполье №1, лист 26 рабочей документации)+20+4(спецификация изделий и материалов спуска в техподполье №2, лист 30 рабочей документации)). 376*1600=601600 руб. Пени – 0,1% за каждый день просрочки. 601600/100/10=601,60 руб. за каждый день просрочки. Итого 601,60*54=32486,40 руб.

- дом 5 - с 01.05.2023 по 24.06.2024 – дней просрочки =54. Стоимость работ - 1600 шт. объем работ по претензии 377шт. (по проекту 379 (5+25(спецификация изделий и материалов спуска в техподполье, лист 23 рабочей документации)+313(спецификация блоков стен техподполья, лист 22 рабочей документации)+33+1+2(спецификация блоков стен под вент. каналы, лист 22 рабочей документации). 377*1600=603200 руб. Пени – 0,1% за каждый день просрочки. 603200/100/10=603,20 руб. за каждый день просрочки. Итого 603,20*54=32572,80 руб.

- дом 6 – с 01.05.2023 по 24.06.2024 – дней просрочки =54. Стоимость работ - 1600 шт. объем работ по претензии 392шт. (по проекту 421 (5+17 (спецификация изделий и материалов спуска в техподполье, лист 28 рабочей документации) +7+22 (спецификация изделий и материалов спуска в техподполье, лист 32 рабочей документации +320 (спецификация блоков стен техподполья, лист 27 рабочей документации) +50 (спецификация блоков стен под вент. каналы, лист 27 рабочей документации). 392*1600=627200 руб. Пени – 0,1% за каждый день просрочки. 627200/100/10=627,20 руб. за каждый день просрочки. Итого 627,20*54=33868,80 руб.

На основании вышеизложенного, истцом пеня по перечисленным работам предъявлена к взысканию неустойка в размере 1 032 486 руб. 07 коп. (90200+70720+93600+23827,15+18298+23770,50+198413,46+149704,5++265024,46+32486,4+32572,8+33868,80=1 032 486,07).

Истец направил ответчику письмо исх.№24/06-1 от 24.06.2024 с требованием по выплате неустойки, которое оставлено подрядчиком без удовлетворения, что и послужило основанием для обращения с настоящим исковым заявлением в суд.

Рассмотрев представленные по делу материалы, арбитражный суд находит исковые требования подлежащими удовлетворению по следующим основаниям.

При принятии решения суд исходит из того, что в соответствии с ч. 1 ст. 8 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) гражданские права и обязанности возникают из оснований, предусмотренных законом и иными правовыми актами, а также из действий граждан и юридических лиц, которые хотя и не предусмотрены законом или такими актами, но в силу общих начал и смысла гражданского законодательства порождают гражданские права и обязанности.

В соответствии с п. 1 ст. 307 ГК РФ в силу обязательства одно лицо (должник) обязано совершить в пользу другого лица (кредитора) определенное действие, как - то: передать имущество, выполнить работу, уплатить деньги и т.п., либо воздержаться от определенного действия, а кредитор имеет право требовать от должника исполнения его обязанности.

Согласно п. 2 ст. 307 ГК РФ обязательства возникают из договора, вследствие причинения вреда и из иных оснований, указанных в настоящем Кодексе.

Согласно ст. 309 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями.

Односторонний отказ от обязательств и одностороннее изменение его условий не допускается в силу ст. 310 ГК РФ.

На основании ст. 702 ГК РФ по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

Факт нарушения ответчиком принятых по договору обязательств подтвержден материалами дела, доказательств обратно суду не представлено.

Согласно п. 7.3 договора в случае нарушения одной из сторон обязательств по настоящему договору (в т.ч. промежуточных сроков выполнения работ), подлежащих денежной оценке, в том числе сроков выполнения работ, другая сторона имеет право начислить пени в размере 0,1% от размера несвоевременно исполненного (неисполненного) обязательства за каждый день просрочки.

Согласно ст. 12 ГК РФ взыскание неустойки является одним из способов защиты нарушенного гражданского права.

В соответствии с п.1 ст. 329 ГК РФ исполнение обязательств может быть обеспечено неустойкой.

Согласно ч. 1 ст. 330 ГК РФ неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения.

Пунктом 60 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24.03.2016 № 7 «О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств» разъяснено, что на случай неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности при просрочке исполнения, законом или договором может быть предусмотрена обязанность должника уплатить кредитору определенную денежную сумму (неустойку), размер которой может быть установлен в твердой сумме - штраф или в виде периодически начисляемого платежа - пени (п. 1 ст. 330 ГК РФ).

При обращении в суд с требованием о взыскании неустойки кредитор должен доказать неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства должником, которое согласно закону или соглашению сторон влечет возникновение обязанности должника уплатить кредитору соответствующую денежную сумму в качестве неустойки (пункт 1 статьи 330 ГК РФ).

Поскольку свои обязательства по выполнению работ ответчик не исполнил, истец в соответствии с п. 7.3. договора за нарушение сроков выполнения работ начислил неустойку в размере 1 032 486 руб. 07 коп.

Суд также обращает внимание, что договор №27/10/23 от 27.10.2023 сторонами не расторгался, но истцом 27.06.2024 заключен договор № 27/06/24 с новым подрядчиком – ИП ФИО3, тем самым прекратив договорные отношения с ответчиком с даты заключения нового договора.

Согласно части 1 статьи 65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основании своих требований и возражений.

ИП ФИО1 в нарушение статьи 65 АПК РФ отзыв не представил, исковые требования не оспорил, возражений по существу спора не заявил.

Частью 1 ст. 9 АПК РФ предусмотрено, что судопроизводство в арбитражном суде осуществляется на основе состязательности. Лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или несовершения ими процессуальных действий (ч. 2 ст. 9 АПК РФ).

В силу пункта 3.1 статьи 70 АПК РФ обстоятельства, на которые ссылается сторона в обоснование своих требований или возражений, считаются признанными другой стороной, если они ею прямо не оспорены или несогласие с такими обстоятельствами не вытекает из иных доказательств, обосновывающих представленные возражения относительно существа заявленных требований.

В силу статьи 71 АПК РФ арбитражный суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств. Арбитражный суд оценивает относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности.

Оценив представленные доказательства по правилам статьи 71 АПК РФ, установив факт нарушения подрядчиком сроков выполнения работ по договору, суд пришел к выводу о наличии оснований для применения к ответчику ответственности в виде взыскания неустойки.

Суд проверил расчет неустойки и установил, что фактически неустойка составляет 1 039 630 руб. 58 коп., однако суд не вправе выйти за пределы заявленных требований.

С учетом изложенного, требование истца о взыскании с ответчика неустойки за нарушение сроков выполнения работ в размере 1 032 486 руб. 07 коп. подлежит удовлетворению.

В соответствии со статьей 110 АПК РФ судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны.

Государственная пошлина по иску с учетом уточнений составляет 55 975 руб. 

Истец оплатил государственную пошлину в размере 56 101 руб., что подтверждается платежным поручением №2035 от 03.10.2024

В соответствии с ч. 1 ст. 110 АПК РФ расходы по уплате государственной пошлины по иску в размере 55 975 руб. относятся на ответчика и подлежат возмещению истцу. Госпошлина в сумме 126 руб. в порядке ст. 104 АПК РФ подлежит возврату истцу из федерального бюджета.

Руководствуясь ст.ст. 104, 110, 156, 167-171, 176, 180, 181 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

Р Е Ш И Л:

Исковые требования общества с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик «Квартал» (ИНН: 

<

***>) удовлетворить.

Взыскать с индивидуального предпринимателя ФИО1 (ИНН: 

<

***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик «Квартал» (ИНН: 

<

***>) пени в размере 1 032 486 руб. 07 коп.; судебные расходы по оплате государственной пошлины в размере 55 975 руб.

Возвратить обществу с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик «Квартал» (ИНН: 

<

***>) из федерального бюджета Российской Федерации государственную пошлину в размере 126 руб.

Решение может быть обжаловано в месячный срок со дня его принятия в Двадцатый арбитражный апелляционный суд путем подачи апелляционной жалобы через Арбитражный суд Тульской области.

Судья                                                                                                  Г.Н. Гулимова