Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области

191124, Санкт-Петербург, ул. Смольного, д.6

http://www.spb.arbitr.ru

Именем Российской Федерации

Резолютивная часть решения

03 сентября 2019 года        Дело № А56-75347/2019

Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области в составе:судьи  Нестерова С.А.,

рассмотрев в порядке упрощенного производства дело по иску

истец Общество с ограниченной ответственностью "Нордекс" (адрес: 195279, 

<

...>, пом. 32-Н, ОГРН: 

<

***>)

ответчик Закрытое акционерное общество "Союз-Строй" (адрес: 196158, 

<

...>, лит. Д, пом. 2Н, ОГРН: 

<

***>)

о взыскании 8 227 руб. 32 коп. неустойки за период с 06.06.2016 по 30.06.2017 на основании вступившего в законную силу решения суда от 13.06.2017 по арбитражному делу №А56-23988/2017, договора подряда от 11.02.2016 №4/71-С, дополнительного соглашения от 16.02.2016 №2 к договору, подписанного сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ от 31.05.2016 и инкассового поручения от 30.06.2017 №215337,

принимая во внимание обоснованность доводов ответчика о пропуске истцом срока исковой давности о взыскании с него неустойки за период по 28.06.2016 (с учетом того, что исковое заявление подано в суд в электроном виде 29.06.2019), а также обоснованность доводов ответчика о расчете истцом неустойки по договору без учета положений пункта 3.4.2 договора в части перечисления 10% от суммы выполненных работ (8% в течение 10 дней с момента подписания акта, 2% в течение 6 месяцев с момента подписания акта), а также ввиду непредставления ответчиком контррасчета неустойки, суд самостоятельно исчислил сумму неустойки подлежащую начислению ответчику за период с 29.06.2016 по 30.06.2017 с учетом положений пункта 3.4.2 договора и произведенного сторонами зачета встречных требований 30.06.2016 на сумму 8 766 руб. 00 коп. (заявлено истцом и не оспорено ответчиком), которая составила 7 655 руб. 32 коп., в связи с чем, руководствуясь статьями 191, 195, 196, 199, 200, 309, 310, 330 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьями 70, 104, 110, 229 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,

решил:

Иск удовлетворить частично.

Взыскать с Закрытого акционерного общества "Союз-Строй" в пользу Общества с ограниченной ответственностью "Нордекс" 7 655 руб. 32 коп. неустойки за период с 29.06.2016 по 30.06.2017 и 1 861 руб. 00 коп. расходов по уплате государственной пошлины.

В удовлетворении остальной части иска отказать.

Возвратить Обществу с ограниченной ответственностью "Нордекс" из федерального бюджета 1 604 руб. 00 коп. государственной пошлины, излишне уплаченной по платежному поручению от 30.01.2017 № 62.

Решение

 подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в Тринадцатый арбитражный апелляционный суд в течение пятнадцати дней со дня принятия.

Судья С. А. Нестеров