Арбитражный суд Тамбовской области

392020, г. Тамбов, ул. Пензенская, д. 67/12

 http://tambov.arbitr.ru 

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

РЕШЕНИЕ

г. Тамбов

«21» февраля 2018г.                                                Дело № А64-8809/2017

Резолютивная часть решения объявлена «14» февраля 2018г.

Полный текст решения изготовлен «21» февраля 2018г.

Арбитражный суд Тамбовской области в составе судьи Макаровой Н.Ю.

при ведении протокола судебного заседания с использованием средств аудиозаписи помощником судьи Пенкиной Е.О.,

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску ОАО «Стрела», г. Тамбов

к ООО «Макс-Строй», Тамбовская область, Тамбовский район, с. Бокино

о взыскании 563 859 руб. 18 коп.

при участии в судебном  заседании:

от истца: ФИО1, доверенность № 2 от 09.01.2018

от ответчика: не явился, извещен

УСТАНОВИЛ:

Открытое акционерное общество «Стрела», г.Тамбов обратилось в Арбитражный суд Тамбовской области с исковым заявлением к Обществу с ограниченной ответственностью «Макс-Строй», Тамбовская область, Тамбовский район, с.Бокино о взыскании задолженности по договору подряда № 13-П от 14.12.2016г. в размере 563 859 руб. 18 коп., из них: 327 429,77 руб. – основной долг, 59 107,35 руб. – пени за период с 16.03.2017 по 29.11.2017, 177 322,06руб. – проценты за пользование коммерческим кредитом за период с 16.03.2017 по 29.11.2017.

Истец исковые требования поддерживает.

Представитель ответчика в судебное заседание не явился, о месте и времени проведения судебного заседания извещен надлежащим образом в соответствии со статьями 121, 123 АПК РФ 

В соответствии со ст.156 АПК РФ, суд считает возможным рассмотреть дело в отсутствие представителей ответчика  по имеющимся материалам, поскольку указанные лица надлежащим образом извещены о времени и месте судебного разбирательства.

Истец поддержал исковые требования.

Из материалов дела следует, что между Открытым акционерным обществом «Стрела» (Подрядчик, Истец) и Обществом с ограниченной ответственностью «Макс - Строй» (Заказчик, Ответчик) заключен договор подряда №13-П от 14.12.2016 г.

В соответствии с п.1.1 договора Подрядчик обязуется выполнить строительно-монтажные работы, указанные в п.1.2. настоящего договора, а Заказчик обязуется создать Подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и оплатить.

В соответствии с п.1.2 договора строительно-монтажные работы, выполняемые по настоящему договору заключаются в выделении и обеспечении работы башенного крана КБ-405 на объекте Заказчика: «Строительство 9-этажного многоквартирного жилого дома с помещениями общественного назначения по адресу: 

<

...>», проезд Запрудный, дом 4А».

В соответствии с п.2.1 договора стоимость работ определяется по планово-расчетным ценам и коэффициентам Подрядчика, действующим на момент выполнения работ, с учетом фактических объемов выполненных работ.

Оплата выполненных работ производится по планово - расчетным ценам и коэффициентам, разработанным и утвержденным Подрядчиком, действующим на момент выполнения работ (п.3.1 Оплата выполненных работ производится Заказчиком со следующей периодичностью: ежемесячно не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным, на основании выставленного счета 13.2 договора).

Истец в полном объеме исполнил принятые на себя обязательства и выполнил работы на общую сумму 1 227 429,77 рублей, в том числе:

 -по акту о приемке выполненных работ от 08.02.2017г. на сумму 60000 руб.,

 -по акту о приемке выполненных работ от 22.02.2017г. на сумму 171 000,48 руб.,

 -по акту о приемке выполненных работ от 24.03.2017г. на сумму 181 084,50 руб.,

 -по акту о приемке выполненных работ от 24.04.2017г. на сумму 177 271,49 руб.,

 -по акту о приемке выполненных работ от 23.05.2017г. на сумму 56 000,16 руб.,

 -по акту о приемке выполненных работ от 23.05.2017г. на сумму 76 800,44 руб.,

 -по акту о приемке выполненных работ от 26.06.2017г. на сумму 176 000,49 руб.,

 -по акту о приемке выполненных работ от 24.07.2017г. на сумму 49 271,14 руб.,

 -по акту о приемке выполненных работ от 24.07.2017г. на сумму 96 000,55 руб.,

 -по акту о приемке выполненных работ от 28.08.2017г. на сумму 184000,52 рублей.

 Акты от 24.07.2017г. направлены в адрес ответчика вместе с сопроводительным письмом б/н 10.09.2017г., получены ответчиком 12.10.2017г., возражения по ним не поступили.

 Акт от 28.08.2017г. направлен в адрес ответчика вместе с сопроводительным письмом №1200 10.11.2017г., получен ответчиком 10.11.2017г., возражения по ним не поступили.

 В соответствии с п. 3.3 договора «Срок оформления актов о приемке выполненных работ ф.КС-2 и справку о стоимости выполненных работ и затрат ф.КС-3 производится Заказчиком в срок не более 3-х суток со ни предъявления их Подрядчиком.

При несогласии с определением объема и стоимости оказанных услуг Подрядчик подписывает акт о приемке выполненных работ ф.КС-2 и справку о стоимости выполненных работ и затрат ф.КС-3, изложив особое мнение, и подается в арбитражный суд. 

До решения арбитражного суда объем и стоимость выполненных работ принимаются по данным Подрядчика.

В случае если Заказчик не подписывает акт о приемке выполненных работ ф.КС-2 и справку о стоимости выполненных работ и затрат ф.КС-3 (в том числе с особым мнением) и не направляет Подрядчику подписанные акты реки свыше 14 дней с даты их получения, то объем и стоимость выполненных работ принимаются по данным подрядчика по односторонне подписанному акту о приемке выполненных работ и справке о стоимости выполненных работ затрат».

Таким образом, стоимость работ за июль и август 2017г. принимается по односторонне подписанным актам о приемке выполненных работ.

 Кроме того, стоимость работ за июль и август 2017г. подтверждается рапортами о работе башенного крана.

 Ответчик свои обязательства по оплате работ выполнил лишь частично, уплатив истцу всего 900000 руб., в том числе:

 -по платежному поручению №178 от 12.05.2017 г. на 300 000 руб.,

 -по платежному поручению №205 от 30.05.2017 г. на 100 000 руб.,

 -по акту приема - передачи векселя от 30.06.2017 г. на 500 000 руб.

Окончательный расчет за выполненные работы ответчиком на настоящее время не произведен.

Размер основного долга ответчика перед истцом составляет 327429,77 руб.

Согласно п.5.4 договора если Заказчик нарушает предусмотренные настоящим договором сроки осуществления оплаты выполненных работ, то за нарушение договорных обязательств Заказчик уплачивает Подрядчику пени в размере 0,1% от просроченной суммы задолженности за каждый календарный день просрочки

Размер пени за период с 16.03.2017г. по 29.11.2017г. согласно прилагаемого расчета составил 19107,35 руб.

В соответствии с п.10.2 договора в случае если Заказчик не произвел оплаты работ в сроки, указанные в п.3.2 договора, считается, что он воспользовался отсрочкой платежа на условиях коммерческого кредита.

В силу п.10.3 договора пользование коммерческим кредитом возникает на шестнадцатый день месяца, следующего за расчетным.

На основании п.10.5 договора размер процентов за пользование коммерческим кредитом составляет 0,3% от суммы долга в день.

Размер процентов за пользование коммерческим кредитом за период с 16.03.2017 г по 19.11.2017 г. составил 177 322,06 руб.

Ответчику направлялась досудебная претензия с требованием оплатить основной долг, проценты за пользование коммерческим кредитом (исх.№858 от 25.08.2017г., получена ответчиком 04.09.2017г.), однако до настоящего времени требования истца не удовлетворены.

На основании вышеизложенного, истец обратился в Арбитражный суд Тамбовской области с настоящим исковым заявлением. 

Исследовав представленные доказательства, заслушав доводы представителей истца и ответчика, суд пришел к выводу, что уточненные исковые требования подлежат удовлетворению. 

При этом суд руководствовался следующим.

Согласно части 1 статьи 4 АПК РФ заинтересованное лицо вправе обратиться в арбитражный суд за защитой своих нарушенных или оспариваемых прав и законных интересов в порядке, установленном настоящим кодексом.

Согласно п.1 ст.8 ГК РФ гражданские права и обязанности возникают из оснований, предусмотренных законом и иными правовыми актами, а также из действий граждан и юридических лиц, которые хотя и не предусмотрены законом или такими актами, но в силу общих начал и смысла гражданского законодательства порождают гражданские права и обязанности. В соответствии с этим гражданские права и обязанности возникают, в том числе из договоров и иных сделок, предусмотренных законом, а также из договоров и иных сделок, хотя и не предусмотренных законом, но не противоречащих ему.

Указанная норма закона содержит перечень юридических фактов, с которыми связано возникновение гражданских прав и обязанностей, как по воле субъекта гражданского права, так и помимо его воли. В частности одним из оснований возникновения гражданских прав и обязанностей является договор.

Согласно пункту 1 статьи 702 ГК РФ по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

В соответствии с пунктом 1 статьи 711 ГК РФ, если договором подряда не предусмотрена предварительная оплата выполненной работы или отдельных ее этапов, заказчик обязан уплатить подрядчику обусловленную цену после окончательной сдачи результатов работы при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в согласованный срок, либо с согласия заказчика досрочно.

На основании п.1 ст.720 ГК РФ заказчик обязан в сроки и в порядке, которые предусмотрены договором подряда, с участием подрядчика осмотреть и принять выполненную работу (ее результат), а при обнаружении отступлений от договора, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе немедленно заявить об этом подрядчику.

В соответствии с п.1.2 договора строительно-монтажные работы, выполняемые по настоящему договору заключаются в выделении и обеспечении работы башенного крана КБ-405 на объекте Заказчика: «Строительство 9-этажного многоквартирного жилого дома с помещениями общественного назначения по адресу: 

<

...>», проезд Запрудный, дом 4А».

В соответствии с п.2.1 договора стоимость работ определяется по планово-расчетным ценам и коэффициентам Подрядчика, действующим на момент выполнения работ, с учетом фактических объемов выполненных работ.

Оплата выполненных работ производится по планово - расчетным ценам и коэффициентам, разработанным и утвержденным Подрядчиком, действующим на момент выполнения работ (п.3.1 ОплатавыполненныхработпроизводитсяЗаказчиком со следующей периодичностью: ежемесячно не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным, на основании выставленного счета 13.2 договора).

Истец в полном объеме исполнил принятые на себя обязательства и выполнил работы на общую сумму 1 227 429,77 рублей, в том числе:

 -по акту о приемке выполненных работ от 08.02.2017г. на сумму 60000 руб.,

 -по акту о приемке выполненных работ от 22.02.2017г. на сумму 171 000,48 руб.,

 -по акту о приемке выполненных работ от 24.03.2017г. на сумму 181 084,50 руб.,

 -по акту о приемке выполненных работ от 24.04.2017г. на сумму 177 271,49 руб.,

 -по акту о приемке выполненных работ от 23.05.2017г. на сумму 56 000,16 руб.,

 -по акту о приемке выполненных работ от 23.05.2017г. на сумму 76 800,44 руб.,

 -по акту о приемке выполненных работ от 26.06.2017г. на сумму 176 000,49 руб.,

 -по акту о приемке выполненных работ от 24.07.2017г. на сумму 49 271,14 руб.,

 -по акту о приемке выполненных работ от 24.07.2017г. на сумму 96 000,55 руб.,

 -по акту о приемке выполненных работ от 28.08.2017г. на сумму 184000,52 рублей.

 Акты от 24.07.2017г. направлены в адрес ответчика вместе с сопроводительным письмом б/н 10.09.2017г., получены ответчиком 12.10.2017г., возражения по ним не поступили.

 Акт от 28.08.2017г. направлен в адрес ответчика вместе с сопроводительным письмом №1200 10.11.2017г., получен ответчиком 10.11.2017г., возражения по ним не поступили.

 В соответствии с п. 3.3 договора «Срок оформления актов о приемке выполненных работ ф.КС-2 и справку о стоимости выполненных работ и затрат ф.КС-3 производится Заказчиком в срок не более 3-х суток со ни предъявления их Подрядчиком.

При несогласии с определением объема и стоимости оказанных услуг Подрядчик подписывает акт о приемке выполненных работ ф.КС-2 и справку о стоимости выполненных работ и затрат ф.КС-3, изложив особое мнение, и подается в арбитражный суд. 

До решения арбитражного суда объем и стоимость выполненных работ принимаются по данным Подрядчика.

В случае если Заказчик не подписывает акт о приемке выполненных работ ф.КС-2 и справку о стоимости выполненных работ и затрат ф.КС-3 (в том числе с особым мнением) и не направляет Подрядчику подписанные акты реки свыше 14 дней с даты их получения, то объем и стоимость выполненных работ принимаются по данным подрядчика по односторонне подписанному акту о приемке выполненных работ и справке о стоимости выполненных работ затрат».

Таким образом, стоимость работ за июль и август 2017г. принимается по односторонне подписанным актам о приемке выполненных работ.

 Кроме того, стоимость работ за июль и август 2017г. подтверждается рапортами о работе башенного крана.

 Ответчик свои обязательства по оплате работ выполнил лишь частично, уплатив истцу всего 900000 руб., в том числе:

 -по платежному поручению №178 от 12.05.2017 г. на 300 000 руб.,

 -по платежному поручению №205 от 30.05.2017 г. на 100 000 руб.,

 -по акту приема - передачи векселя от 30.06.2017 г. на 500 000 руб.

Окончательный расчет за выполненные работы ответчиком на настоящее время не произведен.

Размер основного долга ответчика перед истцом составляет 327429,77 руб.

Согласно п.5.4 договора если Заказчик нарушает предусмотренные настоящим договором сроки осуществления оплаты выполненных работ, то за нарушение договорных обязательств Заказчик уплачивает Подрядчику пени в размере 0,1% от просроченной суммы задолженности за каждый календарный день просрочки

Размер пени за период с 16.03.2017г. по 29.11.2017г. согласно прилагаемого расчета составил 19107,35 руб.

В соответствии со статьей 12 Гражданского кодекса Российской Федерации взыскание неустойки является одним из способов защиты нарушенного права. 

В силу пункта 1 статьи 329 Гражданского кодекса Российской Федерации исполнение обязательств может обеспечиваться неустойкой, залогом, удержанием имущества должника, поручительством, банковской гарантией, задатком и другими способами, предусмотренными залогом или договором.

Согласно пункту 1 статьи 330 Гражданского кодекса Российской Федерации неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности, в случае просрочки исполнения.

Неустойка является одним из способов обеспечения исполнения обязательств, средством возмещения кредитору потерь, вызванных нарушением должником своих обязательств.

В соответствии с п.10.2 договора в случае если Заказчик не произвел оплаты работ в сроки, указанные в п.3.2 договора, считается, что он воспользовался отсрочкой платежа на условиях коммерческого кредита.

В силу п.10.3 договора пользование коммерческим кредитом возникает на шестнадцатый день месяца, следующего за расчетным.

На основании п.10.5 договора размер процентов за пользование коммерческим кредитом составляет 0,3% от суммы долга в день.

Размер процентов за пользование коммерческим кредитом за период с 16.03.2017 г по 19.11.2017 г. составил 177 322,06 руб.

Согласно п.12 постановления Пленумов Верховного Суда Российской Федерации и Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 08.10.1998г. №13/14 «О практике применения положений Гражданского кодекса Российской Федерации о процентах за  пользование чужими денежными средствами» (постановление) проценты, взимаемые за пользование коммерческим кредитом, являются платой за пользование денежными средствами.

Согласно ст.823 ГК РФ к коммерческому кредиту относятся гражданско-правовые обязательства, предусматривающие отсрочку или рассрочку оплаты товаров, работ или услуг.

Если иное не предусмотрено правилами о договоре, из которого возникло действующее обязательство, и не противоречит существу такого обязательства, к коммерческому кредиту применяются нормы о договоре займа (п.2 ст.823 ГК РФ).

Проценты, взимаемые за пользование коммерческим кредитом, являются платой за пользование денежными средствами. 

При отсутствии в законе или договоре условий о размере порядке уплаты процентов за пользование коммерческим кредитом следует руководствоваться нормами статьи 809 ГК РФ.

Проценты за пользование коммерческим кредитом подлежат уплате с момента, определенного законом или договором. 

Взыскиваемые проценты являются платой за кредит, а не мерой ответственности за неисполнение обязательства, поэтому могут быть взысканы одновременно с неустойкой; расчет неустойки и процентов является верным; оснований для исключения ответственности в виде начисления неустойки, либо снижения ее размера применительно к статье 333 ГК РФ не установлено.

Исходя из вышеизложенного, исковые требования заявлены обоснованно и правомерно и подлежат удовлетворению.

В силу п.1 ст.65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

Исследовав обстоятельства дела, оценив в соответствии со статьей 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации представленные в материалы дела доказательства, арбитражный суд приходит к выводу об удовлетворении уточненных исковых требований. 

В соответствии со статьями 102, 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации расходы по государственной пошлине следует отнести на ответчика. 

Руководствуясь статьями 102, 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

РЕШИЛ:

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Макс-Строй», 

<

...> (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>, дата регистрации 28.10.2013г.) в пользу открытого акционерного общества «Стрела», 

<

...> (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, дата регистрации 03.11.1992г.) задолженность в сумме 563859,18руб., из них основной долг 327429,77 руб., 59107,35 руб. – пени за период с 16.03.17 по 29.11.17, проценты за пользование коммерческим кредитом за период с 16.03.17 по 29.11.17 в 177322,06 руб., расходы по оплате государственной пошлины в размере 14277 руб. 

Истцу выдать исполнительный лист после вступления решения в законную силу.

Решение арбитражного суда вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба. В случае подачи апелляционной жалобы, решение, если оно не отменено и не изменено, вступает в законную силу со дня принятия постановления арбитражного суда апелляционной инстанции.

Решение может быть обжаловано в течение месяца после его принятия в Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Тамбовской области.

СудьяН.Ю. Макарова