АРБИТРАЖНЫЙ СУД СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ  Именем Российской Федерации Р Е Ш Е Н И Е Резолютивная часть

Дело № А63-8366/2020

г. Ставрополь

09 сентября 2020 года

Арбитражный суд Ставропольского края в составе судьи Кузьминой М.Н., при  ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Сотниковой С.Р.,  рассмотрев исковое заявление  

 Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации города Ессентуки, г.  Ессентуки, ОГРН 1022601222665, ИНН 2626030460,  

к обществу с ограниченной ответственностью «Домострой», г. Пятигорск,  ОГРН 1122651030700, ИНН 2632805892,  

третьи лица, не заявляющие самостоятельных требований относительно предмета спора,  администрация городского округа город-курорт Ессентуки, Ставропольский край,  

г. Ессентуки, ОГРН 1022601227516, ИНН 2626008426, 

министерство дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края, г. Ставрополь,  ОГРН 1082635013450, ИНН 2636055305,  

ООО «Строительный дорожный контроль», г. Ставрополь, 

о расторжении муниципального контракта от 05.02.2020 № 0121200004719001125-01 на  реконструкцию Суворовского шоссе от ул. 41 проезд до ул. Коломейцева в г. Ессентуки  Ставропольского края, заключенного между Управлением жилищно-коммунального  хозяйства администрации города Ессентуки и обществом с ограниченной ответственностью  «Домострой»,  

встречное исковое заявление общества с ограниченной ответственностью «Домострой»,  ОГРН 1122651030700, ИНН 2632805892, г. Пятигорск, о внесении изменений в пункты 1.5,  2.4 муниципального контракта № 0121200004719001125-01 от 05.02.2020, заключенного  между Управлением жилищно-коммунального хозяйства администрации города Ессентуки и  ООО «Домострой», изложении их в следующих редакциях:  

«1.5. Сроки выполнения Работ: Отдельные этапы не предусмотрены. Выполнение работ  осуществляется с момента заключения муниципального контракта по 30 ноября 2021 года.  Подрядчик по согласованию с Заказчиком может досрочно сдать выполненные работы.  

Заказчик вправе досрочно принять и оплатить такую работу в соответствии с условиями  Контракта».  

«2.4. Источник финансирования контракта из следующих средств: - средства краевого  бюджета на 2020-2021 гг.; средства местного бюджета на 2020-2021 гг.»  

взыскании с Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации города  Ессентуки в пользу ООО «Домострой» задолженности за выполненные работы в размере  17296 523 руб. 47 коп.  

 Руководствуясь статьями 49, 51, 110, 167-170, 176 Арбитражного процессуального  кодекса Российской Федерации, суд   

РЕШИЛ:

В удовлетворении заявления ООО «Домострой», г. Пятигорск, о принятии  уточненных исковых требований по встречному исковому заявлению отказать.  

 В удовлетворении ходатайства ООО «Домострой», г. Пятигорск, о привлечении в  качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно  предмета спора, Министерства финансов Ставропольского края отказать.  

Исковые требования Управления жилищно-коммунального хозяйства  администрации города Ессентуки, г. Ессентуки, удовлетворить в полном объеме.  

 Расторгнуть муниципальный контракт от 05.02.2020 № 0121200004719001125-01  на реконструкцию Суворовского шоссе от ул. 41 проезд до ул. Коломейцева в г. Ессентуки  Ставропольского края, заключенный между Управлением жилищно-коммунального  хозяйства администрации города Ессентуки и обществом с ограниченной ответственностью  «Домострой», г. Пятигорск, ОГРН 1122651030700, ИНН 2632805892.  

 Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Домострой», г. Пятигорск,  ОГРН 1122651030700, ИНН 2632805892, в доход федерального бюджета 6 000 руб.  государственной пошлины.  

 Исполнительный лист выдать после вступления решения в законную силу. 

 Исковые требования ООО «Домострой», г. Пятигорск по встречному исковому  заявлению удовлетворить частично.  

 Взыскать с Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации города  Ессентуки, ОГРН 1022601222665, ИНН 2626030460, в пользу ООО «Домострой»,  г.Пятигорск, ОГРН 1122651030700, ИНН 2632805892, задолженность за выполненные  работы по муниципальному контракту от 05.02.2020 № 0121200004719001125-01 в размере  17296 523,47 руб.  

 В удовлетворении остальной части встречного иска отказать.  

 Исполнительный лист выдать после вступления решения в законную силу по  заявлению взыскателя.  

 Решение суда может быть обжаловано через Арбитражный суд Ставропольского  края в Шестнадцатый арбитражный апелляционный суд в месячный срок со дня его  принятия (изготовления в полном объеме) и в Арбитражный суд Северо-Кавказского округа  при условии, что оно было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной  инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока  подачи апелляционной жалобы.  

Судья М.Н.Кузьмина