РЕШЕНИЕ

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Дело № А40-96445/19-110-857

10 октября 2019 года

город Москва

 

Резолютивная часть решения объявлена 25 сентября 2019 года 

Решение в полном объеме изготовлено 10 октября 2019 года

Арбитражный суд города Москвы в составе:

судьи Мищенко А.В.  /единолично/, 

при ведении протокола судебного заседания секретарем Ермоловой В.В.,  

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску общества с ограниченной ответственностью "СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНАЯ КОМПАНИЯ ГЕНЕЗИС" (123112, Москва город, набережная Пресненская, дом 12, этаж 12 офис Б3, ОГРН: 1157746837148) к обществу с ограниченной ответственностью "МЕМФИС КОНСТРАКШН" (127051, Москва город, бульвар Петровский, дом 3, строение 2, эт 3 пом 1 ком 2 (РМ10Н), ОГРН: 1147746059361) о взыскании 5 852 374 руб.

при участии:

от истца – Эррингтон А.Е. по дов. от  04.07.2019,

от ответчика – не явился, 

УСТАНОВИЛ:

общество с ограниченной ответственностью "СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНАЯ КОМПАНИЯ ГЕНЕЗИС" обратилось с иском к обществу с ограниченной ответственностью "МЕМФИС КОНСТРАКШН" о взыскании  (с учетом принятых изменений в порядке ст.49 АПК РФ) 4 501 826,50 руб. задолженности по Договору №ВХ34/18-М от 30.05.2018, 1 021 914,62 руб. неустойки за период с 11.02.2019 по 25.09.2019.

Ответчик отзыв не представил, в судебное заседание не явился, извещен надлежащим образом о времени и месте судебного заседания. С учетом своевременного размещения информации о времени и месте судебного заседания на официальном сайте арбитражного суда в сети Интернет, суд   рассмотрел спор в их отсутствие на основании ст.ст.121, 123, 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, п.5 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 17.02.2011г. №12 «О некоторых вопросах применения АПК РФ в редакции Федерального закона от 27.07.2010 №228-ФЗ «О внесении изменений в АПК РФ».

Заслушав представителя истца, исследовав и оценив представленные доказательства, суд пришел к следующим выводам:

Как усматривается из материалов дела, 30 мая 2018 г. между ООО «СМК Генезис» (Подрядчик) и ООО «Мемфис Констракшн» (Заказчик) заключен Договор строительного подряда № ВХ34/18-М по объекту: «Образовательный центр БНК (блок начальных классов) и ДОУ (Дошкольное образовательное учреждение), расположенному по адресу: г. Москва, ул. Верхняя 34» (далее по тексту - Договор).

В соответствии с п. 1.1. Договора Подрядчик обязуется выполнить собственными силами и/или с привлечением третьих лиц комплекс работ по разработке рабочей документации на устройство навесной фасадной системы стенового ограждения с воздушным зазором G-tech производства ООО «ИК Генезис» по ТУ 5740-001-17956375-2015 и устройство навесного вентилируемого фасада на Объекте в соответствии с Техническим заданием на проектирование (Приложение №1 к Договору), также, произвести комплекс строительно-монтажных работ по устройству навесного вентилируемого фасада, а Заказчик обязуется принять выполненные Подрядчиком Работы надлежащего качества и оплатить их на условиях настоящего Договора.

В соответствии с п. 1.2. Договора Подрядчик собственными силами обязуется выполнить Строительно-монтажные работы на основании Документации, утвержденной Заказчиком штампом «В производство работ» за подписью ответственного лица Заказчика.

В соответствии с п. 1.3. Проектные и Строительно-монтажные работы выполняются поэтапно в соответствии с Графиком выполнения работ (Приложение №3 Договору).

01 сентября 2018 г. между ООО «СМК Генезис» и ООО «Мемфис Констракшн» заключено Дополнительное соглашение № 1 к Договору № ВХ34/18-М от 30 мая 2018 г.

29 октября 2018 г. между ООО «СМК Генезис» и ООО «Мемфис Констракшн» заключено Дополнительное соглашение № 2 к Договору № ВХ34/18-М от 30 мая 2018 г.

07 ноября 2018 г. между ООО «СМК Генезис» и ООО «Мемфис Констракшн» заключено Дополнительное соглашение № 3 к Договору № ВХ34/18-М от 30 мая 2018 г.

17 октября 2018 г. между ООО «СМК Генезис» и ООО «Мемфис Констракшн» заключено Дополнительное соглашение № 4 к Договору № ВХ34/18-М от 30 мая 2018 г.

9 января 2019 г. между ООО «СМК Генезис» и ООО «Мемфис Констракшн» заключено Дополнительное соглашение № 5 к Договору № ВХ34/18-М от 30 мая 2018 г.

В соответствии с п. 1 ст. 740 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору строительного подряда подрядчик обязуется в установленный договором срок построить по заданию заказчика определенный объект либо выполнить иные строительные работы, а заказчик обязуется создать подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную цену.

В соответствии с п. 1 ст. 746 Гражданского кодекса Российской Федерации оплата выполненных подрядчиком работ производится заказчиком в размере, предусмотренном сметой, в сроки и в порядке, которые установлены законом или договором строительного подряда.

В соответствии с п. 2.3. Договора оплата выполненных работ производится Заказчиком в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты подписания Сторонами Справок о стоимости выполненных работ по форме КС-3 и Актов о приемке выполненных работ по форме КС-2, на основании выставленных Подрядчиком счетов за вычетом гарантийного удержания в размере 5% от стоимости выполненных работ. Сумма выплаченного аванса зачитывается Сторонами ежемесячно в счет оплаты стоимости выполненных работ в размере, пропорциональном стоимости фактически выполненных работ в отчетном периоде.

30 января 2019 г. согласно Акту о приемке выполненных работ по форме КС-2 ООО «СМК Генезис» сдало, а ООО «Мемфис Констракшн» приняло выполненные работы по Договору.

30 января 2019 г. между ООО «СМК Генезис» и ООО «Мемфис Констракшн» была подписана Справка о стоимости выполненных работ по форме КС-3.

В соответствии с Актом сверки взаиморасчетов от 28 февраля 2019 г. между ООО «СМК Генезис» и ООО «Мемфис Констракшн» по Договору задолженность ООО «Мемфис Констракшн» перед ООО «СМК Генезис» составляет 5 402 086 руб. 91 коп. (пять миллионов четыреста две тысячи восемьдесят шесть рублей девяносто одна копейка). С учетом гарантийных удержаний в размере 5% (пять процентов от оборота) итоговая задолженность    ООО    «Мемфис    Констракшн»    перед    ООО    «СМК    Генезис» составляет 4 501 826 руб. 5 коп. (четыре миллиона пятьсот одна тысяча восемьсот двадцать шесть рублей пять копеек).

Таким образом,   задолженность ООО «Мемфис Констракшн» перед ООО «СМК Генезис» по Договору составляет 4 501 826 руб. 5 коп, (четыре миллиона пятьсот одна тысяча восемьсот двадцать шесть рублей пять копеек).

При указанных обстоятельствах иск в этой части подлежит удовлетворению.

Согласно пункту 1 статьи 330 ГК РФ неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения. По требованию об уплате неустойки кредитор не обязан доказывать причинение ему убытков.

В соответствии с п. 7.2. Договора в случае просрочки Заказчиком, не по вине Подрядчика, сроков оплаты Работ по подписанным Заказчиком Актам о приемке выполненных Проектных работ, Актам о приемке выполненных Строительных работ, Подрядчик имеет право взыскать с Заказчика неустойку в размере 0,1% от просроченной денежной суммы за каждый день просрочки.

В соответствии с п. 2.3. Договора оплата выполненных работ производится Заказчиком в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты подписания Сторонами Справок о стоимости выполненных работ по форме КС-3 и Актов о приемке выполненных работ по форме КС-2, на основании выставленных Подрядчиком счетов за вычетом гарантийного удержания в размере 5% от стоимости выполненных работ. Сумма выплаченного аванса зачитывается Сторонами ежемесячно в счет оплаты стоимости выполненных работ в размере, пропорциональном стоимости фактически выполненных работ в отчетном периоде.

В связи с тем, что Справка о стоимости выполненных работ по форме КС-3 и Акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 были подписаны 30 января 2019 г. оплата должна была произведена до 11 февраля 2019 г.

В соответствии с Актом сверки взаиморасчетов от 28 февраля 2019 г. между ООО «СМК Генезис» и ООО «Мемфис Констракшн» последняя оплата в адрес ООО «СМК Генезис» была произведена 27 декабря 2018 г.

Таким образом, в период с 11.02.2019 по 25.09.2019 Ответчиком допущена просрочка оплаты, сумма неустойки в соответствии с п. 7.2 Договора  за период с 11.02.19 по  11.04.19 составляет 1 021 914,62 руб.  

В соответствии со ст. 110 АПК РФ расходы по госпошлине относятся на ответчика.  

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 110, 123,156,169-171 АПК РФ, 

Р Е Ш И Л:

Взыскать с  общества с ограниченной ответственностью "МЕМФИС КОНСТРАКШН"  в пользу общества с ограниченной ответственностью "СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНАЯ КОМПАНИЯ ГЕНЕЗИС"  4 501 826 руб.  62  коп. задолженности, 1 021 914 руб. 62  коп. неустойки, 50 619 руб. в возмещение расходов по госпошлине.

Возвратить  обществу с ограниченной ответственностью "СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНАЯ КОМПАНИЯ ГЕНЕЗИС" из федерального бюджета госпошлину в размере  1 643 руб.,  уплаченную по чеку-ордеру  от  12.04.19 №132

Решение может быть обжаловано в Девятый арбитражный апелляционный суд в течение  месяца с даты его принятия.

Судья:               А.В. Мищенко