АРБИТРАЖНЫЙ СУД ПРИМОРСКОГО КРАЯ Именем Российской Федерации 

РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ

Дело № А51-19667/2023

г. Владивосток

24 июня 2024 года

Арбитражный суд Приморского края в составе судьи Буров А.В.,  

рассмотрев в судебном заседании дело по иску АДМИНИСТРАЦИЯ  ДАЛЬНЕГОРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА (ИНН 

<

***>, ОГРН  

<

***>)  

к ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  ДАЛЬНЕВОСТОЧНАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "АРМАДА" (ИНН 

<

***>,  ОГРН 

<

***>)  

Руководствуясь статьями 167-170, Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации, суд  

р е ш и л:

Обязать ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  ДАЛЬНЕВОСТОЧНАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "АРМАДА" в течение 30  календарных дней с даты вступления настоящего решения в законную силу,  безвозмездно устранить недостатки работ, выполненных по муниципальному контракту   № 0120300020019000020_ 168 от 17.05.2019 г., а именно:  

на участке 1 от ПК-0 до ПК-4: 

произвести замену ламп газоразрядных высокого давления в количестве 17 штук и  обеспечить их работоспособность в соответствии с проектной документацией Шифр  2017.41.1-000 и техническим заданием к муниципальному контракту: Г  

ПК0 – ПК1 в количестве 3 штук (напротив здания № 44а по ул. Осипенко  напротив середины торгового ряда «Кирпичики» - 1);  

ПК1 - ПК2 в количестве 3 штук (напротив середины дома № 40 по ул. Осипенко, в  конце торгового ряда «Кирпичики» напротив здания № 45 по проспекту 50 Октября - 1,  напротив здания № 47 по ул. Осипенко - 1);  

ПК2 – ПК3 в количестве 5 штук (напротив дома № 43 по ул. Осипенко по левой  стороне Бульвара - 2, в конце дома № 40 по ул. Осипенко - 2, напротив дома № по ул.  Осипенко по правой стороне Бульвара - 1); j  

ПК3 - ПК4 в количестве 6 штук (напротив здания № 26а по ул. Осипенко по  правой стороне Бульвара - 4, напротив дома № 39 по ул. Осипенко по левой стороне  Бульвара - 2);  

на всем участке от дома № 45 по ул. Осипенко до здания № 39 по ул. Осипенко  устранить проседание (нарушение плоскостности) брусчатки вдоль водоотводных лотков  (между лотком и бордюрным камнем);  

на всем участке (11К0 - 11К4) от здания № 45 по ул. Осипенко до здания № 39 по  ул. Осипенко на брусчатом покрытии устранить повсеместные провалы (проседание)  брусчатого покрытия глубиной от 1 до 3 см и площадью от 2 до 6 кв.м, путем устранения  проседания подстилающих слоев брусчатого покрытия на ПK0 — ПK 1, ПК2 – ПК3. ПК3  - ПК4.  

Взыскать с ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  ДАЛЬНЕВОСТОЧНАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "АРМАДА" в доход  федерального бюджета 6000,00 руб. государственной пошлины.  

Выдать исполнительный лист после вступления решения в законную силу. 

Решение может быть обжаловано через Арбитражный суд Приморского края в  течение месяца со дня его принятия в Пятый арбитражный апелляционный суд и в  Арбитражный суд Дальневосточного округа в срок, не превышающий двух месяцев со  дня вступления решения в законную силу, при условии, что оно было предметом  рассмотрения апелляционной инстанции.  

Судья Буров А.В.