Арбитражный суд Волгоградской области

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

город  Волгоград

«18» июня 2020 года

Дело № А12-43504/2019

Резолютивная часть решения изготовлена 10 июня 2020 года.

Решение в полном объеме изготовлено 18 июня 2020 года.

Судья Арбитражного суда Волгоградской области Бударина Е.С.,

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Ремизовой О.В., 

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы дела по исковому заявлению      унитарной некоммерческой организации «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) к обществу с ограниченной ответственностью «СтройПортал» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) о взыскании неустойки

при участии в судебном заседании:

от истца – ФИО1, представитель по доверенности № 70 от 27.12.2019;

от ответчика – ФИО2, представитель по доверенности № 5 от 14.02.2020

УСТАНОВИЛ:

Унитарная некоммерческая организация «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов» (далее – истец, УНО «Региональный фонд капремонта») обратилась в Арбитражный суд Волгоградской области с исковым заявлением, уточненным в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ), к обществу с ограниченной ответственностью «СтройПортал» (далее – ответчик, ООО «СтройПортал») о взыскании неустойки в размере 40 152 руб. 50 коп., судебных расходов по оплате государственной пошлины в размере 2 000 руб.

В судебном заседании истец на удовлетворении исковых требований настаивала.

Представитель ответчика поддержал доводы, изложенные в отзыве на исковое заявлении, просила в удовлетворении иска отказать.

При рассмотрении дела установлены следующие обстоятельства, имеющие значение для рассмотрения дела. 

Между УНО «Региональный фонд капремонта» (Заказчик) и ООО «СтройПортал» (Исполнитель) 17.10.2018 заключен договор  № 269-ВО-СК-2017 на оказание услуги по проведению технического и авторского надзора за выполнением работ по сохранению объекта культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенного на территории Волгоградской области (далее – Договор).

По указанному Договору заказчик поручает, а Исполнитель обязуется после получения письменного уведомления от Заказчика оказать услуги по проведению технического и авторского надзора за выполнением работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома, являющегося объектом культурного наследия, расположенного по адресу: 

<

...>.

Во исполнение условий договора Исполнитель обязан:

- обеспечить организацию и проведение технического и авторского надзора за выполнением работ на объекте в течение всего периода производства работ,  в  соответствии  с  требованиями  и  условиями настоящего договора и приложений к нему, НПА, а также устранения выявленных недостатков (дефектов) в период гарантийного срока (п.7.3.2.);

- осуществлять контроль за сроками и качеством выполнения работ и выполнением условий и требований на объекте, предусмотренных договором подряда и приложений к нему (п.7.3.3.);

- не менее двух раз в неделю посещать объект с предоставлением Заказчику фотоотчета в порядке, предусмотренном договором, а также с внесением при каждом посещении объекта отметки в общем журнале производства работ о посещении объекта и выявленных замечаниях (п.7.3.42.).

Пунктом 7.3.43 Договора предусмотрена обязанность Исполнителя не реже двух раз в неделю (по вторникам и четвергам) в форме письменного еженедельного отчета об исполнении договора информировать Заказчика о ходе оказания услуг на объекте с направлением скан-копии данного отчета с приложением фотоотчета по факту посещения объекта в течении рабочей недели на электронный адрес представителя Заказчика.

Однако в нарушение условий договора на 23.07.2018 Исполнитель не предоставлял в установленные сроки оперативную отчетность за период с 10.07.2018 по 23.07.2018.

В соответствии с п. 10.2.8 Договора, в случае нарушения сроков оказания услуг по техническому и авторскому надзору, исполнитель выплачивает Заказчику пени за просрочку в размере 1/130 (одной сто тридцатой) действующей на день уплаты ставки рефинансирования Центрального Банка РФ от стоимости работ по настоящему договору с даты выявления нарушений за каждый день просрочки до даты устранения.

В связи с нарушением ответчиком сроков предоставления оперативной отчётности  истец произвел начисление пени в размере 1 128 руб. 58 коп.

25.09.2017 между УНО «Региональный фонд капремонта» (Заказчик) и ООО «СтройПортал» (Исполнитель)  заключен договор № 259-В-СК-2017 на оказание услуг по проведению технического и авторского надзора за выполнением работ по сохранению объекта культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенного на территории Волгоградской области, в том числе многоквартирном доме по адресу: 

<

...> (капитальный ремонт крыши, фасада).

Согласно пункту 5.3 Договора в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня подписания Заказчиком всех актов выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома по форме № КС-2, а также справок о стоимости выполненных работ по форме КС-3, Исполнитель предоставляет Заказчику Акт по оказанию услуг по строительному контролю, оформленный в соответствии с пунктом 6.2 договора.

Работы по капитальному ремонту выполнялись ООО «Рос-сервис» на основании договора № 755453-В-СМР-2017 от 01.09.2017.

Подписание актов выполненных работ по капитальному ремонту завершено 03.12.2018.

Таким образом, акт оказания услуг по строительному контролю, по мнению истца, должен был быть представлен региональному оператору не позднее 02.01.2019.

Акты оказания услуг по осуществлению авторского надзора поступили в адрес Заказчика 13.03.2019.

В соответствии с пунктом 10.2.8 договора, в случае нарушения сроков оказания услуг по техническому и авторскому надзору, Исполнитель выплачивает Заказчику пени за просрочку в размере 1/130 (одной сто тридцатой) действующей на день уплаты ставки рефинансирования Центрального Банка РФ от стоимости работ по настоящему договору за каждый день просрочки до даты устранения.

В связи с нарушением ответчиком сроков предоставления актов оказанных услуг истец произвел начисление пени в размере 5 407 руб. 29 коп. (с учетом представленных уточнений).

13.06.2018 между УНО «Региональный фонд капремонта» (Заказчик) и ООО «СтройПортал» (Исполнитель)  заключен договор № 280-В-СК-2017 на оказание услуг по проведению технического и авторского надзора за выполнением работ по сохранению объекта культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенного на территории Волгоградской области, в том числе многоквартирном доме по адресу: 

<

...> (капитальный ремонт крыши, фасада).

Согласно пункту 5.3 Договора в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня подписания Заказчиком всех актов выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома по форме № КС-2, а также справок о стоимости выполненных работ по форме КС-3, Исполнитель предоставляет Заказчику Акт по оказанию услуг по строительному контролю, оформленный в соответствии с пунктом 6.2 договора.

Работы по капитальному ремонту выполнялись ООО «Высотафасадремонт» на основании договора № 972849-В-СМР-2014-2016-2017-2018.

Подписание актов выполненных работ по капитальному ремонту завершено 19.12.2018.

Таким образом, акт оказания услуг по строительному контролю, по мнению истца, должен был быть представлен региональному оператору не позднее 19.01.2019.

Акты оказания услуг по осуществлению авторского надзора. поступили в адрес Заказчика 17.04.2019.

В соответствии с пунктом 10.2.8 договора, в случае нарушения сроков оказания услуг по техническому и авторскому надзору, Исполнитель выплачивает Заказчику пени за просрочку в размере 1/130 (одной сто тридцатой) действующей на день уплаты ставки рефинансирования Центрального Банка РФ от стоимости работ по настоящему договору за каждый день просрочки до даты устранения.

В связи с нарушением ответчиком сроков предоставления актов оказанных услуг истец произвел начисление пени в размере 1 216 руб. 59 коп. (с учетом представленных уточнений).

25.09.2017 между УНО «Региональный фонд капремонта» (Заказчик) и ООО «СтройПортал» (Исполнитель)  заключен договор № 258-В-СК-2017 на оказание услуг по проведению технического и авторского надзора за выполнением работ по сохранению объекта культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенного на территории Волгоградской области, в том числе многоквартирном доме по адресу: 

<

...> (капитальный ремонт крыши, фасада), ул. Тряскина, д. 39 (капитальный ремонт крыши, фасада), ул. Тряскина, д. 42 (капитальный ремонт фасада, систем электроснабжения, теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения)

Согласно пункту 5.3 Договора в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня подписания Заказчиком всех актов выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома по форме № КС-2, а также справок о стоимости выполненных работ по форме КС-3, Исполнитель предоставляет Заказчику Акт по оказанию услуг по строительному контролю, оформленный в соответствии с пунктом 6.2 договора.

Работы по капитальному ремонту выполнялись ООО «Рос-сервис» на основании договора № 760593-В-СМР-2017 от 04.09.2017.

Подписание актов выполненных работ по капитальному ремонту дома № 18 по ул. Тряскина завершено 05.06.2018.

Таким образом, акт оказания услуг по строительному контролю, по мнению истца, должен был быть представлен региональному оператору не позднее 05.07.2018.

Акты оказания услуг по осуществлению авторского надзора поступили в адрес Заказчика 17.04.2019.

Подписание актов выполненных работ по капитальному ремонту дома № 39 по ул. Тряскина завершено 15.05.2018.

Таким образом, акт оказания услуг по строительному контролю, по мнению истца, должен был быть представлен региональному оператору не позднее 15.06.2018.

Акты оказания услуг по осуществлению авторского надзора поступили в адрес Заказчика 17.04.2019. 

Подписание актов выполненных работ по капитальному ремонту дома № 39 по ул. Тряскина завершено 04.07.2018.

Таким образом, акт оказания услуг по строительному контролю, по мнению истца, должен был быть представлен региональному оператору не позднее 06.08.2018.

Акты оказания услуг по осуществлению авторского надзора поступили в адрес Заказчика 19.09.2019.

В соответствии с пунктом 10.2.8 договора, в случае нарушения сроков оказания услуг по техническому и авторскому надзору, Исполнитель выплачивает Заказчику пени за просрочку в размере 1/130 (одной сто тридцатой) действующей на день уплаты ставки рефинансирования Центрального Банка РФ от стоимости работ по настоящему договору за каждый день просрочки до даты устранения.

В связи с нарушением ответчиком сроков предоставления актов оказанных услуг истец произвел начисление пени в размере 20 899 руб. 57 коп. (с учетом представленных уточнений).

25.09.2017 между УНО «Региональный фонд капремонта» (Заказчик) и ООО «СтройПортал» (Исполнитель)  заключен договор № 280-В-СК-2017 на оказание услуг по проведению технического и авторского надзора за выполнением работ по сохранению объекта культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенного на территории Волгоградской области, в том числе многоквартирном доме по адресу: 

<

...> (капитальный ремонт крыши, фасада).

Согласно пункту 5.3 Договора в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня подписания Заказчиком всех актов выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома по форме № КС-2, а также справок о стоимости выполненных работ по форме КС-3, Исполнитель предоставляет Заказчику Акт по оказанию услуг по строительному контролю, оформленный в соответствии с пунктом 6.2 договора.

Работы по капитальному ремонту выполнялись ООО «Управление Фасадремонт Волгоградгоргражданстрой» на основании договора № 785015-В-СМР-2017 от 26.09.2017.

Подписание актов выполненных работ по капитальному ремонту завершено 09.04.2018.

Таким образом, акт оказания услуг по строительному контролю, по мнению истца, должен был быть представлен региональному оператору не позднее 09.05.2019.

Акты оказания услуг по осуществлению авторского надзора. поступили в адрес Заказчика 17.04.2019.

В соответствии с пунктом 10.2.8 договора, в случае нарушения сроков оказания услуг по техническому и авторскому надзору, Исполнитель выплачивает Заказчику пени за просрочку в размере 1/130 (одной сто тридцатой) действующей на день уплаты ставки рефинансирования Центрального Банка РФ от стоимости работ по настоящему договору за каждый день просрочки до даты устранения.

В связи с нарушением ответчиком сроков предоставления актов оказанных услуг истец произвел начисление пени в размере 483 руб. 43 коп. (с учетом представленных уточнений).

25.09.2017 между УНО «Региональный фонд капремонта» (Заказчик) и ООО «СтройПортал» (Исполнитель)  заключен договор № 264-В-СК-2017 на оказание услуг по проведению технического и авторского надзора за выполнением работ по сохранению объекта культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенного на территории Волгоградской области, в том числе многоквартирном доме по адресу: 

<

...> (капитальный ремонт крыши, фасада).

Согласно пункту 5.3 Договора в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня подписания Заказчиком всех актов выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома по форме № КС-2, а также справок о стоимости выполненных работ по форме КС-3, Исполнитель предоставляет Заказчику Акт по оказанию услуг по строительному контролю, оформленный в соответствии с пунктом 6.2 договора.

Работы по капитальному ремонту выполнялись ООО «Управление Фасадремонт Волгоградгоргражданстрой» на основании договора № 973145-В-СМР-2017-2018 от 15.06.2018.

Подписание актов выполненных работ по капитальному ремонту завершено 26.12.2018.

Таким образом, акт оказания услуг по строительному контролю, по мнению истца, должен был быть представлен региональному оператору не позднее 26.01.2019.

Акты оказания услуг по осуществлению авторского надзора. поступили в адрес Заказчика 17.04.2019.

В соответствии с пунктом 10.2.8 договора, в случае нарушения сроков оказания услуг по техническому и авторскому надзору, Исполнитель выплачивает Заказчику пени за просрочку в размере 1/130 (одной сто тридцатой) действующей на день уплаты ставки рефинансирования Центрального Банка РФ от стоимости работ по настоящему договору за каждый день просрочки до даты устранения.

В связи с нарушением ответчиком сроков предоставления актов оказанных услуг истец произвел начисление пени в размере 1 096 руб. 35 коп. (с учетом представленных уточнений).

25.09.2017 между УНО «Региональный фонд капремонта» (Заказчик) и ООО «СтройПортал» (Исполнитель)  заключен договор № 257-В-СК-2017 на оказание услуг по проведению технического и авторского надзора за выполнением работ по сохранению объекта культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенного на территории Волгоградской области, в том числе многоквартирном доме по адресу: 

<

...> (капитальный ремонт крыши, фасада).

Согласно пункту 5.3 Договора в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня подписания Заказчиком всех актов выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома по форме № КС-2, а также справок о стоимости выполненных работ по форме КС-3, Исполнитель предоставляет Заказчику Акт по оказанию услуг по строительному контролю, оформленный в соответствии с пунктом 6.2 договора.

Работы по капитальному ремонту выполнялись ООО «Инжениринг строй» на основании договора № 755493-В-ВО-СМР-2017 от 30.08.2018.

Подписание актов выполненных работ по капитальному ремонту завершено 17.09.2018.

Таким образом, акт оказания услуг по строительному контролю, по мнению истца, должен был быть представлен региональному оператору не позднее 17.10.2019.

Акты оказания услуг по осуществлению по технического надзора поступили в адрес Заказчика 17.04.2019, авторского надзора – 30.05.2019

В соответствии с пунктом 10.2.8 договора, в случае нарушения сроков оказания услуг по техническому и авторскому надзору, Исполнитель выплачивает Заказчику пени за просрочку в размере 1/130 (одной сто тридцатой) действующей на день уплаты ставки рефинансирования Центрального Банка РФ от стоимости работ по настоящему договору за каждый день просрочки до даты устранения.

В связи с нарушением ответчиком сроков предоставления актов оказанных услуг истец произвел начисление пени в размере 5 857 руб. 62 коп. (с учетом представленных уточнений).

13.06.2018 между УНО «Региональный фонд капремонта» (Заказчик) и ООО «СтройПортал» (Исполнитель)  заключен договор № 279-В-СК-2017 на оказание услуг по проведению технического и авторского надзора за выполнением работ по сохранению объекта культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенного на территории Волгоградской области, в том числе многоквартирном доме по адресу: 

<

...> (капитальный ремонт крыши, фасада).

Согласно пункту 5.3 Договора в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня подписания Заказчиком всех актов выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома по форме № КС-2, а также справок о стоимости выполненных работ по форме КС-3, Исполнитель предоставляет Заказчику Акт по оказанию услуг по строительному контролю, оформленный в соответствии с пунктом 6.2 договора.

Работы по капитальному ремонту выполнялись ООО «Высотафасадремонт» на основании договора № 971843-В-СМР-2015-2017-2018 от 09.06.2018.

Подписание актов выполненных работ по капитальному ремонту завершено 13.12.2018.

Таким образом, акт оказания услуг по строительному контролю, по мнению истца, должен был быть представлен региональному оператору не позднее 13.01.2019.

Акты оказания услуг по осуществлению авторского и технического надзора поступили в адрес Заказчика 17.04.2019.

В соответствии с пунктом 10.2.8 договора, в случае нарушения сроков оказания услуг по техническому и авторскому надзору, Исполнитель выплачивает Заказчику пени за просрочку в размере 1/130 (одной сто тридцатой) действующей на день уплаты ставки рефинансирования Центрального Банка РФ от стоимости работ по настоящему договору за каждый день просрочки до даты устранения.

В связи с нарушением ответчиком сроков предоставления актов оказанных услуг истец произвел начисление пени в размере 2 711 руб. 39 коп. (с учетом представленных уточнений).

25.09.2017 между УНО «Региональный фонд капремонта» (Заказчик) и ООО «СтройПортал» (Исполнитель)  заключен договор № 262-В-СК-2017 на оказание услуг по проведению технического и авторского надзора за выполнением работ по сохранению объекта культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенного на территории Волгоградской области, в том числе многоквартирном доме по адресу: 

<

...> (капитальный ремонт крыши, фасада).

Согласно пункту 5.3 Договора в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня подписания Заказчиком всех актов выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома по форме № КС-2, а также справок о стоимости выполненных работ по форме КС-3, Исполнитель предоставляет Заказчику Акт по оказанию услуг по строительному контролю, оформленный в соответствии с пунктом 6.2 договора.

Работы по капитальному ремонту выполнялись ООО «Управление Фасадремонт Волгоградгоргражданстрой» на основании договора № 785873-В-СМР-2017 от 27.09.2017.

Подписание актов выполненных работ по капитальному ремонту завершено 15.03.2018.

Таким образом, акт оказания услуг по строительному контролю, по мнению истца, должен был быть представлен региональному оператору не позднее 15.04.2019.

Акты оказания услуг по осуществлению авторского и технического надзора поступили в адрес Заказчика 19.04.2019.

В соответствии с пунктом 10.2.8 договора, в случае нарушения сроков оказания услуг по техническому и авторскому надзору, Исполнитель выплачивает Заказчику пени за просрочку в размере 1/130 (одной сто тридцатой) действующей на день уплаты ставки рефинансирования Центрального Банка РФ от стоимости работ по настоящему договору за каждый день просрочки до даты устранения.

В связи с нарушением ответчиком сроков предоставления актов оказанных услуг истец произвел начисление пени в размере 599 руб. 53 коп. (с учетом представленных уточнений).

25.09.2017 между УНО «Региональный фонд капремонта» (Заказчик) и ООО «СтройПортал» (Исполнитель)  заключен договор № 260-В-СК-2017 на оказание услуг по проведению технического и авторского надзора за выполнением работ по сохранению объекта культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенного на территории Волгоградской области.

Согласно пункту 5.3 Договора в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня подписания Заказчиком всех актов выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома по форме № КС-2, а также справок о стоимости выполненных работ по форме КС-3, Исполнитель предоставляет Заказчику Акт по оказанию услуг по строительному контролю, оформленный в соответствии с пунктом 6.2 договора.

Работы по капитальному ремонту выполнялись ООО «Империя» на основании договора № 777687-В-СМР-2017 от 18.09.2017.

Подписание актов выполненных работ по капитальному ремонту дома № 4, 6 по ул. Тряскина завершено 19.03.2018.

Таким образом, акт оказания услуг по строительному контролю, по мнению истца, должен был быть представлен региональному оператору не позднее 19.04.2018.

Акты оказания услуг по осуществлению авторского и технического надзора поступили в адрес Заказчика 19.04.2019.

Подписание актов выполненных работ по капитальному ремонту дома № 17 по ул. Тряскина завершено 23.04.2018.

Таким образом, акт оказания услуг по строительному контролю, по мнению истца, должен был быть представлен региональному оператору не позднее 23.05.2018.

Акты оказания услуг по осуществлению авторского и технического надзора поступили в адрес Заказчика 21.05.2019.

В соответствии с пунктом 10.2.8 договора, в случае нарушения сроков оказания услуг по техническому и авторскому надзору, Исполнитель выплачивает Заказчику пени за просрочку в размере 1/130 (одной сто тридцатой) действующей на день уплаты ставки рефинансирования Центрального Банка РФ от стоимости работ по настоящему договору за каждый день просрочки до даты устранения.

В связи с нарушением ответчиком сроков предоставления актов оказанных услуг истец произвел начисление пени в размере 752 руб. 22 коп. (с учетом представленных уточнений).

Отказ ответчика исполнить требование Заказчика об оплате штрафа в добровольном порядке послужил основанием для обращения истца в суд.

Согласно статьям 309 и 310 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями. Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом.

В силу пункта 1 статьи 779 ГК РФ по договору возмездного оказания услуг исполнитель обязуется по заданию заказчика оказать услуги (совершить определенные действия или осуществить определенную деятельность), а заказчик обязуется оплатить эти услуги. 

На основании пункта 1 статьи 781 ГК РФ заказчик обязан оплатить оказанные ему услуги в сроки и в порядке, которые указаны в договоре возмездного оказания услуг.

В соответствии с пунктом 1 статьи 329 ГК РФ исполнение обязательств может обеспечиваться неустойкой, залогом, удержанием имущества должника, поручительством, банковской гарантией, задатком и другими способами, предусмотренными законом или договором.

Согласно пункту 1 статьи 330 ГК РФ неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения. По требованию об уплате неустойки кредитор не обязан доказывать причинение ему убытков.

Согласно пункту 1 статьи 401 ГК РФ лицо, не исполнившее обязательства либо исполнившее его ненадлежащим образом, несет ответственность при наличии вины (умысла или неосторожности), кроме случаев, когда законом или договором предусмотрены иные основания ответственности. Лицо признается невиновным, если при той степени заботливости и осмотрительности, какая от него требовалась по характеру обязательства и условиям оборота, оно приняло все меры для надлежащего исполнения обязательства. 

Исходя из содержания указанных норм, привлечение к гражданско-правовой ответственности возможно за неисполнение или неисполнение конкретной, четко определенной обязанности, предусмотренной договором, поскольку только в таком случае возможно сделать вывод о нарушении должником его условий.

В соответствии с пунктом 10.2.8 договоров, в случае нарушения сроков оказания услуг по техническому и авторскому надзору, Исполнитель выплачивает Заказчику пени за просрочку в размере 1/130 (одной сто тридцатой) действующей на день уплаты ставки рефинансирования Центрального Банка РФ от стоимости работ по настоящему договору за каждый день просрочки до даты устранения.

Возражая против удовлетворения иска, представитель ответчика указывает, что услуги оказаны ООО «СтройПортал» в установленные договорами сроки. Неполучение истцом промежуточных отчетов вызвано техническими причинами, при этом истец не сообщил о получении отчетов несвоевременно и не потребовал устранения нарушений.

Также представитель ответчика пояснила, что акты оказанных услуг по заключенным договорам своевременно направлялись в адрес Заказчика. Данное обстоятельство подтверждается представленными в материалы дела сопроводительными письмами № 732 от 28.12.2018, № 744 от 29.12.2018, № 333 от 20.07.2018, № 364 от 04.07.2018 с отметками о вручении УНО «Региональный фонд капремонта».

Поскольку подписанные со стороны заказчика акты оказанных услуг либо мотивированные отказы в подписании данных актов оказанных услуг в адрес ответчика не поступали, ООО  «СтройПортал» повторно направил в адрес истца акты оказанных услуг по данным договорам (письма № 125 от 11.03.2019, № 125 от 17.04.2019). 

Доказательств возвращения Заказчиком в адрес Исполнителя актов оказанных услуг в связи с необходимостью устранения выявленных нарушений, истцом в материалы дела не представлено.

Согласно пункту 5.3 Договора в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня подписания Заказчиком всех актов выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома по форме № КС-2, а также справок о стоимости выполненных работ по форме КС-3, Исполнитель предоставляет Заказчику Акт по оказанию услуг по строительному контролю, оформленный в соответствии с пунктом 6.2 договора.

Согласно условиям заключенных договоров обязанность Исполнителя по предоставлению актов оказания услуг поставлена в зависимость от действий третьих лиц (подписания Заказчиком и Подрядчиком всех актов выполненных работ по форме № КС-2, а также справок о стоимости выполненных работ по форме КС-3). Условиями договоров не предусмотрена обязанность Заказчика информировать Исполнителя о дате подписания актов с Подрядчиком. 

Однако Исполнитель стороной по договорам на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирных домов не является, а, следовательно, сведениями о дате подписания актов выполненных работ не располагает.

Кроме того, истцом не представлены доказательства подписания актов по форме КС-2 и КС-3 между Заказчиком и Подрядчиком именно в указанные в иске и претензиях  даты.

При подобных обстоятельствах, суд приходит к выводу, что оснований для привлечения ответчика к гражданско-правовой ответственности, предусмотренной условиями Договоров, не имеется, в связи с чем, отказывает истцу в удовлетворении заявленных исковых требованиях в полном объеме. 

Согласно статье 168 АПК РФ при принятии решения суд решает вопросы о распределении судебных расходов. 

В соответствии со статьей 110 АПК РФ судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны.

На основании изложенного, руководствуясь статьями 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд  

РЕШИЛ:

в удовлетворении исковых требований отказать.

Возвратить унитарной некоммерческой организации «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов» из средств федерального бюджета государственную пошлину в размере 529 руб. 

Решение может быть обжаловано в арбитражный суд апелляционной инстанции в течение месяца со дня его принятия через Арбитражный суд Волгоградской области.

Судья                                                                          Е.С. Бударина