РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

Дело № А40-223715/22-68-1533

г. Москва

26 января 2023 года

Резолютивная часть решения объявлена 17 января 2023 года

Решение в полном объеме изготовлено 26 января 2023 года 

 

Судья Абрамова Е.А.

при ведении протокола помощником судьи А.Ю. Ярошенко,

рассмотрев в открытом судебном заседании дело

по исковому заявлению ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОЕКТНО-ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ТРАНСПОРТНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА "ЖЕЛДОРИЗЫСКАНИЯ" (394036, ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ, ВОРОНЕЖ ГОРОД, ЧАЙКОВСКОГО 

<

...>, ОГРН: 

<

***>, Дата присвоения ОГРН: 02.07.2003, ИНН: 

<

***>, КПП: 366601001)

к ответчику АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РЖДСТРОЙ" (105005, 

<

...>, ОГРН: 

<

***>, Дата присвоения ОГРН: 19.01.2006, ИНН: 

<

***>, КПП: 770901001), 

третье лицо ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ" (107174, РОССИЯ, Г. МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ БАСМАННЫЙ, НОВАЯ БАСМАННАЯ УЛ., Д. 2/1, СТР. 1, ОГРН: 

<

***>, Дата присвоения ОГРН: 23.09.2003, ИНН: 

<

***>, КПП: 770801001)

о взыскании 3 934 964,47 рублей 

при участии:

от истца: ФИО1 по дов. от 23.03.2022 г. № 3, паспорт, диплом;

от ответчика: ФИО2 по дов. от 27.12.2022 г. № 22/649, паспорт, диплом;

от третьего лица: не явился, извещен;   

УСТАНОВИЛ:

Иск заявлен о взыскании задолженности в сумме 3.934.964 руб. 47 коп. 

Представитель истца в судебном заседание требования поддержал.

Представитель ответчика в судебном заседании против удовлетворения иска возражал.

           Третье лицо в судебное заседание не явилось, о рассмотрении спора извещено в соответствии со ст. 123 АПК РФ, от третьего лица поступил отзыв на иск.  

Непосредственно исследовав и оценив все представленные по делу доказательства, выслушав представителей сторон, суд пришел к следующим выводам. 

 Как усматривается из материалов дела и установлено судом, между АО «РЖДстрой» и ООО Проектно-Изыскательский институт Транспортного Строительства «ЖелДорИзыскания» были заключены договоры №17-21-07-7542, №17-21-07-7548, №17-21-07-7549, № 17-21-07-7550. №17-21-07-7551, №17-21-07-7552, №17-21-07-7553, №17-21-07-7554, №17-21-07-7555, №17-21-07-7562, №17-21-07-7563 от «13» сентября 2021 г. на выполнение проектных работ.

Вышеуказанные договоры обладают идентичным предметом и условиями.

Согласно п. 2.2 вышеуказанных договоров оплата за выполненные и принятые генподрядчиком работы осуществляется в следующем порядке:

п. 2.2.1 оплата в размере 95% (девяносто пяти процентов) от цены настоящего договора (этапа работ) осуществляется генподрядчиком после подписания сторонами акта о выполненных работах (оказанных услугах) формы № ФПУ-26 в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты получения генподрядчиком счета и счета-фактуры путем перечисления генподрядчиком денежных средств на расчетный счет подрядчика.

В соответствии с п. 2.2.2 окончательный расчет (гарантийное удержание) в размере 5% (пяти процентов) от цены настоящего договора генподрядчик производит в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней после завершения всех работ по настоящему договору и получения положительного заключения ведомственной/государственной экспертизы проектной документации и/или инженерных изысканий и достоверности определения сметной стоимости строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства ведомственной экспертизы ОАО «РЖД» и предоставления подрядчиком счета, счета-фактуры, при наличии подписанных сторонами актов формы № ФПУ-26, путем перечисления генподрядчиком денежных средств на расчетный счет подрядчика.

Гарантийное удержание является обеспечительной мерой, гарантирующей надлежащее качество выполняемых работ и покрытие возможных расходов генподрядчика, вызванных ненадлежащим выполнением подрядчиком своих обязательств по договору.

В соответствии с п. 2.2.3 в случае если по итогам проведения экспертизы проектной документации и/или инженерных изысканий будет получено отрицательное заключение экспертизы ОАО «РЖД» по причинам, не зависящим от подрядчика, или генподрядчик (либо генеральный заказчик в лице соответствующего подразделения ОАО «РЖД», далее - заказчик) не осуществляет направление проектной документации и/или результатов инженерных изысканий на ведомственную экспертизу ОАО «РЖД» либо на государственную экспертизу в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты приемки всех работ, выплата гарантийного удержания осуществляется в порядке, предусмотренном подпунктом 2.2.2 настоящего договора не позднее 30 (тридцати) календарных дней с момента наступления указанных событий.

Работы подрядчиком по договорам №17-21-07-7542, №17-21-07-7548, №17-21-07-7549, № 17-21-07-7550, №17-21-07-7551, №17-21-07-7552, №17-21-07-7553, №17-21-07-7554, №17-21-07-7554, №17-21-07-7555, №17-21-07-7562, №17-21-07-7563 от 13 сентября 2021 г. выполнены в полном объеме, приемка работ согласно п. 5.1 договора произведена в согласованные сроки, генподрядчиком работы приняты, что подтверждается актом о выполненных работах (оказанных услугах), подписанным с обеих сторон. 

Согласно п.1 дополнительного соглашения № 1 к договору №17-21-07-7548 цена настоящего договора составляет всего с НДС - 6 339 733, 75 руб.

Согласно п.1 дополнительного соглашения № 1 к договору №17-21-07-7549 Цена настоящего договора составляет всего с НДС - 6 165 075, 28 руб.

Согласно п.1 дополнительного соглашения № 1 к договору №17-21-07-7550 цена настоящего договора составляет всего с НДС - 6 043 108, 75 руб.

Согласно п.1 дополнительного соглашения № 1 к договору №17-21-07-7551 цена настоящего договора составляет всего с НДС - 7 717 562, 96 руб.

Согласно п.1 дополнительного соглашения № 1 к договору №17-21-07-7552 цена настоящего договора составляет всего с НДС - 6 014 715, 48 руб.

Согласно п.1 дополнительного соглашения № 1 к договору №17-21-07-7553 цена настоящего договора составляет всего с НДС - 6 599 624, 47 руб.

Согласно п.1 дополнительного соглашения № 1 к договору №17-21-07-7554 цена настоящего договора составляет всего с НДС - 7 313 124, 56 руб.

Согласно п.1 дополнительного соглашения № 1 к договору №17-21-07-7555 цена настоящего договора составляет всего с НДС - 6 949 183, 57 руб.

Согласно п.1 дополнительного соглашения № 1 к договору №17-21-07-7562 цена настоящего договора составляет всего с НДС - 6 460 866, 61 руб.

Согласно п.1 дополнительного соглашения № 1 к договору №17-21-07-7563 цена настоящего договора составляет всего с НДС - 9 016 157, 30 руб.

Согласно п.1 дополнительного соглашения № 1 к договору №17-21-07-7542 цена настоящего договора составляет всего с НДС - 7 517 353, 68 руб.

Истец сослался на то, что АО «РЖДстрой» не осуществило направление проектной документации и/или результатов инженерных изысканий на государственную экспертизу/ ведомственную экспертизу в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты приёмки всех работ. Следовательно, ответчик обязан был осуществить выплату гарантийного удержания: по договору №17-21-07-7542 сумма гарантийного удержания составила 375 867 руб. 68 коп., по договору №17-21-07-7548 сумма гарантийного удержания составила 316 993 руб. 44 коп., по договору №17-21-07-7549 сумма гарантийного удержания составила 308 253  руб. 76 коп., по договору №17-21-07-7550 сумма гарантийного удержания составила 302 155  руб. 45 коп., по договору №17-21-07-7551 сумма гарантийного удержания составила 385 878 руб. 14 коп., по договору №17-21-07-7552 сумма гарантийного удержания составила 300 737 руб. 77 коп., по договору №17-21-07-7553 сумма гарантийного удержания составила 329 981 руб. 21 коп., по договору №17-21-07-7554 сумма гарантийного удержания составила 365 656 руб. 23 коп., по договору №17-21-07-7555 сумма гарантийного удержания составила 347 459 руб. 18 коп., по договору №17-21-07-7562 сумма гарантийного удержания составила 451 175 руб. 75 коп., по договору №17-21-07-7563 сумма гарантийного удержания составила 450 807  руб. 86 коп.

Согласно акту сверки взаимных расчетов за период с 01.01.2022г по 31.06.2022г задолженность АО «РЖДстрой» перед ООО ПИИТС «ЖелДорИзыскания» по договорам №17-21-07-7542, №17-21-07-7548, №17-21-07-7549, № 17-21-07-7550, №17-21-07-7551, №17-21-07-7552, №17-21-07-7553, №17-21-07-7554, №17-21-07-7555, №17-21-07-7562, №17-21-07-7563 составляет 3 934 964  руб. 47 коп.

В соответствии со ст. 758 ГК РФ по договору подряда на выполнение проектных и изыскательских работ подрядчик (проектировщик, изыскатель) обязуется по заданию заказчика разработать техническую документацию и (или) выполнить изыскательские работы, а заказчик обязуется принять и оплатить их результат.

Согласно ст. 762 ГК РФ по договору подряда на выполнение проектных и изыскательских работ заказчик обязан, если иное не предусмотрено договором: уплатить подрядчику установленную цену полностью после завершения всех работ или уплачивать ее частями после завершения отдельных этапов работ; возместить подрядчику дополнительные расходы, вызванные изменением исходных данных для выполнения проектных и изыскательских работ вследствие обстоятельств, не зависящих от подрядчика.

АО «РЖДстрой» подтвердило факт наличия задолженности перед ООО Проектно-Изыскательский институт Транспортного Строительства «ЖелДорИзыскания» актом сверки взаиморасчетов за период с 01.01.2022 по 31.03.2022. Однако претензию истца о погашении задолженности ответчик оставил без удовлетворения, что послужило основанием обращения в суд с настоящим иском. 

 Возражая против удовлетворения иска, ответчик сослался на то, что осуществил направление проектной документации на экспертизу в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты приемки всех работ в полном объёме, тем самым выполнив условие, предусмотренное пунктом 2.2.3 договоров, что подтверждено актами по форме ФПУ-26 от 31.12.2021. В настоящее время ведомственная экспертиза ОАО «РЖД» проводится, но не завершена по причине наличия ряда замечаний, в связи с чем, обязанность по погашению задолженности не наступила. 

Между тем, документального подтверждения тому, что в работе истца имеются замечания в материалы дела не представлено. Более того, согласно письменным пояснениям третьего лица, ОАО «РЖД», поступившим в суд, выполненные подрядчиком работы приняты заказчиком без замечаний, оплачены в размере 100% от цены договора после подписания сторонами акта о выполненных работах (оказанных услугах) формы ФПУ-26, в течение 60 календарных дней с даты получения заказчиком полного пакета документов к оплате.

При указанных обстоятельствах, доводы ответчика подлежат отклонению, а требование истца о взыскании задолженности суд удовлетворяет в заявленном размере как обоснованное и документально подтвержденное. 

Расходы истца по уплате государственной пошлины относятся на ответчика в соответствии со ст. 110 АПК РФ. 

Учитывая изложенное и руководствуясь ст. ст. 8, 11, 12, 309, 310, 753, 758  ГК РФ, ст. ст. 41,  65, 67, 71, 110, 167 - 171, 176, 180, 181 АПК РФ, суд

РЕШИЛ:

Взыскать с АО "РЖДСТРОЙ" (ОГРН: 1067746082546, ИНН: 7708587205) в пользу ООО ПРОЕКТНО-ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ТРАНСПОРТНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА "ЖЕЛДОРИЗЫСКАНИЯ" (ОГРН: 1033600110488, ИНН: 3666106809) задолженность в сумме 3.934.964 руб. 47 коп. и расходы по уплате государственной пошлины в сумме 42.675 руб. 

             Решение может быть обжаловано в течение месяца со дня принятия в Девятом арбитражном апелляционном суде.

              Судья                   Е.А. Абрамова