АРБИТРАЖНЫЙ СУД 

ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ-ЧУВАШИИ

428000, Чувашская Республика, г. Чебоксары, проспект Ленина, 4 http://www.chuvashia.arbitr.ru/

Именем Российской Федерации

Р Е Ш Е Н И Е

Дело № А79-6023/2017

г. Чебоксары

08 августа 2017 года

Арбитражный суд Чувашской Республики - Чувашии в составе судьи Кисаповой Н.В.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1, рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску

муниципального бюджетного учреждения «Управление жилищным фондом города Чебоксары» 

(

<

...>, ОГРН 

<

***>)

к обществу с ограниченной ответственностью «Стройцентр» 

(

<

...>, ОГРН 

<

***>)

о взыскании 888 243 руб. 73 коп.,

с участием в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, общества с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Теплый Дом», общества с ограниченной ответственностью «Мирный-1»,

при участии:

от истца: ФИО2 по доверенности от 20.01.2017,

установил:

муниципальное бюджетное учреждение «Управление жилищным фондом города Чебоксары» обратилось в суд с иском к обществу с ограниченной ответственностью «Стройцентр» о взыскании 888 243 руб. 73 коп. неосновательного обогащения.

 Исковые требования мотивированы неисполнением ответчиком обязательств по возврату излишне уплаченных денежных средств по контрактам от 02.12.2014 № 73, от 11.12.2014 № 79, от 15.12.2014 № 80. 

Представитель истца в судебном заседании иск поддержал.

Ответчик и третьи лица, надлежащим образом извещенные о дате и времени судебного заседания, в суд не явились, отзыв на иск не представили.

В порядке статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации дело рассмотрено в отсутствие ответчика и третьих лиц.

Выслушав представителя истца, изучив материалы дела, суд установил следующее.

02.12.2014 между истцом (Заказчик) и ответчиком (Подрядчик) заключен контракт № 73 (далее – Контракт № 73) по условиям которого Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению работ по ремонту кровли многоквартирного дома, расположенного по адресу: 

<

...>.

Срок исполнения Подрядчиком своих обязательств в течение 45 дней с момента заключения контракта (пункт 4.2 Контракта № 73).

Оплата выполненных работ производится путем безналичного расчета в течение 5 дней на основании подписанных Сторонами акта о приемке выполненных работ формы № КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат формы № КС-3, счета-фактуры, представленного Подрядчиком (пункт 2.6 Контракта № 73).

В соответствии с пунктом 2.1 Контракта № 73 (в редакции дополнительного соглашения от 23.12.2014) цена контракта составляет 1 169 291 руб. 35 коп., из которых:

- 876 968 руб. 49 коп. субсидий из бюджета города Чебоксары (75% от общей стоимости выполняемых работ);

- 292 322 руб. 83 коп. субсидий из внебюджетного источника (средства собственников помещений в размере 25% от общей стоимости выполняемых работ).

В соответствии с пунктом 2 дополнительного соглашения от 23.12.2014 к Контракту № 73 финансирование выполненных работ за счет средств собственников помещений в размере 25%, что составляет 292 322 руб. 83 коп., производится в следующем порядке:

- Заказчик обязуется финансировать выполнение работ в размере 22 279 руб. 56 коп. за счет муниципального образования города Чебоксары (за муниципальные квартиры);

- финансирование выполненных работ в размере 270 043 руб. 27 коп. осуществляется за счет средств собственников жилых помещении (граждан).

Во исполнение Контракта №73 Подрядчиком выполнены работы на сумму 1 169 291 руб. 32 коп., что подтверждается актом о приемке выполненных работ формы № КС-2 и справкой о стоимости выполненных работ и затрат формы № КС-3 от 19.12.2014.

За выполненные работы истцом ответчику по платежному поручению от 19.12.2014 № 181843 перечислено 32 404 руб. 52 коп., по платежному поручению от 19.12.2014 № 181842 перечислено 1 275 507 руб. 67 коп.

Сумма переплаты за счет средств муниципального образования города Чебоксары по Контракту № 73 составляет 408 664 руб. 14 коп.

11.12.2014 между истцом (Заказчик) и ответчиком (Подрядчик) заключен контракт № 79 (далее – Контракт №79) по условиям которого Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению работ по ремонту фасада жилого многоквартирного дома, расположенного по адресу: 

<

...>.

Срок исполнения Подрядчиком своих обязательств в течение 45 дней с момента заключения контракта (пункт 4.2 Контракта № 79).

Оплата выполненных работ производится путем безналичного расчета в течение 5 дней на основании подписанных Сторонами акта о приемке выполненных работ формы № КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат формы № КС-3, счета-фактуры, представленного Подрядчиком (пункт 2.6 Контракта № 79).

В соответствии с пунктом 2.1 Контракта № 79 (в редакции дополнительного соглашения от 23.12.2014) цена контракта составляет 896 820 руб. 40 коп., из которых:

- 672 615 руб. 30 коп. субсидий из бюджета города Чебоксары (75% от общей стоимости выполняемых работ);

- 224 205 руб. 10 коп. субсидий из внебюджетного источника (средства собственников помещений в размере 25% от общей стоимости выполняемых работ).

В соответствии с пунктом 2 дополнительного соглашения к Контракту № 79 финансирование выполненных работ за счет средств собственников помещений в размере 25%, что составляет 224 205 руб. 10 коп., производится в следующем порядке:

- Заказчик обязуется финансировать выполнение работ в размере 17 087 руб. 92 коп. за счет муниципального образования города Чебоксары (за муниципальные квартиры);

- финансирование выполненных работ в размере 207 117 руб. 18 коп. осуществляется за счет средств собственников жилых помещений (граждан).

Во исполнение Контракта № 79 Подрядчиком выполнены работы на сумму 896 820 руб. 40 коп., что подтверждается актом о приемке выполненных работ формы № КС-2 и справкой о стоимости выполненных работ и затрат формы № КС-3 от 12.12.2014.

За выполненные работы истцом ответчику по платежному поручению от 19.12.2014 № 181850 перечислено 990 229 руб. 83 коп., по платежному поручению от 19.12.2014 № 181851 перечислено 25 156 руб. 98 коп.

Сумма переплаты за счет средств муниципального образования города Чебоксары по Контракту № 79 составляет 325 683 руб. 59 коп.

15.12.2014 между истцом (Заказчик) и ответчиком (Подрядчик) заключен контракт № 80 (далее – Контракт № 80) по условиям которого Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению работ по ремонту кровли многоквартирного дома, расположенного по адресу: 

<

...>.

Срок исполнения Подрядчиком своих обязательств в течение 30 дней с момента заключения контракта (пункт 4.2 Контракта № 80).

Оплата выполненных работ производится путем безналичного расчета в течение 15 дней на основании подписанных Сторонами акта о приемке выполненных работ формы № КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат формы № КС-3, счета-фактуры, представленного Подрядчиком (пункт 2.6 Контракта № 80).

В соответствии с пунктом 2.1 Контракта № 80 (в редакции дополнительного соглашения от 19.12.2014) цена контракта составляет 1 351 483 руб. 40 коп., из которых:

- 1 013 612 руб. 55 коп. субсидий из бюджета города Чебоксары (75% от общей стоимости выполняемых работ);

- 337 870 руб. 85 коп. субсидий из внебюджетного источника (средства собственников помещений в размере 25% от общей стоимости выполняемых работ).

В соответствии с пунктом 2 дополнительного соглашения от 19.12.2014 к Контракту № 80 финансирование выполненных работ за счет средств собственников помещений в размере 25%, что составляет 337 870 руб. 85 коп., производится в следующем порядке:

- Заказчик обязуется финансировать выполнение работ в размере 32 472 руб. 79 коп. за счет муниципального образования г. Чебоксары (за муниципальные квартиры);

- финансирование выполненных работ в размере 305 398 руб. 06 коп. осуществляется за счет средств собственников жилых помещений (граждан).

Во исполнение Контракта № 80 Подрядчиком выполнены работы на сумму 1 351 483 руб. 40 коп., что подтверждается актом о приемке выполненных работ формы № КС-2 и справкой о стоимости выполненных работ и затрат формы № КС-3 от 19.12.2014.

За выполненные работы истцом ответчику по платежному поручению от 19.12.2014 № 181844 перечислено 1 162 731 руб. 27 коп., по платежному поручению от 19.12.2014 № 181845 перечислено 37 250 руб. 06 коп.

Сумма переплаты за счет средств муниципального образования города Чебоксары за выполненные работы по Контракту № 80 составила 153 895 руб. 99 коп.

Размер переплаты Заказчика по контрактам от 02.12.2014 № 73, от 11.12.2014 № 79, от 15.12.2014 № 80 составляет 888 243 руб. 72 коп.

Истцом в адрес ответчика направлены претензии от 04.10.2016 № 23-06-3652, от 01.11.2016 № 23-06-4113, от 31.03.2016 с требованием о возврате излишне перечисленных денежных средств.

Неисполнение требований, изложенных в претензиях, послужило основанием для обращения в суд с настоящим иском.

В соответствии со статьями 309 и 310 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов. Односторонний отказ от исполнения обязательства не допускается.

 По договору строительного подряда подрядчик обязуется в установленный договором срок построить по заданию заказчика определенный объект либо выполнить иные строительные работы, а заказчик обязуется создать подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную цену (пункт 1 статьи 740 Гражданского кодекса Российской Федерации).

В соответствии со статьей 1102 Гражданского кодекса Российской Федерации обязанность возвратить потерпевшему неосновательно приобретенное или сбереженное имущество (неосновательное обогащение) возникает у лица, которое без установленных законом, иными правовыми актами или сделкой оснований приобрело или сберегло имущество за счет другого лица (потерпевшего), за исключением случаев, предусмотренных статьей 1109 названного Кодекса.

Из названной нормы следует, что обязательства из неосновательного обогащения возникают при извлечении выгоды за чужой счет, когда такое обогащение происходит при отсутствии к тому законных оснований.

При взыскании неосновательного обогащения истец должен доказать наличие факта приобретения (сбережения) ответчиком имущества без оснований и за счет истца, а также стоимость такого приобретения (сбережения).

Оценив представленные в материалы дела доказательства в соответствии со статьей 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации суд пришел к выводу, что истец произвел оплату в сумме, превышающей стоимость фактически выполненных ответчиком работ, в связи с чем излишне перечисленные истцом денежные средства в  размере 888 243 руб. 72 коп. являются неосновательным обогащением ответчика. 

Доказательств возврата излишне перечисленных денежных средств материалы дела не содержат.

На основании изложенного, суд считает требование истца о взыскании 888 243 руб. 72 коп. неосновательного обогащения подлежащим удовлетворению. 

Расходы по уплате государственной пошлины суд по правилам статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации относит на ответчика.

Руководствуясь статьями 110, 167 – 170, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

Р Е Ш И Л:

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Стройцентр» в пользу муниципального бюджетного учреждения «Управление жилищным фондом города Чебоксары» 888 243 (Восемьсот восемьдесят восемь тысяч двести сорок три) руб. 72 коп. неосновательного обогащения.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Стройцентр» в доход федерального бюджета 20 765 (Двадцать тысяч семьсот шестьдесят пять) руб. 00 коп. государственной пошлины.

Решение может быть обжаловано в Первый арбитражный апелляционный суд в течение месяца с момента его принятия.

Решение арбитражного суда первой инстанции может быть обжаловано в кассационном порядке в Арбитражный суд Волго-Вятского округа при условии, что оно было предметом рассмотрения Первого арбитражного апелляционного суда или Первый арбитражный апелляционный суд отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.

Кассационная жалоба может быть подана в срок, не превышающий двух месяцев со дня вступления в законную силу обжалуемых решения, постановления арбитражного суда.

Жалобы подаются через Арбитражный суд Чувашской Республики – Чувашии.

Судья

Н.В. Кисапова