АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ 115225, г.Москва, ул. Большая Тульская, д. 17 http://www.msk.arbitr.ru Именем Российской Федерации 

РЕШЕНИЕ

Дело № А40-12789/23-5-100

31 августа 2023 года

г. Москва

 Резолютивная часть решения объявлена 22 августа 2023 года Решение в полном объеме изготовлено 31 августа 2023 года Арбитражный суд г. Москвы в составе: судьи Киселевой Е.Н, единолично, при ведении протокола секретарем судебного заседания Ворониной И.С., рассмотрев в открытом судебном заседании дело 

по иску Общества с ограниченной ответственностью «Предприятие "Поток» (142281,  Московская область, Протвино город, Ленина улица, 33, ОГРН: 1025004861232, дата  присвоения ОГРН: 24.12.2002, ИНН: 5037043419)  

ответчик: Публичное акционерное общество «Ростелеком» (191167, город Санкт- Петербург, Синопская наб., дом 14, литера А, ОГРН: 1027700198767, дата присвоения  ОГРН: 09.09.2002, ИНН: 7707049388)  

о взыскании долга за выполненные работы по Заказу № 4 от 27 мая 2021 года к Договору  подряда № 3540734 от 06.11.2020 года в размере 7 388 698 руб. 38 коп., долга за  выполненные работы по Заказу № 5 от 21 июня 2021 года к Договору подряда № 3540734  от 06.11.2020 года в размере 8 757 700 руб. 74 коп.  

по встречному иску: Публичного акционерного общества «Ростелеком» (191167, город  СанктПетербург, Синопская наб., дом 14, литера А, ОГРН: 1027700198767, дата  присвоения ОГРН: 09.09.2002, ИНН: 7707049388)  

к ответчику: Общество с ограниченной ответственностью «Предприятие «Поток» (142281,  Московская область, Протвино город, Ленина улица, 33, ОГРН: 1025004861232, дата  присвоения ОГРН: 24.12.2002, ИНН: 5037043419)  

о взыскании неосновательного обогащения в размере 4 226 900 руб. 14 коп., неустойки в  размере 6 340 350 руб. 22 коп.  

при участии: согласно протоколу; 

УСТАНОВИЛ:

ООО «Предприятие «Поток» обратилось в суд с иском к ПАО «Ростелеком» о  взыскании задолженности за выполненные работы по заказу № 4 от 27.05.2021 к договору  подряда № 3540734 от 06.11.2020 в размере 7 388 698 руб. 38 коп., задолженности за  выполненные работы по заказу № 5 от 21.06.2021 по договору подряда № 3540734 от  06.11.2020 в размере 8 757 700 руб. 74 коп.  

Определением суда от 20.04.2023 в порядке ст. 132 АПК РФ для рассмотрения  совместно с первоначальным принято встречное исковое заявление Публичного  акционерного общества «Ростелеком» к Обществу с ограниченной ответственностью  «Предприятие «Поток» о взыскании неосновательного обогащения в размере 4 226 900  руб. 14 коп., неустойки в размере 6 340 350 руб. 22 коп.  

Исковые требования по первоначальному иску мотивированы тем, что ответчик в  нарушение принятых на себя обязательств выполненные работы не оплатил.  

Встречный иск мотивирован тем, что работы по заказам № 4, 5 фактически не  выполнены, и оснований для удержания перечисленных авансовых платежей у  подрядчика не имеется.  

Истец заявленные требования в судебном заседании поддержал, в удовлетворении  встречного иска просил отказать.  

Ответчик, заявленные требования не признал, на удовлетворении встречного иска  настаивал.  

Выслушав стороны, исследовав письменные материалы дела, суд пришел к  следующим выводам.  

В ходе судебного разбирательства установлено, что 06 ноября 2020 года между  Публичным акционерным обществом «Ростелеком» (ПАО «Ростелеком») (заказчик) и  ООО «Предприятие «Поток» (подрядчик) был заключен Договор на выполнение  ремонтно-строительных работ по реконструкции гидроизоляции и дренажной системы  технического здания в Пушкинском районе Московской области № 3540734, в  соответствии с п. 1.1. которого, подрядчик обязуется по заданию Заказчика в объеме,  предусмотренном Техническим заданием, на основании согласованных и подписанных  Сторонами Заказов, составленных по форме, согласованной Сторонами в Приложении   № 3, выполнить Работы по проектированию, Строительно-монтажные работы, включая  обеспечение Материалами и Оборудованием с доставкой на Площадку, необходимыми  для выполнения Работ на Объекте, а заказчик обязуется принять и оплатить выполненные  Работы по соответствующему Заказу в порядке, определенном в настоящем Договоре.  

Согласно п. 1.3. Договора - Работы по соответствующему Заказу выполняются в  объеме, предусмотренном в данном Заказе, в соответствии с Техническим заданием,  согласованном Сторонами в приложении № 2 к Договору.  

В соответствии с п. 1.4. Договора - Работы, указанные в п. 1.1 Договора,  выполняются на Площадках, указанных в Техническом задании.  

 Подрядчик от своего имени обязуется заключить договор с Экспертной  организацией, предварительно письменно согласовав её выбор с Заказчиком, а также  совершить иные необходимые действия для организации проведения экспертизы и  получения положительного экспертного заключения по разработанной проектно-сметной  документации (п. 1.6 договора).  

Работы выполняются поэтапно. Этапы и сроки их выполнения указаны в  Приложении № 6 - график выполнения работ (п. 1.9 договора).  

Согласно п. 3.7.1. Договора - Заказчик, в течение 20 календарных дней перечисляет  Подрядчику авансовый платеж в размере 20% от стоимости Заказа на основании  выставленного Подрядчиком Счета. Окончательная оплата фактически выполненных  работ по Заказу осуществляется в течение 30 календарных дней с даты выставления счета  на оплату (п. 3.7.2 договора).  

Обмен Электронными документами, подписанными ЭП, Стороны признаются  равнозначным документам на бумажном носителе, подписанными собственноручной  подписью и скреплённой печатью (в случаях, установленных законодательством)  уполномоченным представителем каждой и Сторон (п.3.10.2 договора).  

Получение документов в электронном виде и подписанных АП эквивалентно  получению документов на бумажном носителе и является необходимым достаточным  условием, позволяющим установить, что ЭД исходит от Стороны, его направившей  (п.3.10.3. Договора).  

Согласно п.5.1.6. Договора, сдаче-приемке по соответствующему Заказу подлежат  результаты всех СМР, в том числе Скрытых работ. Подрядчик вправе приступать к  выполнению последующих СМР по соответствующему Заказу только после приемки  заказчиком Скрытых работ по акту освидетельствования.  

После завершения выполнения всего объёма Работ по советующему Заказу,  Подрядчик направляет заказчику письменное уведомление о готовности к сдаче  результата всего объекта Работ по соответствующему Заказу за подписью  уполномоченного представителя на электронный адрес Заказчика mrfad@rt.ru с  приложением подписанного со своей стороны акт приемки Объекта. Заказчик в течение 10  рабочих дней со дня получения указанного Акта подписывает его, либо в тот же срок  направляет Подрядчику письменный мотивированный отказ от подписания Акта с  указанием перечня замечаний к выполненным работам по соответствующему Заказу и  сроком их устранения. В случае направления Подрядчику письменного мотивированного  отказа, Подрядчик своими силами и за свой счет в сроки, определённые заказчиком.  Устраняет замечания Заказчика. После устранения Подрядчиком замечаний Заказчик в  течении 10 рабочих дней подписывает Акт приемки Объекта.  

В обоснование заявленных требований истец ссылается на то, что 10 марта 2021  года между истцом и ответчиком подписан Заказ № 1 к Договору подряда № 3540734 от 06  ноября 2020 года.  

Согласно п.2 Заказа № 1 - Заказчик поручает Подрядчику на условиях Договора  подряда № 3540734 от 06 ноября 2020 года выполнить работы 1-го и 2-го этапа в  соответствии с техническим заданием.  

Согласно п. 3 Заказа № 1 - Цена работ по настоящему Заказу составляет  1 048 255,71 руб. 71 коп., в том числе НДС 20% - 174 709,28 руб.  

В соответствии с п. 5 Заказа № 1 - Срок начал Работ: день, следующий за датой  подписания Сторонами настоящего Заказа. Срок окончания Работ: не позднее 60  календарных дней с даты заключения Заказа.  

Срок исполнения заказа не позднее 11 мая 2021 года. 

11 мая 2021 года между Сторона подписан Акт сдачи-приемки выполненных  проектно-изыскательных работ по заказу № 1 к Договору подряда № 3540734 от 06.11.2020  года, согласно которому работы по Заказу № 1 выполнены в полном объеме,  удовлетворяют условиям договора, требованиям Задания на проектирование и оформлены  в надлежащем порядке.  

Заказчиком осуществлена оплата по Заказу № 1: платежным поручение № 5623 от  01.04.2021 года на сумму 209 651,14 руб.; платежным поручением № 429201 от 17.06.2021  года на сумму 838 604,57 руб.  

27 мая 2021 года между истцом и ответчиком подписан Заказ № 2 к договору  подряда № 3540734 от 06 ноября 2020 года.  

Согласно п.2 заказа № 2 - Заказчик поручает Подрядчику на условиях Договора  подряда № 3540734 от 06 ноября 2020 года выполнить работы в соответствии с  техническим заданием.  

Согласно п. 3 Заказа № 2 - цена работ по настоящему Заказу составляет 9 312 950,17  руб., в том числе НДС 20% - 1 552 158,36 руб. Срок начала Работ: 17 мая 2021 года (п. 5  заказа № 2).  

Срок окончания Работ: не позднее 06 сентября 2021 года. 

03 августа 2021 года между Сторона подписан Акт о приемке выполненных работ  по форме КС-2 и КС-3 по заказу № 2 к Договору подряда № 3540734 от 06.11.2020 года,  согласно которому работы по Заказу № 2 выполнены в полном объеме. Удовлетворяют  условиям договора, требованиям Задания на проектирование и оформлены в надлежащем  порядке.  

Заказчиком осуществлена оплата по Заказу № 2: Платежным поручение № 350593  от 02.06.2021 года на сумму 1 862 590,03 руб.; платежным поручение № 165539 от  10.09.2021 года на сумму 7 138 984,83 руб.  

27 мая 2021 года между истцом и ответчиком подписан Заказ № 3 к Договору  подряда № 3540734 от 06 ноября 2020 года.  

Согласно п.2 Заказа № 3 - Заказчик поручает Подрядчику на условиях Договора  подряда № 3540734 от 06 ноября 2020 года выполнить работы в соответствии с  техническим заданием.  

Согласно п.3 Заказа № 3 - Цена работ по настоящему Заказу составляет 7 905 216,17  руб., в том числе НДС 20% - 1 317 536,03 руб.  

Согласно п.5 Заказа № 3 - Срок начала Работ: 18 мая 2021 года. 

Срок окончания Работ: не позднее 01 октября 2021 года.  

23 сентября 2021 года между Сторона подписан Акт о приемке выполненных работ  по форме КС-2 и КС-3 по Заказу № 3 к Договору подряда № 3540734 от 06.11.2020 года,  согласно которому работы по Заказу № 3 выложены в полном объеме, удовлетворяют  условиям договора, требованиям Задания на проектирование и оформлены в надлежащем  порядке.  

Заказчиком осуществлена оплата по Заказу № 3: платежным поручение № 350502  от 02.06.2021 года на сумму 1 885 717,86 руб.; платежным поручение № 56953 от  12.10.2021 года на сумму 5 871 870,50 руб.  

27 мая 2021 года между истцом и ответчиком подписан Заказ № 4 к Договору  подряда № 3540734 от 06 ноября 2020 г.  

Согласно п.2 Заказа № 4 - Заказчик поручает Подрядчику на условиях Договора  подряда № 3540734 от 06 ноября 2020 года выполнить работы в соответствии с  техническим заданием.  

Согласно п.3 Заказа № 4 - Цена работ по настоящему Заказу составляет 9 428 589,31  руб., в том числе НЛС 20% - 1 571 431,55 руб. Согласно п.5 Заказа № 4 - Срок начала  Работ: 24 мая 2021 года.  

Срок окончания Работ: не позднее 01 октября 2021 года.  

Заказчиком осуществлена оплата по Заказу № 4: платежным поручение № 350502  от 02.06.2021 года на сумму 1 885 717,86 руб.  

21 июня 2021 года между истцом и ответчиком подписан Заказ № 5 к Договору  подряда № 3540734 от 06 ноября 2020 года.  

Согласно п.2 Заказа № 5 - Заказчик поручает Подрядчику на условиях Договора  подряда № 3540734 от 06 ноября 2020 года выполнить работы в соответствии с  техническим заданием.  

Согласно п.3 Заказа № 5 - Цена работ по настоящему Заказу составляет 11 705  911,42 руб., в том числе НДС 20% - 1 950 985,24 руб.  

Согласно п.5 Заказа № 5 - Срок начала Работ: 01 июля 2021 года. 

Срок окончания Работ: не позднее 11 октября 2021 года.  

Заказчиком осуществлен оплата по Заказу № 5: платежным поручение № 4139 от  01.07.2021 года на сумму 2 341 182,28 руб.  

Как указывает истец, им все работы, предусмотренные Заказом № 4 и Заказов № 5  были выполнены в полном объеме в сроки, установленные сторонами, при этом в ходе  выполнения работ истцом были выявлены дополнительные работы, о которых было  сообщено Заказчику и которые заказчик к выполнению Подрядчику не поручал, в связи  чем, указанные работы Подрядчиком не выполнялись.  

При этом, ответчик выполнение дополнительных работ возлагал на истца, путем  заявления о наличии недостатков, которые таковыми не являлись.  

В дальнейшем ответчик заключил договора на выполнения работ, которые  являлись дополнительными к работам, порученным истцу с иными подрядчиками.  

29 октября 2021 года представителями Заказчика и Подрядчика был составлен Акт  осмотра объекта реконструкции дренажных систем, в ходе которого был произведен  осмотр объекта по Заказу № 3 и Заказу № 4. В ходе осмотра был зафиксирован объем  выполненных работ, а так же определен перечень замечаний необходимых к устранению.  

При этом, на 29 октября 2021 года ответчиком был подтвержден весь объем  выполненных истцом работ по Заказу № 4 и Заказу № 5 с установлением наличия  незначительных недостатков, которые на эксплуатационные свойства выполненных работ  не влияли.  

Так в Акте указано, что по состоянию на 29 октября 2021 года остались не  выполнены работы:  

1) Торец в осях А-Д-21 - не выполнена вертикальная гидроизоляция и участок  дренажа и обратная засыпка грунтом; 2) не выполнена гидроизоляция вентиляционных  труб в количестве 08 шт.; 3) не засыпаны грунтом уголки возле входных групп; 4) не  установлены кольца дренажных колодцев; 5) не восстановлена труба канализации на  участке А-Д-21; 6) Не восстановлен Электрокабель.  

В Акте также отмечено, что: 1) для завершения работ по торцу в осях А-Д-21  необходимо выполнить замену трубопровода ГСМ. Замена трубопровода оформляется  отдельным заказом. Так как не входит в состав проекта и Заказов. 2) Работы по входным  группам оформляются отдельным Заказом.  

То есть указанные работы являются дополнительными к перечню объема работ по  Заказу № 4 и Заказу № 5 не имеют отношения.  

17 декабря 2021 года в адрес Заказчика было направлено уведомление о  завершении работ на Объекте ПАО «Ростелеком» по адресу: Московская область,  Пушкинский район, п. Софрино с приложением Актов по форме КС-2 и КС-3, которые  были подписаны в одностороннем порядке.  

24 декабря 2021 года Заказчик направил в адрес подрядчика мотивированный отказ  от приемки работ, в котором Заказчик, ссылаясь на незначительные замечания, не  влияющие на эксплуатационные свойства работ, указал на отсутствие оснований к оплате  работ.  

20 декабря 2021 года между представителями истца и ответчика был составлен Акт  осмотра выполняемых работ в п. Софрино по устройству гидроизоляции в котором были  перечислены недостатки выявленные в ходе осмотра выполненных работ, которые так же  не влияли на эксплуатационные свойства выполненных работ и которые ранее не  заявлялись со стороны ответчика в ходе неоднократных выходов на объект строительства.  

Подрядчик, преследуя цели урегулирования спора с Заказчиком, провел работы  направленные на устранение незначительных замечаний, выявленных Заказчиком,  выполнил дополнительные работы, порученные Заказчиком, со смещением сроков  выполнения работ с согласия Заказчика, так как Заказчику требовалось выполнение  дополнительных работ, которые планировались к поручению к исполнению Подрядчику,  но как указано выше к исполнению Подрядчику поручены не были.  

14 сентября 2022 года между представителями сторон был составлен Акт осмотра  выполняемых работ в п. Софрино по устройству гидроизоляции в котором были  перечислены недостатки выявленные в ходе осмотра выполненных работ, при этом истец  указывает, что недостатки, которые ранее были перечислены в акте от 20 декабря 2021  года в акте от 14 сентября 2022 года отсутствуют, что свидетельствует о добросовестном  исполнении со стороны истца своих обязательств рамках Договора и заказов к нему и  непоследовательных действий со стороны ответчика направленных на уклонение от  осуществления приемки выполненных работ.  

19 сентября 2021 года в адрес ответчика были направлены на документальному  проверку исполнительная документация к актам КС-2 и КС-3 и проекты Актов  выполненных работ по форме КС-2, а так же Акты стоимости выполненных работ по  форме КС-3 по Заказу № 4 и Заказу № 3.  

20 декабря 2022 года в адрес Заказчика были направлены Акты выполненных  работ, подписанные в одностороннем порядке по форме КС-2, КС-3 Заказ № 4 на сумму  9 274 416,24 руб.; КС-2, КС-3 заказ № 5 на сумму 11 098 883,02 руб., которые были  получены Заказчиком 27 декабря 2022 года.  

30 декабря 2022 года в адрес истца поступил ответ № 03/05/36990/22 от ответчика,  в котором последний сослался на то, что подписание Актов выполненных работ в  одностороннем порядке не предусмотрено условиями договора и подписание Актов  выполненных работ не представляется возможным.  

30 декабря 2022 года в адрес ответчика была направлена претензия о досудебном  урегулировании спора, возникшего между сторонами. Ответчик отказался урегулировать  спор в досудебном порядке.  

18 января 2023 года ответчик направил в адрес истца Уведомление № 03/05/921/23  об одностороннем расторжении Заказов № 4 от 27 мая 2021 года, № 5 от 21 июня 2021 года  к Договору № 3540734 от 06 ноября 2020 года и возврате авансов, об уплате неустойки.  

Однако, до настоящего времени, акты приемки (форма КС-2) ответчиком не  подписаны, не возвращены, мотивированного отказа и возражений по видам, объемам,  стоимости выполненных работ не заявлено. Ответчик на протяжении длительного  времени уклоняется от приемки работ и необоснованно не оплачивает их. Всего работы,  как указывает истец выполнены на общую сумму 20 373 299 руб. 26 коп. по заказу № 4 с  учетом выплаченного аванса 7 388 698 руб. 38 коп., по заказу № 5 стоимость работ с  учетом авансовых платежей составила 8 757 700 руб. 74 коп.  

Ссылаясь на указанные обстоятельства, истец обратился в суд с настоящими  требованиями о взыскании долга.  

В свою очередь, возражая против удовлетворения заявленных требований,  ответчик заявил встречный иск, ссылаясь на то, что работы по Заказам № 4 и № 5  Подрядчиком не выполнены и не сданы Заказчику в порядке, установленном Договором.  Ввиду изложенного обязанности по оплате работ по Заказам № 4 и № 5 на стороне  Заказчика не возникло.  

В силу ст.ст. 309, 310 ГК РФ, обязательства должны исполняться надлежащим  образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных  правовых актов, односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее  изменение его условий не допускается.  

В соответствии со статьями 702, 708, 709 и 720 ГК РФ обязательственное  правоотношение по договору подряда состоит из двух основных встречных обязательств,  определяющих тип этого договора: обязательства подрядчика выполнить в натуре работы  надлежащего качества в согласованный срок и обязательства заказчика уплатить  обусловленную договором цену в порядке, предусмотренном сделкой (статья 328 ГК РФ).  

Так, в силу пункта 1 статьи 711 ГК РФ, если договором подряда не предусмотрена  предварительная оплата выполненной работы или отдельных ее этапов, заказчик обязан  уплатить подрядчику обусловленную цену после окончательной сдачи результатов работы  при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в согласованный срок.  

Из встречного характера таких обязательств и положений пунктов 1 и 2 статьи 328  ГК РФ следует, что в случае ненадлежащего исполнения принятого подрядчиком  основного обязательства им не может быть получена та сумма, на которую он мог  рассчитывать, если бы исполнил это обязательство должным образом (в том числе с  соблюдением установленных сроков).  

Из обстоятельств рассматриваемого дела следует, что порядок сдачи-приемки  работ был согласован сторонами в разделе 5 Договора.  

В соответствии с пунктами 5.1.3.и 5.1.4 Договора Подрядчик был обязан в день  завершения строительно-монтажных работ (далее по тексту - СМР) по соответствующему  Заказу отправить Заказчику на электронный адрес и письменное Уведомление о  готовности к сдаче результата Работ.  

Одновременно с направлением указанного Уведомления Подрядчик был обязан  представить Заказчику (пункт 5.1.4 Договора):  

- подписанный со своей стороны Акт приемки выполненных работ но  унифицированной форме № КС-2 и Справку о стоимости выполненных работ и затрат по  унифицированной форме № КС-3,  

- 3 (три) экземпляра Исполнительной документации с согласующей подписью  представителя Заказчика, осуществляющего строительный контроль, что данные  комплекты документации полностью соответствуют фактически выполненным СМР.  

Таким образом, согласно пункт 5.1.5 договора, обязанность Заказчика по созданию  приемочной комиссии и проведению приемки СМР возникала только при условии  предоставления Подрядчиком полного пакета Сдаточной, в том числе Исполнительной  документации.  

Согласованный Сторонами срок выполнения работ по Заказу № 4 - 01.10.2021. по  Заказу № 5 - 11.10.2021  

Однако Подрядчик результат Работ в определенном Договором порядке Заказчику  к приемке не представил ни в период срока выполнения Работ, установленного Заказами.  

При этом, подрядчик направил документы, уже за пределами срока выполнения  работ.  

13.10.2021 письмом по электронной почте Подрядчиком был предоставлен  черновик сметы (без надлежащего оформления, без подписи) на работы общей  стоимостью 40 357 968,25 руб. Исполнительной или сдаточной документации  Подрядчиком при этом предоставлено не было.  

В ответ письмами по электронной почте 14.10.2021 и 15.10.2021 Заказчиком в  адрес Подрядчика были направлены замечания к указанной смете.  

07.12.2021 по Акту о передаче документов Подрядчиком в адрес Заказчика была  предоставлена для проверки часть Исполнительной документации в следующем составе:  односторонне составленные Акты освидетельствования скрытых работ (без обязательной  согласующей подписи представителя Заказчика, осуществляющего технический надзор за  СМР), графическая часть, сертификаты качества.  

Замечания от 13.12.2021 к указанной части Исполнительной документации были  направлены Заказчиком в адрес Подрядчика по электронной почте письмом от 15.12.2021.  

14.12.2021 Подрядчиком по электронной почте в адрес Заказчика на часть работ  были направлены для проверки Акты о приемке выполненных работ по унифицированной  форме № КС-2 и Справки о стоимости выполненных работ и затрат по унифицированной  форме № КС-3 (не подписанные, черновики): по заказу № 4 на сумму 8 856 500,05 руб.,  по заказу № 5 на сумму 10 580 530,52 руб.  

Замечания к указанным Актам были направлены Заказчиком в адрес Подрядчика  по электронной почте письмом от 15.12.2021.  

17.12.2021 Подрядчиком по электронной почте в адрес Заказчика вместе с  сопроводительным Письмом исх. от 17.12.2021 № 385 были направлены для проверки  Акты о приемке выполненных работ по унифицированной форме КС-2 (не подписанные,  черновики): по Заказу № 4 на сумму 4 270 126,74 руб., по Заказу № 5 на сумму  6 474 693,00 руб.  

При этом Справок о стоимости выполненных работ и затрат по унифицированной  форме № КС-3 предоставлено не было. Полного комплекта сполнительной и сдаточной  документации, предусмотренного Договором, Подрядчиком предоставлено Заказчику не  было.  

20.12.2021 Сторонами была осуществлена совместная комиссионная проверка  выполняемых работ, составлен «Акт осмотра выполняемых работ в п. Софрино по  устройству гидроизоляции» от 20.12.2021 с фиксацией перечня не выполненных работ и  допущенных Подрядчиком нарушений, а также Акт фиксации нарушений от 20.12.2021.  

По результатам проведенной сторонами комиссионной проверки, а также проверки  Заказчиком частично предоставленной документации, в ответ на письмо Подрядчика исх.  от 17.12.2021 № 385, Заказчиком в адрес Подрядчика 24.12.2021 письмом исх. от  24.12.2021 № 03/05/57571/21 был направлен мотивированный отказ от приемки Работ.  

Мотивированный отказ от приемки работ был обусловлен отсутствием  завершенного результата Работ, наличием многочисленных замечаний к качеству и  объему Работ.  

За период февраль-март 2022 года Подрядчиком были направлены документы для  сдачи части Работ, а именно: 04.02.2022 Подрядчиком в адрес Заказчика почтовым  отправлением через АО «Почта России» вместе с сопроводительным Письмом исх. от  04.02.2022 № 43 и Актом о передаче документов от 04.02.2022 были направлены для  проверки следующие документы (получены ПАО «Ростелеком» 25.02.2022): Акты о  приемке выполненных работ по унифицированной форме № КС -2. Справки о стоимости  выполненных работ и затрат по унифицированной форме № КС-3 по Заказу № 4 на сумму  8 856 500.05 руб., по Заказу № 5 - на сумму 10 580 530.52 руб.; часть Исполнительной  документации в виде Актов освидетельствования скрытых работ по Заказу № 4 - Акты от  21.10.21 № 32, № 33, № 34. № 38. от 25.10.2021 № 44/Г. № -5. № 46/В, № 47/Г. № 48/В, №  49/Г, № 50В, № 51. № 52/Г, № 53/В. № 55В. № 54; по Заказу № 5 - Акты от 19.10.2021 №  1.1. № 1.2. № 1.4. № 1.6. № 1.7. № 1.8. № 1.9. Л» 1.10, от 21.10.2021 № 42, № 57. № 58, №  59. от 25.10.2021 № 62. № 63/Г. № 64. № 65/В. -V 66/Г. № 69/В, № 70/Г, № 71 /В. № 72. №  73/Г, № 74/В. № 75. № 76/В. № 85. от 10.11.2021 № 80.  

При этом Подрядчиком были предоставлены в том числе односторонне  составленные им Акты освидетельствования скрытых работ (по Заказу № 4 - это Акты №  56.78,79, по Заказу № 5 - Акты № 77. 82, 89), которые ранее представители Заказчика,  осуществляющие технический надзор за СМР, отказались подписывать ввиду того, что:  либо перечисленные в Актах работы фактически не были выполнены подрядчиком; либо  перечисленные в Актах работы выполнены некачественно и с нарушениями Акты  оформлены некорректно/ сведения, изложенные в Актах, не соответствуют  действительности; либо документы, отраженные в Актах (сертификаты, схемы и тд.) не  предоставлены.  

В связи с тем, что работы на Объекте фактически остановлены подрядчиком с  20.12.2021, документация для проверки была предоставлена лишь частично, а замечания  Заказчика к исполнительной и сдаточной документациям, направленные ранее в декабре  2021 года. Подрядчиком не были исправлены, Заказчиком в адрес Подрядчика 10.03.2022  по электронной почте был направлен повторный мотивированный отказ от приемки  результата Работ.  

Вместе с указанным Письмом от 10.03.2022 в адрес Подрядчика был направлен ряд  документов: письмо исх. от 24.12.2021 № 03/05/57571/21 «О направлении  мотивированного отката от приемки работ» (первоначально направлено Подрядчику  24.12.2021); замечания к Актам по форме № КС-2, поступившим от Подрядчика  25.02.2022 с Письмом исх. от 04.02.2022 № 43; акт осмотра выполняемых работ в п.  Софрино по устройству гидроизоляции» от 20.12.2021. Указанный Акт направлен  повторно, поскольку ни одно из перечисленных в нем замечаний не было устранено  Подрядчиком (первоначально Акт был направлен Подрядчику 24.12.2021); замечания от  13.12.2021 к Исполнительной документации. Указанные замечания направлены повторно,  поскольку не были устранены (первоначально направлены Подрядчику 15.12.2021).  

Также приложением к Письму исх. от 10.03.2022 № 03/05/7696/22 Заказчиком в  адрес Подрядчика было направлено Заключение специалиста ООО «Научный Центр  «Мосэкспертстрой» от 29.11.2021, подготовленное по итогам обследования фактически  смонтированной на тот момент части дренажной системы Объекта.  

Согласно выводам, изложенным в указанном Заключении, нормальная  эксплуатация дренажной системы Объекта невозможна; устранение недостатков и  дефектов, допущенных в ходе проведения строительно-монтажных работ, необходимо  выполнить на 100% протяженности трассы дренажной системы; требуется проведение  комплекса работ по демонтажу с последующим монтажом в соответствии с требованиями  рабочей документации и действующей нормативно-технической документацией;  категория технического состояния дренажной системы оценивается как аварийная.  

При этом, предметом Заказов № 4 и № 5 являлось выполнение Подрядчиком работ  но восстановлению гидроизоляции и дренажной системы Технического здания № 1.  расположенного в п. Софрино Пушкинского района Московской области. Согласно  

представленным в материалы дела документам, следует, что сам объект находится под  землей и имеет важное значение для оказания услуг связи спецпользователям, в том числе  для оказания услуг связи в интересах безопасности и обороноспособности.  

01.09.2022 по Акту передачи документов от 01.09.2022 б/н Подрядчиком были  представлены следующие документы, относящиеся к выполнению работ по Заказу № 4:  акт о приемке выполненных работ по форме № КС-2 на сумму 7 306 670.70 руб.  Указанный Акт предоставлен Подрядчиком в черновом варианте, без подписи, с  рукописными пометками и исправлениями по тексту; часть Исполнительной  документации (исполнительные схемы, сертификаты соответствия, декларации о  соответствии и т.д.).  

В ответ 13.09.2022 по Акту передачи документов от 13.09.2022 б/н Заказчиком в  адрес Подрядчика были направлены: письмо ПАО «Ростелеком» исх. от 09.09.2022 №  03/05/26112/22 «О направлении замечаний к ИД Заказа № 4 и разделам проекта перечень  замечаний от 08.09.2022 по результатам документальной проверки ИД и разделы проекта  ВО, АР, КР.  

Подрядчику по Акту от 13.09.2022 была возвращена для доработки/исправления  вся исполнительная документация, ранее переданная Подрядчиком по Акту передачи  документов от 01.09.2022.  

19.09.2022 по Акту передачи документов Подрядчиком вновь были повторно  представлены документы, относящиеся к выполнению работ по Заказу № 4, в частности:  акт о приемке выполненных работ по форме № КС-2 на сумму 7 306 670,70 руб.  Указанный Акт был предоставлен Подрядчиком в черновом варианте, без подписи, с  рукописными пометками и исправлениями по тексту; часть исполнительной  документации (исполнительные схемы, сертификаты соответствия, декларации о  соответствии и т.д.).  

В ответ 05.10.2022 по электронной почте Заказчик направил в адрес подрядчика:  письмо исх. от 03.10.2022 № 03/05/27834/22 «О повторном направлении замечаний к ИД  Заказа № 4 и разделам проекта»; перечень замечаний от 30.09.2022 по результатам  документальной проверки ИД к КС-2 и разделы проекта ВО, АР. КР.  

19.09.2022 по Акту передачи документов от 19.09.2022 б/н Подрядчиком были  представлены для проверки документы, относящиеся к выполнению работ по Заказу № 5,  в частности: акт о приемке выполненных работ по форме № КС-2 на сумму 5 682 812.93  руб. Указанный Акт был предоставлен Подрядчиком в черновом варианте, без подписи, с  рукописными пометками и исправлениями по тексту; часть Исполнительной  документации (исполнительные схемы, сертификаты соответствия, декларации о  соответствии и т.д.).  

В ответ 05.10.2022 по электронной почте Заказчик направил в адрес Подрядчика:  письмо исх. от 03.10.2022 № 03/05/28046/22 «О направлении замечаний к ПД Заказа № 5»,  перечень замечаний от 30.09.2022 по результатам документальной проверки ИД к КС-2  Заказа № 5.  

20.12.2022 Уведомлением исх. от 20.12.2022 б/н Подрядчиком в адрес Заказчика  почтовым отправлением АО «Почта России» были направлены документы, касающиеся  выполнения Работ по Заказам № 4 и № 5. в частности: Акт по форме КС-2, Справка по  форме КС-3 на сумму 9 274 416.24 руб. по Заказу № 4, акт по форме КС-2. Справка по  форме КС-3 на сумму 11 098 883.02 руб. по Заказу № 5, копия реестра передачи  исполнительной документации по Заказу № 4; копия реестра передачи исполнительной  документации но Заказу № 5.  

В ответ ПАО «Ростелеком» 30.12.2022 по электронной почте в адрес Подрядчика  было направлено Письмо исх. № 03/05/36990/22 «О неисполнении обязательств но  Договору от 06.11.2020 № 3540734». В связи с тем, что Замечания от 30.09.2022 к  исполнительной документации и актам по форме № КС-2, ранее направленные.  Подрядчиком были не устранены, приложением к указанному Письму данные Замечания  были направлены повторно.  

Приложением к указанному Письму в адрес Подрядчика было направлено  Заключение специалиста ООО «Научно-исследовательское объединение  Стройэкспертиза» от 02.09.2022, подготовленное по итогам обследования участка  дренажной системы в осях А-Д/21 Объекта.  

Согласно выводам, изложенным в указанном Заключении, нормальная  эксплуатация участка дренажной системы Объекта невозможна; устранение недостатков и  дефектов, допущенных в ходе проведения строительно- монтажных работ, необходимо  выполнить на 100% протяженности исследуемой трассы важной системы; требуется  проведение комплекса работ по демонтажу с последующим обратным монтажом в  соответствии с требованиями рабочей документации и действующей технической  документацией; категория технического состояния участка дренажной системы  оценивается как аварийная.  

Мотивированные отказы Заказчика от приемки Работ направлялись подрядчику  неоднократно и содержались в письмах: исх. от 24.12.2021 № 03/05/57571/21 «О  направлении мотивированного отказа от «емки работ»; исх. от 10.03.2022 № 03/05/7696/22  «О повторном направлении мотивированного отказа от приемки работ»; исх. от 09.09.2022   № 03/05/26112/22 «О направлении замечаний к ИД Заказа № 4 и делам проекта»; исх. от  03.10.2022 № 03/05/27834/22 «О повторном направлении замечаний к ИД аза № 4 и  разделам проекта»; исх. от 03.10.2022 № 03/05/28046/22 «О направлении замечаний к ИД  Заказа № 5»; исх. от 30.12.2022 № 03/05/36990/22 «О неисполнении обязательств по  Договору от .11.2020 № 3540734».  

При этом заказчик был готов осуществлять промежуточную сдачу-приемку  надлежаще выполненных и завершенных работ в случае их наличия, что подтверждается  подписанием сторонами 22.07.2022 Дополнительного соглашения № 2 к договору, а также  предоставленной в материалы дела перепиской сторон (письмо Заказчика исх. от  31.08.2022 № 03/05/25307/22).  

Однако, со своей стороны, подрядчик не приступал к сдаче-приемке работ в  порядке, предусмотренном разделом 5 договора, уклонялся от выхода на Объект для  проверки соответствия объема фактически выполненных строительно-монтажных работ и  предоставленной части исполнительной и сдаточной документации, с 20.12.2021  фактически остановил работы на объекте, не приступал к исправлению выданных  Заказчиком замечаний и допущенных нарушений.  

При этом мотивированные отказы Заказчика от приемки Работ были обусловлены  не только явным фактическим отсутствием конечного надлежащего результата Работ и  отсутствием соответствующего результату Работ полного исправленного пакета  Исполнительной и Сдаточной документации, но и заключениями специалиста ООО  «Научный Центр «Мосэкспертсрой» от 29.11.2021, и ООО «Научно-исследовательское  объединение «Стройэкспертиза» от 02.09.2022 (по итогам обследования участка  дренажной системы в осях А-Д/21 объекта от 23.10.2022) по проведению экспертных  мероприятий для определения качества, объемов, стоимости выполненных/не  завершенных работ, ущерба, причиненною в ходе проведения строительно-монтажных  работ на Объекте.  

В силу статьи 720 ГК РФ доказательством сдачи подрядчиком результата работ и  приемки его заказчиком является акт или иной документ, удостоверяющий приемку  выполненных работ. Предъявляя требование об оплате выполненных работ, подрядчик  обязан доказан, выполнения работ и их стоимость.  

Согласно части 1 статьи 753 ГК РФ заказчик, получивший сообщение подрядчика о  готовности к сдаче результата выполненных по договору строительного подряда работ  либо, если это предусмотрено договором, выполненного этапа работ, обязан немедленно  приступить к его приемке.  

Сдача результата работ подрядчиком и приемка его заказчиком оформляются  актом, подписанным обеими сторонами (часть 4 статьи 753 ГК РФ).  

При этом, в силу статьи 726 ГК РФ подрядчик обязан передать заказчику вместе с  результатом работы информацию, касающуюся эксплуатации или иного использования  предмета договора подряда, если это предусмотрено договором либо характер  информации таков, что без нее невозможно использование результата работы для целей,  указанных в договоре.  

Частью 6 статьи 52 Градостроительного кодекса Российской Федерации  предусмотрено, что лицо, осуществляющее строительство, обязано обеспечивать ведение  исполнительной документации.  

Обязанность Подрядчика по оформлению и передаче Заказчику исполнительной и  сдаточной документации была также установлена пунктами 3.7.2, 3.10.5, 4.17, 4.24, 5.1.2,  5.1.4, 5.1.6 подписанного Сторонами Договора.  

Из совокупности норм, изложенных в статье 726 ГК РФ и части 6 статьи 52  Градостроительного кодекса Российской Федерации, а также из условий заключенного  Сторонами Договора, следует, что обязанность Подрядчика по оформлению и  предоставлению Заказчику Исполнительной/Сдаточной документации является частью  общего обязательства по выполнению Работ.  

Исполнительная и сдаточная документация является частью результата действий  Подрядчика по Договору и указанный результат подлежит передаче Заказчику в срок,  установленный для выполнения Работ.  

Таким образом, заказчик вправе требовать от Подрядчика в срок, установленный  для выполнения Работ, передачи исполнительной и сдаточной документации, обязанность  по оформлению которой входит в предмет Договора подряда.  

Довод Подрядчика об устранении полученных замечаний и завершении проведения  работ в 2022 году опровергается данными Журнала учета обхода территории.  

В соответствии со ст. 7 Федерального закона № 126-ФЗ «О связи», операторы связи  при эксплуатации сетей связи и сооружений связи обязаны обеспечивать защиту средств  связи и сооружений связи от несанкционированного доступа к ним.  

Объект в п. Софрино охраняется ЧОП и на нем соблюдается пропускной режим. 

В соответствии с Журналом учета обхода территории Объекта, работники ООО  «Предприятие Поток» в 2022 году посещали Объект лишь в отдельные дни в некоторые  месяцы, на непродолжительный период и, как правило, в составе 1-3 человек.  

Соотношение количества работников и времени их нахождения на Объекте  свидетельствует о том, что строительно-монтажные работы не проводились.  

Ссылка Подрядчика на проведение на Объекте ремонта магистралей ГСМ  (топливопроводов) сторонней организацией как на обоснование невозможности  проведения Подрядчиком работ по Договору и как на просрочку со стороны ПАО  «Ростелеком», также не обоснована.  

Актом обследования мест пересечения вводов в Техническое здание № 1 от  25.11.2021, составленным комиссией с участием Подрядчика, установлено, что вводы  технической канализации и топливопроводов ГСМ не препятствуют дальнейшему  производству Подрядчиком работ по устройству дренажной канализации.  

Таким образом, Подрядчик не был лишен возможности осуществлять работы на  Объекте, в том числе работы, связанные с устранением ранее выявленных недостатков,  оформленных многочисленными Актами фиксации нарушений, составленными в порядке  пункта 7.4. Договора.  

Кроме того, аварийные работы по ремонту трубопроводов ГСМ были завершены к  декабрю 2021 года, что подтверждается Актом о приемке выполненных работ № 34 по  форме № КС-2 и Справкой о стоимости выполненных работ и затрат № 34 по форме №  КС-3, подписанной ПАО «Ростелеком» и привлеченным подрядчиком (ООО «НГЩ  СпецИнжиниринг»).  

Согласно п.1 Акта осмотра объекта от 29.10.2021 (л.д. 16-18 т. 2) Подрядчик  обязался завершить работы по гидроизоляции, дренажу и обратной засыпке в течение 7  

дней с даты завершения работ по ремонту трубопровода ГСМ, однако свои обязательства  Подрядчик не выполнил.  

Представленная Подрядчиком в материалы судебного дела переписка, связанная с  обсуждением Сторонами заключения иных заказов (письма исх. № 132 от 13.04.2022, №  19 от 19.01.2022, № 157 от 27.05.2022, № 273 от 16.08.2022) не относится к предмету  рассмотрения данного дела.  

Поскольку Работы по реконструкции гидроизоляции и дренажной системы  Объекта, предусмотренные Заказом № 4 и Заказом № 5, Подрядчиком не выполнены,  надлежащий исправленный пакет исполнительной и сдаточной документации Заказчику  не передан, то какие-либо правовые основания для удовлетворения искового требования  Подрядчика о взыскании задолженности по оплате Работ в общем размере 16 146 399,12  руб. у суда отсутствуют.  

С учетом изложенного, суд приходит к выводу об отсутствии оснований для  удовлетворения требований по первоначальному иску.  

В настоящем случае отказ удовлетворение первоначальных исковых требований  ООО «Предприятие «Поток» о взыскании задолженности по договору № 3540734 от  06.11.2020 обуславливает удовлетворение встречного иска ПАО "Ростелеком" о  взыскании неотработанного аванса по договору в сумме 4 226 900 руб. 14 коп. и  неустойки за нарушение сроков выполнения работ в сумме 6 340 350 руб. 22 коп.  

Для выполнения работ по Заказам № 4 от 27.05.2021, № 5 от 21.06.2021 к Договору   № 3540734 от 06.11.2020г. Заказчик перечислил Подрядчику в качестве авансов денежные  средства: по Заказу № 4 от 27.05.2021-1 885 717,86 руб. по счету № 14 от 27.05.2021,  платежное поручение № 350502 от 02.06.2021; по Заказу № 5 от 21.06.2021 - 2 341 182,28  руб. по счету № 17 от 21.06.2021, платежное поручение № 4139 от 01.07.2021.  

Судом установлено, что уведомлением Ns 03/05/1208/23 ПАО «Ростелеком» в  одностороннем порядке заявило об одностороннем расторжении Заказов № 4 и № 5 в  связи с нарушением сроков выполнения работ Подрядчиком и потребовало возвратить  сумму неотработанных авансов по заказам № 4, № 5.  

В соответствии с частью 1 статьи 450.1 ГК РФ предоставленное настоящим  Кодексом, другими законами, иными правовыми актами или договором право на  односторонний отказ от договора (исполнения договора) может быть осуществлено  управомоченной стороной путем уведомления другой стороны об отказе от договора  (исполнения договора).  

Договор прекращается с момента получения данного уведомления, если иное не  предусмотрено настоящим Кодексом, другими законами, иными правовыми актами или  договором.  

Статья 715 ГК РФ устанавливает возможность отказа от исполнения договора в  связи с его ненадлежащим исполнением подрядчиком в случае, когда подрядчик не  приступает своевременно к исполнению договора подряда или выполняет работу  настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным либо  становится очевидным, что работа не будет выполнена надлежащим образом.  

Доказательств выполнения работ по вышеуказанному договору ответчиком  арбитражному суду не представлено (статья 65 АПК РФ).  

Исследовав и оценив в порядке статьи 71 АПК РФ имеющиеся в деле  доказательства, суд пришел к выводу о том, что требование истца о взыскании с ответчика  4.226.900,14 руб. неосновательного обогащения, в порядке, предусмотренном статьями  1102, 1103 ГК РФ подлежит удовлетворению, поскольку при отказе истца от исполнения  договора у ответчика отсутствуют правовые основания для удержания суммы полученной  предварительной оплаты.  

Истцом по встречному иску также заявлено о взыскании с ответчика по встречному  иску неустойки за нарушение сроков выполнения работ.  

Согласно пункту 1 статьи 330 ГК РФ неустойкой (штрафом, пени) признается  определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан оплатить  

кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в  частности, в случае просрочки исполнения.  

Пунктом 7.1. Договора предусмотрена неустойка за нарушение Подрядчиком ков  выполнения работ по Заказу в форме штрафа в размере 30% (тридцати процентов) от  цены, указанной в соответствующем проекте Заказа.  

Размер неустойки по Заказу № 4 от 27.05.2021 составляет 2 828 576,79 руб. в  соответствии со следующим расчетом: 9 428 589,31 руб. * 30% = 2 828 576,79 руб.  

Размер неустойки по Заказу № 5 от 21.06.2021 составляет 3 511 773,43 руб. в  соответствии со следующим расчетом: 11 705 911,42 руб. * 30% = 3 511 773,43 руб.  

Общая сумма неустойки составляет 2 828 576,79 + 3 511 773,43 = 6 340 350,22 руб.  

Согласно пункту 10.6.1. Общих условий исполнения договора неустойка подлежит  выплате нарушившей Стороной в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты доставки  уведомления.  

Суд полагает, что с учетом представленных доказательств имеются основания для  начисления пени за ненадлежащее исполнение обязательств.  

Расчет пени судом проверен и признан правильным. 

Ответчик заявил ходатайство о применении ст. 333 ГК РФ, в котором он просит  уменьшить размер неустойки до разумных пределов ввиду ее явной несоразмерности  последствиям нарушения обязательств.  

Основанием для применения ст. 333 Гражданского Кодекса РФ может служить  явная несоразмерность неустойки последствиям нарушения обязательства. Критериями  для установления несоразмерности в каждом конкретном случае могут быть: высокий  процент неустойки; значительное превышение суммы неустойки над размером  возможных убытков, вызванных нарушением обязательств; длительность неисполнения  обязательств и др.  

Как разъяснено в абзаце 2 пункта 1 Постановления Пленума Высшего  Арбитражного Суда Российской Федерации от 22.12.2011 г. № 81 "О некоторых вопросах  применения статьи 333 Гражданского кодекса Российской Федерации" исходя из  принципа осуществления гражданских прав своей волей и в своем интересе (статья 1  Гражданского кодекса Российской Федерации) неустойка может быть снижена судом на  основании статьи 333 Кодекса только при наличии соответствующего заявления со  стороны ответчика, при этом право снижения размера неустойки предоставлено суду в  целях устранения явной ее несоразмерности последствиям нарушения обязательств  независимо от того, является неустойка законной или договорной. В п.2 этого же  Постановления Пленум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации указал, что  разрешая вопрос о соразмерности неустойки последствиям нарушения денежного  обязательства и с этой целью определяя величину, достаточную для компенсации потерь  кредитора, суды могут исходить из двукратной учетной ставки (ставок) Банка России,  существовавшей в период такого нарушения.  

Конституционный Суд Российской Федерации в определении от 21.12.2000 № 263- О разъяснил, что предоставленная суду возможность снижать размер неустойки в случае  ее чрезмерности по сравнению с последствиями нарушения обязательств является одним  из правовых способов, предусмотренных в законе, которые направлены против  злоупотребления правом свободного определения размера неустойки, то есть, по  существу, на реализацию требования статьи 17 Конституции Российской Федерации,  согласно которой осуществление прав и свобод человека и гражданина не должно  нарушать права и свободы других лиц. Таким образом, суд должен установить баланс  между применяемой к нарушителю мерой ответственности и оценкой действительного (а  не возможного) размера ущерба, причиненного в результате конкретного  правонарушения.  

При таких обстоятельствах задача суда состоит в устранении явной  несоразмерности штрафных санкций, следовательно, суд может лишь уменьшить размер  неустойки до пределов, при которых она перестает быть явно несоразмерной, причем  

указанные пределы суд определяет в силу обстоятельств конкретного дела и по своему  внутреннему убеждению.  

В данном случае, предусмотренная вышеуказанным договором неустойка в  заявленной сумме является явно чрезмерной (30%).  

При рассмотрении настоящего спора суд, исходя из фактических обстоятельств  дела, оценивая соразмерность заявленной к взысканию суммы возможным финансовым  последствиям для каждой из сторон, пришел к выводу о наличии оснований для снижения  неустойки до 5%.  

В данном случае суд, основываясь на том, что степень соразмерности начисленной  истцом неустойки последствиям нарушения обязательства является оценочной  категорией, оценив указанный критерий исходя из своего внутреннего убеждения и  обстоятельств настоящего дела, пришел к выводу о наличии правовых оснований для  снижения заявленного размера неустойки.  

Суд полагает, что снижение размера неустойки до 5% обеспечит баланс интересов  сторон и позволит истцу в должной мере компенсировать имущественные потери в  результате нарушения ответчиком своих обязательств по договору.  

Поскольку факт несвоевременного исполнения ответчиком по встречному иску  обязательства судом установлен, в соответствии со статьей 330 Гражданского кодекса  Российской Федерации, требование истца о взыскании с ответчика неустойки подлежит  удовлетворению частично в общей сумме 1 056 725 руб. 04 коп., полученной в результате  перерасчета неустойки судом. В удовлетворении остальной части неустойки надлежит  отказать.  

При таких обстоятельствах, встречный иск подлежит частичному удовлетворению.  

Расходы по госпошлине относится судом в соответствии со ст. 110 АПК РФ с  учетом итогов рассмотрения дела.  

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 11, 309, 310, 314, 330, 333, 450,  450.1, 702, 708, 721, 1102 ГК РФ, руководствуясь ст.ст. 8, 9, 65, 71, 75, 102, 110, 167- 171,  176 АПК РФ, суд  

РЕШИЛ:

В удовлетворении первоначальных исковых требований отказать. 

Встречный иск удовлетворить частично. 

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «Предприятие «Поток»  (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>) в пользу Публичного акционерного общества  «Ростелеком» (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>) неосновательное обогащение 4  226 900 (четыре миллиона двести двадцать шесть тысяч девятьсот) руб. 14 коп., неустойку  1 056 725 (один миллион пятьдесят шесть тысяч семьсот двадцать пять) руб. 04 коп., а  также 75 836 (семьдесят пять тысяч восемьсот тридцать шесть) руб. 00 коп. расходов по  уплате госпошлины.  

В удовлетворении остальной части встречного иска отказать. 

Решение может быть обжаловано в Девятый арбитражный апелляционный суд в  течение месяца с даты его принятия.  

Судья Е.Н. Киселева