Арбитражный суд Волгоградской области 

Именем Российской Федерации РЕШЕНИЕ (резолютивная часть)

Дело № А12- 719/2019

08 апреля 2019 г.

город Волгоград

  Арбитражный суд Волгоградской области в составе судьи Кремс Л.А., при ведении  протокола судебного заседания помощником судьи Самородовой Т.В., рассмотрев  в открытом судебном заседании дело по иску общества с ограниченной  ответственностью «Газпром трансгаз Волгоград» (ИНН 

<

***>; ОГРН  

<

***>) к обществу с ограниченной ответственностью «ГРСП «Магнит»  (ИНН 

<

***>; ОГРН 

<

***>), третье лицо общество с ограниченной  ответственностью «СамсонСтрой»  

об обязании передать исполнительную и техническую документацию, связанную с  выполнением строительно-монтажных работ, присуждении судебной неустойки,  

при участии в судебном заседании: от истца – ФИО1, по доверенности № 024/15-541 от 13.12.2018 г.; от ответчика – не явился, извещён; от третьего лица – не явился, извещён. 

Руководствуясь ст. ст. 167-170, 176 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации, арбитражный суд  

Р Е Ш И Л:

В ходатайстве ООО «ГРСП «Магнит» о приостановлении производства по  делу отказать.  

 Обязать общество с ограниченной ответственностью «ГРСП «Магнит»  (ИНН 

<

***>) в течение 30 календарных дней с момента вступления  судебного акта по настоящему делу передать ООО «Газпром трансгаз Волгоград»  исполнительную документацию в отношении работ, выполненных на основании  договора подряда № 0910-15-723 от 19 августа 2015 г. на выполнение строительно  

- монтажных работ по объекту «Гараж-ангар на 15 единиц автотранспорта  Антиповское ЛПУМГ», а именно:  

1. Общий журнал работ; 2. Журнал сварочных работ; 3. Журнал прокладки кабеля; 4. Журнал бетонных работ. 

5. Акты освидетельствования скрытых работ. Исполнительные схемы.  «Архитектурно-строительные решения»:  

- Устройство фундаментов ФМ 1-13 (АОСР № 1 от 28.09.2015 г.); - Монтаж фундаментных балок ФБ (АОСР № 11/1 от 24.12.2015 г.); 

- Устройство внутренней стены в/0 11/Ж-И (Исполнительная схема  армирования опорной подушки и монтаж закладной Мн 1, Акт о приемке  

монтажных работ по цоколю, Исполнительная схема бетонирования опорных  подушек ОП1);  

- Монтаж, огрунтовка и окраска МК (Исполнительная схема монтажа  распорок и вертикальных связей, Акт ответственных конструкций от 22.11.2015 г.  (металлический каркас);  

 - Монтаж ограждающих конструкций стен (Исполнительная схема по  монтажу стеновых сендвич-панелей. Монтаж ворот);  

 Акты входного контроля № 6 от 19.09.15 г., № 7, № 8, № 9, № 14, № 22, №  27, № 30, № 34 от 27.11.15 г., № 35 от 12.12.15 г., № 37 ОТ 26.12.15, № 38;  

 Сертификаты и паспорта: - Технический паспорт № 659 на КС 15-9, КС 10-9, ПП15, ПП10; - Декларация о соответствии № РОСС RU.БЦ01.Д00038; - Сертификат соответствия № С- RU _ПБ05.В.03455; - Сертификат соответствия № ЮAЧ40.RU.1402.H00218; Свидетельство о государственной регистрации  № RU.67.CО.01.013.Е.001484.02.12; - Сертификат соответствия № РОСС RU.AE83.B27487; - Сертификат соответствия № РОСС RU.AE83.B27486; - Паспорт Н-1,5 и ГПС Ру-1,0 Мпа. 

 Присудить в пользу ООО «Газпром трансгаз Волгоград» судебную неустойку  на случай неисполнения ООО «ГРСП «Магнит» настоящего судебного акта в  размере 5 000 руб. за каждый день просрочки исполнения решения суда, начиная с  тридцать первого дня после вступления решения суда в законную силу.  

 В остальной части иска отказать. 

 Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «ГРСП «Магнит»  (ИНН 

<

***>; ОГРН 

<

***>) в пользу общества с ограниченной  ответственностью «Газпром трансгаз Волгоград» (ИНН 

<

***>; ОГРН  

<

***>) расходы по оплате госпошлины в сумме 6000 руб.  

 Решение арбитражного суда первой инстанции может быть обжаловано в  порядке апелляционного производства в Двенадцатый арбитражный  апелляционный суд в течение месяца после его принятия через арбитражный суд  Волгоградской области.  

 Судья Л.А. Кремс