АРБИТРАЖНЫЙ СУД ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ  Бульвар Гагарина, 70, Иркутск, 664025, тел. (3952)24-12-96; факс (3952) 24-15-99  

дополнительное здание суда: ул. Дзержинского, 36А, Иркутск, 664011, 

тел. (3952) 261-709; факс: (3952) 261-761 http://www.irkutsk.arbitr.ru Именем Российской Федерации 

РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ

 

г. Иркутск Дело № А19-26351/2019  21.01.2020 г.  

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 174 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации, арбитражный суд  

РЕШИЛ:

исковые требования удовлетворить; 

обязать ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  "ОБЪЕДИНЕННАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ" в течение 3 месяцев с момента  вступления решения в законную силу безвозмездно устранить выявленные недостатки  выполненных работ в рамках выполнения гарантийных обязательств по договору   № 78/2015 от 13.08.2015, заключенному между ОБЛАСТНЫМ ГОСУДАРСТВЕННЫМ  АВТОНОМНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ "ЦЕНТР ПО СОХРАНЕНИЮ ИСТОРИКО- КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ и ОБЩЕСТВОМ С  ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОБЪЕДИНЕННАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ  КОМПАНИЯ", на объекте культурного наследия «Усадьба Бревнова: особняк, здание  служб» 1900-е гг., 

<

...> лит. А, а именно:  

1.1. Выполнить биоцидную обработку цокольной зоны стен здания;  

1.2. Выполнить ремонт стен помещений 1-го этажа (после биоцидной  обработки); устранить трещины в штукатурном слое 1-го этажа, по необходимости - в  помещениях 2-го этажа;  

1.3. Выполнить ремонт внутренне деревянной лестницы (в том числе укрепление  элементов ограждения, предусмотреть решение по перепаду высот между полом второго  этажа и верхней ступенью лестницы);  

1 .4. Выполнить постмонтажную корректировку оконных заполнений;  1.5. Выполнить выборочный ремонт стропильной системы крыши;  

1.6. Выполнить крепление зрительных кресел в зале (пом. № 20 на первом  

этаже), крепление штучного напольного покрытия; 1.7. Устранить дефекты, допущенные при навешивании дверных полотен; 

1.8. Выполнить обеспечение доступа маломобильных групп населения (далее -  

МГН) в санузел на 1-ом этаже, оборудовать санузел специальным оборудованием:  

поручнями, крючками и пр., необходимым для МГН; 1.9. Закупить кресло для эвакуации инвалидов; 1.10. Установить предупредительные знаки для МГН на путях эвакуации; 1.11. Установить рампы для МГН; 

1.12. Выполнить устройство механизмов для самозакрывания и уплотнений в  

притворах дверей, выходящих на лестничную клетку внутренней деревянной лестнице и  

выходящих на парадную лестницу; 

1.13. Выполнить реставрацию двери-зеркала (на 2 этаже, между пом. № 2 и пом.  

 № 3); 

1.14. Установить греющие кабеля в системе организованного водоотвода с  

кровли; 

1.15. Провести ревизию песчаниковых блоков, сваленных на территории объекта  

культурного наследия. Решить вопрос об облицовке лестницы в подвал блоками  

песчаника, в соответствии с проектной документацией; 

1.16. Завершить работы по благоустройству территории, выполнить установку  

малых форм; 

1.17. Выполнить ревизию электрической проводки (не убрана в кабель-канал). По  

необходимости - выполнить ремонт электрической проводки; 1.18. Выполнить ремонт паркета в конференц-зале на 2-ом этаже; 1.19. Выполнить ремонт дверных порогов; 

1.20. Выявить причину намокания порога и полов на 1 этаже в пом. № 5.  

Выполнить локальный ремонт полов в данном помещении; 

1.21. Выполнить ремонт полов деревянной галереи и наружной деревянной  

лестницы, обеспечить устройство лотков вдоль стен на галерее; 1.22. Выполнить реставрацию парадной лестницы; 

1.23. Привести ширину проезда МГН за сценой к эвакуационному выходу в  

зрительном зале на 1 этаже, в соответствие с проектными решениями; 

1.24. Выполнить локальный ремонт углового фрагмента стен второго этажа (пом.  

 № 2 «зимний сад»); 

взыскать с ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  "ОБЪЕДИНЕННАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ" в пользу ОБЛАСТНОГО  ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОНОМНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ "ЦЕНТР ПО СОХРАНЕНИЮ  ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 6 000 рублей –  судебных расходов, связанных с оплатой государственной пошлины.  

Решение может быть обжаловано в Четвертый арбитражный апелляционный суд  через Арбитражный суд Иркутской области в течение месяца после его принятия.  

Судья Н.В. Хромцова