РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

Дело № А40-121916/23-126-943

г. Москва

24 ноября 2023 года

Резолютивная часть решения объявлена 13 ноября 2023 года

Полный текст решения изготовлен 24 ноября 2023 года

Арбитражный суд г. Москвы в составе:

председательствующего судьи Новикова М.С. 

протокол судебного заседания вел помощник судьи Антоновский С.А., 

рассмотрев в открытом судебном заседании дело 

по иску ООО "РСК "АРХИТЕКТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ" (ОГРН 

<

***>) 

к ООО "ПАЛЛАДИУМ" (ОГРН 

<

***>) 

о взыскании 531 390,41 руб. 

В судебном заседании приняли участие:

от истца: ФИО1, доверенность от 16.04.2022 

от ответчика: не явился, извещен

У С Т А Н О В И Л:

ООО "РСК "АРХИТЕКТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ" обратилось в Арбитражный суд г.Москвы с иском о взыскании с ООО "ПАЛЛАДИУМ" 531 390 руб. 41 коп. из них: сумму авансового платежа по договору № АРХ.31.22 от 06.07.2022г. в размере 500 000 руб. 00 коп., проценты за пользование чужими денежными средствами за период с 28.07.2022 по 25.05.2023 в размере 31 390 руб. 41 коп., проценты за пользование чужими денежными средствами, подлежащие начислению на сумму долга в размере 500 000 руб. 00 коп., исходя из ставки, установленной статьей 395 ГК РФ, действующей в соответствующие периоды за период с 26.05.2023 по дату фактической оплаты.

Определением от 12.07.2023г. исковое заявление ООО "РСК "АРХИТЕКТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ" принято к производству суда для рассмотрения в порядке упрощенного производства, по правилам главы 29 АПК РФ. 

В ходе рассмотрения дела в порядке упрощенного производства суд пришел к выводу о том, что имеется основание для рассмотрения дела по общим правилам искового производства, предусмотренное ч. 5 ст. 227 АПК РФ, о чем судом вынесено определение от 21.09.2023г. 

Истец требования поддержал согласно исковому заявлению.

Ответчик отзыв не представил, исковые требования не оспорил.

Дело рассмотрено в порядке ст.ст.123, 156 АПК РФ в отсутствие ответчика, надлежащим образом извещенного о дате, времени и месте судебного разбирательства.

Молчание ответчика расценивается судом как отсутствие возражений на иск в соответствии со ст.41, 65, 66, 75, 131, 133-136 АПК РФ.

Выслушав представителей истца, изучив материалы дела, оценив относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности на основании ст. 71 АПК РФ, арбитражный суд установил, что требования истца заявлены обоснованно и подлежат удовлетворению в полном объеме по следующим основаниям.

При этом суд исходит из того, что в соответствии со ст.4 Арбитражного процессуального кодекса РФ заинтересованное лицо вправе обратиться в арбитражный суд за защитой своих нарушенных или оспариваемых прав и законных интересов в порядке, установленном АПК РФ.

Согласно ст.65 Арбитражного процессуального кодекса РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений. Вместе с тем, согласно ч.2 ст.9 Арбитражного процессуального кодекса РФ лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или несовершения ими процессуальных действий. 

Как следует из материалов дела, 06.07.2022г. между ООО «РСК «Архитектурное наследие» (Генподрядчик) и ООО «Палладиум» (Подрядчик) был заключен договор подряда на выполнение работ № АРХ.31.22, в соответствии с которым Подрядчик обязался выполнить комплекс работ на объекте культурного наследия федерального значения «Городская усадьба, 1898-1912 гг. - главный дом, ограда с воротами, фонтан» по адресу: г. Москва, Новая Басманная д. 14 стр. 1 (далее Объект).

В соответствии с условиями Договора подряда Подрядчик принял на себя обязательства по выполнению комплекса работ по демонтажу, изготовлению, доставке и монтажу на объекте реставрации в соответствии с п. 1.6 Договора соответствующих Изделий. Дата окончания работ по Договору - 03.08.2022г.

ООО «РСК «Архитектурное наследие» в качестве аванса по Договору перечислило ООО «Палладиум» 800 000 руб., что подтверждается платежным поручением №219 от 12.07.2022.

Таким образом Генподрядчик своевременно выполнило свои обязательства по выплате аванса. Подрядчик со всеми условиями Договоров подряда, включая особенности выполнения был ознакомлен и согласен и уже должен был передать Заказчику результат работ по настоящему Договору подряда. Между тем до настоящего времени результат работ Генподрядчику передан не был.

Для Генподрядчика существенным условием Договора является своевременное представление Подрядчиком результата работ.

В связи с нарушением по вине Подрядчика сроков выполнения работ более чем на 30 дней ООО «РСК «Архитектурное наследие» уведомило ООО «Палладиум» о расторжении договора №Арх.31.22 от 06.07.2022 в одностороннем порядке.

Договор считается расторгнутым с даты доставки подрядчику настоящего уведомления (п.1 ст.450.1 ГК РФ), а в случае возврата данного уведомления с отметкой организации, осуществляющей доставку, о выбытии адресата, истечения срока хранения отправления или отказа от получения - с даты возврата отправления с данным уведомлением, с момента поступления в отделение связи (статья 165.1 ГК РФ).

Ответчиком обязательства по выполнению работ в полном объеме не исполнены, в связи с чем у ответчика образовалась задолженность в сумме 500 000 руб. 00 коп., которую истец просит взыскать с ответчика в судебном порядке. 

Пунктом 1 ст.702 ГК РФ установлено, по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его. 

В соответствии со ст.ст.309, 310 Гражданского Кодекса Российской Федерации обязательства должны исполняться надлежащим образом и в установленный срок в соответствии с условиями обязательства. Односторонний отказ от исполнения обязательства не допускается. 

Согласно пункту 2 статьи 328 Гражданского кодекса Российской Федерации в случае непредоставления обязанной стороной обусловленного договором исполнения обязательства либо наличия обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что такое исполнение не будет произведено в установленный срок, сторона, на которой лежит встречное исполнение, вправе приостановить исполнение своего обязательства либо отказаться от исполнения этого обязательства и потребовать возмещения убытков.

В соответствии со статьей 1102 ГК РФ лицо, которое без установленных законом, иными правовыми актами или сделкой оснований приобрело или сберегло имущество за счет другого лица, обязано возвратить последнему неосновательно приобретенное или сбереженное имущество.

Исходя из содержания указанной нормы получение ответчиком денежных средств от истца при отсутствии у истца обязанности их выплачивать в силу соответствующего договора или требования нормативного акта, без предоставления ответчиком со своей стороны каких-либо товаров (работ, услуг) в счет принятых сумм следует квалифицировать как неосновательное обогащение.

Как разъяснено в пункте 1 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 11.01.2000 № 49 "Обзор практики рассмотрения споров, связанных с применением норм о неосновательном обогащении", полученные до расторжения договора денежные средства, если встречное удовлетворение получившей их стороной не было предоставлено и обязанность его предоставить отпала, являются неосновательным обогащением получателя.

Принимая во внимание заключенный между сторонами договор, а также тот факт, что работы ответчиком на спорную сумму не выполнены, доказательств обратного ответчиком в материалы дела суду не представлено, договор расторгнут, оснований для удержания ответчиком денежных средств, перечисленных в качестве предоплаты, не имеется, в связи с чем требование истца о взыскании неосновательного обогащения в виде неотработанного аванса по договору № АРХ.31.22 от 06.07.2022г. в размере 500 000 руб. 00 коп., является обоснованным и подлежащим удовлетворению.

Истец предъявил требование о взыскании процентов за пользование чужими денежными средствами за период с 28.07.2022 по 25.05.2023 в размере 31 390 руб. 41 коп., проценты за пользование чужими денежными средствами, подлежащие начислению на сумму долга в размере 500 000 руб. 00 коп., исходя из ставки, установленной статьей 395 ГК РФ, действующей в соответствующие периоды за период с 26.05.2023 по дату фактической оплаты

Согласно статье 395 ГК РФ в случаях неправомерного удержания денежных средств, уклонения от их возврата, иной просрочки в их уплате подлежат уплате проценты на сумму долга. Размер процентов определяется ключевой ставкой Банка России, действовавшей в соответствующие периоды. Эти правила применяются, если иной размер процентов не установлен законом или договором.

Ответчик сумму процентов не оспорил, контррасчет суммы процентов не представил, факт перечисления процентов в добровольном порядке не доказал.   

Начисление процентов произведено истцом обоснованно, так как факт нарушения денежного обязательства ответчиком перед истцом подтвержден материалами дела и соответствует требованиями ст. 395 ГК РФ, в связи с чем суд взыскивает с ответчика проценты за пользование чужими денежными средствами в сумме 31 390 руб. 41 коп. за период с 28.07.2022 по 25.05.2023.  

 Кроме того, на основании пункта 3 статьи 395 ГК РФ и пункта 48, 65 Постановления Пленума Верховного суда РФ от 24.03.2016 №7 «О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств», в связи с отсутствием уплаты долга на дату рассмотрения дела, подлежит удовлетворению требование истца о взыскании с ответчика процентов за пользование чужими денежными средствами за период начисления, начиная с 26.05.2023. по дату фактической оплаты, исходя из ключевой ставки Банка России, действующей в соответствующие периоды. 

Стороны согласно ст. ст. 8, 9 АПК РФ, пользуются равными правами на представление доказательств и несут риск наступления последствий совершения или несовершения ими процессуальных действий, в том числе представления доказательств обоснованности и законности своих требований или возражений.

Согласно требованиям ст. 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств, оценивает относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности.

Согласно ст. 65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

В соответствии с ч. 3.1 ст. 70 АПК РФ обстоятельства, на которые ссылается сторона в обоснование своих требований или возражений, считаются признанными другой стороной, если они ею прямо не оспорены или несогласие с такими обстоятельствами не вытекает из иных доказательств, обосновывающих представленные возражения относительно существа заявленных требований.

В соответствии со ст.110 АПК РФ суд относит на ответчика расходы истца по госпошлине в сумме 13 628 руб. 00 коп. 

Учитывая ст. ст. 8, 12, 307-310, 328, 395, 720, 779, 781, 1102 ГК РФ, руководствуясь ст. ст. 65, 68, 71, 75, 110, 123, 156, 167-171, 176, 180, 181, 319 АПК РФ, суд

Р Е Ш И Л:

Взыскать с ООО "ПАЛЛАДИУМ" (ОГРН 

<

***>) в пользу ООО "РСК "АРХИТЕКТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ" (ОГРН 

<

***>) 500 000 (пятьсот тысяч) руб. неосновательного обогащения, 31 390 (тридцать одна тысяча триста девяносто) руб. 41 коп. процентов за пользование чужими денежными средствами на основании ст. 395 ГК РФ за период с 28.07.2022 по 25.05.2023, проценты за пользование чужими денежными средствами на основании ст. 395 ГК РФ, начисленные на сумму неосновательного обогащения за период с 26.05.2023 по дату фактической оплаты, а также 13 628 (тринадцать тысяч шестьсот двадцать восемь) руб. судебных расходов по оплате государственной пошлины.

Решение может быть обжаловано в месячный срок с даты его принятия в Девятый арбитражный апелляционный суд.

Судья:

М.С. Новиков