АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ 115191, г.Москва, ул. Большая Тульская, д. 17 http://www.msk.arbitr.ru 

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

РЕШЕНИЕ

Дело № А40-68602/20-96-449

28 июля 2020 года

г. Москва

 

Решение в порядке ст. 229 АПК РФ вынесено 22 июля 2020 года  Мотивированное решение вынесено 28 июля 2020 года  

Арбитражный суд города Москвы в составе судьи Гутник П.С., единолично  рассмотрев исковое заявление ФКР МОСКВЫ к ООО "ЮГОСЛАВСТРОЙДЕКОР" о  взыскании штрафа в размере 100 000 руб., госпошлины.  

без вызова сторон. 

УСТАНОВИЛ:

ФКР МОСКВЫ обратилось в суд с иском к ответчику ООО  "ЮГОСЛАВСТРОЙДЕКОР" о взыскании штрафа в размере 100 000 руб., госпошлины.  

При решении вопроса о принятии искового заявления к производству судом  установлены основания, предусмотренные статьей 227 АПК РФ, для рассмотрения дела  в порядке упрощенного производства.  

Определением Арбитражного суда города Москвы от 29.05.2020 года исковое  заявление ФКР МОСКВЫ принято к рассмотрению в порядке упрощенного  производства. Копия определения Арбитражного суда города Москвы от 29.05.2020  года направлена лицам, участвующим в деле, а также размещена на официальном сайте  ВАС РФ.  

Ко дню принятия решения суд располагает сведениями о получении сторонами  копии определения о принятии искового заявления к производству и рассмотрении  дела в порядке упрощенного производства, что является надлежащим извещением в  силу статей 121, 122, 123 АПК РФ.  

Дело рассмотрено судом в порядке упрощенного производства в порядке главы 29  АПК РФ в редакции, действовавшей на дату принятия решения на основании  доказательств, представленных в течение установленного судом срока.  

Резолютивная часть судебного акта размещена на официальном сайте  Арбитражного суда города Москвы 23.07.2020 года.  

В канцелярию суда поступило заявление ФКР МОСКВЫ об изготовлении  мотивированного решения по делу.  

В порядке ч. 2 ст. 229 АПК РФ судом составлено мотивированное решение. 

Изучив материалы дела, суд считает исковые требования подлежащими  удовлетворению по следующим основаниям.  

Судом установлено, что между Фондом капитального ремонта многоквартирных  домов города Москвы (далее – Заказчик, Истец) и ООО «ЮГОСЛАВСТРОЙДЕКОР»  (далее – Генподрядчик, Ответчик) заключен договор № ПКР-000278-17 от 31.05.2017г.  (далее - Договор) на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества в  многоквартирном доме (далее - МКД), расположенном по адресу: 

<

...>.  

Согласно ст. 309 Гражданского Кодекса Российской Федерации (ГК РФ)  обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями  обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, односторонний отказ от  исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются (ст.  310 ГК РФ).  

В соответствии со ст. 708 ГК РФ в договоре подряда указываются начальный и  конечный сроки выполнения работы. По согласованию между сторонами в договоре  могут быть предусмотрены также сроки завершения отдельных этапов работы  (промежуточные сроки).  

Если иное не установлено законом, иными правовыми актами или не  предусмотрено договором, подрядчик несет ответственность за нарушение качества  выполнения работ по договору.  

В адрес ФКР Москвы поступило обращение собственника квартиры,  расположенной по адресу: 

<

...> по вопросу некачественно  выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного  дома.  

Работы по ремонту стояков горячего водоснабжения были приняты Заказчиком в  соответствии с Актом приемки выполненных работ от 01.10.2018г.  

Согласно п. 10.3 Договора Гарантийный срок на выполненные работы по каждому  Объекту устанавливается продолжительностью 5 (пять) лет с момента подписания Акта  

(-ов) приемки выполненных работ по Объекту, а в случае досрочного расторжения  настоящего Договора (на выполненные Генподрядчиком до даты расторжения  Договора и принятые Заказчиком работы) - с даты расторжения настоящего Договора.  

Если в течение Гарантийного срока выявится, что работы (отдельные виды работ)  или оборудование (часть оборудования) имеют недостатки (дефекты), которые  являются следствием ненадлежащего выполнения Генподрядчиком (его поставщиками  и/или привлеченными им субподрядными организациями) принятых им на себя  обязательств, в том числе будут обнаружены материалы, которые не соответствуют  сертификатам качества или требованиям Договора, то Заказчик организует составление  Рекламационного акта, где подробно описываются выявленные недостатки (дефекты) и  их причины, устанавливаются сроки начала и окончания работ по устранению  недостатков (дефектов). Течение срока исковой давности начинается с даты  составления Рекламационного акта (п. 10.4 Договора).  

В силу п. 1.34. Договора, рекламационный акт - документ, составляемый  сторонами настоящего Договора в порядке, предусмотренном Договором, в случае  обнаружения недостатков (дефектов) на Объекте в течение гарантийного срока и  содержащий перечень недостатков (дефектов) с их подробным описанием, а также  указанием даты окончания устранения этих недостатков (дефектов) Генподрядчиком.  

«12» марта 2019 года в адрес Генподрядчика в соответствии с п. 10.5. Договора,  направлено письменное извещение Заказчика № ФКР-ЦАО-1164/9 о выявленных  недостатках (дефектах), в соответствии с которым Генподрядчику необходимо было  явиться 13.03.2019г. на осмотр по указанному в извещении адресу.  

В результате комиссионной проверки, состоявшейся 13.03.2019г., по факту  причинения ущерба собственнику помещения в многоквартирном доме по адресу: 

<

...>, актом от 13.03.2019г. выявлены нарушения  технологии производства работ по капитальному ремонту МКД, а также повреждения в  жилых помещениях № 21, 35, 14 в период гарантийного срока, установленного  договором.  

Согласно п. 6.1.28 Договора Генподрядчик принял на себя обязанность  самостоятельно нести ответственность в случае предъявления Заказчиком, либо  непосредственно лицом, которому причинен ущерб, каких-либо требований или  претензий вследствие выполнения Генподрядчиком на Объекте(-ах) работ.  

За неисполнение в установленный срок предписания Заказчика по исполнению  предусмотренных Договором обязательств - штраф в размере 50 000 (пятьдесят тысяч)  рублей (п.12.7.18).  

«14» марта 2019г. в адрес Генподрядчика было направлено предписание № ФКР- 1ДАО-1227/9 с требованием устранить выявленные замечания, зафиксированные в акте  от 13.03.2019г., урегулировать вопрос возмещения ущерба с собственниками в срок до  27.03.2019г.  

В установленные в рекламационном акте сроки Генподрядчик к выполнению  работ по устранению недостатков (дефектов) не приступил, нарушил срок начала и  окончания работ по устранению выявленных недостатков (дефектов), не урегулировал  вопрос о возмещении ущерба.  

В соответствии с разделом 9 Договора при наступлении страхового случая  Генподрядчик обязан выполнить предусмотренные договором страхования  гражданской ответственности действия, а также незамедлительно (в течение одного  рабочего дня) информировать заказчика о наступлении страхового случая и обеспечить  направление в страховую компанию заявления о наступлении страхового случая.  

При обнаружении факта причинения вреда третьим лицам. Генподрядчик вправе  компенсировать причиненный вред без уведомления страховой компании путем  проведения восстановительных работ или выплаты денежной компенсации  пострадавшим третьим лицам. Срок выплаты денежной компенсации или срок  проведения восстановительных работ не должен превышать 10 (десяти) рабочих дней.  

В соответствии с п. 12.7.16 Договора за нарушение Генподрядчиком условий,  предусмотренных разделом 9 Договора Генподрядчик уплачивает Заказчику штраф в  размере 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей.  

В соответствии с положениями раздела 9 Договора, Генподрядчик не обеспечил  направление в страховую компанию заявления о наступлении страхового случая, не  компенсировал причиненный вред пострадавшим третьим лицам.  

В рамках досудебного урегулирования спора Истцом была направлена в адрес  Ответчика претензия от 10.02.2020г. № ФКР-30-684/20, что подтверждается реестром  отправки претензии с описью почты России.  

Требования по претензии не удовлетворены. 

Указанные обстоятельства послужили основанием для обращения истца с  исковым заявлением в суд.  

Ответчик отзыв не представил, при этом суд отмечает, что предоставление отзыва  на иск суду и лицам, участвующим в деле, в силу ст. 131 АПК РФ, является  процессуальной обязанностью ответчика.  

В определении суда, суд обязывал ответчика представить письменный  мотивированный отзыв в порядке ст. 131 АПК РФ.  

Между тем, в нарушение ст. 131 АПК РФ, ответчик указанное требование не  исполнил, отзыв на иск не представил, об обстоятельствах, препятствующих  своевременному предоставлению отзыва на иск и дополнительных доказательствах,  которые могли бы быть признаны судом уважительными, суду не сообщил, в связи с  чем, принял риск наступления последствий совершения или несовершения им  процессуальных действий (ч. 2 ст. 9 и ст. 41 АПК РФ).  

Молчание ответчика расценивается судом как отсутствие возражений на иск в  соответствии со ст.41, 65, 66, 75, 131, 133-136 АПК РФ.  

Изучив материалы дела, суд считает исковые требования подлежащими  удовлетворению в полном объеме по следующим основаниям.  

В соответствии со ст. 309 ГК РФ - обязательства должны исполняться  надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями  закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в  соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми  требованиями. Статья 310 ГК РФ указывает на то, что односторонний отказ от  исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускается.  

Согласно пункту 1 статьи 702 ГК РФ по договору подряда одна сторона  (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика)  определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять  результат работы и оплатить его.  

В соответствии со статьями 711 и 746 ГК РФ основанием для возникновения у  заказчика обязательства по оплате выполненных работ в порядке, установленном  договором подряда, является сдача подрядчиком и принятие заказчиком результатов  работы в установленном законом и договором порядке.  

В соответствии с п. 4 ст. 753 ГК РФ сдача результата работ подрядчиком и  приемка его заказчиком оформляются актом, подписанным обеими сторонами.  

Стороны согласно ст. ст. 8, 9 АПК РФ, пользуются равными правами на  представление доказательств и несут риск наступления последствий совершения или  несовершения ими процессуальных действий, в том числе представления доказательств  обоснованности и законности своих требований или возражений.  

Согласно требованиям ст. 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской  Федерации арбитражный суд оценивает доказательства по своему внутреннему  убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном  исследовании имеющихся в деле доказательств, оценивает относимость, допустимость,  достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и  взаимную связь доказательств в их совокупности.  

Согласно ст. 65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать  обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и  возражений.  

В соответствии со ст. 68 АПК РФ обстоятельства дела, которые согласно закона  должны быть подтверждены определенными доказательствами, не могут  подтверждаться в арбитражном суде иными доказательствами.  

В соответствии с ч. 3.1 ст. 70 АПК РФ обстоятельства, на которые ссылается  сторона в обоснование своих требований или возражений, считаются признанными  другой стороной, если они ею прямо не оспорены или несогласие с такими  обстоятельствами не вытекает из иных доказательств, обосновывающих  представленные возражения относительно существа заявленных требований.  

На основании п. 1 ст. 330 ГК РФ, неустойкой (штрафом, пеней) признается  определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан  уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения  обязательства, в частности в случае просрочки исполнения. По требованию об уплате  неустойки кредитор не обязан доказывать причинение ему убытков.  

В соответствии со ст. 708 ГК РФ в договоре подряда указываются начальный и  конечный сроки выполнения работы. По согласованию между сторонами в договоре  могут быть предусмотрены также сроки завершения отдельных этапов работы  (промежуточные сроки).  

Если иное не установлено законом, иными правовыми актами или не  предусмотрено договором, подрядчик несет ответственность за нарушение качества  выполнения работ по договору.  

В адрес ФКР Москвы поступило обращение собственника квартиры,  расположенной по адресу: 

<

...> по вопросу некачественно  выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного  дома.  

Работы по ремонту стояков горячего водоснабжения были приняты Заказчиком в  соответствии с Актом приемки выполненных работ от 01.10.2018г.  

Согласно п. 10.3 Договора Гарантийный срок на выполненные работы по каждому  Объекту устанавливается продолжительностью 5 (пять) лет с момента подписания Акта  (-ов) приемки выполненных работ по Объекту, а в случае досрочного расторжения  настоящего Договора (на выполненные Генподрядчиком до даты расторжения  Договора и принятые Заказчиком работы) - с даты расторжения настоящего Договора.  

Если в течение Гарантийного срока выявится, что работы (отдельные виды работ)  или оборудование (часть оборудования) имеют недостатки (дефекты), которые  

являются следствием ненадлежащего выполнения Генподрядчиком (его поставщиками  и/или привлеченными им субподрядными организациями) принятых им на себя  обязательств, в том числе будут обнаружены материалы, которые не соответствуют  сертификатам качества или требованиям Договора, то Заказчик организует составление  Рекламационного акта, где подробно описываются выявленные недостатки (дефекты) и  их причины, устанавливаются сроки начала и окончания работ по устранению  недостатков (дефектов). Течение срока исковой давности начинается с даты  составления Рекламационного акта (п. 10.4 Договора).  

В силу п. 1.34. Договора, рекламационный акт - документ, составляемый  сторонами настоящего Договора в порядке, предусмотренном Договором, в случае  обнаружения недостатков (дефектов) на Объекте в течение гарантийного срока и  содержащий перечень недостатков (дефектов) с их подробным описанием, а также  указанием даты окончания устранения этих недостатков (дефектов) Генподрядчиком.  

«12» марта 2019 года в адрес Генподрядчика в соответствии с п. 10.5. Договора,  направлено письменное извещение Заказчика № ФКР-ЦАО-1164/9 о выявленных  недостатках (дефектах), в соответствии с которым Генподрядчику необходимо было  явиться 13.03.2019г. на осмотр по указанному в извещении адресу.  

В результате комиссионной проверки, состоявшейся 13.03.2019, по факту  причинения ущерба собственнику помещения в многоквартирном доме по адресу: 

<

...>, актом от 13.03.2019г. выявлены нарушения  технологии производства работ по капитальному ремонту МКД, а также повреждения в  жилых помещениях № 21, 35, 14 в период гарантийного срока, установленного  договором.  

Согласно п. 6.1.28 Договора Генподрядчик принял на себя обязанность  самостоятельно нести ответственность в случае предъявления Заказчиком, либо  непосредственно лицом, которому причинен ущерб, каких-либо требований или  претензий вследствие выполнения Генподрядчиком на Объекте(-ах) работ.  

За неисполнение в установленный срок предписания Заказчика по исполнению  предусмотренных Договором обязательств - штраф в размере 50 000 (пятьдесят тысяч)  рублей (п.12.7.18).  

«14» марта 2019г. в адрес Генподрядчика было направлено предписание № ФКР- 1ДАО-1227/9 с требованием устранить выявленные замечания, зафиксированные в акте  от 13.03.2019г., урегулировать вопрос возмещения ущерба с собственниками в срок до  27.03.2019г.  

В установленные в рекламационном акте сроки Генподрядчик к выполнению  работ по устранению недостатков (дефектов) не приступил, нарушил срок начала и  

окончания работ по устранению выявленных недостатков (дефектов), не урегулировал  вопрос о возмещении ущерба.  

В соответствии с разделом 9 Договора при наступлении страхового случая  Генподрядчик обязан выполнить предусмотренные договором страхования  гражданской ответственности действия, а также незамедлительно (в течение одного  рабочего дня) информировать заказчика о наступлении страхового случая и обеспечить  направление в страховую компанию заявления о наступлении страхового случая.  

При обнаружении факта причинения вреда третьим лицам. Генподрядчик вправе  компенсировать причиненный вред без уведомления страховой компании путем  проведения восстановительных работ или выплаты денежной компенсации  пострадавшим третьим лицам. Срок выплаты денежной компенсации или срок  проведения восстановительных работ не должен превышать 10 (десяти) рабочих дней.  

В соответствии с п. 12.7.16 Договора за нарушение Генподрядчиком условий,  предусмотренных разделом 9 Договора Генподрядчик уплачивает Заказчику штраф в  размере 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей.  

Таким образом, поскольку Ответчиком не были исполнены в полном объеме свои  обязательства по Договору, Истцом начислен Ответчику штраф в общем размере 100  000 руб.  

Ответчиком в материалы дела не представлены документы, подтверждающие  отсутствие нарушений выполненных работ, либо документы, подтверждающие  устранения Ответчиком выявленных Истцом нарушений в выполненных работах по  Договоур.  

Суд считает факт нарушения ответчиком обязательств по Договору  документально подтвержденным представленными Истцом в материалы дела  доказательствами.  

Представленный истцом расчет судом проверен, методологически и  арифметически выполнен верно.  

В разъяснение указанной нормы права Президиум Высшего Арбитражного Суда  Российской Федерации в постановлении от 6 марта 2012 г. № 12505/11 указал, что  нежелание представить доказательства должно квалифицироваться исключительно как  отказ от опровержения того факта, на наличие которого аргументировано со ссылкой  на конкретные документы указывает процессуальный оппонент. Участвующее в деле  лицо, не совершившее процессуальное действие, несет риск наступления последствий  такого своего поведения.  

Таким образом, ответчик, которому суд разъяснил риск наступления  неблагоприятных последствий в случае непредставления отзыва и доказательств в  

подтверждение своих возражений по каждому доводу заявителя, не оспорил и опроверг  факты, указанные Истцом в обоснование своих требований.  

В связи с вышеизложенным, суд приходит к выводу об удовлетворении  заявленных требований в полном объеме.  

Расходы по госпошлине распределены на основании ст. 110 АПК РФ.  

На основании ст.ст. 307-310, 314, 330, 425, 521, 702, 711, 746, 753 ГК РФ,  руководствуясь ст.ст. 65, 69, 71, 110, 226-229 АПК РФ, суд  

Р Е Ш И Л:

Взыскать с ООО "ЮГОСЛАВСТРОЙДЕКОР" в пользу ФКР МОСКВЫ штраф в  

размере 100 000 руб., расходы по оплате госпошлины в размере 4 000 руб.  

Решение может быть обжаловано в Девятый арбитражный апелляционный суд в  

срок, не превышающий пятнадцати дней со дня его принятия. 

Судья П.С. Гутник 

Электронная подпись действительна.Данные ЭП:Удостоверяющий центр ФГБУ ИАЦ СудебногодепартаментаДата 16.06.2020 14:29:00Кому выдана Гутник Полина Сергеевна