РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

Дело № А40-267076/21-110-1804

г. Москва

17 апреля 2023 г.

Резолютивная часть решения объявлена 17 марта 2023 года 

Решение в полном объеме изготовлено 17 апреля 2023 года

Арбитражный суд города Москвы в составе:

судьи Мищенко А.В. /единолично/, 

при ведении протокола судебного заседания секретарем Милкиной К.А.,  

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску Министерства обороны Российской Федерации (119019, МОСКВА ГОРОД, ЗНАМЕНКА УЛИЦА, ДОМ 19, ОГРН: 1037700255284) к  обществу с ограниченной ответственностью "СИСТЕМЫ И СВЯЗЬ" (107113, МОСКВА ГОРОД, ШУМКИНА УЛИЦА, 20, СТР 1, ОГРН: 1107746657127) о взыскании 18 789 966,67 руб.,

при участии:

от истца –Баширова  Р.А. по дов.  от  12.10.2022

от ответчика- Степанов Н.О. по дов.  от 24.101.2022,

УСТАНОВИЛ:

Министерство обороны Российской Федерации обратилось с иском к обществу с ограниченной ответственностью "СИСТЕМЫ И СВЯЗЬ" о взыскании 18 789 966,67 руб. неустойки за нарушение срока выполнения работ по этапам №5 и №6 по государственному контракту от 04.12.2017 №17/728/ОКР.

Определением суда от 17 апреля 2023 года исковое заявление оставлено без рассмотрения.

Постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 15 августа 2022 года определение Арбитражного суда города Москвы от 20.06.2022 оставлено  без изменений.

Постановлением Арбитражного суда Московского округа от 05 октября 2022 года определение Арбитражного суда города Москвы от 20.06.2022 и постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 15.08.2022 по делу № А40-267076/2021 отменены, дело направлено на новое рассмотрение в Арбитражный суд города Москвы. 

При новом рассмотрении дела истец поддержал заявленное требование в полном объеме.

Ответчик иск не признал по основаниям, изложенным в отзыве.

Заслушав представителей лиц, участвующих в деле, исследовав и оценив в совокупности доказательства, выполнив указания кассационной инстанции, суд пришел к следующим выводам.

Как усматривается из материалов дела, между Министерством обороны Российской Федерации (далее - Заказчик) и ООО «СиС» (далее - Исполнитель) был заключен государственный контракт от 4 декабря 2017 г. № 17/728/ОКР на выполнение опытно-конструкторской работы шифр «Развлечение-ВА».  

Пунктом 2.2. Контракта предусмотрен срок выполнения этапа № 5 ОКР -с 29 июня 2019 г. по 31 августа 2019 г. включительно.

Однако, 31 августа 2019 г. нерабочий день (суббота).

В соответствии со статьей 193 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) если последний день срока приходится на нерабочий день, днем окончания срока считается ближайший следующий за : рабочий день, то есть 2 сентября 2019 г.

Работы по этапу № 5 ОКР Исполнителем по состоянию на 24 января 2021 г.1 не выполнены.

Просрочка исполнения обязательства составляет 510 дней (за период :   сентября 2019 г. по 24 января 2021 г.).

Пунктом 2.2. Контракта для выполнения этапа № 6 ОКР предусмотрен срок- с 1 сентября 2019 г. по 27 октября 2019 г. включительно.

С учетом того, что 27 октября 2019 г. нерабочий день (воскресенье), по правилам ст. 193 ГК РФ днем окончания срока считается 28 октября 2019 г.

Согласно пункту 4.5. Контракта датой исполнения обязательств по отдельным этапам ОКР является дата подписания Заказчиком (Представителем Заказчика) Акта сдачи приемки выполненного этапа ОКР (Приложение № 1 к Контракту).

Работы по этапу № 6 ОКР Исполнителем по состоянию на 24 января 2021 г. не выполнены.

Просрочка исполнения обязательства составляет 454 дней (за период с 29 октября 2019 г. по 24 января 2021 г.).

Согласно пункту 4.5. Контракта датой исполнения обязательств по отдельным этапам ОКР является дата подписания Заказчиком (Представителем Заказчика) Акта сдачи - приемки выполненного этапа ОКР (Приложение № 1 к Контракту).

В соответствии с пунктом 8.3. Контракта, в случае нарушения сроков выполнения этапов ОКР, предусмотренных Контрактом, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки (пени). Неустойка (пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения Исполнителем обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного срока исполнения обязательства, в размере одной трехсотой, действующей на дату уплаты неустойки (пени) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Исполнителем.

Работы по этапам №№ 1, 2, 3 ОКР  Исполнителем фактически выполнены, что подтверждается:

Актом сдачи-приемки выполненного этапа ОКР по этапу № 1 ОКР, подписанным Заказчиком 27 марта 2018 г.;

Актом сдачи-приемки выполненного этапа ОКР по этапу № 2 ОКР, подписанным Заказчиком 21 декабря 2018 г.;

Актом сдачи-приемки выполненного этапа ОКР по этапу № 3 ОКР, подписанным Заказчиком 26 августа 2019 г.

 

Сумма неустойки за нарушение срока выполнения работ по этапам № 5 и № 6  по расчету Истца  составляет 18 789 966, 67 руб.

Согласно условиям Контракта Минобороны России в адрес Ответчика направлены претензии: от 4 июня 2021 г. № 207/8/2019 и 207/8/2105, которые оставлены без ответа.

Вместе с тем, заявленная сумма неустойки рассчитана Истцом исходя из общей Цены Контракта (с учетом стоимости выполненных работ на сумму 168 750 000,00 рублей).

В соответствии с позицией Президиума ВАС РФ, изложенной в Постановлении № 5467/14 от 15.07.2014 по делу № А53-10062/2013, начисление неустойки на общую сумму государственного контракта без учета надлежащего исполнения части работ противоречит принципу юридического равенства, поскольку создает преимущественные условия кредитору, которому, следовательно, причитается компенсация не только за не исполненное в срок обязательство, но и за те работы, которые были выполнены надлежащим образом.

Превращение института неустойки в способ обогащения кредитора недопустимо и противоречит ее компенсационной функции.

Условия Контракта предусматривают поэтапное выполнение работ, то есть исполнение Ответчиком обязательств по частям, устанавливая самостоятельную стоимость каждого этапа работ.

Таким образом, представленный Истцом расчет неустойки, основанный на полной Цене Контракта, носит неправомерный характер, в то время как сумма неустойки подлежит расчету исходя из стоимости заявленных Истцом этапов работ, нарушение сроков которых является основанием для взыскания с Ответчика неустойки.

В соответствии с п. 2.2 Контракта, датами истечения сроков выполнения этапов работ, предшествующих заявленных Истцом этапам, являются: этап № 1 ОКР – 10.03.2018; этап № 2 ОКР – 16.07.2018; этап № 3 ОКР – 30.11.2018; Этап № 4 ОКР – 28.06.2019.

В связи с этим ответственность Ответчика за не выполнение таких этапов носит реестровый характер, а соответствующее ей требование Истца подлежит рассмотрению в деле о банкротстве Ответчика.

Включение в расчет неустойки стоимости этапов работ, завершение которых предшествует возбуждению дела о банкротстве Ответчика, нарушает как принципы равенства сторон в гражданских правоотношениях, так и положения Закона о банкротстве.

Сумма заявленной Истцом неустойки подлежит исчислению исходя из стоимости этапов работ, нарушение сроков которых является основанием для ее начисления, без учета стоимости предшествующих этапов работ, и составляет 1 235 075,00 руб. в соответствии с нижеследующим расчетом:

Задолженность

Период просрочки

Ставка

Формула

Неустойка

 

с

по

дней

 

3 500 000,00

03.09.2019

Новая задолженность на 3 500 000,00 руб.

3 500 000,00

03.09.2019

28.10.2019

56

7.5

3 500 000,00 × 56 × 1/300 × 7.5%

49 000,00 

10 450 000,00

29.10.2019

Новая задолженность на 6 950 000,00 руб.

10 450 000,00

29.10.2019

24.01.2021

454

7.5

10 450 000,00 × 454 × 1/300 × 7.5%

1 186 075,00 

Сумма неустойки: 1 235 075,00 руб.

При указанных обстоятельствах иск подлежит частичному удовлетворению.

На основании  изложенного, руководствуясь ст.ст.   110, 123, 167-171 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,  

РЕШИЛ:

Взыскать с  общества с ограниченной ответственностью "СИСТЕМЫ И СВЯЗЬ" (ОГРН: 1107746657127)  в пользу  Министерства обороны Российской Федерации (ОГРН: 1037700255284) 1 235 075 руб. неустойки .

В удовлетворении остальной части иска отказать

Взыскать с  общества с ограниченной ответственностью "СИСТЕМЫ И СВЯЗЬ" (ОГРН: 1107746657127)  в федеральный бюджет госпошлину в размере  7 687 руб. 

Решение может быть обжаловано в Девятый арбитражный апелляционный суд в течение  месяца с даты его принятия.

 

Судья:

А.В. Мищенко