АРБИТРАЖНЫЙ СУД ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА 

г. Салехард, ул. Республики, д.102, тел. (34922) 5-31-00,   www.yamal.arbitr.ru, e-mail: info@yamal.arbitr.ru  

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

РЕШЕНИЕ (резолютивная часть)

Дело № А81-1667/2023

г. Салехард

16 апреля 2024 года

Арбитражный суд Ямало-Ненецкого автономного округа в составе судьи  Осиповой Ю.Г., при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного  заседания Мамадулиной М. Г., рассмотрев в открытом судебном заседании дело по  исковому заявлению государственного казённого учреждения "Дирекция дорожного  хозяйства Ямало-Ненецкого автономного округа" (ИНН: 

<

***>, ОГРН:  

<

***>) к акционерному обществу "Ямалавтодор" (ИНН: 

<

***>, ОГРН:  

<

***>) об обязании выполнить восстановительные работы поврежденного в  процессе содержания деформационного шва на мосту через реку ФИО1 км. 264+260,  

с привлечением к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющих  самостоятельных требований относительно предмета спора, акционерного общества  "Ханты-Мансийскдорстрой" (ИНН: 

<

***>, ОГРН: 

<

***>),  

при участии в судебном заседании: от истца – ФИО2 по доверенности от 27.03.2024 № 32, 

от ответчика – ФИО3 по доверенности от 09.01.2024,  от третьих лиц - представители не явились,  

Руководствуясь статьями 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации, арбитражный суд  

РЕШИЛ:

1. Обязать акционерное общество "Ямалавтодор" (ИНН: 

<

***>,  ОГРН: 

<

***>) произвести восстановительные работы поврежденного  деформационного шва на мосту через реку ФИО1 км 264+260 в течение двух месяцев  с даты вступления решения в законную силу, а именно:  

- демонтировать резиновый компенсатор обеспечивая его сохранность; 

- разобрать асфальтобетонное покрытие и бетон омоноличивания со стороны  получившего повреждения окаймления шва на длине, равной поврежденному участку  плюс 200 мм со стороны каждого конца. Глубину разборки принимать 250 мм от верха  покрытия проезжей части;  

 

-удалить поврежденные участки профилей окаймления по контакту (сварке) с  анкерующими закладными деталями, сохранив последние без повреждений при этих  работах;  

- при необходимости заменить поврежденные закладные детали или выправить  их до проектного положения;  

- установить в проектное положение и скрепить сваркой с закладными деталями  и сохраненными участками окаймлений новые аналогичные по размерам и профилю  отрезки окаймлений. обеспечить соосность продольной штрабы для установки  резинового компенсатора;  

- уложить бетон омоноличивания шва и асфальтобетонное покрытие; 

-освидетельствовать демонтированный резиновый компенсатор и при  отсутствии повреждений установить между окаймлениями в проектное положение, при  необходимости использовать новый резиновый компенсатор.  

2. Взыскать с акционерного общества "Ямалавтодор" (ИНН: 

<

***>, ОГРН:  

<

***>) в пользу государственного казённого учреждения "Дирекция  дорожного хозяйства Ямало-Ненецкого автономного округа" (ИНН: 

<

***>,  ОГРН: 

<

***>) расходы за проведение по делу судебной экспертизы в размере  300 000 рублей.  

3. Взыскать с акционерного общества "Ямалавтодор" (ИНН: 

<

***>,  ОГРН: 

<

***>) в доход федерального бюджета государственную пошлину  в размере 6 000 рублей.  

4. Решение может быть обжаловано в порядке апелляционного производства в  течение месяца со дня его принятия (изготовления его в полном объеме) путем подачи  апелляционной жалобы в Восьмой арбитражный апелляционный суд через  Арбитражный суд Ямало-Ненецкого автономного округа.  

В соответствии с частью 5 статьи 15 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации настоящий судебный акт выполнен в форме электронного  документа и подписан усиленной квалифицированной электронной подписью судьи.  

Арбитражный суд Ямало-Ненецкого автономного округа разъясняет, что в  соответствии со статьей 177 Арбитражного процессуального кодекса Российской  Федерации решение, выполненное в форме электронного документа, направляется  лицам, участвующим в деле, посредством его размещения на официальном сайте  арбитражного суда в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в  режиме ограниченного доступа не позднее следующего дня после дня его принятия.  

По ходатайству указанных лиц копии решения на бумажном носителе могут  быть направлены им в пятидневный срок со дня поступления соответствующего  ходатайства в арбитражный суд заказным письмом с уведомлением о вручении или  вручены им под расписку.  

Ю.Г. Осипова

Судья