Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области

191015, Санкт-Петербург, Суворовский пр., 50/52

http://www.spb.arbitr.ru

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

Дело № А56-142367/2018

05 февраля 2019 года

г.Санкт-Петербург

Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области в составе:судьи Сергеева О.Н.,

рассмотрев дело по иску:

истец: общество с ограниченной ответственностью "ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО" (адрес:  Россия 197101, г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ул КРОПОТКИНА 1/И, ОГРН:  1127847599439);

ответчик:  общество с ограниченной ответственностью "РЕВВОРК" (адрес:  Россия 125167, г МОСКВА, г МОСКВА, пр-кт ЛЕНИНГРАДСКИЙ 37/9/618, ОГРН:  1127747301593);

о взыскании 37620.73

установил:

ООО "ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО" предъявило иск о взыскании с ООО "РЕВВОРК" 37 620 руб. 73 коп. неустойки за нарушение срока окончания работ по договору №ЭС-14пр от 21.01.16.

Ответчик иск отклонил и заявил ходатайство о применении ст.333 ГК РФ.

Дело рассмотрено в порядке упрощенного производства на основании ст. ст. 226-229 АПК РФ.

Судом установлено:

Между сторонами был заключен договор № ЭС-14пр от 21.01.16 на выполнение работ по вдавливанию свай на Пермской ГРЭС.

Цена работ составляет 2 971 680 руб. 00 коп.

Срок окончания работ – 30.03.16.

Истец в обоснование исковых требований ссылается на то, что ответчик выполнил работы с нарушением установленного срока.

25.08.17 объект введен в эксплуатацию, следовательно, работы выполнены ответчиком в 2016-2017 г. Ссылка истца на то, что работы на сумму 121 360 руб. 00 коп. не выполнены по состоянию на 16.10.18 необоснованна.

Решением от 07.06.17 по делу №А56-392/2017 с ООО "ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО" взыскано в пользу ООО "РЕВВОРК" 1 630 160 руб. 00 коп. задолженности и 25 699 руб. 13 коп. неустойки за просрочку платежа.

Учитывая, что в договоре размер неустойки одинаковый для заказчика и для подрядчика – 0,01 % (п.п.7.1,7.2) суд полагает возможным для соблюдения баланса интересов сторон уменьшить начисленную истцом неустойку в размере 37 620 руб. 73 коп. до 25 699 руб. 13 коп.

Расходы по государственной пошлине в размере 2 000 руб. 00 коп. относятся на ответчика.

Руководствуясь статьями 303, 330, 333 Гражданского кодекса Российской Федерации, 110, 226-229 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области

решил:

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "РЕВВОРК" в пользу общества с ограниченной ответственностью "ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО" 25 699 руб. 13 коп. неустойки за нарушение срока окончания работ по договору №ЭС14пр от 21.01.16 и 2 000 руб. 00 коп. расходов по государственной пошлине. 

Выдать исполнительный лист в порядке статьи 319 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. 

В остальной части исковых требований отказать.

Решение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в Тринадцатый арбитражный апелляционный суд в срок, не превышающий десяти дней со дня принятия.

Судья Сергеева О.Н.