РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

Дело № А40-280114/22-143-2095

02 июня  2023г.

г.  Москва

 

Резолютивная часть решения объявлена                       29 мая      2023г.

Мотивированное решение изготовлено                                        02 июня  2023г.

Арбитражный суд в составе:

Судьи Гедрайтис О.С.

при ведении протокола секретарем судебного заседания ФИО1

с использованием средств аудиозаписи

рассматривает в судебном заседании дело по иску ООО «ЭЛСТАР» (ОГРН 

<

***>) 

к ООО «ОТК-ГРУПП» (ОГРН 

<

***>) 

о взыскании 4.061.821 руб. 00 коп.

при участии: 

от истца: ФИО2 дов. от 01.08.2022г.

от ответчика: ФИО3 Ген.дир. Приказ № ОД/01

УСТАНОВИЛ:

ООО «ЭЛСТАР» обратилось с учетом уточнения предмета требований к ООО «ОТК-Групп» о взыскании 4 038 359руб. 00коп. задолженности и 222 389руб. 00коп. неустойки  по договору №202201 от 10.01.2022г.

Истец поддержал исковые требования, просил их удовлетворить.

Ответчик возражал против удовлетворения исковых требований по доводам, изложенным в отзыве.

Оценив материалы дела, выслушав представителей сторон, суд пришел к выводу об удовлетворении исковых требований исходя при этом из следующего.

Как усматривается из материалов дела, 10.01.2022г. между истцом и ответчиком заключен договор №202201.

В соответствии с вышеуказанным договором истец обязался выполнять работы, а ответчик принимать и оплачивать их.

В порядке ст. 720 ГК РФ заказчик обязан в сроки и в порядке, которые предусмотрены договором подряда, с участием подрядчика осмотреть и принять выполненную работу (ее результат), а при обнаружении отступлений от договора, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе немедленно заявить об этом подрядчику.

Заказчик, обнаруживший недостатки в работе при ее приемке, вправе ссылаться на них в случаях, если в акте либо в ином документе, удостоверяющем приемку, были оговорены эти недостатки либо возможность последующего предъявления требования об их устранении.

Если иное не предусмотрено договором подряда, заказчик, принявший работу без проверки, лишается права ссылаться на недостатки работы, которые могли быть установлены при обычном способе ее приемки (явные недостатки).

Заказчик, обнаруживший после приемки работы отступления в ней от договора подряда или иные недостатки, которые не могли быть установлены при обычном способе приемки (скрытые недостатки), в том числе такие, которые были умышленно скрыты подрядчиком, обязан известить об этом подрядчика в разумный срок по их обнаружении.

Истец свои обязательства по договору выполнил надлежащим образом, о чем свидетельствует акт о приемке выполненных работ и справка о стоимости выполненных работ и затрат №1 от 28.02.2022г., подписанные со стороны ответчика.

В порядке ст. 309 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона.

Ответчиком частично оплачены выполненные работы, задолженность составила 4 038 359руб. 00коп. и до настоящего времени им не погашена.

Так, в действиях ответчика усматривается односторонний отказ от исполнения обязательств, что в соответствии со ст. 310 ГК РФ не допускается, следовательно, требование истца о взыскании 4 038 359руб. 00коп. задолженности является обоснованным и подлежит удовлетворению в судебном порядке.

Довод ответчика о том, что истцом работы выполнены некачественно, признана судом несостоятельной, поскольку результат работ принят по актам, из которых следует, что работы, предусмотренные договором, выполнены истцом в полном объеме, замечаний по стоимости, качеству и объему работ ответчиком не заявлено. 

Кроме того, доказательств, которые бы подтвердили наличие недостатков в работах, принятых без замечаний работ, в материалы дела ответчиком не представлено. 

Согласно п. 4 ст. 753 ГК РФ, сдача результата работ подрядчиком и приемка его заказчиком оформляются актом, подписанным обеими сторонами. При отказе одной из сторон от подписания акта в нем делается отметка об этом и акт подписывается другой стороной.

Односторонний акт сдачи или приемки результата работ может быть признан судом недействительным лишь в случае, если мотивы отказа от подписания акта признаны им обоснованными.

В соответствии с п. 14 Информационного письма Президиума ВАС РФ от 24.01.2000г. № 51 «Обзор практики разрешения споров по договору строительного подряда» вышеуказанная норма (п. 4 ст. 753 ГК РФ) означает, что оформленный в одностороннем порядке акт является доказательством исполнения подрядчиком обязательства по договору и при отказе заказчика от оплаты на суд возлагается обязанность рассмотреть доводы заказчика, обосновывающие его отказ от подписания акта приемки результата работ.

Кроме того, в соответствии с п. 12 вышеуказанного Информационного письма Президиума ВАС РФ, наличие акта приемки работ, подписанного заказчиком, также не лишает заказчика права представить суду возражения по объему и стоимости работ.

Таким образом, исходя из содержания вышеуказанных норм ГК РФ и разъяснений ВАС РФ, заказчик вправе предъявить в суд свои обоснованные возражения по предъявленным к оплате работам как в случае, если он не подписал акты приемки работ, так и в случае их подписания.

В силу ст. 746 ГК РФ, оплата выполненных подрядчиком работ производится заказчиком в размере, предусмотренном сметой, в сроки и в порядке, которые установлены законом или договором строительного подряда. При отсутствии соответствующих указаний в законе или договоре оплата работ производится в соответствии со ст. 711 ГК РФ.

Вместе с тем, ответчиком в материалы дела не представлены надлежащие доказательства выявленных недостатков в выполненных истцом работах.

Так, в материалах дела отсутствует перечень недостатков, акты, подтверждающие фиксацию выявленных недостатков, а также документы, подтверждающие выполнение работ по устранению недостатков.

При этом, извещения о вызове на объект были направлены Почтой России за два рабочих для до даты явки на объект, то есть несвоевременно.

Из представленного договора, подписанного с третьим лицом, не усматривает что он был заключен непосредственно для устранения недостатков в выполненных ответчиком работах.

Представленные ответчиком в материалы дела фотографии, также не приняты судом в качестве доказательств выполнения работ ненадлежащего качества, поскольку из них невозможно установить время и дату исполнения фото и принадлежность объекта. Объект, отображенный на фото идентифицировать невозможно. Доказывание факта ненадлежащего выполнения работ данными документами законом не предусмотрено.

Учитывая, что в материалах дела отсутствуют доказательства, свидетельствующие о направлении ответчиком в адрес истца каких-либо претензий после получения и подписания актов по форме КС-2, КС-3, то, следовательно, работы приняты ответчиком в полном объеме и без замечаний.

Кроме того, истец просит взыскать с Ответчика неустойку за просрочку оплаты стоимости работ в размере 222 389 руб.  00коп. согласно п. 3.3. договора.

Согласно ст.330 ГК РФ неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения. По требованию об уплате неустойки кредитор не обязан доказывать причинение ему убытков.

Согласно расчету Истца, размер неустойки составил  222 389руб. 00коп.  за период с 22.03.2022г. по 31.03.2022г. и с 02.10.2022г. по 29.05.2023г. судом проверен, признан правильным и подлежащим удовлетворению в заявленном размере в судебном порядке.

При таких обстоятельствах, заявленные требования обоснованы, подтверждены представленными доказательствами и подлежат удовлетворению в судебном порядке.

В соответствии со ст. 110 АПК РФ государственная пошлина относится на ответчика.

Руководствуясь ст. ст. 309, 310, 330, 333, 702, 720  ГК РФ, ст. ст. 110, 167-170, 176  АПК РФ, суд                                   

                                                               РЕШИЛ:

Взыскать с ООО «ОТК-ГРУПП» (ОГРН 

<

***>) в пользу ООО «ЭЛСТАР» (ОГРН 

<

***>) 4 038 359руб. 00коп. задолженности, 222 389руб. 00коп.  неустойки и 43 309руб. 00коп. расходов по оплате госпошлины. 

Взыскать с ООО «ОТК-ГРУПП» (ОГРН 

<

***>) в доход Федерального бюджета РФ  расходы  по оплате  госпошлины в размере  995руб.00коп.

Решение может быть обжаловано в Девятый Арбитражный Апелляционный суд в течении месяца со дня принятия.

Судья О.С. Гедрайтис