Арбитражный суд Мурманской области улица Академика Книповича, дом 20, город Мурманск, 183038 http://murmansk.arbitr.ru Именем Российской Федерации 

РЕШЕНИЕ

дело № А42-2962/2024

город Мурманск

18 июля 2024 года

Резолютивная часть решения вынесена и оглашена 15.07.2024. Мотивированное решение изготовлено 18.07.2024. 

Арбитражный суд Мурманской области в составе судьи Новиковой О.О., при  ведении протокола секретарем судебного заседания Бочкаревой Ю.А., рассмотрев в  отрытом судебном заседании дело по исковому заявлению некоммерческой организации  «Фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Мурманской  области» (183031, 

<

...>; ОГРН: 

<

***>,  ИНН: 

<

***>)  

к обществу с ограниченной ответственностью «АТЛАНТИС» (196158,  

<

...>, лит. А, пом. 15-Н, оф. 1; ОГРН: 

<

***>,  ИНН: 

<

***>)  

о взыскании 408 387 руб. 80 коп., при участии в судебном заседании представителей: истца – не участвует, извещен; ответчика – не участвует, извещен, 

установил:

некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта общего имущества в  многоквартирных домах в Мурманской области» (ОГРН: 

<

***>, ИНН:  

<

***>) (далее – истец) обратилось в Арбитражный суд Мурманской области с  исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью «АТЛАНТИС» (ОГРН:  

<

***>, ИНН: 

<

***>) о взыскании с ответчика в пользу истца неустойки с  13.10.2022 по 01.12.2022 в размере 305 342 руб. 50 коп.  

18.04.2024 исковое заявление было принято к рассмотрению в порядке упрощенного  производства судом.  

06.05.2024 истцом представлено ходатайство об уточнении размера исковых  требований, в котором просит взыскать с ответчика неустойку за просрочку исполнения  обязательств по договору № 2022-СМР-ФКР-109 на оказание услуг и (или) выполнение  работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов от 15.06.2022  за период с 13.10.2022 по 28.12.2022 в сумме 470 227 руб. 45 коп.  

24.05.2024 судом вынесено определение о рассмотрении дела по общим правилам  искового производства.  

Стороны, извещенные надлежащим образом о времени и месте рассмотрения дела,  представителей в суд не направили. Отзыв ответчиком не представлен.  

В соответствии со статьей 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской  Федерации (далее – АПК РФ) суд считает возможным рассмотреть дело в отсутствие  представителей сторон.  

В ходе предварительного судебного заседания суд пришёл к выводу о готовности  настоящего дела к судебному разбирательству. В соответствии с частью 4 статьи 137 АПК  

РФ суд завершил предварительное судебное заседание и перешёл к рассмотрению дела в  судебном заседании арбитражного суда первой инстанции.  

15.06.2022 сторонами заключен договор № 2022-СМР-ФКР-109 на оказание услуг и  (или) выполнение работ по капитальному общего имущества № 2022-СМР-ФКР-109  (далее – Договор), в соответствии с которым истец поручает, а ответчик принимает на  себя обязательство своими силами и средствами и/или силами привлеченных  субподрядных организаций, за свой счет, с использованием собственных материалов,  конструкций, изделий и оборудования выполнить по заданию истца, в соответствии с  рабочей и проектной документаций, техническим заданием (Приложение № 2 к  настоящему Договору), работы по капитальному ремонту фасада многоквартирного дома,  расположенного по адресу: 

<

...> включая  выполнение строительно-монтажных работ на объекте, сооружение и демонтаж  временных зданий и сооружений, поставку материалов, изделий, конструкций,  оборудования, предусмотренных проектной документацией и техническим заданием,  своевременное устранение недостатков (дефектов), выполнение обязательств в течение  гарантийного срока, выполнение иных неразрывно связанных работ и возмещение ущерба  третьим лицам, сдать объект и результат работ по акту приёмки в эксплуатацию истцу в  порядке, определенном разделом 6 Договора.  

Согласно пункту 2.1 Договора стоимость работ по договору составляет  6 106 580 руб.  

В пункте 3.1 Договора указано, что фактической датой окончания работ является  дата подписания акта выполненных работ по форме КС-2 сторонами.  

Согласно Приложению № 4 к Договору работы по капитальному ремонту должны  быть окончены не позднее 12.10.2022.  

Ответчиком допущена просрочка исполнения обязательств в части сроков окончания  работ.  

Акт выполненных работ по форме КС-2 подписан 28.12.2022. То есть с нарушением  срока окончания работ на 77 дней (период 12.10.2022 - 28.12.2022).  

Согласно пункту 11.4 Договора, в случае нарушения ответчиком срока  начала/окончания работ, предусмотренного пунктом 3.1 Договора, а также нарушение  срока окончания работ по отдельным видам работ (промежуточные сроки работ) по  каждому объекту, включая выполнение этапов работ по отдельным элементам (системам)  здания в соответствии с Календарным планом работ, графиком производства работ, срока  передачи исполнительной документации, ответчик обязан уплатить истцу неустойку в  размере 0,1% от стоимости работ, сроки по которому нарушены, которая начисляется за  каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором,  начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока  исполнения обязательства, включая срок исполнения.  

Истцом начислена неустойка на основании пункта 11.4 Договора за просрочку  выполнения работ за период с 13.10.2022 по 28.12.2022 в размере 470 227 руб. 45 коп.  (расчет: 6 106 850 руб. 77 коп. х 77 дней х 0,1%).  

В порядке досудебного урегулирования спора истцом ответчику была направлена  претензия № от 01.12.2022 № 04/23/22120110328, которая не была удовлетворена  ответчиком, что стало основанием для обращения истца в суд с настоящим иском.  

Суд считает исковые требования подлежащими удовлетворению по следующим  основаниям.  

Возражений ответчиком не представлено. 

В соответствии со статьей 65 АПК РФ суд считает обоснованным расчет,  произведенный истцом.  

Факт несвоевременного выполнения обязательств по выполнению работ в  установленный Договором срок, подтвержден.  

В соответствии с пунктом 1 статьи 740 ГК РФ, по договору строительного подряда  подрядчик обязуется в установленный договором срок построить по заданию заказчика  определенный объект либо выполнить иные строительные работы, а заказчик обязуется  создать подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и  уплатить обусловленную цену.  

Основания и размер неустойки согласован сторонами в договорах.  

В соответствии статьями 330, 331 ГК РФ подлежит взысканию с ответчика в пользу  истца неустойка (пени) за период с 13.10.2022 по 28.12.2022 в размере 470 227 руб. 45 коп.  

Таким образом, требования истца подлежат удовлетворению в полном объеме.  

Платежным поручением от 14.02.2024 № 1042 истец перечислил в федеральный  бюджет 9 107 руб. государственной пошлины.  

Согласно статье 110 АПК РФ, судебные расходы, понесенные лицами,  участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются  арбитражным судом со стороны.  

Соответственно, с учетом уточнения исковых требований истцом, расходы истца по  уплате государственной пошлины в размере 9 107 руб. подлежат возмещению ответчиком,  в доход федерального бюджета подлежит государственная пошлина в размере 3 298 руб.  

Судебный акт выполнен в электронной форме. Копия решения считается  полученной лицом, которому она в силу положений процессуального законодательства  высылается посредством размещения решения на официальном сайте суда в режиме  ограниченного доступа, на следующий день после дня его размещения на указанном сайте  (статьи 177, 186 АПК РФ).  

Руководствуясь статьями 49, 110, 167-171, 176 Арбитражного процессуального  кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Мурманской области  

решил:

исковые требования некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта  общего имущества в многоквартирных домах в Мурманской области» (ОГРН:  

<

***>, ИНН: 

<

***>) удовлетворить.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «АТЛАНТИС» (ОГРН:  

<

***>, ИНН: 

<

***>) в пользу некоммерческой организации «Фонд  капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Мурманской  области» (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>) неустойку за просрочку исполнения  обязательств по договору № 2022-СМР-ФКР-109 на оказание услуг и (или) выполнение  работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов от 15.06.2022  в сумме 470 227 руб. 45 коп., а также судебные расходы по уплате государственной  пошлины в сумме 9 107 руб.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «АТЛАНТИС» (ОГРН:  

<

***>, ИНН: 

<

***>) в доход федерального бюджета государственную  пошлину в сумме 3 298 руб.  

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в месячный срок со дня  принятия.  

Судья О.О. Новикова