АРБИТРАЖНЫЙ СУД ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ул. Б.Хмельницкого, 59-б, г.Иваново, 153022

тел/факс (4932) 42-96-65, http://ivanovo.arbitr.ru, е-mail: info@ivanovo.arbitr.ru

Именем Российской Федерации

Р Е Ш Е Н И Е

Дело № А17-8471/2017

15 декабря 2017 года

г. Иваново

 

Резолютивная часть решения

 изготовлена 4.12.2017 года

Арбитражный суд Ивановской области в составе судьи Торговой Татьяны Евгеньевны, рассмотрев в порядке упрощенного производство дело по иску общества с ограниченной ответственностью «ИвЭнергоСтрой» к акционерному обществу «Стройиндустрия-Холдинг»  о  взыскании  задолженности по договору строительного подряда № 6/03 от 29.03.2016 года в размере 310 810 рублей 76 копеек,

Установил:

ООО «ИвЭнергоСтрой» (истец) обратилось в Арбитражный суд Ивановской области с исковым заявлением к АО «Стройиндустрия-Холдинг» (ответчик) о взыскании задолженности за выполненные работы по договору подряда в сумме 310.810,76 рублей.

Определением суда от 10.10.2017 года дело принято к рассмотрению в порядке упрощенного производства, резолютивная часть решения изготовлена 4.12.2017 года.

11.12.2017 года ответчик обратился с заявлением об изготовлении мотивированного решения.

Исковые требования истца заключаются во взыскании с ответчика задолженности за фактически выполненные и принятые ответчиком без замечаний работы по Договору строительного подряда №6/03 от 29.03.2017 года в сумме 310.810,76 рублей.

Ответчиком 31.10.2017 года представлено ходатайство о рассмотрении дела по общим правилам искового производства по причине того, что между сторонами происходит сверка  и урегулирование взаимных расчетов. Возражений по сумме иска или по основаниям иска, по доказательствам, ответчиком заявлено не было.

Истец возражал против перехода к рассмотрению дела по общим правилам искового производства, указав в письменном дополнении к иску следующее.

09 августа 2017 года ООО «ИвЭнергоСтрой» направил в адрес АО «Стройиндустрия- Холдинг» претензию № 141 на сумму 288 233,61 руб.

После направления и получения претензии между ООО «ИвЭнергоСтрой» и АО «Стройиндустрия-Холдинг» началась работа по сверке расчетов по выполненным ООО «ИвЭнергоСтрой» строительным работам. В результате проделанной работы между истцом и ответчиком был составлен и подписан акт сверки взаимных расчетов за период: январь 2017г.

- август 2017г. Согласно указанного акта была проведена сверка расчетов по трем заключенным договорам.

Исходя из данных, имеющихся в акте сверки, задолженность АО «Стройиндустрия- Холдинг» перед ООО «ИвЭнергоСтрой» по договору № 6-03 от 29.03.2016г. на 31.08.2017г. составляет 347 019 руб. 81 коп. Задолженность ООО «ИвЭнергоСтрой» перед АО «Стройиндустрия-Холдинг» за услуги подрядчика согласно акта сверки по состоянию на

31.08.2017г. составляет 36 209 руб. 05 коп. Таким образом, задолженность АО «Стройиндустрия-Холдинг» перед ООО «ИвЭнергоСтрой» составляет: 347 019,81 - 36 209,05 = 310 810 руб. 76 коп.

ООО «ИвЭнергоСтрой» 19 октября 2017г. отправил в адрес АО «Стройиндустрия- Холдинг» дополнение к претензии № 141 от 09.08.2017г., которая была получена ответчиком 24 октября 2017 года.

Работы по договору строительного подряда № 6/03 от 29 марта 2016 года были полностью выполнены в 2016 году; все объемы работ были сверены в 2016-2017 гг., что подтверждается подписанными актами выполненных работ и справками о стоимости выполненных работ, сверка имеющихся документов и сумм задолженности произведена между сторонами. В настоящее время никаких работ ООО «ИвЭнергоСтрой» не производит, дополнительные документы также не подписываются. С момента предъявления искового заявления ответчик задолженность не погасил.

В связи с чем, суд не усмотрел оснований для перехода к рассмотрению дела по общим правилам. Кроме того, ответчик  не указал каких-либо возражений по иску.

Исследовав материалы дела и изучив позиции сторон, суд установил следующее.

29 марта 2016 года между АО «Стройиндустрия-Холдинг» («Подрядчик») и ООО «ИвЭнергоСтрой» («Субподрядчик») был заключен Договор строительного подряда №6/03 (далее - Договор). Согласно п.1.1. Договора Субподрядчик принял на себя обязательства выполнить на свой риск собственными силами и средствами, из своих материалов и оборудования электромонтажные и пусконаладочные работы «Электрооборудование многоквартирного жилого дома» на объекте по адресу: ул. Рабфаковская в г.Иваново, оси 4-5 (далее - Объект), а также выполнить подготовку технической, исполнительной, иной необходимой документации, участвовать в передаче Объекта эксплуатирующей организации, указанной Подрядчиком в соответствии с условиями Договора, и, при необходимости, установленной Подрядчиком, в вводе Объекта в эксплуатацию.

Согласно п. 2.1 Договора №6/03 от 29.03.2016г., цена Договора включает в себя стоимость работ, указанных в п.1.1. Договора и составляет 6 494 338 руб. 21 коп., в т.ч. 18 % НДС, является твердой, изменению не подлежит и оплачивается за фактически выполненный и принятый объем работ.

Приложением к договору № 6/03 от 29.03.2016г. является подписанный сторонами локальный сметный расчет № 1 на 49/12-ЭО Электрооборудование на общую сумму 6 494 338 руб. 21 коп.

За весь период действия договора ООО «ИвЭнергоСтрой» выполнило работы на общую сумму 6 226 416 руб. 74 коп., что подтверждается подписанными без замечаний актами о приемке выполненных работ и справками о стоимости выполненных работ и затрат.

Согласно п. 2.4. Договора, расчеты по договору осуществляются на основании подписанных сторонами Актов о приемке выполненных работ формы КС-2 и справок о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3 за фактически выполненный и принятый объем работ, с приложением исполнительной документации, в течение 30 (тридцати) банковских дней после получения Подрядчиком оригинала счета и счета-фактуры.

АО «Стройиндустрия-Холдинг» произвело оплату выполненных работ по договору в размере 5 879 396  руб. 93 коп.

В связи с чем, не оплаченной осталась сумма 347019,81 рублей.

30 марта 2016 года между АО «Стройиндустрия-Холдинг» и ООО «ИвЭнергоСтрой» было подписано дополнительное соглашение № 1 к Договору строительного подряда №6/03, согласно которому стороны пришли к соглашению внести изменения в Договор, дополнив его пунктом 2.9. следующего содержания: «услуги Подрядчика по организации строительства составляют 5 % от стоимости, указанной в Приложениях к договору, в том числе НДС 18 % и учитываются при осуществлении авансовых платежей в адрес Субподрядчика. Удержание услуг Подрядчика производится по факту оказания Подрядчиком услуг и подтверждается ежемесячно путем подписания акта об оказании услуг. Подрядчик представляет Субподрядчику указанный акт в 2-х экземплярах в срок не позднее 3-х рабочих дней с момента окончания отчетного периода. Субподрядчик обязан подписать указанный акт в 2-х экземплярах в течение 3-х рабочих дней с момента получения и 1 экземпляр вернуть Подрядчику».

Руководствуясь пунктом 2.9 Договора АО «Стройиндустрия-Холдинг» выставило ООО «ИвЭнергоСтрой» акты за услуги подрядчика по организации строительства по всем выполненным работам на общую сумму 311 320  руб. 84 коп. ООО «ИвЭнергоСтрой» произвело частичную оплату по данным актам в размере 275 111 руб. 79 коп., что подтверждается платежными поручениями. В связи с тем, что последние акты выполненных ООО «ИвЭнергоСтрой» работ не оплачены АО «Стройиндустрия-Холдинг», являются неоплаченными и акты подрядчика на сумму 36 209  руб. 05 коп.

Т.о., задолженность АО «Стройиндустрия-Холдинг» перед ООО «ИвЭнергоСтрой» составляет:

347 019,81 - 36 209,05 = 310 810 руб. 76 коп.

14 июля 2017 года ООО «ИвЭнергоСтрой» написало в адрес АО «Стройиндустрия- Холдинг» письмо с просьбой оплатить задолженность по договору. Письмо осталось без ответа, выполненные работы не оплачены.

09 августа 2017 года ООО «ИвЭнергоСтрой» написало в адрес АО «Стройиндустрия- Холдинг» претензию, которая была передана через канцелярию АО «Стройиндустрия- Холдинг». До настоящего времени претензия осталась без ответа, задолженность не погашена.

После направления и получения претензии между ООО «ИвЭнергоСтрой» и АО «Стройиндустрия-Холдинг» началась работа по сверке расчетов по выполненным ООО «ИвЭнергоСтрой» строительным работам. В результате проделанной работы между истцом и ответчиком был составлен и подписан акт сверки взаимных расчетов за период: январь 2017г.

- август 2017г. Согласно указанного акта была проведена сверка расчетов по трем заключенным договорам.

Исходя из данных, имеющихся в акте сверки, задолженность АО «Стройиндустрия- Холдинг» перед ООО «ИвЭнергоСтрой» по договору № 6-03 от 29.03.2016г. на 31.08.2017г. составляет 347 019 руб. 81 коп. Задолженность ООО «ИвЭиергоСтрой» перед АО «Стройиндустрия-Холдинг» за услуги подрядчика согласно акта сверки по состоянию на 31.08.2017 года составила сумму 36209,05 рублей.

Никаких возражений по заявленным суммам ответчиком не представлено.

 

Исследовав материалы дела и позиции сторон, суд считает заявленные требований истца законными и обоснованными.

В соответствии с пунктом 1 статьи 702 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору подряда подрядчик обязуется выполнить по заданию заказчика определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работ и оплатить ее.

В соответствии со статьями 309, 310 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательства должны исполняться надлежащим образом, односторонний отказ от исполнения обязательств не допустим.

В силу пункта 4 статьи 753 Гражданского кодекса Российской Федерации сдача результата работ подрядчиком и приемка его заказчиком оформляются актом, подписанным обеими сторонами.

Аналогичная позиция содержится в пункте 8 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 24.01.2000 N 51 "Обзор практики разрешения споров по договору строительного подряда", в соответствии с которым основанием возникновения обязательства заказчика по оплате является сдача результата работ, что в данном случае подтверждается актами приемки выполненных работ.

В соответствии со статьей 711 Гражданского кодекса Российской Федерации заказчик обязан уплатить подрядчику обусловленную цену после окончательной сдачи результатов работы при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в согласованный срок, либо с согласия заказчика досрочно.

Представленные истцом  акты о приемке выполненных работ формы КС-2 подписаны уполномоченными представителями обеих сторон без замечаний и скреплены печатью сторон. 

В нарушение требований статей 702-729 Гражданского кодекса РФ ответчик не произвел оплату выполненных истцом работ в полном объеме. Задолженность составляет 310.380,76 руб.

Доказательств иного в материалы дела не представлено, ни один из представленных истцом документов в качестве подтверждения своих исковых требований, ответчиком не оспорен. 

Согласно статье 9 АПК РФ лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или не совершения ими процессуальных действий.

В связи с изложенным, требования истца о взыскании задолженности в сумме 310.810,76 рублей подлежат удовлетворению.

Руководствуясь статьями 110, ч.1 ст. 229 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

РЕШИЛ:

Ходатайство ответчика о рассмотрении дела по общим правилам искового производства оставить без удовлетворения.

Исковые требования истца удовлетворить.

Взыскать с акционерного общества «Стройиндустрия-Холдинг» (153015, 

<

...> И, ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, дата государственной регистрации в качестве юридического лица – 29.05.2002 года, дата присвоения ОГРН: 25.12.2002 года) в пользу общества с ограниченной ответственностью «ИвЭнергоСтрой» (153002, 

<

...>, дата государственной регистрации в качестве юридического лица – 10.08.2012 года, ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) задолженность по договору строительного подряда № 6/03 от 29.03.2016 года в размере 310 810 рублей 76 копеек, 9 216 рублей расходы по государственной пошлине. 

 

Решение подлежит немедленному исполнению.

Исполнительный лист подлежит выдаче после вступления решения суда в законную силу по правилам раздела VII АПК РФ. До вступления решения в законную силу исполнительный лист выдается по заявлению взыскателя.

Решение (резолютивная часть) по делу вступает в законную силу по истечении пятнадцати дней со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба.

В течение пяти дней со дня размещения решения (резолютивной части), принятого в порядке упрощенного производства, на официальном сайте арбитражного суда в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», лицо, участвующее в деле, может обратиться в арбитражный суд с заявлением о составлении мотивированного решения.

Мотивированное решение изготавливается судом в течение пяти дней со дня поступления от лица, участвующего в деле, соответствующего заявления.

В случае составления мотивированного решения арбитражного суда такое решение вступает в законную силу по истечении пятнадцатидневного срока, установленного для подачи апелляционной жалобы.

Решение может быть обжаловано во Второй арбитражный апелляционный суд в срок, не превышающий пятнадцати дней со дня его принятия, в соответствии со статьями 257, 259 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Решение арбитражного суда первой инстанции, если оно было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы, может быть обжаловано в Арбитражный суд Волго-Вятского округа в двухмесячный срок со дня вступления решения в законную силу в соответствии со статьями 273, 275, 276, 288.2 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, только по основаниям, предусмотренным частью 4 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Жалобы подаются через Арбитражный суд Ивановской области.

Пересмотр в порядке кассационного производства решения арбитражного суда в Судебной коллегии Верховного Суда Российской Федерации производится в порядке и сроки, предусмотренные статьями 291.1-291.15 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. Кассационная жалоба в этом случае подается непосредственно в Верховный Суд Российской Федерации.

Судья                                                                    Т.Е. Торгова