АРБИТРАЖНЫЙ СУД КЕМЕРОВСКОЙ  ОБЛАСТИ

Красная ул., д. 8, Кемерово, 650000

http://www.kemerovo.arbitr.ru

E-mail: info@kemerovo.arbitr.ru

Тел. (384-2) 58-43-26, тел./факс (384-2) 58-37-05

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

РЕШЕНИЕ

Дело № А27-20560/2019

город Кемерово

06 ноября 2019 года

Резолютивная часть решения объявлена 29 октября 2019 года

Решение в полном объеме изготовлено 06 ноября 2019 года

   Арбитражный суд Кемеровской области  в составе судьи  Плискиной Е.А., при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания М., рассмотрев в судебном заседании дело по иску Публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания «Сибири», г. Красноярск (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) 

к Акционерному обществу «ИНРУСИНВЕСТ», г. Новокузнецк Кемеровской области (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>)

о взыскании 522 573 руб. 36 коп.

при участии: 

от истца: не явились, извещены; 

от ответчика: ФИО1 – представитель по доверенности от 22.02.2017, 

у с т а н о в и л:

Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания «Сибири» (далее – ПАО «МРСК Сибири», Компания, истец) обратилось в Арбитражный суд Кемеровской области с исковым заявлением о взыскании с Акционерного общества «ИНРУСИНВЕСТ» (далее – АО «ИНРУСИНВЕСТ», Общество, ответчик) 522 573 руб. 36 коп., из которых 178 657 руб. 56 коп. задолженности по плате за технологическое присоединение к электрическим сетям по договору об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям № 20.2400.11243.18 от 18.02.2019, и 343 915 руб. 80 коп. неустойки за период с 04.03.2019 по 20.05.2019 за нарушение срока внесения окончательного платежа. 

Исковые требования со ссылкой на условия договора №20.2400.11243.18 от 18.02.2019,  пункт 16 (2)  Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 № 861 (далее - Правила № 861), статьи 309, 314, 329, 330, 331 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ), мотивированы неисполнением ответчиком обязанности по внесению окончательного платежа в течение 10 календарных дней с даты подписания акта об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям № 46-19-11243.18  от 21.02.2019.

В судебное заседание, истец, извещенный надлежащим образом в соответствии со статьями 121-123 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ) о дате и месте судебного заседания, явку представителя не обеспечил, возражения на доводы ответчика, отраженные в определении от 26.09.2019, не представил. 

Спор рассмотрен в порядке статьи 156 АПК РФ в отсутствие представителя истца по представленным в дело доказательствам.

Возражая против удовлетворения иска, ответчик указал на то, что о существовании обязанности по внесению окончательного платежа за  технологическое присоединение узнал только 09.04.2019, получив претензию истца от 28.03.2019 об оплате задолженности. 10.04.2019 оплата долга произведена в полном объеме. Сам акт об осуществлении технологического присоединения был предоставлен истцом в апреле 2019 года без указания даты его составления. Следовательно, с учетом положений статьи 314 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ), просрочка в оплате долга отсутствует. Также ответчик оспорил период  начисления неустойки: с учетом 10-ти дней, срок на оплату выпал на 03.03.2019, воскресенье, выходной день, следовательно, последний день оплаты – 04.03.2019, первым днем просрочки является  05.03.2019, а последним днем – 10.04.2019, день оплаты долга в полном объеме. 

Как следует из материалов дела, между ПАО «МРСК Сибири» (сетевая организация) и АО «ИНРУСИНВЕСТ» (заявитель) заключен договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям № 20.2400.11243.18 от 18.02.2019. 

По условиям  договора сетевая организация приняла на себя обязательства по осуществлению технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя -  нежилого здания, почтовый адрес согласно ориентира: г. Красноярск, Октябрьский район, ул. Волочаевская, земельный участок 44, кадастровый номер земельного участка 24:50:0100299:29, в том числе по обеспечению готовности объектов электросетевого хозяйства (включая их проектирование, строительство, реконструкцию) к присоединению энергопринимающих устройств, урегулированию отношений с третьими лицами в случае необходимости строительства (модернизации) такими лицами принадлежащих им объектов электросетевого хозяйства (энергопринимающих устройств, объектов электроэнергетики), с учетом характеристик: максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств – 300 кВт; категория надежности  - 3, класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется технологическое присоединение – 0,40 кВ, а заявитель обязался оплатить указанную услугу в соответствии с условиями договора (пункты 1, 2 договора). 

Срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению составляет  1 год со дня заключения договора (пункт 5 договора). 

Размер платы за технологическое присоединение  определяется в соответствии с Приказом Министерства тарифной политики Красноярского края от 27.12.2018 № 537-п и оставляет 1 786 575 руб. 60 коп. в том числе НДС  (пункт 10 договора в редакции в редакции протокола согласования разногласий).

Пунктом 11 договора (в редакции протокола согласования разногласий) установлено, что внесение платы за технологическое присоединение осуществляется заявителем в следующем порядке: 10% платы за технологическое присоединение, что составляет 178 657 руб. 56 коп. вносится в течение 15 календарных дней со дня заключения договора; 30% платы за технологическое присоединение в размере 535 972руб. 68 коп.  вносится в течение 60 календарных дней со дня заключения договора; 20% платы за технологическое присоединение в размере 357 315 руб. 12 коп. вносится в течение 180  дней календарных дней со дня заключения договора; 30 % платы в размере 535 972 руб. 68 коп. вносится в течение 15 календарных дней со дня фактического присоединения; 10% платы за технологическое присоединение в размере 178 657 руб. 56коп. вносится в течение 10 календарных дней со дня подписания акта об осуществлении технологического присоединения.

Датой исполнения обязательств заявителя по оплате расходов за оказанные услуги по договору считается дата внесения денежных средств в кассу или на расчетный счет сетевой организации (пункт 12 договора).

Пунктом 17 договора предусмотрено, что в случае нарушения одной из сторон сроков исполнения своих обязательств по договору такая сторона уплачивает другой стороне неустойку, равную 0,25 процентов от указанного общего размера платы за каждый день просрочки. При этом совокупный размер такой неустойки при нарушении срока осуществления мероприятий по технологическому присоединению заявителем не может превышать размер неустойки, определенной в предусмотренном настоящим абзацем порядке за год просрочки.

Ссылаясь на то, что подписав акт об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям № 46-19-11243.18  от 21.02.2019, Общество не оплатило в установленный срок окончательный платеж по договору в размере   178 657руб. 56 коп., Компания направила в его адрес претензию от 28.03.2019 с требованием об оплате задолженности и неустойки. В ответ Общество сообщило об отсутствии в акте об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям № 46-19-11243.18  даты его подписания, указало на факт внесения платежа в сумме 178 657 руб. 56 коп. платежным поручением № 1091 от 10.04.2019, а также со ссылкой на статью 314 ГК РФ полагало необоснованным предъявление неустойки за нарушение срока оплаты. Несмотря на это, в письме от 22.05.2019 № 1.3/20/10823-исх Компания настаивала  на внесении платы и полагала начисление неустойки обоснованным. 

Поскольку, по мнению Компании, ответчик обязан оплатить долг в размере 178 657руб. 56 коп., а также неустойку, начисленную за период с 04.03.2019 по 20.05.2019 за нарушение срока внесения окончательного платежа, Компания обратилась в арбитражный суд с исковым заявлением. 

Выслушав представителя ответчика, изучив материалы дела, суд не нашел оснований для удовлетворения исковых требований в связи со следующим. 

Согласно пункту 1 статьи 26 Федерального закона от 26.03.2003 N 35-ФЗ "Об электроэнергетике" технологическое присоединение к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам (далее также - технологическое присоединение), осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, и носит однократный характер. Технологическое присоединение осуществляется на основании договора об осуществлении технологического присоединения к объектам электросетевого хозяйства, заключаемого между сетевой организацией и обратившимся к ней лицом. Указанный договор является публичным. 

Порядок технологического присоединения энергопринимающих устройств юридических и физических лиц к электрическим сетям регулируются Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 № 861.

В соответствии с пунктом 3 Правил № 861 сетевая организация обязана выполнить в отношении любого обратившегося к ней лица мероприятия по технологическому присоединению при условии соблюдения им настоящих Правил и наличии технической возможности технологического присоединения. 

Технологическое присоединение осуществляется на основании договора, заключаемого между сетевой организацией и юридическим или физическим лицом, в установленные сроки (пункт 6 Правил № 861).

Согласно пункту 19 Правил технологического присоединения стороны составляют акт об осуществлении технологического присоединения по форме, предусмотренной приложением N 1 к настоящим Правилам, не позднее 3 рабочих дней после осуществления сетевой организацией фактического присоединения объектов электроэнергетики (энергопринимающих устройств) заявителя к электрическим сетям и фактического приема (подачи) напряжения и мощности.

К правоотношениям сторон  по договору об осуществлении технологического присоединения применяются правила главы 39 Гражданского кодекса Российской Федерации.  

В соответствии со статьей 779 Гражданского Кодекса Российской Федерации по договору возмездного оказания услуг исполнитель обязуется по заданию заказчика оказать услуги (совершить определенные действия или осуществить определенную деятельность), а заказчик обязуется оплатить эти услуги.

Согласно статье 781 Гражданского Кодекса Российской Федерации заказчик обязан оплатить оказанные ему услуги в сроки и порядке, которые указаны в договоре возмездного оказания услуг.

В соответствии с положениями статей 309, 310 Гражданского Кодекса Российской Федерации обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов. Односторонний отказ от исполнения обязательств не допускается.

Надлежащее исполнение обязательств может быть обеспечено неустойкой (статья 329 ГК РФ). Согласно статье 12 Гражданского кодекса Российской Федерации взыскание неустойки является одним из способов защиты нарушенного гражданского права. Неустойкой признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения (статья 330 Кодекса). 

Факт выполнения истцом технологического присоединения ответчик не оспаривает, выражая несогласие только с датой подписания акта об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям № 46-19-11243.18 -   21.02.2019, а также оспаривая факт наличия задолженности.

Суд соглашается с доводами ответчика об отсутствии долга, поскольку факт оплаты 178 657 руб. 56 коп. подтверждается подлинником платежного поручения № 1091 от 10.04.2019, с назначением платежа «оплата за технологическое присоединение к электрическим сетям по договору № 20.2400.11243.198 от 18.02.2019 (

<

...>)» с отметкой банка о его исполнении. 

Доказательств, опровергающих факт оплаты, истец не представил. 

В обоснование начисления неустойки с 04.03.2019, Компания представила в материалы дела копию акта об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям АТП № 46-19-11243.18 с указанием даты подписания -   21.02.2019. 

В соответствии с частью 6 статьи 71 АПК РФ арбитражный суд не может считать доказанным факт, подтверждаемый только копией документа или иного письменного доказательства, если утрачен или не передан в суд оригинал документа, а копии этого документа, представленные лицами, участвующими в деле, не тождественны между собой и невозможно установить подлинное содержание первоисточника с помощью других доказательств.

Акт об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям АТП № 46-19-11243.18 представлен ответчиком на обозрение суда в оригинале, копия приобщена к материалам дела, акт не содержит даты его подписания. 

При таких обстоятельствах суд полагает недоказанным факт возникновения у ответчика обязанности по оплате оставшейся части долга до получения им 09.04.2019 претензии истца от 28.03.2019 № 1.3/03/7167-исх. 

Поскольку на эту дату (09.04.2019) акт был подписан, что ответчиком не опровергнуто, суд полагает, что у Общества возникла обязанность по внесению окончательного платежа. В соответствии с пунктом 11 договора об осуществлении технологического присоединения № 20.2400.11243.18 от 18.02.2019 (в редакции протокола согласования разногласий), 10-дневный срок оплаты истекал 19.04.2019. Оплата произведена ответчиком 10.04.2019, в связи с чем, оснований для взыскания неустойки не имеется. 

Согласно части 1 статьи 9, части 1 статьи 65 АПК РФ, судопроизводство в арбитражном суде осуществляется на основе состязательности; каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

В силу части 3.1. статьи 70 АПК РФ обстоятельства, на которые ссылается сторона в обоснование своих требований или возражений, считаются признанными другой стороной, если они ею прямо не оспорены или несогласие с такими обстоятельствами не вытекает из иных доказательств, обосновывающих представленные возражения относительно существа заявленных требований.

Частью 2 статьи 9 АПК РФ установлено, что  лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или несовершения ими процессуальных действий.

Истец, надлежащим образом извещенный о рассмотрении дела и о возражениях ответчика (отражены в ответе на претензию от 22.04.2019, а также в определении суда от 26.09.2019), правом представить возражения на отзыв, доказательства в обоснование возражений  не воспользовался, чем принял на себя риск наступления последствий. 

Иск удовлетворению не подлежит.

Расходы по уплате государственной пошлины в соответствии с частью 1 статьи 110 АПК РФ относятся на истца. 

Руководствуясь статьями 110, 167-171, 180 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

р е ш и л:

Отказать в удовлетворении иска. 

Решение может быть обжаловано в течение одного месяца со дня его принятия  в Седьмой арбитражный апелляционный суд путем подачи апелляционной жалобы через Арбитражный суд Кемеровской области. 

Судья        Плискина Е.А.