АРБИТРАЖНЫЙ СУД САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ

693000, г. Южно-Сахалинск, Коммунистический проспект, 28

Факс 460-945, 460-952, адрес сайта-http://sakhalin.arbitr.ru/

Электронная почта-info@sakhalin.arbitr.ru

Именем Российской Федерации

 

РЕШЕНИЕ

мотивированное решение по делу, рассматриваемому

в порядке упрощенного производства

Дело № А59-3705/2022

г. Южно-Сахалинск

3 октября 2022 года

Резолютивная часть решения принята 23.09.2022

Арбитражный суд Сахалинской области в составе судьи Веретенникова И.Н., рассмотрев в порядке упрощенного судопроизводства дело по исковому заявлению

муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства городского округа «Охинский» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, адрес регистрации: 694490, Сахалинская область, Охинский район, 

<

...>)

к обществу с ограниченной ответственностью «Хабремстрой» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, адрес регистрации: 680038, Хабаровский край, 

<

...>) 

о взыскании неустойки за просрочку исполнения обязательств по муниципальным контрактам

УСТАНОВИЛ:

муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства городского округа «Охинский» (далее - истец, МКУ «УКС») обратилось в арбитражный суд с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью «Хабремстрой» (далее - ответчик, общество, ООО «Хабремстрой») с требованием о взыскании неустойки за просрочку исполнения обязательств по муниципальным контрактам: № 0361300002919000043 от 12.07.2019, № 10 от 18.02.2020 в общей сумме 325 842 рубля 77 копеек.

Исковые требования нормативно обоснованы положениями статьей 309, 763, 743 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ), Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Закон № 44-ФЗ) и мотивированы нарушением подрядчиком сроков выполнения работ по контрактам.

Истцом в адрес ответчика были направлены претензии с требованием об уплате неустойки за ненадлежащее исполнение обязательств по муниципальным контрактам № 0361300002919000043 от 12.07.2019 и № 10 от 18.02.2020. 

Направленные в адрес ответчика претензии оставлены без удовлетворения, что послужило основанием для обращения в суд с настоящим иском.

В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 227 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ) определением от 21.03.2022 исковое заявление принято к рассмотрению в порядке упрощенного производства по правилам главы 29 АПК РФ без вызова сторон на основании имеющихся в деле доказательств.

В отзыве на исковое заявление, ответчик с исковыми требованиями не согласился. Указал, что 18.07.2020 МКУ «УКС» направило в адрес ООО «Хабремстрой» письмо № 291, в котором просило считать ранее направленные претензии № 86 от 17.02.2020, № 88 от 17.02.2020, № 271 от 08.06.2020 недействительными. К данному письму заказчик приложил перерасчет неустойки за просрочку выполнения ООО «Хабремстрой» работ по муниципальному контракту № 0361300002919000043 от 12.07.2019 за весь период, а именно: с 31 октября 2019 года по 14 мая 2020 года, за вычетом дней просрочки, произошедшей не по вине Подрядчика, который составил сумму неустойки в размере 253 298 рублей 62 копейки. Данная сумма перерасчета неустойки им выплачена 29.06.2020.

В отношении требования об уплате неустойки по муниципальному контракту от 18.02.2020 № 10 в размере 3 744 рублей 51 копейки за период просрочки с 6 марта 2020 года по 14 мая 2020 года считает обоснованными. Данная задолженность также им была выплачена 09.08.2022.  

По результатам рассмотрения дела судом 23.09.2022 вынесена резолютивная часть решения, согласно которой в удовлетворении исковых требований отказано в полном объеме.

28.09.2022 от истца поступило заявление о составлении мотивированного решения по делу, в связи, с чем в силу части 2 статьи 229 АПК РФ суд изготавливает мотивированное решение. 

Изучив материалы дела, исследовав и оценив по правилам статьи 71 АПК РФ доказательства, имеющиеся в деле, суд приходит к следующему.

12.07.2019 между МКУ «УКС» (Заказчик) и ООО «Хабремстрой» (Подрядчик) заключен муниципальный контракт № 0361300002919000043 на выполнение работ по объекту: Ремонт кровли и фасада здания МБДОУ д/с № 5 «Звездочка» г. Охи, в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1 к муниципальному контракту), передаваемой в производство работ Заказчиком проектной документацией, утверждённой в установленном действующим законодательством порядке, с соблюдением технологии и всех требований нормативно-технической документации, обязательной при выполнении данных работ и условиями настоящего Контракта, а Заказчик обязуется создать Подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и оплатить в установленном настоящим Контрактом порядке (пункт 1.1 контракта).

Место выполнения работ: 

<

...>. (пункт 1.2 контракта).

Цена контракта составляет 25 299 131 рубль 61 копейка, в соответствии с расчётом цены контракта (Приложение №2 к муниципальному контракту).

Сумма, подлежащая уплате Заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации заказчиком (пункт 2.1 контракта).

В пункте 3.1 контракта стороны согласовали, что заказчик оплачивает только фактически выполненные работы. Объем фактически выполненных Подрядчиком работ определяется актом о приемке выполненных работ (форма № КС-2) и справкой о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3) подписанных Заказчиком без замечаний.

В силу пункта 3.2 контракта оплата производится, исходя из объема выполненных работ и цены контракта, путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Подрядчика в срок не позднее тридцати дней с даты подписания заказчиком документов о приемке, предусмотренных Контрактом. 

Окончательный расчет за выполненные работы осуществляется после подписания акта сдачи-приемки выполненных работ (рекомендованная форма акта содержится в Приложении №3 Контракта) (пункт 3.4 контракта).

Все изменения, дополнения настоящего контракта оформляются в письменном виде в формате Дополнительного соглашения к настоящему Контракту и подписываются обеими сторонами (пункт 11.10 контракта).

Согласно пункту 12.1.1 контракта, сроки выполнения работ с даты, заключения контракта по 30.10.2019 (включительно).

Контракт считается заключенным с момента размещения, в единой информационной системе подписанного Заказчиком Контракта и действует до полного исполнения обязательств по нему (пункт 12.2 контракта).

Дополнительным соглашением от 18.12.2019 №1 стороны внесли изменения в абзац 1 подпункт 2.1 пункта 2 контракта и дополнили Приложение № 1 и № 2 к Техническому заданию Контракта.

Так, согласно пункту 2.1 контракта в новой редакции, цена контракта составляет 26 013 665 рублей 09 копеек (без НДС), в соответствии с расчетом цены контракта (Приложение № 2 к муниципальному контракту).

Истец исполнил свои обязательства в установленный Контрактом срок и в полном объеме принял и оплатил работы.

Согласно акту № 1 сдачи-приемки выполненных работ установлено, что подрядчиком работы выполнены 14.05.2020.

В соответствии с пунктом 5.3.4 контракта пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных Подрядчиком.

Истец обратился к ответчику со следующими претензиями об оплате неустойки:

- № 88 от 17.02.2020 за период просрочки с 31 октября 2019 года по 26 декабря 2019 года в размере 192 847рублей 76 копеек;

- № 86 от 17.02.2020 за период просрочки с 27 декабря 2019 года по 17 февраля 2020 года в размере 52 172рубля 71 копейки;

- № 271 от 08.06.2020 за период просрочки с 18 февраля 2020 года по 14 мая 2020 года в размере 77 077рублей 79 копеек.

Общая сумма начисленной истцом неустойки по муниципальному контракту от 12.07.2019 № 0361300002919000043 составила 322 098 рублей 26 копеек.

18.02.2020 между МКУ «УКС» (Заказчик) и ООО «Хабремстрой» (Подрядчик) заключен муниципальный контракт № 10 на  выполнение работ по объекту: «Расширение дверных проемов по объекту: «Капитальный ремонт фасада здания МБДОУ д/с № 5 «Звездочка» г. Охи», в соответствии с требованием Технического задания (Приложение № 1 к Контракту, являющегося неотъемлемой частью контракта), с соблюдением условий технологии и всех требований нормативно-технической документации, обязательной при выполнении данных работ и иными, условиями настоящего Контракта.  (пункт 1.1. контракта)

Место выполнения работ: 

<

...> (пункт 1.2. контракта).

Согласно пункта 2.1. контракта цена составляет 297 183 рубля 60 копеек без НДС, в соответствии с расчётом цены контракта (Приложение № 2 к муниципальному контракту).

Указанная в пункте 2.1 настоящей статьи цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта. При исполнении Контракта изменение его условий не допускается, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Контрактом статьей 34 и статьей 95 Федерального закона от 05,04,2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Стороны согласовали форму, сроки и порядок оплаты в главе 3 контракта.

После выполнения работ в полном объеме Подрядчик предъявляет Заказчику акт приемки выполненных работ (унифицированная форма КС-2) в 4-х экземплярах, справку о стоимости выполненных работ и затрат (унифицированная форма КС-3) в 4-х экземплярах, акт сдачи-приемки выполненных работ (рекомендованная форма акта содержится в Приложении № 3 Контракта) в 4-х экземплярах. Заказчик в течении 3 (трех) рабочих дней рассматривает и оформляет представленные документы или направляет Подрядчику обоснованный, отказ. (пункт 3.1. контракта)

После подписания Сторонами форм КС-2, КС-3 без замечаний, а так же акта сдачи-приемки выполненных работ (в день сдачи-приемки объекта), Подрядчик представляет Заказчику счёт, счет-фактуру (при наличии) в 1-ом  экземпляре.

Оплата работ производится Заказчиком только в том случае, если предъявляемые к оплате счёт, счет-фактура (при наличии), акт приемки выполненных работ (КС-2), справку о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) и акт сдачи-приемки выполненных работ оформлены надлежащим образом и подписаны с обеих сторон.

Оплата работ производится Заказчиком за фактически выполненные работы, перечислением платежным поручением на расчетный счет Подрядчика в срок не более тридцати дней с даты подписания Заказчиком документов о приемке, предусмотренных контрактом, в пределах общей суммы, не превышающей лимиты бюджетных обязательств.

Обязательство Заказчика по оплате считается исполненным в момент списания денежных средств с лицевого счета Заказчика.

Истец исполнил свои обязательства в установленный Контрактом срок и в полном объеме: принял и оплатил работы.

Актом № 1 сдачи-приемки выполненных работ установлено, что подрядчиком работы выполнены 14.05.2020 (окончание работ по факту).

В соответствие с пунктом 5.4. контракта в случае просрочки начала и/или окончания работ (видов, этапов), по настоящему Контракту, Заказчик начисляет Подрядчику пеню.

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного срока исполнения обязательства, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты, пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных Подрядчиком.

Истец обратился к ответчику с претензией от 09.06.2020 № 273 об оплате неустойки в размере 3 744 рубля 51 копейки.

Указав, что задолженность ответчиком не погашена, истец обратился в суд с настоящим иском.

Судом установлено, что спорные правоотношения по своей правовой природе подпадают под правовое регулирование общих норм обязательственного права, содержащихся в части первой ГК РФ, норм главы 37 ГК РФ, регулирующие правоотношения при выполнении подрядных работ для государственных или муниципальных нужд, Закона № 44-ФЗ.

В соответствии с положениями статей 309, 310 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями. Односторонний отказ от исполнения обязательств не допускается.

Согласно части 1 статьи 763 ГК РФ, подрядные строительные работы (статья 740), проектные и изыскательские работы (статья 758), предназначенные для удовлетворения государственных или муниципальных нужд, осуществляются на основе государственного или муниципального контракта на выполнение подрядных работ для государственных или муниципальных нужд.

По государственному или муниципальному контракту на выполнение подрядных работ для государственных или муниципальных нужд (далее - государственный или муниципальный контракт) подрядчик обязуется выполнить строительные, проектные и другие связанные со строительством и ремонтом объектов производственного и непроизводственного характера работы и передать их государственному или муниципальному заказчику, а государственный или муниципальный заказчик обязуется принять выполненные работы и оплатить их или обеспечить их оплату (часть 2 статьи 763 ГК РФ).

В соответствии с правилами статьи 708 ГК РФ, в договоре подряда указываются начальный и конечный сроки выполнения работы. По согласованию между сторонами в договоре могут быть предусмотрены также сроки завершения отдельных этапов работы (промежуточные сроки). Если иное не установлено законом, иными правовыми актами или не предусмотрено договором, подрядчик несет ответственность за нарушение как начального и конечного, так и промежуточных сроков выполнения работы.

Срок выполнения работ является существенным условием для договора подряда.

В соответствии с пунктом 1 статьи 329 ГК РФ исполнение обязательств может обеспечиваться, в том числе, неустойкой.

Неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения (пункт 1 статьи 330 ГК РФ).

Возражая против заявленных требований, ответчик представил письмо МКУ «УКС ГО «Охинский» от 18.06.2020 № 291, в котором истец просил ранее направленные претензии № 88 от 17.02.2020, № 86 от 17.02.2020, № 271 от 08.06.2020 считать недействительными, с приложением перерасчета неустойки за просрочку работ по муниципальному контракту муниципальному контракту  от 12.07.2019 № 0361300002919000043, за вычетом дней просрочки, произошедшей не по вине Подрядчика, а также доказательства оплаты долга за начисленную истцом неустойку по (платежное поручение № 1015 от 29.06.2020 на сумму 253 298 рублей 62 копейки) и указал на погашение задолженности до обращения истца в суд с иском.

В счет погашения суммы начисленной истцом по муниципальному контракту от 18.02.2020 № 10, представил доказательства оплаты долга (платежное поручение № 180 от 08.08.2022 на сумму 3 744 рубля 51 копейку).

Таким образом, заявленные истцом требования удовлетворены ответчиком еще до обращения МКУ «УКС» в суд с рассматриваемым исковым заявлением.

Несмотря на обстоятельство добровольной оплаты ответчиком неустойки, суд считает необходимым отметить следующее.

В соответствии с частью 9.1 статьи 34 Закона о контрактной системе, Правительство Российской Федерации вправе установить случаи и порядок списания начисленных поставщику (подрядчику, исполнителю), но не списанных заказчиком сумм неустоек (штрафов, пеней) в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств, предусмотренных контрактом.

Как следует из пункта 40 Обзора судебной практики применения законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, утвержденного Президиумом Верховного Суда РФ 28.06.2017, списание или предоставление отсрочки уплаты неустоек (штрафов, пеней) является обязанностью заказчика, в связи с чем, суд обязан проверить соблюдение им требований указанной нормы.

Согласно части 42.1 статьи 112 Закона о контрактной системе, начисленные поставщику (подрядчику, исполнителю), но не списанные заказчиком суммы неустоек (штрафов, пеней) в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением в 2015, 2016, 2020 и 2021 годах обязательств, предусмотренных контрактом, подлежат списанию в случаях и порядке, которые установлены Правительством Российской Федерации.

В соответствии с пунктом 2 Постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2018 № 783 «О списании начисленных поставщику (подрядчику, исполнителю), но не списанных заказчиком сумм неустоек (штрафов, пеней) в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств, предусмотренных контрактом» (далее - Постановление Правительства РФ № 783) списание начисленных и неуплаченных сумм неустоек (штрафов, пеней) осуществляется по контрактам, обязательства по которым исполнены в полном объеме, за исключением контрактов, по которым:

а) в 2015, 2016 и 2020 годах изменены по соглашению сторон условия о сроке исполнения контракта, и (или) цене контракта, и (или) цене единицы товара, работы, услуги, и (или) количестве товаров, объеме работ, услуг, предусмотренных контрактами;

б) в 2020 году обязательства не были исполнены в полном объеме в связи с возникновением не зависящих от поставщика (подрядчика, исполнителя) обстоятельств, повлекших невозможность исполнения контракта в связи с распространением новой коронавирусной инфекции;

в) в 2021 и 2022 годах обязательства не были исполнены в полном объеме в связи с существенным увеличением в 2021 и 2022 годах цен на строительные ресурсы, повлекшем невозможность исполнения контракта поставщиком (подрядчиком, исполнителем);

г) обязательства не были исполнены в полном объеме по причине возникновения при исполнении контракта не зависящих от сторон контракта обстоятельств, влекущих невозможность его исполнения без изменения условий, в связи с введением политических или экономических санкций иностранными государствами, совершающими недружественные действия в отношении Российской Федерации, граждан Российской Федерации или российских юридических лиц (далее - санкции), и (или) с введением иностранными государствами, государственными объединениями и (или) союзами и (или) государственными (межгосударственными) учреждениями иностранных государств или государственных объединений и (или) союзов мер ограничительного характера (далее - меры ограничительного характера).

В соответствии с пунктом 3 Постановления Правительства РФ № 783 (в редакции Постановлений Правительства РФ от 26.04.2020 № 591, от 10.03.2022 № 340) списание начисленных и неуплаченных сумм неустоек (штрафов, пеней) осуществляется заказчиком в следующих случае и порядке:

а) если общая сумма начисленных и неуплаченных неустоек (штрафов, пеней) не превышает 5 процентов цены контракта, заказчик осуществляет списание начисленных и неуплаченных сумм неустоек (штрафов, пеней) за исключением случаев, предусмотренных подпунктами «в» - «д» настоящего пункта;

б) если общая сумма начисленных и неуплаченных неустоек (штрафов, пеней) превышает 5 процентов цены контракта, но составляет не более 20 процентов цены контракта, заказчик осуществляет списание 50 процентов начисленных и неуплаченных сумм неустоек (штрафов, пеней) при условии уплаты 50 процентов начисленных и неуплаченных сумм неустоек (штрафов, пеней), за исключением случаев, предусмотренных подпунктами «в» - «д» настоящего пункта;

в) если неуплаченные неустойки (штрафы, пени) начислены вследствие неисполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств по контракту в связи с возникновением не зависящих от него обстоятельств, повлекших невозможность исполнения контракта в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, заказчик осуществляет списание начисленных и неуплаченных сумм неустоек (штрафов, пеней);

г) если неуплаченные неустойки (штрафы, пени) начислены вследствие неисполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств по контракту в связи с существенным увеличением в 2021 и 2022 годах цен на строительные ресурсы, повлекшем невозможность исполнения контракта поставщиком (подрядчиком, исполнителем), заказчик осуществляет списание начисленных и неуплаченных сумм неустоек (штрафов, пеней) в период с даты заключения контракта до даты представления предусмотренного абзацем пятым подпункта «а» пункта 2 постановления Правительства Российской Федерации от 9 августа 2021 года № 1315 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» предложения поставщика (подрядчика, исполнителя) об изменении существенных условий контракта в связи с существенным увеличением цен на строительные ресурсы, подлежащие поставке и (или) использованию при исполнении такого контракта, с приложением информации и документов, обосновывающих такое предложение;

д) если неуплаченные неустойки (штрафы, пени) начислены вследствие неисполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств по контракту в связи с возникновением не зависящих от него обстоятельств, повлекших невозможность исполнения контракта в связи с введением санкций и (или) мер ограничительного характера, заказчик осуществляет списание начисленных и неуплаченных сумм неустоек (штрафов, пеней).

Согласно подпункту «а» пункта 5 Постановления Правительства РФ от 04.07.2018 № 783 для списания неустойки до 5 % от цены контракта необходимо наличие документа об исполнении поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств (за исключением гарантийных обязательств) по контракту в полном объеме, подтвержденное актом приемки или иным документом.

Поскольку сумма начисленной истцом ответчику неустойки за просрочку исполнения обязательства по контрактам не превышает 5% от цены контракта; контракт исполнен обеими сторонами в полном объеме, суд находит основания для списания заявленной истцом суммы неустойки, предусмотренного подпунктом «а» пункта 3 Правил списания сумм неустоек (штрафов, пеней), начисленных поставщику (подрядчику, исполнителю), но не списанных заказчиком в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств, предусмотренных контрактом, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.07.2018 № 783 с учетом изменений, внесенных Постановлением Правительства РФ от 10.03.2022 № 340.

Данный правовой подход соответствует правовой позиции, изложенной в Определении Верховного Суда Российской Федерации от 19.04.2022 № 302-ЭС21-25561.

На основании изложенного, несмотря на добровольную оплату ответчиком задолженности, предъявленные истцом требования, противоречат действующему правовому регулированию.

Поскольку в удовлетворении исковых требований отказано, а истец в силу закона освобожден от уплаты государственной пошлины, вопрос о распределении судебных расходов по оплате государственной пошлины судом не разрешается (пункт 12 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 11.07.2014 № 46 «О применении законодательства о государственной пошлине при рассмотрении дел в арбитражных судах»).

Руководствуясь статьями 110, 167-171, 179 и 229 АПК РФ, суд 

РЕШИЛ:

в удовлетворении исковых требований муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства городского округа «Охинский» отказать.

Лицам, участвующим в деле, разъясняется, что в соответствии с частью 2 статьи 229 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд составляет мотивированное решение по заявлению лица, участвующего в деле, которое может быть подано в течение пяти дней со дня размещения настоящего решения на официальном сайте арбитражного суда Сахалинской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://sakhalin.arbitr.ru или http://kad.arbitr.ru/).

Решение подлежит немедленному исполнению, но может быть обжаловано в Пятый арбитражный апелляционный суд через арбитражный суд Сахалинской области в срок, не превышающий пятнадцати дней со дня его принятия, а в случае составления мотивированного решения арбитражного суда - со дня принятия решения в полном объеме.

Решение вступает в законную силу по истечении пятнадцати дней со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба. В случае составления мотивированного решения арбитражного суда решение вступает в законную силу по истечении срока, установленного для подачи апелляционной жалобы. В случае подачи апелляционной жалобы решение арбитражного суда первой инстанции, если оно не отменено или не изменено, вступает в законную силу со дня принятия постановления арбитражным судом апелляционной инстанции.

 

Судья                                                                                            И.Н. Веретенников