АРБИТРАЖНЫЙ СУД САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

410002, г. Саратов, ул. Бабушкин взвоз, д. 1; тел/ факс: (8452) 98-39-39;

http://www.saratov.arbitr.ru; e-mail: info@saratov.arbitr.ru

Именем Российской Федерации

Р Е Ш Е Н И Е

Дело №А57-26661/2018

05 июля 2019 года

город Саратов

 

Резолютивная часть решения объявлена  04 июля 2019 года. 

Полный текст решения изготовлен 05 июля 2019 года.

Арбитражный суд Саратовской области в составе судьи Кузьмина А.В., при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Жерновой Н.Н (до перерыва), секретарем судебного заседания ФИО1 (после перерыва) рассмотрев в  судебном заседании дело по исковому заявлению 

индивидуального предпринимателя ФИО2 (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>), р.п. Лысые Горы, Саратовская область,

к обществу с ограниченной ответственностью «Дорстрой» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>), город Аркадак, Саратовская область,

третьи лица: 

ГКУ Саратовской области «Дирекция транспорта и дорожного хозяйства», город Саратов,

общество с ограниченной ответственностью «Регион», город Калининск, Саратовская область,

о взыскании задолженности по договору подряда № 3 от 04.05.2018 в размере 1 239 920 руб. 85 коп., пени на 26.10.2018 в размере 23 612 руб. 41 коп., а также пени с 27.10.2018 по дату фактической оплаты задолженности, судебных расходов по оплате государственной пошлины, 

при участии:

от истца – ФИО3, представитель по доверенности от 03.06.2019, 

от ответчика – ФИО4, представитель по доверенности от 16.01.2019,  ФИО5, представитель по доверенности от 16.01.2019, 

от третьих лиц – не явились, извещены надлежащим образом, 

УСТАНОВИЛ:

В Арбитражный суд Саратовской области обратился индивидуальный предприниматель ФИО2 с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью «Дорстрой» о взыскании задолженности по договору подряда № 3 от 04.05.2018 в размере 1 239 920 руб. 85 коп., пени на 26.10.2018 в размере 23 612 руб. 41 коп., а также пени с 27.10.2018 по дату фактической оплаты задолженности.

В ходе рассмотрения спора к участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, были привлечены ГКУ Саратовской области «Дирекция транспорта и дорожного хозяйства», город Саратов, общество с ограниченной ответственностью «Регион», город Калининск, Саратовская область.

В ходе рассмотрения спора истец в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации неоднократно уточнял исковые требования. Согласно последнему заявлению об уточнении (изменении) исковых требований истец просит взыскать с ответчика задолженность по договору субподряда № 2 от 30.12.2016 за период: сентябрь – декабрь 2017 года в размере 617 532 руб., пени за период с 22.08.2018 по 12.06.2019 в размере 46 325 руб. 19 коп. коп., а также пени с 13.06.2019 по дату фактической оплаты задолженности.

В силу части 1 статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации истец вправе при рассмотрении дела в арбитражном суде первой инстанции до принятия судебного акта, которым заканчивается рассмотрение дела по существу, изменить основание или предмет иска, увеличить или уменьшить размер исковых требований.

Соответствующие уточнения исковых требований приняты арбитражным судом, поскольку они не противоречат закону и не нарушают права других лиц.

В соответствии с абзацем 2 части 1 статьи 121 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (в ред. Федерального закона от 27.07.2010г. №228-ФЗ) информация о принятых по делу судебных актах, о дате, времени и месте проведения судебного заседания, об объявленных перерывах в судебном заседании размещена на официальном сайте Арбитражного суда Саратовской области - http://www.saratov.arbitr.ru.

Представитель истца явился в судебное заседание, поддержал исковые требования в полном объеме с учетом уточнений.

Представитель ответчика в судебном заседании возражал против удовлетворения исковых требований, представил в суд доказательства расторжения договора (соглашение о расторжении договора от 30.03.2018, дополнительное соглашение к договору субподряда №2 и платежное поручение №262 от 04.05.2018 на сумму 360 282 руб.).

Третьи лица  в судебное заседание не явились. В материалах дела имеются доказательства надлежащего извещения третьих лиц   о времени и месте судебного заседания.

В соответствии с п. 5 ст. 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при неявке в судебное заседание иных лиц, участвующих в деле и надлежащим образом извещенных о времени и месте судебного разбирательства, суд рассматривает дело в их отсутствие.

Согласно части 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений. 

Арбитражному суду представляются доказательства, отвечающие требованиям статей 67, 68, 75 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Дело рассматривается в порядке статей 153-167 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Исследовав материалы дела, проверив доводы, изложенные в исковом заявлении, выслушав представителей истца и ответчика, суд считает, что исковые требования не подлежат удовлетворению по следующим основаниям.

Как следует из материалов дела, между ООО «Дорстрой» (Заказчик) и ИП ФИО2 (Подрядчик) был заключен договор субподряда № 2 от 30.12.2016. Согласно условиям данного договора, Субподрядчик принимает на себя обязательства выполнить работ по содержанию автомобильных дорог в Лысогорском районе Саратовской области в 2017 г., а Подрядчик обязуется принять работы и оплатить их в соответствии с условиями настоящего Договора. 

Работы выполняются в соответствии с контрольным событием «Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, мостов и иных искусственных сооружений на них, находящихся в государственной собственности области, за счет средств областного дорожного фонда» плана-графика реализации государственной программы Саратовской области «Развитие транспортной системы до 2020 года».

В соответствии с пунктом 2.1. договора Управление Договором от имени и по поручению Государственного Заказчика – Государственного казенного учреждения Саратовской области «Дирекция транспорта и дорожного хозяйства» в соответствии с договором Субподряда №1 от 30.12.2016 осуществляет ООО «Дорстрой» (пункт 1.2. договора).

Пунктом 3.1. договора предусмотрено, что его цена составляет 40 358 532 руб., НДС не облагается. 

- 2017 г. – 12 627 439 руб., в ценах 2017 г.;

- 2018 г. – 13 538 563 руб., в ценах 2018 г.;

- 2019 г. – 14 192 530 руб., в ценах 2019 г.

В соответствии с пунктом 4.4. договора оплата выполненных работ производится на основании: акта о приемке выполненных работ по форме №КС-2, составленного в соответствии с Техническим заданием и справкой о стоимости выполненных работ и затрат по форме №КС-3. оплата производится на расчетный счет Субподрядчика после поступления денежных средств от Государственного заказчика на расчетный счет Подрядчика за соответствующий отчетный период.

Согласно пункту 4.5. договора Субподрядчик ежемесячно компенсирует Подрядчику расходы за выполнение его услуг в размере 2% стоимости работ по настоящему договору.

Согласно пункту 5.1. договора начало выполнения работ осуществляется с момента заключения договора, но не ранее 01.01.2017; окончание работ – 31 декабря 2019 года.

Буквальное толкование условий заключенного сторонами договора субподряда №2 от 30.12.2016  в соответствии с правилами статьи 431 Гражданского кодекса Российской Федерации позволяет прийти к выводу о том, что данный договор по своей правовой природе является договором подряда, регулируемым нормами главы 37 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Согласно части 1 статьи 702 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

В соответствии с частью 1 статьи 720 Гражданского кодекса Российской Федерации заказчик обязан в сроки и в порядке, которые предусмотрены договором подряда, с участием подрядчика осмотреть и принять выполненную работу (ее результат), а при обнаружении отступлений от договора, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе немедленно заявить об этом подрядчику.

Согласно части 1 статьи 711 Гражданского кодекса Российской Федерации, если договором подряда не предусмотрена предварительная оплата выполненной работы или отдельных ее этапов, заказчик обязан уплатить подрядчику обусловленную цену после окончательной сдачи результатов работы при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в согласованный срок, либо с согласия заказчика досрочно.

В подтверждение надлежащего исполнения обязательств по выполнению работ по договору, истец представил акт о приемке выполненных работ №10 от 27.11.2017 и справку о стоимости выполненных работ и затрат №10 от 27.11.2017 на сумму 13 946 538 руб., а также акт о приемке выполненных работ №11 от 25.12.2017 и справку о стоимости выполненных работ и затрат №11 от 25.12.2017 на сумму 14 189 587 руб. 

Кроме того, истец указывает, что в рамках исполнения обязательств по договору субподряда №2 от 30.12.2016 он также выполнил работы за период сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь 2017 года на общую сумму 2 768 333 руб., что подтверждается копиями журналов производства работ по содержанию автомобильных дорог и исполнительными сметами, представленными в материалы дела. Указанные работы, со слов истца, были приняты специалистом Государственного заказчика – ФИО6 Однако, по мнению истца, данные работы ответчик так и не оплатил в полном объеме.

Сложившуюся задолженность по договору субподряда № 2 от 30.12.2016 за период: сентябрь – декабрь 2017 года в размере 617 532 руб. истец просит взыскать в судебном порядке.

Согласно статьям 309, 310 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства  и требованиями закона, и иных правовых актов. Односторонний отказ от исполнения обязательства не допускается, за исключением случаев, предусмотренных законом.

Согласно пункту 1 статьи 407 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательство прекращается полностью или частично по основаниям, предусмотренным Кодексом, другими законами, иными правовыми актами или договором. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 450 Гражданского кодекса Российской Федерации изменение и расторжение договора возможны по соглашению сторон, если иное не предусмотрено названным Кодексом, другими законами или договором. 

Согласно пункту 2 статьи 453 Гражданского кодекса Российской Федерации, при расторжении договора обязательства сторон прекращаются, если иное не предусмотрено законом, договором или не вытекает из существа обязательства. 

Из содержания пункта 3 статьи 453 Гражданского кодекса Российской Федерации следует, что в случае расторжения договора обязательства считаются прекращенными с момента заключения сторонами соглашения о расторжении договора, если иное не вытекает из этого соглашения (пункт 1 Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 21.12.2005 N 104 "Обзор практики применения арбитражными судами норм Гражданского кодекса РФ о некоторых основаниях прекращения обязательств"). 

Из материалов дела следует, что между сторонами 30.03.2018 заключено соглашение о расторжении Договора Субподряда №2 от 30.12.2016, в соответствии с пунктом 1.  которого договор субподряда №2 от 30.12.2016 расторгается с момента подписания Сторонами настоящего соглашения. 

В соответствии с пунктом 3. соглашения взаиморасчеты между Сторонами по Договору произведены в полном объеме. 

На основании пункта 4. соглашения Стороны не имеют друг к другу претензий по обязательствам исполнения условий Договора субподряда №2 от 30.12.2016. 

Соглашение вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами (пункт 5 соглашения). 

Таким образом, обязательства сторон по договору субподряда №2 от 30.12.2016 прекращены за исключением обязательств, указанных в дополнительном Соглашении к договору от 30.03.2018, согласно пункту 1. которого установлено, что ранее заключенный договор субподряда №2 от 30.12.2016 был расторгнут по соглашению сторон от 30.03.2018, и стороны пришли к соглашению, что в связи с расторжением договора Подрядчик возвращает Субподрядчику расходы за выполнение его услуг в размере 2% в сумме 360 828 руб. 

Платежным поручением № 262 от 04.05.2018 ответчик перечислил на расчетный счет истца денежные средства в размере 360 828 руб.

Довод истца, о том, что договор в части исполнения не оплаченных обязательств за период  с сентября по декабрь 2017 года, судом не принимается по следующим основаниям.

В соответствии с пунктом 1 статьи 452 Гражданского кодекса Российской Федерации соглашение об изменении или о расторжении договора совершается в той же форме, что и договор, если из закона, иных правовых актов, договора или обычаев не вытекает иное. 

В соответствии с пунктом 2 статьи 434 Гражданского кодекса Российской Федерации, договор в письменной форме может быть заключен путем составления одного документа, подписанного сторонами, а также путем обмена письмами, телеграммами, телексами, телефаксами и иными документами, в том числе электронными документами, передаваемыми по каналам связи, позволяющими достоверно установить, что документ исходит от стороны по договору. 

Соглашение о расторжении договора от 30.03.2018 заключено путём составления одного документа. Согласно пункту 6 указанного соглашения – составлено в двух экземплярах. 

Соглашение представлено ответчиком в материалы дела, истцом факт заключения соглашения не оспаривается, признаётся (часть 3.1. статьи 70 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации). 

При указанных обстоятельствах у суда отсутствуют основания считать соглашение незаключенным. Довод истца о заблуждении относительно мотива заключения соглашения судом не принимается. 

В соответствии с пунктом 3 статьи 178 Гражданского кодекса Российской Федерации заблуждение относительно мотивов сделки не является достаточно существенным для признания сделки недействительной. 

Документов, подтверждающих расторжение указанного соглашения, признания его недействительным – в материалы дела сторонами не представлено. Оснований ничтожности указанного соглашения судом не установлено. 

Условиями данного соглашения о расторжении договора в пункте 3 стороны признали факт взаиморасчетов между Сторонами по Договору в полном объеме.

Кроме того, согласно пункту 2 соглашения о расторжении договора стороны договорились, что взаимные обязательства сторон по Договору Субподряда №2 прекращаются с момента его расторжения. 

Таким образом, стороны вышеуказанным соглашением достигли договоренность о том, что возникшие до расторжения договора подряда обязательства по оплате выполненных подрядчиком работ исполнены заказчиком. То есть в данном случае расторжение договора подряда влечет не только прекращение обязательств на будущее время, но и лишает подрядчика права требовать с заказчика образовавшиеся до момента расторжения договора суммы основного долга. 

Довод истца о том, что после расторжения договора у ответчика имеется задолженность за выполненные работы судом отклоняется. 

В соответствии с пунктом 3 статьи 423 Гражданского кодекса Российской Федерации договор предполагается возмездным, если из закона, иных правовых актов, содержания или существа договора не вытекает иное. 

Из содержания соглашения от 30.03.2018 не следует, что заказчиком приняты и не оплачены работы, выполненные Субподрядчиком. Вместе с тем при заключении соглашения стороны исходили из того, что работы, выполненные подрядчиком, оплачены в полном объёме. Такое соглашение не противоречит праву кредитора освободить должника от имущественной обязанности перед собой (пункт 1 статьи 572, статьи 582 Гражданского кодекса Российской Федерации), в том числе путём заключения соглашения о расторжении договора, предусматривающего прекращение обязательств между сторонами из такого договора. 

В ходе рассмотрения настоящего дела представитель истца заявил ходатайство о назначении экспертизы. 

Суд, рассмотрев ходатайство о назначении экспертизы, считает его не подлежащим удовлетворению по следующим основаниям.

В силу положений статьи 82 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд назначает экспертизу для разъяснения возникающих при рассмотрении дела вопросов, требующих специальных познаний.

Исходя из смысла положений статьи 82 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, удовлетворение ходатайства о проведении экспертизы является правом, а не обязанностью арбитражного суда.

Суд признает, что основания для назначения судебной экспертизы отсутствуют и проведение ее при сложившихся обстоятельствах нецелесообразно, поскольку суд не усматривает в существе настоящего спора вопросов, требующих специальных знаний и имеющих значение для правильного рассмотрения дела. Суд полагает, что по делу собрано достаточно доказательств, позволяющих установить фактические обстоятельства, имеющие значение для правильного и обоснованного рассмотрения данного спора.

При таких обстоятельствах, в удовлетворении ходатайства истца о  назначении по делу судебной экспертизы следует отказать.

В соответствии со статьей 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основании своих требований и возражений. Суду представляются доказательства, отвечающие требованиям статей 67, 68, 75 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

В соответствии со статьей 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств.

Оценив все представленные в материалах дела доказательства в их взаимосвязи и совокупности, как того требуют положения пункта 2 статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд пришел к выводу, что исковые требования удовлетворению не подлежат.

Согласно статье 168 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при принятии решения арбитражным судом суд решает вопрос о распределении судебных расходов.

Распределение судебных расходов между лицами, участвующими в деле, производится судом в соответствии с частью 1 статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

В соответствии с частью 1 статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны.

В силу пункта 1 статьи 333.22 Налогового кодекса Российской Федерации, излишне уплаченная истцом государственная пошлина подлежит возврату.

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 177, 180, 181 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд 

Р Е Ш И Л:

В удовлетворении исковых требований отказать.

Возвратить индивидуальному предпринимателю ФИО2 (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) р.п. Лысые Горы, Саратовская область из федерального бюджета уплаченную платежным поручением №378 от 23.11.2018 государственную пошлину в размере 11034 руб.

Решение арбитражного суда вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба.

Исполнительный лист выдать взыскателю после вступления решения в законную силу.

Решение арбитражного суда может быть обжаловано в апелляционную или кассационную инстанции в порядке, предусмотренном главами 34, 35 раздела VI Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. Соответствующая жалоба подается через принявший решение в первой инстанции арбитражный суд.

Направить копии решения арбитражного суда лицам, участвующим в деле, в соответствии с требованиями статьи 177 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Судья арбитражного суда 

Саратовской области                                                                              

 

А.В. Кузьмин