9_945416  

АРБИТРАЖНЫЙ СУД САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

И М Е Н Е М Р О С С И Й С К О Й Ф Е Д Е Р А Ц И И  

Р Е Ш Е Н И Е (резолютивная часть)

Дело № А59-4877/2019

г. Южно-Сахалинск

30 января 2020 года

Арбитражный суд Сахалинской области в составе судьи 

Портновой О. А., при ведении протокола судебного заседания  помощником судьи Кон В. С., рассмотрев в судебном заседании дело по  иску Федерального государственного унитарного предприятия  «Росморпорт» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в лице  Сахалинского филиала к Публичному акционерному обществу «Холмский  морской торговый порт» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) о  возложении обязанности выполнить ремонтные работы на объектах,  расположенных по адресу: 

<

...>  

при участии представителей: 

от истца – ФИО1 по доверенности от 09.12.2019 года,  ФИО2 по доверенности от 09.12.2019 года,  

от ответчика – ФИО3 по доверенности от 09.01.2020 года,  

руководствуясь ст. ст. 167-176 Арбитражного процессуального  кодекса РФ, суд  

РЕШИЛ:

Иск удовлетворить.  

Обязать ПАО «Холмский морской торговый порт» выполнить на  

Объектах, расположенных по адресу: Сахалинская область, г. Холмск, ул.  

Катерная, д. 1А в течение 2 (двух) лет с момента вступления настоящего  

решения суда в законную силу следующие ремонтные работы: На причале № 3: 

-разработать и выполнить мероприятия по устранению подмывов и  

разрушения бетонной бермы в основании стенки на участках причала Х20,  

XI5, Х5 м; Y15-Y20, Y65-Y70 м; 

-разработать и осуществить мероприятия по ремонту надстройки;  -произвести ремонт анкерных тяг;  

-привести в работоспособное состояние швартовные и отбойные  

устройства на сооружении; 

-провести ремонтные работы по устранению дефектов  колесоотбойного бруса и монолитного бетонного покрытия причала;  

-установить на причале опорные знаки геодезической сети и  деформационные марки для контроля пространственного положения  сооружения. Провести нулевой цикл наблюдений;  

-привести документацию по технической эксплуатации сооружения  в соответствие с требованиями ГОСТ Р 54523-2011.  

На причале № 7: 

- разработать и выполнить мероприятия по ремонту бетонной  бермы в основании сооружения;  

-привести в работоспособное состояние швартовные и отбойные  устройства на сооружении;  

-провести ремонтные работы по устранению дефектов  колесоотбойного бруса и монолитного бетонного покрытия причала;  

-установить на причале опорные знаки геодезической сети и  деформационные марки для контроля пространственного положения  сооружения. Провести нулевой цикл наблюдений;  

-устранить дефекты кранового пути; 

-привести документацию по технической эксплуатации сооружения  в соответствие с требованиями ГОСТ Р 54523-2011.  

Взыскать с ПАО «Холмский морской торговый порт» в пользу  ФГУП «Росморпорт» судебную неустойку на случай неисполнения  настоящего судебного акта в размере 1/365 от годовой арендной платы  Причала № 3 и причала № 7 в сумме 3 645 514,66, то есть 10 012, 37 рублей  за каждый день неисполнения, начиная с даты истечения срока исполнения  настоящего судебного акта до даты его фактического исполнения.  

Взыскать с ПАО «Холмский морской торговый порт» судебные  расходы, понесенные ФГУП «Росморпорт» по уплате государственной  пошлины, в размере 6 000 (шесть тысяч) рублей.  

Решение может быть обжаловано в Пятый арбитражный  апелляционный суд через Арбитражный суд Сахалинской области в  течение одного месяца.  

Решение вступает в законную силу по истечении месячного срока  со дня его принятия (изготовления в полном объеме), если не подана  апелляционная жалоба. В случае подачи апелляционной жалобы решение,  если оно не отменено и не изменено, вступает в законную силу со дня  принятия постановления арбитражного суда апелляционной инстанции.  

Судья О. А. Портнова