РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

Дело № А40-49945/24-134-228

23 мая 2024 года

город Москва

 

Резолютивная часть решения объявлена   15 мая 2024 г.

Решение в полном объёме изготовлено 23 мая 2024 г.

 

Арбитражный суд г. Москвы в составе судьи Титовой Е.В.,  

при ведении протокола секретарем судебного заседания Адыг У.Г. 

рассмотрев в судебном заседании дело по исковому заявлению: 

 

истец: Федеральное государственное унитарное предприятие «Ростовский-На-Дону научно-исследовательский институт радиосвязи» (344038, Ростовская область, Ростов-На-Дону город, Нансена улица, 130, ОГРН: 

<

***>, Дата присвоения ОГРН: 23.09.2002, ИНН: 

<

***>)

ответчик: Акционерное общество «Интерсеть» (129329, Россия, г. Москва, вн.тер.г. Муниципальный округ Бабушкинский, Кольская 

<

...>, этаж 8, ком. 6-9, ОГРН: 

<

***>, Дата присвоения ОГРН: 16.03.2006, ИНН: 

<

***>)

о взыскании задолженности по договору № 122018711484201028001698/04-2017/3310-РНИИРС-ПРД от 28 декабря 2017 года в размере 3 995 826 руб. 38 коп.;  задолженности по договору № 122018711484201028001698/04-2017/3310-РНИИРС-АК от 10 января 2018 года в размере 3 567 522 руб. 04 коп., с учетом уточнений принятых в порядке ст. 49 АПК РФ;

при участии в судебном заседании:

от истца: ФИО1, (паспорт, доверенность № 61АА6995428 от 13 ноября 2019 года, диплом);

от ответчика: не явился, извещен; 

 

УСТАНОВИЛ:

Федеральное государственное унитарное предприятие «Ростовский-На-Дону научно-исследовательский институт радиосвязи» (далее – истец) обратилось в Арбитражный суд города Москвы с иском Акционерному обществу «Интерсеть» (далее – ответчик) о взыскании задолженности по договору № 122018711484201028001698/04-2017/3310-РНИИРС-ПРД от 28 декабря 2017 года в размере 3 995 826 руб. 38 коп.;  задолженности по договору № 122018711484201028001698/04-2017/3310-РНИИРС-АК от 10 января 2018 года в размере 3 567 522 руб. 04 коп., с учетом уточнений принятых в порядке ст. 49 АПК РФ.

Истец в судебном заседании поддержал исковые требования в полном объеме.

Ответчик, надлежащим образом уведомленный о месте и времени судебного разбирательства, в судебное заседание не явился. В порядке ст.ст. 123, 156 АПК РФ суд счел возможным рассмотреть дело в отсутствие представителя ответчика.

Рассмотрев материалы дела, основания и предмет заявленных требований, оценив представленные доказательства, суд приходит к выводу об удовлетворении исковых требований, на основании следующего.

Как следует из материалов дела, 28 декабря 2017 года между Федеральным государственным унитарным предприятием «Ростовский-на-Дону научно-исследовательский институт радиосвязи» (Исполнитель/Истец) и акционерным обществом «ИНТЕРСЕТЬ» (Заказчик/Ответчик) заключен договор №122018711484201028001698/04-2017/3310-РНИИРС-ПРД согласно которого Исполнитель обязуется в установленный Договором срок выполнить СЧ ОКР «Разработка усилитель-передатчика с функцией преобразователя с выходной мощностью 4 Вт для КТС земной станции спутниковой связи в Ka/Q диапазоне».

Истцом выполнены работы по 2 этапу «Изготовление опытных образцов (ОО) ПРД (2 шт.). Проведение предварительных испытаний (ПрИ) ПРД. Присвоение комплекту РКД ПРД ''литеры «О». Проведение материально-технической приемки (МТП)», что подтверждается подписанными сторонами Актом от 30.09.2021 года и Актом сдачи-приемки выполненных работ №2 от 30.09.2021 года.

Протоколом цены единицы продукции сторонами (от 16.05.2019 года) согласована цена 2-го этапа в размере 19 995 290 (девятнадцать миллионов девятьсот девяносто пять тысяч двести девяносто) рублей 38 копеек.

В соответствии с п.6.4 Договора оплата этапа СЧ ОКР производится в течение 30 (тридцати) дней после подписания Исполнителем и Заказчиком акта сдачи-приемки выполненных работ по этапу СЧ ОКР.

Ответчиком получены Акты сдачи-приемки выполненных работ, протокол фиксированной цены, а также счет на оплату от 03.12.2021 года №770.

С учетом ранее выплаченного аванса в размере 15 999 464 руб. (п/п от 13.03.2018 года №119), сумма окончательного расчета составляет 3 995 826 (три миллиона девятьсот девяносто пять тысяч восемьсот двадцать шесть) рублей 38 копеек.

В связи с неисполнением Ответчиком обязательств по оплате окончательного расчета за выполненные Истцом работы по 2 этапу Договора, Истцом направлена претензия (исх. от 30.12.2022 года №010/501-17660), которая осталась без удовлетворения.

Кроме того, 10 января 2018 года между Федеральным государственным унитарным предприятием «Ростовский-на-Дону научно-исследовательский институт радиосвязи» (Исполнитель) и акционерным обществом «ИНТЕРСЕТЬ» (Заказчик) заключен договор №122018711484201028001698/04-2017/3310-РНИИРС-АК согласно которого Исполнитель обязуется в установленный Договором срок выполнить СЧ ОКР «Разработка комплекса КТС земной станции спутниковой связи в Ka/Q диапазоне».

Истцом выполнены работы по 2 этапу «Изготовление опытного образца АК КТС ЗССС Ka/Q. Проведение предварительных испытаний АК КТС ЗССС Ka/Q в ФГУП «РНИИРС», присвоение литеры «О». Материально-техническая приемка. Поставка АК КТС ЗССС Ka/Q на объект. Пусконаладочные работы», что подтверждается подписанными сторонами Актом №2/1-АК от 01.07.2021 года и Актом сдачи-приемки выполненных работ №22-АК от 01.07.2021 года.

Протоколом цены единицы продукции сторонами (02.02.2021 года) согласована цена 2-го этапа в размере 17 837 760 (семнадцать миллионов восемьсот тридцать семь тысяч семьсот шестьдесят) рублей 21 копейка.

В соответствии с п.6.4 Договора оплата этапа СЧ ОКР производится в течение 30 (тридцати) дней после подписания Исполнителем и Заказчиком акта сдачи-приемки выполненных работ по этапу СЧ ОКР.

Ответчиком получены Акты сдачи-приемки выполненных работ, протокол фиксированной цены, а также счет на оплату от 06.07.2021 года №361.

С учетом ранее выплаченного аванса (п/п от 13.03.2018 года №118) сумма окончательного расчета составляет 3 567 522 (три миллиона пятьсот пятьдесят два) рубля 04 копейки.

В связи с неисполнением Ответчиком обязательств по оплате окончательного расчета за выполненные Истцом работы по 2 этапу Договора, Истцом направлена претензия (исх. от 30.12.2022 года №010/502-17661). 

Поскольку инициированный досудебный порядок урегулирования спора не принес положительного результата, истец обратился в арбитражный суд с настоящими требованиями.

Удовлетворяя исковые требования, суд исходит из следующего.

В соответствии с положениями статьей 309 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями. При этом односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом (статья 310 ГК РФ).

В соответствии со ст. 702 Гражданского кодекса РФ по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его. 

Согласно части 1 статьи 711 Гражданского кодекса установлена обязанность заказчика уплатить подрядчику обусловленную цену после окончательной сдачи результатов работ при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в согласованный срок, либо с согласия заказчика досрочно.

Выполнение истцом работ по договорам подтверждается подписанными сторонами Актами от 30.09.2021, №2/1-АК от 01.07.2021, а также Актами сдачи-приемки выполненных работ №2 от 30.09.2021 года, №22-АК от 01.07.2021 года,  представленными в материалы дела, подписаны двумя сторонами, отметки о каких-либо недостатках работ, недостачи документации или иных оснований для непринятия работ отсутствуют. 

Доказательства исполнения обязательства по оплате выполненных работ ответчиком в материалы дела не представлено, заявленный размер долга ответчиком документально не опровергнут, в связи с чем исковые требования о взыскании задолженности по договору № 122018711484201028001698/04-2017/3310-РНИИРС-ПРД от 28 декабря 2017 года в размере 3 995 826 руб. 38 коп. и задолженности по договору № 122018711484201028001698/04-2017/3310-РНИИРС-АК от 10 января 2018 года в размере 3 567 522 руб. 04 коп. подлежат удовлетворению в полном объеме.

Согласно ст. 9 АПК РФ лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или несовершения ими процессуальных действий.

Таким образом, стороны по делу самостоятельно распоряжаются своими процессуальными правами и обязанностями, и в силу ст. 9 АПК РФ несут риск наступления последствий совершения или несовершения им процессуальных действий.

В соответствии со ст. 65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

Согласно ст. 67 АПК РФ арбитражный суд принимает только те доказательства, которые имеют отношение к рассматриваемому делу. В соответствии со ст.68 АПК РФ обстоятельства дела, которые согласно закону, должны быть подтверждены определенными доказательствами, не могут подтверждаться в арбитражном суде иными доказательствами.

Оценив в соответствии со ст. 71 АПК РФ все приведенные доводы и представленные в материалы дела доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств, определив относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности, суд пришел к выводу, что исковые требования подлежат удовлетворению.

Расходы на оплату государственной пошлины подлежат взысканию с ответчика по правилам статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. 

Учитывая изложенное и на основании ст.ст. 12, 309, 310, 702,711 Гражданского кодекса Российской Федерации, а также руководствуясь ст.ст. 4, 65, 67, 68, 71, 76, 110, 156, 167-171, 176-177, 180 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

Р Е Ш И Л:

Исковые требования удовлетворить в полном объеме.

Взыскать с Акционерного общества «Интерсеть» (ИНН: 

<

***>) в пользу  Федерального государственного унитарного предприятия «Ростовский-На-Дону научно-исследовательский институт радиосвязи» (ИНН: 

<

***>)  задолженность по договору № 122018711484201028001698/04-2017/3310-РНИИРС-ПРД от 28 декабря 2017 года в размере 3 995 826 руб. 38 коп.,  задолженность по договору № 122018711484201028001698/04-2017/3310-РНИИРС-АК от 10 января 2018 года в размере 3 567 522 руб. 04 коп., а также расходы по оплате государственной пошлины в размере 60 817 руб.

Решение может быть обжаловано в Девятый арбитражный апелляционный суд в течение одного месяца со дня его принятия.

 

Судья:

Е.В. Титова