АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

450057, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Октябрьской революции, 63а, тел. (347) 272-13-89, 

факс (347) 272-27-40, сервис для подачи документов в электронном виде: http://my.arbitr.ru

сайт http://ufa.arbitr.ru/

 

Именем Российской Федерации

 

РЕШЕНИЕ

Дело № А07-26663/2022

г. Уфа

22 декабря 2022 года

Резолютивная часть решения объявлена 16.12.2022

Полный текст решения изготовлен 22.12.2022

Арбитражный суд Республики Башкортостан в составе судьи Вафиной Е. Т., при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания  ФИО1, рассмотрев дело по иску

Акционерного общества "Транснефть - Урал" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) 

к Обществу с ограниченной ответственностью Частная охранная организация "Евразия-56" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>)

о взыскании неустойки в размере 250 383 руб. 65 коп.

при участии в судебном заседании:

от истца ФИО2, доверенность №21-03-19-19 от 21.01.2022 паспорт, диплом.

Акционерное общество "Транснефть - Урал" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) обратилось в Арбитражный суд Республики Башкортостан с исковым заявлением к Обществу с ограниченной ответственностью Частная охранная организация "Евразия-56" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) о взыскании неустойки в размере 250 383 руб. 65 коп.

Определением Арбитражного суда Республики Башкортостан от 02.09.2022 г. исковое заявление было принято к производству с указанием на рассмотрение дела в порядке упрощенного производства.

29.09.2022 от ответчика поступил отзыв на исковое заявление, согласно которому указывает, что услуги частично были оказаны на сумму 286 849,68 руб., что подтверждается актом оказанных услуг от 28.02.2022 г.

От истца посредством системы «Мой Арбитр» поступило возражение на отзыв ответчика, приобщено. 

Определением Арбитражного суда Республики Башкортостан от 20.10.2022 г. суд перешел к рассмотрению дела по общим правилам искового производства, назначил дату предварительного судебного заседания на 06.12.2022 в 11:15 ч.

От ответчика в судебном заседании поступил справочный расчет, приобщено.

Истец представил письменные пояснения  с приложением детализированного расчета неустойки, приобщено.

Дело рассмотрено в отсутствие представителя ответчика по правилам ст. 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Исследовав материалы и обстоятельства дела, суд

УСТАНОВИЛ:

Как следует из материалов дела, 10.12.2021 между АО «Транснефть - Урал» (далее - Заказчик) и ООО ЧОО «Евразия- 56» (далее - Исполнитель) заключен договор возмездного оказания услуг № ТУР-1106- 2021 (далее - Договор), согласно которому Исполнитель обязуется оказывать Заказчику услуги по сезонному обслуживанию резервуарного парка Черкасского НУ АО «Транснефть-Урал», объем, перечень, этап, сроки, результат и особенности оказания которых установлены в Задании Заказчика (далее - Задание), являющимся Приложением № 1 к Договору, а Заказчик обязуется принять и оплатить надлежащим образом оказанные услуги.

В силу условий Договора уборка снега должна осуществляется на следующих объектах Заказчика: ЛИДС «Нурлино», ЛПДС «Черкассы», ЛПДС «Черкассы-ПП» (далее - Объекты Заказчика).

Согласно п. 3 Задания, п.1.1 Приложения Задания услуги оказываются в период с 18.01.2022-29.04.2022, уборка снега осуществляется на основании вызова представителем Заказчика (заявки) при наличии необходимости. Этапом оказания услуг является календарный месяц.

В соответствии с п. 3.1.1, 3.1.2 Договора Исполнитель обязан оказать услуги в объеме, порядке и сроки, установленные Договором, с соблюдением действующего законодательства Российской Федерации.

Пунктом 11.2.17 Технического задания «РЭН-009021019-22 Сезонное обслуживание резервуарного парка Черкасского НУ АО «Транснефть-Урал» предусмотрено, что после вызова исполнителя для выполнения работ по уборке снега (средством телефонной связи и электронной почты) подрядчик обязан приступить к выполнению работ в течение суток.

Как следует из искового заявления Исполнитель не осуществил уборку снега на Объектах Заказчика в порядке и сроки, установленные Договором и Заданием, на основании следующих вызовов: № ТУР-21-19- 58/2673 от 25.01.2022 (дублирование заявки: № ТУР-21-19-58/2826 от 26.01.2022), № ТУР- 21-19-58/3340 от 28.01.2022, № ТУР-21-19-58/3589 от 31.01.2022, № ТУР-21-19-58/4492 от 04.02.2022 (дублирование заявки: № ТУР-21-19-58/4610 от 05.02.2022), № ТУР-21-19- 58/4663 от 07.02.2022. Заявка № ТУР-21-19-58/1962 от 20.01.2022 исполнена частично: Исполнителем осуществлена очистка кровли резервуара и отмосток на Объектах Заказчика.

Факты неявки бригады Исполнителя по заявкам Заказчика для осуществления очистки Объектов зафиксированы Актами об отсутствии на объекте подрядной организации, Протоколом совещания по вопросам организации выполнения работ по объектам Программы РЭН на 2022 г. от 07.02.2022.

Протоколом совещания по вопросам организации выполнения работ по объектам Программы РЭН на 2022 г. от 07.02.2022, подписанным представителями Заказчика и Исполнителя, установлены мероприятия по обеспечению надлежащего исполнения обязательств по Договору, в частности, Исполнитель обязуется в срок до 11.02.2022 выполнить работы по очистке крыш резервуаров от имеющегося снега на Объектах Заказчика.

Заказчиком проведена проверка выполнения реализаций мероприятий, предусмотренных протоколом от 07.02.2022. Актом от 15.02.2022, от подписания которого представитель Исполнителя немотивированно отказался, зафиксировано частичное исполнение заявок.

В связи с существенным нарушением условий Договора Заказчик в одностороннем порядке отказался от исполнения обязательств по Договору на основании уведомления от

16.02.2022№ ТУР-21-19-58/6319. Договор расторгнут 18.02.2022.

На основании ст. 330 ГК РФ АО «Транснефть - Урал» претензией от 29.06.2022 № ТУР-21- 03-15/26437 предъявлено требование об уплате неустоек, определенных Договором:

• В порядке п. 7.1. Договора за нарушение сроков оказания услуг в размере 11 408,65 руб.;

• В порядке п. 7.14 Договора по факту отказа Заказчика от исполнения Договора в одностороннем порядке в связи с существенным нарушением Исполнителем договорных обязательств в размере 477 950 рублей.

Общий размер неустойки за ненадлежащее исполнение обязательств по Договору составил 489 358,65 руб.

Поскольку претензионные требования Исполнителем не были удовлетворены, Заказчик обратился в ПАО «Банк Уралсиб» с требованием о совершении платежа по гарантии исполнения условий договора № 9991-4R1/672302 от 07.12.2021, по которому Заказчику уплачена предельная сумма банковской гарантии в размере 238 975 руб.

Таким образом, задолженность Исполнителя по уплате неустойки составляет 250 383 руб.65 коп.

Изучив материалы дела, суд пришел к выводу о том, что исковые требования подлежат удовлетворению по следующим основаниям. 

В соответствии с п. 1 ст. 779 ГК РФ по договору возмездного оказания услуг исполнитель обязуется по заданию заказчика оказать услуги (совершить определенные действия или осуществить определенную деятельность), а заказчик обязуется оплатить эти услуги. 

На основании ст. 309 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями. Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом (ст. 310 ГК РФ). 

Исполнение обязательств может обеспечиваться неустойкой, залогом, удержанием вещи должника, поручительством, независимой гарантией, задатком, обеспечительным платежом и другими способами, предусмотренными законом или договором (п. 1 ст. 329 ГК РФ). 

В силу п. 1 ст. 330 ГК РФ неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения. 

Договор № ТУР-1106-2021 от 10.12.2021 заключен по результатам проведения закупочной процедуры в форме конкурса в электронной форме по лоту 2600-M05-K-Y03-00335- 2022 «РЭН-011-21-09-22 Сезонное обслуживание резервуарного парка Черкасского НУ АО "Транснефть - Урал"» (далее - Лот), проведенного в соответствии с положениями Федерального  закона от 18.07.2011 № 229-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и Положением ПАО «Транснефть» о закупках товаров, работ, услуг.

Техническим заданием по Лоту (далее - Техническое задание) предусмотрено, что в состав работ входит механическая очистка и удаление снега с крыши, козырьков резервуаров, колец орошения, камер низкократной пены, пеногенераторов, отмостки резервуаров с использованием искробезопасных инструментов и инструментов, исключающих повреждение лакокрасочного покрытия.

Пунктом 11.1.3 Технического задания установлено, что удаление снега по необходимости, исходя из результатов замеров высоты снежного покрова (0,3 м), по вызову представителя Заказчика. Прогнозная потребность расчистки каждого резервуара 3 раза (суммарный объем расчистки представлен в разделе 6 Технического задания «Ведомость объемов работ»).

В соответствии с разделом 6 «Ведомость объемов работ» распределены виды выполняемых работ (очистка кровли резервуаров, отмосток резервуаров, пешеходных дорожек внутри резервуаров РВС(П)-20000 № 3,4,7-12, 13-16, расположенных на ЛПДС «Нурлино», РВС(П)-10 ООО № 21-26, № 48-51, расположенных на НПС «Черкассы-ПП».

Исходя из прогнозируемой потребности расчистки снега, сроков оказания услуг, рассчитан прогнозируемый объем расчистки, распределенный по этапам оказания услуг (календарный месяц).

Приложением № 1.1. к Заданию Заказчика, являющимся неотъемлемой частью Договора, с учетом прогнозируемого объема расчистки и распределения его по этапам оказания услуг, установлена стоимость оказания каждого вида выполняемых работ (очистка кровли, отмосток, пешеходных дорожек внутри резервуаров).

Таким образом, исходя из положений условий Договора и закупочной документации, уборка снега на резервуарах Истца осуществляется по заявкам и  вызове по результатам замера объема осадок. Цена Договора определена с учетом прогнозируемых потребности и объемов уборки снега и распределена на каждый этап выполнения работ.

Из анализа имеющихся в деле доказательств следует, что факт нарушения ответчиком срока исполнения обязательства по договору подтверждается имеющимися в материалах дела следующих вызовов: № ТУР-21-19- 58/2673 от 25.01.2022 (дублирование заявки: № ТУР-21-19-58/2826 от 26.01.2022), № ТУР- 21-19-58/3340 от 28.01.2022, № ТУР-21-19-58/3589 от 31.01.2022, № ТУР-21-19-58/4492 от 04.02.2022 (дублирование заявки: № ТУР-21-19-58/4610 от 05.02.2022), № ТУР-21-19- 58/4663 от 07.02.2022. Заявка № ТУР-21-19-58/1962 от 20.01.2022 исполнена частично.

Заявка № ТУР-21-19-58/1962 от 20.01.2022 исполнена частично, что подтверждается Протоколом совещания по вопросам организации выполнения работы по объектам Программы РЭН на 2022 от 07.02.2022, подписанным представителями Истца и Ответчика:

-ЛПДС «Нурлино» выполнена очистка кровли в количестве 578,4 мл3;

- НПО «Черкассы-ПП» выполнена очистка кровли 1076,18 м3, очистка отмосток 325, 9 мл3.

Иные заявки, полученные Ответчиком, не исполнены. Актом от 15.02.2022 зафиксированы объемы фактически очистки резервуаров, выполненной на основании заявки № ТУР-21-19-58/1962 от 20.01.2022. Установленные объемы были предъявлены Заказчику в акте оказанных услуг № 95, направленном Ответчиком в мае 2022 года, для принятия.

Согласно п.7.1 Договора расчет неустойки за нарушение сроков оказания услуг по заявкам (вызовам) Истца осуществляется, исходя из вида неоказанных услуг и их стоимости в соответствии с Приложением 1.1. к Заданию Заказчика.

В соответствии с пунктом 7.14. Договора в случае отказа Заказчика от исполнения Договора в одностороннем порядке  в связи с существенным нарушением Исполнителем договорных обязательств, Заказчик вправе сверх штрафов, пеней и неустоек, предъявленных ранее за нарушения, предусмотренные статьей 7 Договора, предъявить Исполнителю неустойку в размере не более 10 % (десяти процентов) от стоимости Услуг по Договору. Зачет суммы неустойки может быть произведен Заказчиком за счет обеспечительного платежа (пункт 5.3.2 Договора) либо при окончательном расчете за оказанные Услуги. К существенным нарушением Стороны относят:

а) нарушение Исполнителем обязательств по обеспечению конфиденциальности информации, установленных статьей 8 Договора;

б) неоднократное (более двух раз) нарушение Исполнителем обязательств, ответственность за которые предусмотрена пунктами 7.1 – 7.3, 7.5, 7.7 – 7.9 Договора;

в) однократное нарушение обязательства, ответственность за которое предусмотрена в пункте 7.6 Договора. 

Заказчик вправе зачесть сумму неустойки (штрафов, пеней), начисленной за нарушение Исполнителем условий Договора, в счет оплаты по Договору. В этом случае Заказчик должен направить в адрес Исполнителя письменное уведомление о зачете, в котором должна быть указана сумма начисленной неустойки и основания ее начисления, а также итоговая сумма оплаты по Договору с учетом проведенного зачета. С момента получения Исполнителем указанного уведомления обязательство Заказчика по оплате в размере, равном сумме зачтенной неустойки (штрафов, пеней), прекращается. Заказчик вправе вместо осуществления зачета, указанного в абзаце первом настоящего пункта, истребовать причитающуюся ему неустойку (штраф, пени) в судебном порядке.(п.7.15 Договора).

Произведенный истцом в исковом заявлении расчет пени не противоречит условиям договора, нормам ст. 330 ГК РФ, не нарушает имущественных интересов ответчика, судом проверен и признан правильным. 

Таким образом, требование истца о взыскании суммы неустойки в размере 250 383 руб. 65 коп является обоснованным и подлежит удовлетворению.

Расходы истца по уплате государственной пошлины за подачу иска подлежат отнесению на ответчика на основании ст. 110 АПК РФ. 

Руководствуясь ст. ст. 110, 167 - 170, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд 

РЕШИЛ:

Исковые требования Акционерного общества "Транснефть - Урал" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>)  удовлетворить.

Взыскать с  Общества с ограниченной ответственностью Частная охранная организация "Евразия-56" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в пользу Акционерного общества "Транснефть - Урал" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) сумму  неустойки в размере 250 383 руб. 65 коп., а также судебные расходы по уплате государственной пошлины в размере 8008 рублей.

Исполнительный лист выдать после вступления решения в законную силу по ходатайству взыскателя. 

Решение вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба. В случае подачи апелляционной жалобы решение, если оно не отменено и не изменено, вступает в законную силу со дня принятия постановления арбитражного суда апелляционной инстанции.

Решение может быть обжаловано в Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия решения (изготовления его в полном объеме) через Арбитражный суд Республики Башкортостан.

Если иное не предусмотрено Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации, решение может быть обжаловано в Арбитражный суд Уральского округа при условии, что оно было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.

Информацию о времени, месте и результатах рассмотрения апелляционной или кассационной жалобы можно получить соответственно на Интернет-сайтах Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда www.18aas.arbitr.ru или Арбитражного суда Уральского округа www.fasuo.arbitr.ru.

 

Судья Е.Т. Вафина