﻿

Арбитражный суд Псковской области

ул. Свердлова, 36, г. Псков, 180000

http://pskov.arbitr.ru

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

Дело № А52-1955/2021

город Псков

23 ноября 2021 года

Резолютивная часть решения оглашена 16 ноября 2021 года

       Арбитражный суд Псковской области в составе судьи Будариной Ж.В., при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Степановой В.А., рассмотрел в судебном заседании дело по исковому заявлению общества с ограниченной ответственностью «Кордав» (адрес: 400067, город Волгоград, улица им. Кирова, дом 114А, кв. 38;  ОГРН 1173443015074, ИНН 3461062188)

к Администрации городского поселения «Дедовичи» (адрес: 182710, Псковская область, рабочий поселок Дедовичи, пл. Советов, д. 6, ОГРН 1066030000190, ИНН 6004003684) 

 о взыскании 354000 руб.,

      при участии в заседании:

от истца: Матюшенко С.В., представитель по доверенности;

от ответчика: не явился, извещен.

установил:

общество с ограниченной ответственностью «Кордав» (далее – истец, ООО «Кордав», Общество) обратилось в суд с исковым заявлением к Администрации городского поселения «Дедовичи»  (далее – ответчик, Администрация) о взыскании 354000 руб. задолженности по муниципальному контракту от 21.08.2020 № 03573000158200000220001. 

 Определением суда от 30.04.2021 дело назначено к рассмотрению в порядке упрощенного производства без вызова сторон в срок не позднее 28.06.2021 в соответствии со статьей 228 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. Определением от 28.06.2021 суд перешел к  рассмотрению дела по  общему порядку судопроизводства.

 Ответчик требования не признал по  основаниям, изложенным в  отзыве на исковое заявление и  дополнениях к нему, представил ходатайство о рассмотрении дела в его отсутствие, что в силу статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса  не препятствует рассмотрению спора по существу.

 Исследовав  материалы дела, выслушав представителя истца, суд установил следующее.											Администрация городского поселения «Дедовичи» (заказчик) и ООО «Кордав» (подрядчик) в соответствии с положениями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ  «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон №44-ФЗ) заключили муниципальный контракт от 21.08.2020 № 03573000158200000220001 (далее - контракт) на приобретение и установку игрового оборудования на детские площадки: ул. Октябрьская МКД № 22 и во дворе домов № 17,19,21,25 рп. Дедовичи. Контракт вступает в силу с момента подписания и действует до 22.10.2020 и полного его исполнения сторонами (пункт 11.1 контракта). Срок окончания работ  21 августа 2020 года включительно (пункт 1.3 контракта).

28.08.2020 между сторонами заключено дополнительное соглашение к контракту от  21.08.2020 № 03573000158200000220001, где сторонами согласована поставка дивана-качелей на цепях вместо качели маятниковой с защитными боковинами с художественной росписью в средневековом стиле.	

	Цена контракта составляет 354000 руб. 00 коп. (пункт 2.1 контракта). Оплата  осуществляется в течение 15-ти рабочих дней после подписания заказчиком акта сдачи-приемки выполненных работ и ведомости объемов работ (пункт 2.6 контракта, пункт 1.4 технического задания).

В соответствии с пунктом 4.1 контракта выполнение работ  осуществляется в соответствии с требованиями и  условиями, установленными техническим заданием и действующими нормами. В техническом задании (описание объекта закупки) (приложение №1 и спецификации (приложение №2 к контракту) стороны согласовали технические (функциональные) характеристики товара. В техническом задании согласованы срок выполнения работ (до 21.08.2020 включительно), наименование игрового оборудования, требования к характеристикам материалов, комплектаций оборудования, конструкции, оформления и обеспечения безопасности. Качество выполненных работ должно соответствовать СНиП, СанПиН, ГОСТ, ТУ, Техническим регламентам, прочим действующим нормам и требованиям, применяемым к данному виду выполненных работ, и должно осуществляться в соответствии с условиями, установленными техническим заданием (пункты 1.2, 4.1 контракта).

Согласно пункту 4.2 контракта уполномоченный в соответствии с пунктом 4.3 контракта представитель заказчика в пятидневный срок производит приемку выполненных работ. Если в результате проведенной проверки будут обнаружены отступления, ухудшающие результат работы, или иные недостатки, заказчик делает соответствующие пометки  в акте сдачи-приемки выполненных работ. В этом случае Заказчик устанавливает подрядчику срок устранения выявленных нарушений, при  этом всю ответственность за нарушение сроков выполнения работ несет подрядчик (пункт 4.6 контракта). Если выявленные недостатки в установленный заказчиком срок не устранены, либо являются существенными и неустранимыми, заказчик вправе потребовать неустойки, возмещения убытков, инициировать расторжение контракта (пункт 4.7 контракта).

Истец ссылается на то, что поставил ответчику оборудование, выполнил работы по его установке в сентябре 2020 года. Между тем Администрация оплату не произвела и 21.04.2021 приняла решение об одностороннем отказе от исполнения муниципального контракта от 21.08.2020 № 03573000158200000220001.  

Претензия от 17.02.2021 № 08/21 об оплате задолженности, направленная в адрес ответчика, оставлена последним без рассмотрения.

Полагая, что качество поставленного товара соответствует требованиям и условиям контракта, товар поставлен заказчику, а оплата не произведена, истец обратился с настоящим требованием.

Ответчик требование не признает по мотивам того, что технические характеристики поставленного оборудования не соответствуют заявленным, не являются улучшенными, оборудование поставлено в сроки, препятствующие возможности устранению недостатков товара в разумный срок.

Суд считает требование не подлежащим удовлетворению исходя из следующего.

В соответствии со статьей 526 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) по государственному или муниципальному контракту на поставку товаров для государственных или муниципальных нужд поставщик (исполнитель) обязуется передать товары государственному или муниципальному заказчику либо по его указанию иному лицу, а государственный или муниципальный заказчик обязуется обеспечить оплату поставленных товаров.

К отдельным видам договора купли-продажи (розничная купля-продажа, поставка товаров, поставка товаров для государственных нужд, контрактация, энергоснабжение, продажа недвижимости, продажа предприятия) положения, предусмотренные параграфом 1 главы 30 ГК РФ, применяются, если иное не предусмотрено правилами Кодекса об этих видах договоров (пункт 5 статьи 454 ГК РФ).

Согласно пункту 1 статьи 469 ГК РФ продавец обязан передать покупателю товар, качество которого соответствует договору купли-продажи.

В силу пункта 1 статьи 518 ГК РФ покупатель (получатель), которому поставлены товары ненадлежащего качества, вправе предъявить поставщику требования, предусмотренные статьей 475 ГК РФ, за исключением случая, когда поставщик, получивший уведомление покупателя о недостатках поставленных товаров, без промедления заменит поставленные товары товарами надлежащего качества.

Пунктом 1 статьи 523 ГК РФ предусмотрено право сторон договора поставки на односторонний отказ от исполнения такого договора в случае существенного нарушения его одной из сторон.

В силу абзаца четвертого пункта 2 статьи 450 ГК РФ существенным признается нарушение договора одной из сторон, которое влечет для другой стороны такой ущерб, что она в значительной степени лишается того, на что была вправе рассчитывать при заключении договора.

В случае существенного нарушения требований к качеству товара (обнаружения неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляются неоднократно, либо проявляются вновь после их устранения, и других подобных недостатков) покупатель вправе отказаться от исполнения договора купли-продажи и потребовать возврата уплаченной за товар денежной суммы (пункт 2 статьи 475 ГК РФ).

В силу пункта 1 статьи 450.1 ГК РФ предоставленное названным Кодексом, другими законами, иными правовыми актами или договором право на односторонний отказ от договора (исполнения договора) (статья 310) может быть осуществлено уполномоченной  стороной путем уведомления другой стороны об отказе от договора (исполнения договора). Договор прекращается с момента получения данного уведомления, если иное не предусмотрено названным Кодексом, другими законами, иными правовыми актами или договором.

Помимо Гражданского кодекса Российской Федерации отношения сторон регулируются Законом N 44-ФЗ.

Статьей 95 названного Закона регулируется порядок расторжения государственного контракта.

В соответствии с частями 8 и 9 указанной статьи расторжение контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством; заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, при условии, если это было предусмотрено контрактом.

Решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты принятия указанного решения размещается в единой информационной системе и направляется поставщику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу поставщика, указанному в контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение заказчиком подтверждения о его вручении поставщику (часть 12 статьи 95 Закона N 44-ФЗ).

В силу части 14 статьи 95 Закона N 44-ФЗ заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления поставщика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения контракта устранено нарушение условий контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы в соответствии с частью 10 названной статьи.

Пунктом 8.3 контракта предусмотрено право сторон на односторонний отказ от его исполнения в соответствии с гражданским законодательством.

Из приведенных норм следует, что в случае существенного нарушения требований к качеству товара у покупателя отсутствует необходимость обращаться к продавцу с требованием об устранении недостатков, поскольку в данной ситуации законом предусмотрено право на односторонний отказ от договора.

Из материалов дела усматривается, что получив оборудование Администрация в присутствии представителя Общества, в соответствии с пунктами 4.2, 4.3, 4.6 контракта, комиссией заказчика произвело приемку оборудования, о чем составлен акт от 20.10.2020 № 1. В результате приемки комиссией заказчика установлен факт несоответствия технических характеристик оборудования, указанных в техническом задании заказчика и спецификации к дополнительному соглашению № 1 от 28.08.2020  и технических характеристик, а именно:

Наименование оборудования

Характеристики по условиям технического задания  	по

Фактически установлено  

Нормативное обоснование

 

Детский игровой

комплекс для детей в возрасте

от 7 до 12 лет

 

Габаритные размеры над уровнем грунта должны быть:

Размеры игрового

комплекса:

длина - не менее 4590 мм и не более 4600 мм; ширина - не менее 3140 мм и не более 3150 мм; высота комплекса - не менее 3910 мм и не более 4000 мм.

Количество и размеры горок: количество      горок      состальным скатом - 1 штука;высота ската горки - от1505 мм до 1515 мм;ширина   стальной    частиската      горки      (междубортами) - не менее 490 мми не более 500 мм;высота каждого  из  двухфанерных бортов горки - неменее 100 мм от уровнястального ската.Высота   платформ   башеннад уровнем грунта:-   платформа   башни   навысоте не менее 1505 мм ине  более   1515   мм   надуровнем грунта - 1 штука 

комплектация должны быть:

Несущие	деревянные

столбы	комплекса

выполнены из клееного бруса сечением 90мм х 90мм и имеют скругленный профиль без канавки посередине.

Количество несущих столбов деревянных - 6 штук:

высотой не менее 2000мм

2 штуки;

высотой не менее 3200мм

4 штуки.

Две башни разной высоты:

высокая башня высотой не менее 3910 мм и не более 4000 мм с платформой на высоте не менее 1505 мм и не более 1515 мм над уровнем фунта - 1 штука;низкая башня высотой не менее 2000 мм и не более 2010 мм с платформой на высоте не менее 1255 мм и не более 1265 мм над уровнем грунта - 1 штука. Вертикальная шведскаялестница должна состоятьиз	горизонтальных

перекладин, выполненныхиз металлической трубыкруглого сечения столщиной стенки не менее2мм, и двутавровой стяжки,выполненной	из

металлической         трубы круглого      сечения      с толщиной стенки не менее 2мм

Количество несущих

столбов:

несущих      столбовдеревянных - 6 штук.Материалы	и

Габаритные размеры (фактические)

Размеры      игрового комплекса: длина - 4300 мм; ширина - 1010 мм; высота  комплекса -3100 мм.

Количество и размеры горок:

количество горок со стальным скатом - 1 штука; 1300мм;

ширина стальной части ската горки (между бортами) - 480 мм;

Высота

высота каждого из двух фанерных бортов горки - 70 мм. Несущие деревянныестолбы комплексавыполнены	из

клееного	бруса

сечением 100 мм х 100мм и имеютскругленный профильбез	канавки

посередине. Количество   несущих столбов деревянных -6 штук:

отсутствует

высотой 2500мм - 4 штуки.

Одна башня.

Безопасная

деревянная лестница высотой 1430 мм Безопасная деревянная лестница высотой не менее 1505 мм и не более 1515 мм

 

Оборудование   и   элементыоборудования    должны:соответствовать	общим

требованиям безопасности и мерам защиты по ГОСТ Р ИСО/МЭК 50 (п. 4.3.1. ГОСТ Я-52169-2012).

Выступающие	концы

болтовых	соединений

должны быть защищены. - п. 4.3.9 ГОСТ - К - 52169-2012

Вертикальная шведская     лестница отсутствует.

 

Качалка-балансир в средневековом стиле

Габаритные размеры над уровнем грунта должны быть:

длина не менее 2640 мм и

не более 2690 мм;

ширина не менее 760 мм и

не более 810 мм;

высота в центре балансира

- не менее 835 мм и не

более 855 мм;

высота       сидения        в

положении равновесия - не

менее 610 мм и не более

630 мм.

Число посадочных мест - 2 штуки.

Габаритные размеры (фактические):

длина не менее 2404 мм;

ширина 180 мм; высота     в     центре балансира-470 мм; высота    сидения    в положении равновесия —400 мм. Число      посадочных мест - 2 штуки.

Длина     2500     мм, ширина     300     мм, высота     750     мм. Материал

многослойная фанера. Опорный каркас - из металлической трубы.

Детский игровой комплекс в

средневековом стиле для детей в

возрасте от 3 до 6 лет

Габаритные размеры над уровнем  грунта должны быть:

Размеры              игрового комплекса :

длина - не менее 2990 мм и не более 3000 мм; ширина - не менее 1600 мм и не более 1700 мм; высота   комплекса  -   не менее 3735 мм и не более 3900 мм.

Количество    и    размеры

горок:

количество     горок     со

стальным скатом - 1 штука;

высота ската горки - от 755

мм до 765 мм;

высота  каждого  из двух

фанерных бортов горки - не

менее 100 мм от уровня

стального ската.

Высота платформы башни

над уровнем грунта:

-   платформа   башни   на высоте не менее 755 мм и не   более   765   мм   над уровнем грунта - 1 штука. Количество          несущих столбов деревянных - 4 штуки.

Габаритные размеры (фактические):

Размеры      игрового комплекса:  длина - 3100 мм; ширина - 2750 мм; высота  комплекса -1500мм.

Количество и размеры горок:

количество горок со стальным скатом - 1 штука;

высота ската горки -800 мм;

высота   каждого   из двух фанерных бортов горки - 115 мм от уровня       стального ската.

Высота     платформы башни   над   уровнем грунта: - платформа башни на высоте не менее 800 мм     над     уровнем фунта - 1 штука. Количество   несущих столбов деревянных - 4 штуки.

Длина     3100     мм, ширина    2760    мм,

высота     155     мм. Установлено           8 столбов   из   массива дерева длиной   1500 мм.

Для детей от 3 до 7 лет.

Между    площадками комплекса установлен соединительный арочный     мост     с деревянными ступенями.

Песочница квадратная    с крышкой     (2 шт.)

Размеры    над    уровнем грунта:

длина -1400 мм; ширина -1400 мм; высота песочницы - 350 мм

Размеры            над уровнем         грунта (фактические):

длина - 1220 мм; ширина - 1220 мм; высота песочницы -270 мм.

Размер 1220x1320 мм. Корпус выполнен из многослойной фанеры.

Качалка-балансир      с художественно й росписью на тему

сказочных сюжетов

Габаритные размеры над уровнем грунта должны быть:

длина не менее 2640 мм и не более 2690 мм; ширина не менее 760 мм и не более 810 мм; высота        в        центре балансира - не менее 835 мм и не более 855 мм; высота       сидения        в положении равновесия - не менее 610 мм и не более 630 мм.

Число посадочных мест - 2 штуки.

Габаритные размеры над уровнем грунта (фактические):

длина 2000 мм; ширина 370 мм; высота    в     центре балансира-560 мм; высота    сидения    в положении равновесия - 470 мм. Число      посадочных мест - 2 штуки.

Длина 2040 мм, ширина 366 мм, высота от уровня земли     880     мм.

Материал

многослойная фанера. Опорный каркас - из металлической трубы.

Качели

маятниковые с

зашитыми

боковинами   с

художественно

й росписью в

средневековом

стиле

Размеры    над    уровнем грунта должны быть: Длина - 1750 мм (± 10мм); ширина   -   1450   мм   (± 10мм);

высота над уровнем земли -   1530   мм   (±   10мм).

Количество      посадочных мест - 1 штука.

Размеры над уровнем грунта

(фактические):

Длина-2059 мм ширина -2400 мм; высота над уровнем земли     -800     мм. Количество посадочных мест - 1 штука.

Качели одинарные на деревянных столбах с подвесом   на   цепях. Размер   площади   -2400ммх1150       мм, высота    2100    мм. Соединения     между столбами

металлический каркас. Сидения   подвешены на      металлических цепях,        покрытых пластиковой термоусадочной пленкой.

Скамейка      с боковинами из фиброжелезо-бетона

Размеры           скамейки должны быть:

длина - не менее 1570 мм и не более 1600 мм; ширина - не менее 450 мм и не более 490 мм; высота спинки - 450 мм. Боковины                    из фиброжелезобетона   -   2 штуки.

Размеры    скамейки (фактические): длина- 1610 мм; ширина - 360 мм; высота спинки - 420 мм.

Боковины             из

фиброжелезобетона

отсутствует.

Скамейка            со спинкой. Длина 1600 мм, ширина 480 мм, высота    от    уровня земли 900 мм. Каркас выполнен              из металлического профиля.

Шестигранна я

фиброжелезо-бетонная урна с ведром-вставкой

Размеры   над   уровнем грунта:

длина - 400 мм; ширина-380 мм; высота урны - 600 мм

Размеры           над уровнем       грунта (фактические):

длина - 420 мм;

ширина - 420 мм; высота урны - 600 мм Установлена четырехгранная урна.

Урна деревянная   со вставкой.        Размер 420x420              мм. Выполнена           из массива   дерева   на металлическом каркасе.        Внутри расположен металлический вкладыш,

выполненный         из

оцинкованного

металла.

Информационный стенд

Размеры    над    уровнем грунта должны быть: Размеры     изделия     над уровнем гоунта: высота над уровнем земли - не менее 1750 мм; толщина - 55 мм; ширина - 594 мм. Размеры фанерного щита: длина-850 мм; ширина-594 мм. Нанесение

информационного текста на фанерный щит произведено методом прямой УФ полноцветной

широкоформатной печати по фанере с высоким разрешением.

мм;

толщина - 55 мм; ширина - 594 мм. Размеры    фанерного щита:

длина - 121 мм; ширина - 83 мм.

Нанесение информационного текста на фанерный щит       произведено методом прямой УФ полноцветной широкоформатной печати по фанере с высоким разрешением - отсутствует.

диаметром 42 мм

Размеры            над уровнем         грунта (фактические):

Размеры изделия над уповнемгоунта: высота над уровнем земли - не менее 1750

Размер   920x1900x40 мм.

Названный акт подписан представителем Общества с возражениями.

Получив возражения Общества по факту приемки товара, отраженные в акте от 20.10.2021, Администрация провела экспертизу поставленного оборудования, что согласуется с положениями пункта 3.2.3 контракта, по результатам которой обществом с ограниченной ответственностью «Амеланд» составлен технический отчет. Из данного отчета следует, что отдельные изделия и их элементы имеют явные несоответствия требованиям и условиям технического задания по размерам и явные устранимые дефекты. Выявлено несоответствие требований ГОСТ 31937-2011 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния», СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений» и действующим требованиям технических регламентов, нормативной документации (ГОСТам, ОСТам, ТУ), отсутствие технических условий, паспортов и сертификатов соответствия изделий, явные, устранимые дефекты изделий относятся к категории ограниченно работоспособного технического состояния. Изделие и/или строительная конструкция в целом, включая состояние грунтов основания, при которой имеются крены, дефекты и повреждения, приведшие к снижению несущей способности, но отсутствует опасность внезапного разрушения, потери устойчивости или опрокидывания, и функционирование конструкций и эксплуатация изделия возможна либо при контроле (мониторинге) технического состояния, либо при проведении необходимых мероприятий по восстановлению или усилению конструкций изделия и (или) грунтов основания и последующем мониторинге технического состояния (при необходимости). Конструкция изделий не полностью подтверждает безопасную эксплуатацию и требования безопасной эксплуатации возрастной группы детей.

Между сторонами велась переписка (л.д.49-56 т.1), где в том числе Обществу было предоставлена возможность для устранения недостатков выполненных работ, указанные в акте сдачи-приемки от 20.10.2020 № 1 в срок до 15.04.2021. Выявленные недостатки устранены не были, что подтверждается актом № 1 от 21.04.2021, составленным комиссией ответчика.

Данные обстоятельства явились основанием для принятия заказчиком 21.04.2021 решения об одностороннем отказе от исполнения муниципального контракта от 21.08.2020 № 03573000158200000220001.  

Выявленные несоответствия, по мнению суда, являются существенными нарушением условий контракта, поскольку указание заказчиком в техническом задании особых характеристик товара, отвечающим его потребностям, необходимы заказчику с учетом специфики такого товара, предназначенного для использования детьми. Требования к такому товару являются обязательными и не могут допускать вариативности, о чем Общество как поставщик товара, обладающего обозначенными характеристиками, не может быть не осведомлено. Заказчик является  органом местного самоуправления  и в аукционной документации были установлены конкретные требования к поставляемому оборудованию,  а  истец, являясь участником электронного аукциона, имел возможность, до заключения контракта ознакомится с его условиями и требованиями, предъявляемым заказчиком к предмету поставки. 

Таким образом, обнаружив при приемке товара несоответствие его технических характеристик условиям контракта, заказчик принял решение от 21.04.2021 об одностороннем отказе от исполнения контракта, о чем уведомил Общество. При этом обнаруженные недостатки не могли быть устранены без несоразмерных затрат времени, так как оборудование поставлено за сроками  выполнения работ, т.е. после   21.08.2020.

Вместе с тем, суд принимает во внимание, что из приведенных выше норм следует, что в случае существенного нарушения требований к качеству товара у покупателя отсутствует необходимость обращаться к продавцу с требованием об устранении недостатков, поскольку в данной ситуации законом предусмотрено право на односторонний отказ от договора.

На основании изложенного, Администрация  правомерно приняла решение об одностороннем отказе от исполнения контракта.

 Требование части 12 статьи 95 Закона №44-ФЗ ответчиком соблюдены. Доказательств обратного не представлено. Такие доводы истцом не заявлены. 

Кроме того, согласно разъяснениям, данным в пункте 16 Обзора судебной практики применения законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 28.06.2017, несовершение заказчиком всех действий, предусмотренных частью 12 статьи 95 Закона №44-ФЗ, не свидетельствует об отсутствии надлежащего уведомления, если доказано, что уведомление об одностороннем отказе заказчика от исполнения контракта доставлено исполнителю. В данном случае соответствующее уведомление Обществом получено, что последним не оспаривается.

Однако, подрядчик не предпринял никаких действий по устранению выявленных заказчиком и отраженных в решении об отказе нарушений, что явилось бы основанием для отмены решения об отказе от исполнения договора.

Представленное  Обществом экспертное заключение  от 16.12.2020 № 49-12/20  о проведении экспертизы по определению качества и функционала детской игровой площадки расположенной в д.Дедовичи Псковской области относительно технического задания к контракту на установку данной детской площадки судом не принимается, поскольку проведено без уведомления заказчика, в его отсутствие.

 В данном случае, суд полагает, что исходя из предмета иска и обстоятельств, подлежащих доказыванию, специальных познаний для сравнения на предмет соответствия технических характеристик поставленного оборудования, условиям технических требований, указанных в контракте, техническом задании и спецификации к нему, не требуется. 

           Доводы Общества о том, что поставленное им оборудование является улучшенным не опровергают факта поставки оборудования не соответствующего техническим характеристикам, заявленным в контракте, и не являются основанием для удовлетворения требований истца. 

  При том, что улучшения нельзя признать таковыми, поскольку улучшение качества материалов, комплектующих изделий, а также расширение диапазона возрастной группы игровых комплексов документально подрядчиком не подтверждено. Техническая документация и сертификаты соответствия на поставленное оборудование подрядчиком, в нарушение п. 3.3 технического задания муниципального контракта, при его исполнении не предоставлены. Подрядчиком допущена недопоставка следующих комплектующих: пункт № 1 - Детский игровой комплекс для детей в возрасте от 7 до 12 лет (недопоставлена одна башня и вертикальная шведская лестница); пункт № 8 - Скамейка с боковинами из фиброжелезо-бетона (отсутствуют боковины из фиброжелезо-бетона).

           Таким образом, оценив представленные в дело доказательства на предмет их относимости, допустимости и достаточности в соответствии со статьями 67, 68, 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд признает, что представленные в материалы дела документы подтверждают факт поставки некачественного товара, тогда как ответчик доказательств обратного не представил.

На основании изложенного в удовлетворении иска следует отказать.	     

В соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации расходы по оплате госпошлины подлежат отнесению на  истца.

     	Руководствуясь статьями 110, 167-170  Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд 

РЕШИЛ:

В иске отказать. 

     	Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Кордав» в доход федерального бюджета госпошлину в сумме 10080 руб.

    	На решение в течение месяца после его принятия может быть подана апелляционная жалоба в Четырнадцатый арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Псковской области.

Судья								Ж.В. Бударина