Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

Дело №А40-253188/20-96-1598

04 марта 2021 года

г. Москва

 

Резолютивная часть решения объявлена 02.03.2021

Полный текст решения изготовлен 04.03.2021

Арбитражный суд города Москвы в составе судьи Гутник П.С., при ведении протокола секретарем судебного заседания ФИО1, рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску ООО "КАПИТАЛСТРОЙ" (ИНН 

<

***>) к ООО "РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС" (ИНН 

<

***>) о взыскании 10 820 275,63 руб., госпошлины

при участии в судебном заседании:

от истца:   ФИО2 по доверенности от 20.04.2019, диплом;

от ответчика:  ФИО3 по доверенности от 30.12.2020, диплом;

Рассмотрев материалы дела, суд

УСТАНОВИЛ:

ООО "КАПИТАЛСТРОЙ"  (далее по тексту – Истец) обратилось в арбитражный суд с иском к ООО "РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС"  (далее по тексту – Ответчик), в котором просил суд  взыскать (с учетом принятых в порядке ст. 49 АПК РФ уточнений):

1. Задолженность в размере 542 972,47 рублей (Пятьсот сорок две тысячи девятьсот семьдесят два рубля 47 коп.), в том числе НДС 20% - 90495,41 рублей за выполненные Контракту № РиР-05-08-19 от 05 августа 2019 года работы.

2. Сумму неустойки в размере 517 696,36 рублей (Пятьсот семнадцать тысяч шестьсот девяносто шесть рублей 36 коп.) за просрочку обязательств по оплате, предусмотренных Контрактом №РиР-05-08-19 от 05 августа 2019 года.

3. Задолженность в размере 701 163,29 рублей (Семьсот одна тысяча сто шестьдесят три рубля 29 коп.), в том числе НДС 20% - 116 860,55 рублей, за выполненные по Контракту № РиР-12-09-19 от 12 февраля 2019 года работы.

4. Неустойку в размере 70 116,33 рублей (Семьдесят тысяч сто шестнадцать рублей 33 коп.) по Контракту № РиР-12-09-19 от 12 февраля 2019 года.

5. Задолженность в размере 6 504 098,38 рублей (Шесть миллионов пятьсот четыре тысячи девяносто восемь рублей 38 коп.), в том числе НДС 20% - 1084016,40 рублей, за работы, выполненные по Контракту № РиР-19-08-19 от 19 августа 2019 года (без учета стоимости работ, выполненных по дополнительным соглашениям).

6. Задолженность в размере 328 048,44 рублей (Триста двадцать восемь тысяч сорок восемь рублей 44 коп.) в части платы за предоставление рассрочки по Контракту № РиР-19-08-19 от 19 августа 2019 года.

7. Сумму неустойки за просрочку платежей по Контракту №РиР-19-08-19 от 19 августа 2019 года в размере 801 656,41 (Восьмисот одной тысячи шестисот пятидесяти шести рублей 41 коп.) (без учета неустойки за нарушение сроков оплаты работ по дополнительным соглашениям).

8. Задолженность в размере 357 213,78 рублей (Триста пятьдесят семь тысяч двести тринадцать рублей 78 коп.), в том числе НДС 20% - 59535,63 рублей, за работы, выполненные по Дополнительному соглашению №1 от 19 декабря 2019 года к Контракту № РиР-19-08-19 от 19 августа 2019 года.

9. Неустойку в размере 57 868,63 рублей (Пятьдесят семь тысяч восемьсот шестьдесят восемь рублей 63 коп.) за нарушение обязательств в части оплаты задолженности по Дополнительному соглашению №1 от 19 декабря 2019 года к Контракту № РиР-19-08-19 от 19 августа 2019 года.

10. Задолженность в размере 342 870,37 рублей (Триста сорок две тысячи восемьсот семьдесят рублей 37 коп.), в том числе НДС 20% - 57145,06 рублей, за работы, выполненные по Дополнительному соглашению №2 от 20 декабря 2019 года к Контракту № РиР-19-08-19 от 19 августа 2019 года.

11. Неустойку в размере 44 916,02 рублей (Сорок четыре тысячи девятьсот шестнадцать рублей 02 коп.) за нарушение обязательств в части оплаты задолженности по Дополнительному соглашению №2 от 20 декабря 2019 года к Контракту № РиР-19-08-19 от 19 августа 2019 года.

12. Задолженность в размере 281 657,47 рублей (Двести восемьдесят одна тысяча шестьсот пятьдесят семь рублей 47 коп.), с учетом НДС 20% - 46 942,91 рублей, за работы, выполненные по Дополнительному соглашению №3 от 07 июля 2020 года к Контракту №РиР-19-08-19 от 19 августа 2019 года.

13. Неустойку в размере 19 997,68 рублей (Девятнадцать тысяч девятьсот девяносто семь рублей 68 коп.), за нарушение обязательств в части оплаты задолженности по Дополнительному соглашению №3 от 07 июля 2020 года к Контракту № РиР-19-08-19 от 19 августа 2019 года.

Истец требования поддержал в полном объеме по основаниям изложенным в иске.

Ответчик не воспользовался предоставленными ему АПК РФ процессуальными правами, отзыв или иную письменную позицию по спору не представил, требования истца не оспорил, не предоставил истребованные судом доказательства оплаты задолженности либо ее отсутствия.

Заслушав представителей сторон спора, исследовав письменные материалы дела, арбитражный суд приходит к следующему. 

Между  ООО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС» (Заказчиком) и ООО «КапиталСтрой» (Подрядчиком) были заключены контракты на выполнение работ. 

Истцом были выполнены работы в полном объёме. 

Ответчик работы не оплатил. 

Уклонение ответчика от оплаты данной задолженности и послужило основанием для обращения истца в арбитражный суд с настоящим иском.

Рассматривая данный спор по существу, суд исходит из следующего.

Между сторонами заключены договоры подряда, к правоотношениям сторон применяются положения гл. 37 ГК РФ.

Согласно п. 1 ст. 4 АПК РФ заинтересованное лицо вправе обратиться в арбитражный суд за защитой своих нарушенных или оспариваемых прав и законных интересов, в том числе с требованием о присуждении ему компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта в разумный срок, в порядке, установленном настоящим Кодексом.

Согласно ч. 1 ст. 702 ГК РФ по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

В договоре подряда указываются начальный и конечный сроки выполнения работы. По согласованию между сторонами в договоре могут быть предусмотрены также сроки завершения отдельных этапов работы (промежуточные сроки) (ч. 1 ст. 708 ГК РФ).

Согласно ч. 1 ст. 709 ГК РФ в договоре подряда указываются цена подлежащей выполнению работы или способы ее определения. При отсутствии в договоре таких указаний цена определяется в соответствии с пунктом 3 статьи 424 настоящего Кодекса.

Как установлено ч. 1 ст. 720 ГК РФ заказчик обязан в сроки и в порядке, которые предусмотрены договором подряда, с участием подрядчика осмотреть и принять выполненную работу (ее результат), а при обнаружении отступлений от договора, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе немедленно заявить об этом подрядчику.

Сдача результата работ подрядчиком и приемка его заказчиком оформляются актом, подписанным обеими сторонами (пункт 4 статьи 753 ГК РФ).

Частью 1 ст. 711 ГК РФ установлено, что если договором подряда не предусмотрена предварительная оплата выполненной работы или отдельных ее этапов, заказчик обязан уплатить подрядчику обусловленную цену после окончательной сдачи результатов работы при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в согласованный срок, либо с согласия заказчика досрочно.

В силу положений статей 309, 310 Гражданского кодекса Российской Федерации, обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями, при том, что односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом, другими законами или иными правовыми актами.

Из положений статей 702, 740, 746 Гражданского кодекса Российской Федерации следует, что основанием для возникновения у заказчика денежного обязательства по оплате работ по договору является совокупность следующих обстоятельств: выполнение работ и передача их результата заказчику.

Основанием для возникновения обязательства заказчика по оплате обусловленных договором работ является сдача работ заказчику путем подписания акта выполненных работ (пункт 8 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 24.01.2000 №51 «Обзор практики разрешения споров по договору строительного подряда» (далее - информационное письмо №51).

I. 05 августа 2019 года между ООО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС» (Заказчиком) и ООО «КапиталСтрой» (Подрядчиком) был заключен Контракт № РиР-05-08-19. Предметом данного контракта являлось выполнение Подрядчиком по заданию Заказчика ремонтных, монтажных, демонтажных, отделочных работ на Объекте (в помещении ресторана «Иль Патио» площадью 267 кв.м., расположенном по адресу: 

<

...>, которые Ответчик обязался принять и оплатить. Всего по Контракту № РиР-05-08-19 от 05 августа 2019 года Подрядчик выполнил, а Заказчик принял работ на общую сумму 10 864 862,34 рублей, в том числе НДС 20% - 1 810 810,39 рублей. Данные работы были выполнены Истцом в полном объеме, с надлежащим качеством, в согласованные Сторонами сроки, что подтверждается:

- актом о приемке выполненных работ КС-2 №1 от 11 ноября 2019 года на сумму  10 864 862,34 рублей, в том числе НДС 20% - 1 810 810,39 рублей.

- справкой стоимости выполненных работ и затрат КС-3 №1 от 11 ноября 2019 года на сумму 10 864 862,34 рублей, в том числе НДС 20% - 1 810 810,39 рублей.

Согласно пункту 5.1.1. Контракта № РиР-05-08-19 от 05 августа 2019 года Заказчик в течение 5 (Пяти) банковских дней с момента подписания настоящего Контракта и получения выставленного Подрядчиком счета, перечисляет на расчетный счет Подрядчика первый авансовый платеж в размере 50% (Пятьдесят) от общей стоимости Контракта, указанной в пункте 3.1. настоящего Контракта, что составляет 5 432 431,17 рублей, в том числе НДС 20% - 905 405,19 рублей. 

В полном объеме сумму первого авансового платежа Ответчик оплатил с существенной задержкой - 26 декабря 2019 года (в том числе: 1 000 000 рублей – 19 сентября 2019 года, 1 500 000 рублей – 21 октября 2019 года, 1 000 000 рублей – 24 октября 2019 года, 982 431,17 рублей – 26 декабря 2019 года).

Пунктом 9.2 Контракта Стороны определили, что в случае невыполнения и/или ненадлежащего выполнения обязательств по оплате выполненных работ, Заказчик оплачивает штрафную неустойку в размере 0,05% от размера задолженности за каждый день просрочки, но не более 10% от суммы задолженности.

С учетом пункта 5.5. Контракта срок просрочки данного платежа надлежит рассчитывать с 20 сентября 2019 года. Таким образом, сумма неустойки, которую Ответчик обязан выплатить в пользу Истца, за нарушение срока оплаты первого авансового платежа по Контракту № РиР-05-08-19 от 05 августа 2019 года составляет    110 064,13 рублей.

Месяц

Начислено

Долг

Период просрочки

Формула

Пени

с

по

дней

20.09.2019

5432431,17

-1 000 000,00

19.09.2019

Погашение части долга

4 432 431,17

20.09.2019

21.10.2019

32

4 432 431,17 × 32 × 0.05%

70 918,90 р.

-1 500 000,00

21.10.2019

Погашение части долга

2 932 431,17

22.10.2019

24.10.2019

3

2 932 431,17 × 3 × 0.05%

4 398,65 р.

-1 000 000,00

24.10.2019

Погашение части долга

1 932 431,17

25.10.2019

01.11.2019

8

1 932 431,17 × 8 × 0.05%

7 729,72 р.

-950 000,00

01.11.2019

Погашение части долга

982 431,17

02.11.2019

26.12.2019

55

982431,17 × 55 × 0.05%

27 016,86 р.

-982 431,17

26.12.2019

Погашение части долга

Итого:

110 064,13 р.

Сумма основного долга: 0,00 руб.

Сумма пеней по задолженности: 110 064,13 руб.

В соответствии с п.5.1.2. Контракта второй авансовый платеж в размере 20% (Двадцать) от общей стоимости Контракта, составляющий 2 172 972, 47 рублей, в том числе НДС 20% - 362162,08 рублей должен был быть перечислен Подрядчику в течение 20 дней со дня подписания Акта допуска. Акт доступа на объект подписан 09 сентября 2019 года. Следовательно, второй авансовый платеж, предусмотренный Контрактом №РиР-05-08-19, должен был быть произведен Заказчиком не позднее 29 сентября 2019 года. Однако сумма указанного авансового платежа была оплачена Ответчиком в полном объеме лишь 21 июля 2020 года (в том числе: 2 077 027,53 рублей – 26 декабря 2019 года, 95 944,94 рублей – 21 июля 2020 года).

С учетом пункта 5.5. Контракта срок просрочки данного платежа надлежит рассчитывать с 22 октября 2019 года. Таким образом, сумма неустойки, которую Ответчик обязан выплатить в пользу Истца, за нарушение срока оплаты второго авансового платежа по Контракту № РиР-05-08-19 от 05 августа 2019 года составляет 81 686,36 рублей.

Месяц

Начислено

Долг

Период просрочки

Формула

Пени

с

по

дней

22.10.2019

2172 972,47

2 172 972,47

22.10.2019

26.12.2019

66

2 172 972,47 × 66 × 0.05%

71 708,09 р.

-2 077 027,53

26.12.2019

Погашение части долга

95 944,94

27.12.2019

21.07.2020

208

95 944,94 × 208 × 0.05%

9 978,27 р.

-95 944,94

21.07.2020

Погашение части долга

0,00

22.07.2020

10.12.2020

142

0,00 × 142 × 0.05%

0,00 р.

Итого:

81 686,36 руб.

Сумма основного долга: 0,00 руб.

Сумма пеней по задолженности: 81 686,36 руб.

Пунктом 5.2 Контракта № РиР-05-08-19 от 05 августа 2019 года Стороны определили, что оплата выполненных работ производится на основании утверждаемых Заказчиком Актов КС-2, КС-3 о приемке выполненных работ в течение 10 (десяти) банковских дней, с момента подписания Актов КС-2, КС-3 Сторонами, с удержанием 70% (Семидесяти) от суммы выполненных работ в счет погашения авансового платежа. 

Следовательно, выполненные Подрядчиком работы должны были быть в полном объеме оплачены в срок не позднее 21 ноября 2019 года. Однако принятые Заказчиком по Контракту № РиР-05-08-19 от 05 августа 2019 года работы в полном объеме не оплачены до настоящего момента. 

Сумма неустойки в данной части оплаты выполненных работ (на сумму             3 259 458,70 рублей) составляет 325 945,87 рублей.

Месяц

Начислено

Долг

Период просрочки

Формула

Пени

с

по

дней

26.11.2019

3259458,70

3 259 458,70

26.11.2019

21.07.2020

239

3 259 458,70 × 239 × 0.05%

389 505,31 р.

-2386 486,23

21.07.2020

Погашение части долга

872 972,47

22.07.2020

23.07.2020

2

872 972,47 × 2 × 0.05%

872,97 р.

-130 000,00

23.07.2020

Погашение части долга

742 972,47

24.07.2020

27.10.2020

96

742 972,47 × 96 × 0.05%

35 662,68 р.

-200 000,00

27.10.2020

Погашение части долга

542 972,47

28.10.2020

10.12.2020

44

542 972,47 × 44 × 0.05%

11 945,39 р.

Итого:

437 986,35 р.

но не более 10%

325 945,87 р.

Сумма основного долга: 542 972,47 руб.

Сумма пеней по задолженности: 325 945,87 руб.

- Размер неоплаченной основной задолженности ООО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС» по Контракту № РиР-05-08-19 от 05 августа 2019 года составляет  542 972,47 рублей (Пятьсот сорок две тысячи девятьсот семьдесят два рубля 47 копеек), в том числе НДС 20% - 90 495,41 рублей.

- Общая сумма пеней (неустойки) за просрочку платежей по Контракту №РиР-05-08-19 от 05 августа 2019 года составляет 517 696,36 рублей  (110 064,13 + 81 686,36 + 325 945,87 =  517 696,36).

Судом установлен факт надлежащего исполнения истцом обязательств по договору, что подтверждается подписанными сторонами без разногласий актами выполненных работ:

Вместе с тем, доказательств, подтверждающих оплату работ в полном объёме ответчиком в нарушение статьи 65 АПК РФ, суду не представлено и по существу не оспаривается ответчиком. 

Мотивированный отказ от подписания актов ответчик не заявил, как не представил возражений относительно объемов предъявленных к оплате выполненных работ.

Принятие работ свидетельствует о потребительской ценности произведенных работ для заказчика и желании ими воспользоваться. Таким образом, при приемке работ без разногласий ответчик обязан произвести ее оплату.

В связи с вышеизложенным, исковые требования в части взыскания долга и неустойки подлежат удовлетворению.

II. 12 сентября 2019 года между ООО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС» (Заказчиком) и ООО «КапиталСтрой» (Подрядчиком) был заключен Контракт № РиР-12-09-19. Предметом данного контракта являлось выполнение Подрядчиком по заданию Заказчика демонтажных работ на Объекте: 

<

...>, СТЦ «МЕГА Белая дача», помещение № В1118 и № В1118(add), кофейня «Коста Кофе». 

Всего по Контракту № РиР-12-09-19 от 12 сентября 2019 года, Подрядчик выполнил, а Заказчик принял работ на общую сумму 701 163,29 рублей, в том числе НДС 20% - 116 860,55 рублей. Данные работы были выполнены Истцом в полном объеме, с надлежащим качеством, в согласованные Сторонами сроки, что подтверждается:

- актом о приемке выполненных работ КС-2 №1 от 20 сентября 2019 года на сумму  701 163,29 рублей, в том числе НДС 20% - 116 860,55 рублей;

- справкой стоимости выполненных работ и затрат КС-3 №1 от 11 ноября 2019 года на сумму 701 163,29 рублей, в том числе НДС 20% - 116 860,55 рублей.

Пунктом 9.2 Контракта № РиР-12-09-19 от 12 сентября 2019 года Стороны определили, что в случае невыполнения и/или ненадлежащего выполнения обязательств по оплате выполненных работ, Заказчик оплачивает штрафную неустойку в размере 0,05% от размера задолженности за каждый день просрочки, но не более 10 % от суммы задолженности.

Месяц

Начислено

Долг

Период просрочки

Формула

Пени

с

по

дней

24.09.2019

350 581,65

350 581,65

24.09.2019

10.12.2020

444

350 581,65 × 444 × 0.05%

77 829,13 р.

Итого:

77 829,13 р.

но не более 10%

35 058,17 р.

30.09.2019

350 581,64

350 581,64

30.09.2019

10.12.2020

438

350 581,64 × 438 × 0.05%

76 777,38 р.

Итого:

76 777,38 р.

но не более 10%

35 058,16 р.

Сумма основного долга: 701 163,29 руб.

Сумма пеней по данным задолженностям: 70 116,33 руб.

По состоянию на 11 декабря 2020 года:

- Размер основной задолженности по Контракту № РиР-12-09-19 от 12 февраля 2019 года составляет 701 163,29 рублей, в том числе НДС 20% - 116 860,55 рублей.

- Размер штрафной неустойки по Контракту № РиР-12-09-19 от 12 февраля 2019 года составляет 70 116,33 рублей.

Судом установлен факт надлежащего исполнения истцом обязательств по договору, что подтверждается подписанными сторонами без разногласий актами выполненных работ:

Вместе с тем, доказательств, подтверждающих оплату работ в полном объёме ответчиком в нарушение статьи 65 АПК РФ, суду не представлено и по существу не оспаривается ответчиком. 

Мотивированный отказ от подписания актов ответчик не заявил, как не представил возражений относительно объемов предъявленных к оплате выполненных работ.

Принятие работ свидетельствует о потребительской ценности произведенных работ для заказчика и желании ими воспользоваться. Таким образом, при приемке работ без разногласий ответчик обязан произвести ее оплату.

В связи с вышеизложенным, исковые требования в части взыскания долга и неустойки подлежат удовлетворению.

III. 19 августа 2019 года между ООО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС» (Заказчиком) и ООО «КапиталСтрой» (Подрядчиком) был заключен Контракт №РиР-19-08-19. Предметом данного контракта являлось выполнение Подрядчиком по заданию Заказчика ремонтных, монтажных, демонтажных, отделочных работ на Объекте (в помещении ресторана «Фрайдис» площадью 433 кв.м., расположенном по адресу: Московская область, г. Котельники, ТРЦ МЕГА Белая Дача), которые Ответчик обязался принять и оплатить. 

Изначально стоимость Контракта № РиР-19-08-19 от 19 августа 2019 года составляла 19 682 906,28 рублей, в том числе НДС 20% - 3 280 484,38 рублей. 

Работы на сумму 19 682 906,28 рублей, с учетом НДС 20% - 3 280 484,38 рублей, Подрядчиком были выполнены своевременно и в полном объеме, что подтверждается:

-  актом о приемке выполненных работ КС-2 №1 от 10 марта 2020 года на сумму   19 682 906,28 рублей, с учетом НДС 20% - 3 280 484,38 рублей.

- справкой стоимости выполненных работ и затрат КС-3 №1 от 10 марта 2019 года на сумму 19 682 906,28 руб., с учетом НДС 20% - 3 280 484,38 рублей.

Согласно пункту 5.1.1. Контракта Заказчик в течение 5 (Пяти) банковских дней с момента подписания настоящего Контракта и получения выставленного Подрядчиком счета, должен был перечислить на расчетный счет Подрядчика первый авансовый платеж в размере 30% (Тридцать) от общей стоимости Контракта, указанной в пункте 3.1 настоящего Контракта, что составляет 5 904 871,88 рублей, в том числе НДС 20% -        984 145,31 рублей. 

В полном объеме сумму первого авансового платежа Ответчик оплатил лишь 29 ноября 2019 года (в том числе: 4 000 000 рублей – 07 ноября 2019 года, 1 904 871,88 рублей – 29 ноября 2019 года).

Пунктом 9.2 Контракта стороны определили, что в случае невыполнения и/или ненадлежащего выполнения обязательств по оплате выполненных работ, Заказчик оплачивает штрафную неустойку в размере 0,05% от размера задолженности за каждый день просрочки.

С учетом пункта 5.5. Контракта срок просрочки данного платежа надлежит рассчитывать с 20 сентября 2019 года. Таким образом, сумма неустойки, которую Ответчик обязан выплатить в пользу Истца, за нарушение срока оплаты первого авансового платежа по Контракту № РиР-19-08-19 от 19 августа 2019 года составляет 801 656,41 рубля.

Месяц

Начислено

Долг

Период просрочки

Формула

Пени

с

по

дней

20.09.2019

5904871,88

5 904 871,88

20.09.2019

07.11.2019

49

5 904 871,88 × 49 × 0.05%

144 669,36 р.

-4000 000,00

07.11.2019

Погашение части долга

1 904 871,88

08.11.2019

29.11.2019

22

1 904 871,88 × 22 × 0.05%

20 953,59 р.

-1904 871,88

29.11.2019

Погашение части долга

Итого:

165 622,95 руб.

Сумма основного долга: 0,00 руб.

Сумма пеней по всем задолженностям: 165 622,95 руб.

В соответствии с п.5.1.2. Контракта второй авансовый платеж в размере 20% (Двадцать) от общей стоимости Контракта, составляющий 3 936 581,26 рублей, в том числе НДС 20% - 656096,88 рублей, должен был быть перечислен Подрядчику в течение 30 дней со дня подписания Акта допуска. Акт доступа на объект подписан 07 ноября 2019 года. Следовательно, второй авансовый платеж, предусмотренный Контрактом № РиР-05-08-19, должен был быть произведен Заказчиком не позднее 07 декабря 2019 года. Однако сумма указанного авансового платежа была оплачена Ответчиком в полном объеме лишь 27 февраля 2020 года (в том числе: 650 000 рублей – 26 декабря 2019 года, 1 000 000 рублей – 07 февраля 2020 года, 2 000 000 рублей – 18 февраля 2020 года и 286 000 рублей - 27 февраля 2020 года).

С учетом пункта 5.5. Контракта срок просрочки данного платежа надлежит рассчитывать с 09 декабря 2019 года. Таким образом, сумма неустойки, которую Ответчик обязан выплатить в пользу Истца за нарушение срока оплаты второго авансового платежа по Контракту № РиР-19-08-19 от 19 августа 2019 года, составляет 119 953,93 рублей.

Месяц

Начислено

Долг

Период просрочки

Формула

Пени

с

по

дней

09.12.2019

3936581,26

3 936 581,26

09.12.2019

26.12.2019

18

3 936 581,26 × 18 × 0.05%

35 429,23 р.

-650 000,00

26.12.2019

Погашение части долга

3 286 581,26

27.12.2019

07.02.2020

43

3 286 581,26 × 43 × 0.05%

70 661,50 р.

-1000 000,00

07.02.2020

Погашение части долга

2 286 581,26

08.02.2020

18.02.2020

11

2 286 581,26 × 11 × 0.05%

12 576,20 р.

-2000 581,26

18.02.2020

Погашение части долга

286 000,00

19.02.2020

27.02.2020

9

286 000,00 × 9 × 0.05%

1 287,00 р.

-286 000,00

27.02.2020

Погашение части долга

Итого:

119 953,93 руб.

Сумма основного долга: 0,00 руб.

Сумма пеней по всем задолженностям: 119 953,93 руб.

Согласно п. 5.1.3. Контракта № РиР-19-08-19 оставшаяся часть оплаты (9 841 453,14 рублей, в том числе НДС 20% - 1640242,19 рублей) производится после подписания сторонами Актов КС-2, Кс-3 о приемке выполненных работ, в течение 6 месяцев равными долями до 10 числа каждого месяца. Таким образом, Ответчик должен был оплатить Истцу: 

- до 10 апреля 2020 года – 1 640 242,19 рублей, в том числе НДС 20% - 273373,70 рублей;

- до 10 мая 2020 года - 1 640 242,19 рублей, в том числе НДС 20% - 273373,70 рублей;

- до 10 июня 2020 года - 1 640 242,19 рублей, в том числе НДС 20% - 273373,70 рублей;

- до 10 июля 2020 года - 1 640 242,19 рублей, в том числе НДС 20% - 273373,70 рублей;

- до 10 августа 2020 года - 1 640 242,19 рублей, в том числе НДС 20% - 273373,70 рублей;

- до 10 сентября 2020 года - 1 640 242,19 рублей, в том числе НДС 20% - 273373,70 руб.

Однако в указанной части оплаты принятых работ, Ответчиком были произведены лишь следующие платежи:

- 27 февраля 2020 года – 56 870,37 рублей; 

- 23 сентября 2020 года – 1 640 242,19 рублей;

- 27 октября 2020 года – 1 640 242,19 рублей.

С учетом данного обстоятельства и в соответствии с п.9.2 Контракта, сумма неустойки, которую Ответчик обязан выплатить в пользу Истца, за нарушение своих обязательств в этой части оплаты работ, выполненных Истцом по Контракту  №РиР-19-08-19 от 19 августа 2019 года составляет 720 480,79 рублей.

Месяц

Начислено

Долг

Период просрочки

Формула

Пени

с

по

дней

11.04.2020

1640242,19

-56 870,37

26.02.2020

Погашение части долга

1 583 371,82

11.04.2020

23.09.2020

166

1 583 371,82 × 166 × 0.05%

131 419,86 р.

-1 583 371,82

23.09.2020

Погашение части долга

Итого:

131 419,86 р.

11.05.2020

1640242,19

1 640 242,19

11.05.2020

23.09.2020

136

1 640 242,19 × 136 × 0.05%

111 536,47 р.

-56 870,37

23.09.2020

Погашение части долга

1 583 371,82

24.09.2020

27.10.2020

34

1 583 371,82 × 34 × 0.05%

26 917,32 р.

-1 583 371,82

27.10.2020

Погашение части долга

Итого:

138 453,79 р.

11.06.2020

1640242,19

1 640 242,19

11.06.2020

27.10.2020

139

1 640 242,19 × 139 × 0.05%

113 996,83 р.

-56 870,37

27.10.2020

Погашение части долга

1 583 371,82

28.10.2020

11.12.2020

45

1 583 371,82 × 45 × 0.05%

35 625,87 р.

Итого:

149 622,70 р.

13.07.2020

1640242,19

1 640 242,19

13.07.2020

11.12.2020

152

1 640 242,19 × 152 × 0.05%

124 658,41 р.

Итого:

124 658,41 р.

11.08.2020

1640242,19

1 640 242,19

11.08.2020

11.12.2020

123

1 640 242,19 × 123 × 0.05%

100 874,89 р.

Итого:

100 874,89 р.

11.09.2020

1640242,19

1 640 242,19

11.09.2020

11.12.2020

92

1 640 242,19 × 92 × 0.05%

75 451,14 р.

Итого:

75 451,14 р.

Сумма основного долга: 6 504 098,39 р.

Сумма пеней по данным задолженностям: 720 480,79 р.

В соответствии с п. 5.2 Контракта № РиР-19-08-19 от 19 августа 2019 года Стороны определили, что за предоставление Заказчику рассрочки по оплате выполненных работ согласно п.5.1. настоящего Контракта, Заказчик дополнительно к стоимости выполненных работ обязуется выплатить Подрядчику плату за предоставление указанной рассрочки – в размере 10 (Десяти) % от общей стоимости выполненных работ по Контракту за вычетом авансов. 

Учитывая, что рассрочка предоставлялась Ответчику на сумму 9 841 453,14 рублей, то размер платы за предоставление указанной рассрочки составил 984 145,31 рублей (Девятьсот восемьдесят четыре тысячи сто сорок пять рублей 31 коп.). 

Выплата Заказчиком платы за предоставление рассрочки в размере, указанном в настоящем пункте производится Заказчиком в течение 6 (Шести) месяцев, ежемесячно равными долями – по 1/6 от общей стоимости размера платы за предоставление рассрочки (п.5.2 Контракта № РиР-19-08-19 от 19 августа 2019 года), т.е. по 164 024,22 рублей ежемесячно в течение 6 месяцев начиная с апреля 2020 года (984145,31/6=164024,22). В соответствии с п.5.3 Контракта рассрочка по оплате выполненных работ согласно п.3 ст.149 НК РФ не облагается НДС. Таким образом, Ответчик должен был осуществить в пользу Истца следующие платежи в счет платы за предоставление рассрочки по Контракту № РиР-19-08-19 от 19 августа 2019 года:

- до 30 апреля 2020 года – 164 024,22 рублей;

- до 31 мая 2020 года - 164 024,22 рублей;

- до 30 июня 2020 года - 164 024,22 рублей;

- до 31 июля 2020 года - 164 024,22 рублей;

- до 31 августа 2020 года - 164 024,22 рублей;

- до 30 сентября 2020 года - 164 024,22 рублей.

Однако свои обязательства в этой части Ответчик также надлежащим образом и в полном объеме не исполнил. Ответчиком были произведены лишь следующие платежи:

- 01 сентября 2020 года - 164 024,22 рублей;

- 01 сентября 2020 года - 164 024,22 рублей;

- 22 сентября 2020 года - 164 024,22 рублей;

- 27 октября 2020 года - 164 024,22 рублей.

С учетом данного обстоятельства и в соответствии с п.9.2 Контракта, сумма неустойки, которую Ответчик обязан выплатить в пользу Истца, за нарушение своих обязательств в части нарушения сроков внесения платежей в счет платы за предоставление рассрочки по Контракту № РиР-19-08-19 от 19 августа 2019 года составляет 45 598,74 рублей.

Месяц

Начислено

Долг

Период просрочки

Формула

Пени

с

по

дней

06.05.2020

164 024,22

164 024,22

06.05.2020

01.09.2020

119

164 024,22 × 119 × 0.05%

9 759,44 р.

-164 024,22

01.09.2020

Погашение части долга

Итого:

9 759,44 руб.

01.06.2020

164 024,22

164 024,22

01.06.2020

01.09.2020

93

164 024,22 × 93 × 0.05%

7 627,13 р.

-164 024,22

01.09.2020

Погашение части долга

Итого:

7 627,13 руб.

01.07.2020

164 024,22

164 024,22

01.07.2020

22.09.2020

84

164 024,22 × 84 × 0.05%

6 889,02 р.

-164 024,22

22.09.2020

Погашение части долга

Итого:

6 889,02 руб.

03.08.2020

164 024,22

164 024,22

03.08.2020

27.10.2020

86

164 024,22 × 86 × 0.05%

7 053,04 р.

-164 024,22

27.10.2020

Погашение части долга

Итого:

7 053,04 руб.

01.09.2020

164 024,22

164 024,22

01.09.2020

11.12.2020

102

164 024,22 × 102 × 0.05%

8 365,24 р.

Итого:

8 365,24 руб.

01.10.2020

164 024,22

164 024,22

01.10.2020

11.12.2020

72

164 024,22 × 72 × 0.05%

5 904,87 р.

Итого:

5 904,87 руб.

Сумма основного долга: 328 048,44 руб.

Сумма пеней по данным задолженностям: 45 598,74 руб.

По состоянию на 11 декабря 2020 года:

- Сумма основного долга по Контракту № РиР-19-08-19 от 19 августа 2019 года (без учета стоимости работ, выполненных по дополнительным соглашениям) составляет 6 504 098,38 рублей (Шесть миллионов пятьсот четыре тысячи девяносто восемь рублей 38 коп.), в том числе НДС 20% - 1084016,40 рублей.

- Сумма задолженности Ответчика в части платы за предоставление рассрочки по Контракту № РиР-19-08-19 от 19 августа 2019 года составляет  328 048,44 рублей (Триста двадцать восемь тысяч сорок восемь рублей 44 коп.).

- Общая сумма пеней (неустойки) за просрочку платежей по Контракту №РиР-19-08-19 от 19 августа 2019 года составляет 801 656,41 руб. 

Судом установлен факт надлежащего исполнения истцом обязательств по договору, что подтверждается подписанными сторонами без разногласий актами выполненных работ:

Вместе с тем, доказательств, подтверждающих оплату работ в полном объёме ответчиком в нарушение статьи 65 АПК РФ, суду не представлено и по существу не оспаривается ответчиком. 

Мотивированный отказ от подписания актов ответчик не заявил, как не представил возражений относительно объемов предъявленных к оплате выполненных работ.

Принятие работ свидетельствует о потребительской ценности произведенных работ для заказчика и желании ими воспользоваться. Таким образом, при приемке работ без разногласий ответчик обязан произвести ее оплату.

В связи с вышеизложенным, исковые требования в части взыскания долга и неустойки подлежат удовлетворению.

IV. 19 декабря 2019 года между ООО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС» (Заказчиком) и ООО «КапиталСтрой» (Подрядчиком) было заключено Дополнительное соглашение №1 к Контракту № РиР-19-08-19 от 19 августа 2019 года (далее по тексту настоящего пункта – «ДС №1», «Соглашение»). Предметом ДС №1 являлось выполнение Подрядчиком по заданию Заказчика работ по приобретению и установке  вытяжных зонтов на объекте Заказчика – ресторане Фрайдис, расположенном по адресу: 

<

...>, ТРЦ «МЕГА Белая Дача», помещение №2513, которые Ответчик обязался принять и оплатить.

Работы на сумму 357 213,78 рублей (Триста пятьдесят семь тысяч двести тринадцать  рублей 78 коп.), с учетом НДС 20% - 59 535,63 рублей, Подрядчиком были выполнены своевременно и в полном объеме, что подтверждается:

-  актом о приемке выполненных работ КС-2 №1 от 03 февраля 2020 года на сумму   357 213,78 рублей (Триста пятьдесят семь тысяч двести тринадцать  рублей 78 коп.), с учетом НДС 20% - 59 535,63 рублей;

- справкой стоимости выполненных работ и затрат КС-3 №1 от 03 февраля 2020 года на сумму 357 213,78 рублей (Триста пятьдесят семь тысяч двести тринадцать  рублей 78 коп.), с учетом НДС 20% - 59 535,63 рублей.

Пунктом 3.1. ДС №1 Стороны определили, что Заказчик производит оплату аванса для приобретения зонтов в размере 100% от общей стоимости ДС №1, что составляет 357213,78 рублей, в том числе НДС 20% - 59535,63 рублей в течение 5 (Пяти) банковских дней с момента выставления счета на оплату. Указанная сумма задолженности в размере 357213,78 рублей, в том числе НДС 20% - 59535,63 рублей, не оплачена Заказчиком Подрядчику до настоящего момента. В данном случае срок просрочки надлежит рассчитывать с 23 января 2020 года.

Пунктом 5.2. ДС №1 Стороны договорились, что во всем, что не предусмотрено Соглашением, Стороны руководствуются положениями Контракта № РиР-19-08-19 от 19 августа 2019 года.

С учетом данного обстоятельства и в соответствии с п.9.2 Контракта, сумма неустойки, которую Ответчик обязан выплатить в пользу Истца, за нарушение своих обязательств в части оплаты задолженности по Дополнительному соглашению №1 от 19 декабря 2019 года к Контракту № РиР-19-08-19 от 19 августа 2019 года составляет 57 868,63  рублей.

Месяц

Начислено

Долг

Период просрочки

Формула

Пени

с

по

дней

23.01.2020

357 213,78

357213,78

23.01.2020

11.12.2020

324

357 213,78 × 324 × 0.05%

57 868,63 р.

Итого:

57 868,63 руб.

Сумма основного долга: 357 213,78 руб.

Сумма пеней по всем задолженностям: 57 868,63 руб.

Судом установлен факт надлежащего исполнения истцом обязательств по договору, что подтверждается подписанными сторонами без разногласий актами выполненных работ:

Вместе с тем, доказательств, подтверждающих оплату работ в полном объёме ответчиком в нарушение статьи 65 АПК РФ, суду не представлено и по существу не оспаривается ответчиком. 

Мотивированный отказ от подписания актов ответчик не заявил, как не представил возражений относительно объемов предъявленных к оплате выполненных работ.

Принятие работ свидетельствует о потребительской ценности произведенных работ для заказчика и желании ими воспользоваться. Таким образом, при приемке работ без разногласий ответчик обязан произвести ее оплату.

В связи с вышеизложенным, исковые требования в части взыскания долга и неустойки подлежат удовлетворению.

V. 20 декабря 2019 года между ООО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС» (Заказчиком) и ООО «КапиталСтрой» (Подрядчиком) было заключено Дополнительное соглашение №2 к Контракту № РиР-19-08-19 от 19 августа 2019 года (далее по тексту настоящего пункта – «ДС №2», «Соглашение»). Предметом ДС №2 являлось выполнение Подрядчиком по заданию Заказчика строительно-монтажных работ по изготовлению и устройству декоративных перегородок, на объекте Заказчика – ресторане Фрайдис, расположенном по адресу: 

<

...>, ТРЦ «МЕГА Белая Дача», помещение №2513, которые Ответчик обязался принять и оплатить.

Работы на сумму 685 740,74 рублей (Шестьсот восемьдесят пять тысяч семьсот сорок рублей 74 коп.), с учетом НДС 20% - 114 290,12 рублей, Подрядчиком были выполнены своевременно и в полном объеме, что подтверждается:

-  актом о приемке выполненных работ КС-2 №1 от 10 марта 2020 года на сумму   685 740,74 рублей (Шестьсот восемьдесят пять тысяч семьсот сорок рублей 74 коп.), с учетом НДС 20% - 114 290,12 рублей;

- справкой стоимости выполненных работ и затрат КС-3 №1 от 10 марта 2019 года на сумму 685 740,74 рублей (Шестьсот восемьдесят пять тысяч семьсот сорок рублей 74 коп.), с учетом НДС 20% - 114 290,12 рублей.

Пунктом 3.1. ДС №2 Стороны определили, что Заказчик производит оплату аванса в размере 50% от общей стоимости работ, выполняемых по данному Соглашению, что составляет 342 870,37 рублей, в том числе НДС 20% - 57145,06 рублей в течение 5 (Пяти) банковских дней с момента выставления счета на оплату. Указанная сумма аванса была Заказчиком выплачена Подрядчику только 27 февраля 2020 года.

Согласно п. 3.2. ДС №2 оставшиеся 50% - 342870,37 рублей, в том числе НДС 20% - 57145,06 рублей, Заказчик должен был оплатить Подрядчику после подписания Сторонами актов сдачи-приемки формы 2 и 3 фактически выполненных объемов работ, на основании выставленного счета в течение 5 (Пяти) рабочих дней. В соответствии с п. 3.3. ДС №2 оплата за выполненные монтажные работы по Соглашению  производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента подписания Сторонами актов приемки выполненных работ. Таким образом, указанная денежная сумма в размере 342 870,37 руб., в том числе НДС 20% - 57145,06 рублей, должна была быть уплачена Заказчиком в пользу Подрядчика не позднее 24 марта 2020 года. Однако данная задолженность Ответчиком не оплачена до настоящего момента.

Пунктом 5.2. ДС №2 Стороны договорились, что во всем, что не предусмотрено Соглашением, Стороны руководствуются положениями Контракта № РиР-19-08-19 от 19 августа 2019 года.

С учетом данного обстоятельства и в соответствии с п.9.2. Контракта, сумма неустойки, которую Ответчик обязан выплатить в пользу Истца, за нарушение своих обязательств в части оплаты задолженности за работы выполненные Истцом по Дополнительному соглашению №2 от 20 декабря 2019 года к Контракту № РиР-19-08-19 от 19 августа 2019 года, составляет 44 916,02 рублей.

Месяц

Начислено

Долг

Период просрочки

Формула

Пени

с

По

дней

25.03.2020

342 870,37

342870,37

25.03.2020

11.12.2020

262

342 870,37 × 262 × 0.05%

44 916,02 р.

Итого:

44 916,02 руб.

Сумма основного долга: 342 870,37 руб.

Сумма пеней по всем задолженностям: 44 916,02 руб.

Судом установлен факт надлежащего исполнения истцом обязательств по договору, что подтверждается подписанными сторонами без разногласий актами выполненных работ:

Вместе с тем, доказательств, подтверждающих оплату работ в полном объёме ответчиком в нарушение статьи 65 АПК РФ, суду не представлено и по существу не оспаривается ответчиком. 

Мотивированный отказ от подписания актов ответчик не заявил, как не представил возражений относительно объемов предъявленных к оплате выполненных работ.

Принятие работ свидетельствует о потребительской ценности произведенных работ для заказчика и желании ими воспользоваться. Таким образом, при приемке работ без разногласий ответчик обязан произвести ее оплату.

В связи с вышеизложенным, исковые требования в части взыскания долга и неустойки подлежат удовлетворению.

VI. 07 июля 2020 года между ООО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС» (Заказчиком) и ООО «КапиталСтрой» (Подрядчиком) было заключено Дополнительное соглашение №3 к Контракту № РиР-19-08-19 от 19 августа 2019 года (далее по тексту настоящего пункта – «ДС №3», «Соглашение»). Предметом ДС №3 являлось выполнение Подрядчиком по заданию Заказчика дополнительных строительно-монтажных работ, согласно Приложению №1 к настоящему Соглашению (Смета) на объекте Заказчика – ресторане Фрайдис, расположенном по адресу: 

<

...>, ТРЦ «МЕГА Белая Дача», помещение №2513, которые Ответчик обязался принять и оплатить.

Работы по ДС №3 на сумму 281 657,47 рублей (Двести восемьдесят одна тысяча шестьсот пятьдесят семь рублей 47 коп.), с учетом НДС 20% - 46 942,91 рублей, Подрядчиком были выполнены своевременно и в полном объеме, что подтверждается:

-  актом о приемке выполненных работ КС-2 №1 от 15 июля 2020 года на сумму   281 657,47 рублей (Двести восемьдесят одна тысяча шестьсот пятьдесят семь рублей 47 коп.), с учетом НДС 20% - 46 942,91 рублей;

- справкой стоимости выполненных работ и затрат КС-3 №1 от 15 июля 2020 года на сумму 281 657,47 рублей (Двести восемьдесят одна тысяча шестьсот пятьдесят семь рублей 47 коп.), с учетом НДС 20% - 46 942,91 рублей.

Пунктом 3.1. ДС №3 Стороны определили, что Заказчик производит оплату работ по ДС №3 в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента подписания Сторонами актов выполненных работ (формы КС-2, КС-3) на основании предоставленного Подрядчиком оригинала Счета. Счет № 26 от 15 июля 2020 года на сумму 281 657,47 рублей (Двести восемьдесят одна тысяча шестьсот пятьдесят семь рублей 47 коп.), с учетом НДС 20% - 46942,91 рублей, не оплачен Ответчиком до настоящего момента.

 Пунктом 5.2. ДС №3 Стороны договорились, что во всем, что не предусмотрено Соглашением, Стороны руководствуются положениями Контракта № РиР-19-08-19 от 19 августа 2019 года.

С учетом данного обстоятельства и в соответствии с п.9.2 Контракта, сумма неустойки, которую Ответчик обязан выплатить в пользу Истца, за нарушение своих обязательств в части оплаты задолженности по Дополнительному соглашению №3 от 07 июля 2020 года к Контракту № РиР-19-08-19 от 19 августа 2019 года составляет 19 997,68  рублей.

Месяц

Начислено

Долг

Период просрочки

Формула

Пени

с

По

дней

23.07.2020

281 657,47

281657,47

23.07.2020

11.12.2020

142

281 657,47 × 142 × 0.05%

19 997,68 р.

Итого:

19 997,68 руб.

Сумма основного долга: 281 657,47 руб.

Сумма пеней по всем задолженностям: 19 997,68 руб.

Судом установлен факт надлежащего исполнения истцом обязательств по договору, что подтверждается подписанными сторонами без разногласий актами выполненных работ:

Вместе с тем, доказательств, подтверждающих оплату работ в полном объёме ответчиком в нарушение статьи 65 АПК РФ, суду не представлено и по существу не оспаривается ответчиком. 

Мотивированный отказ от подписания актов ответчик не заявил, как не представил возражений относительно объемов предъявленных к оплате выполненных работ.

Принятие работ свидетельствует о потребительской ценности произведенных работ для заказчика и желании ими воспользоваться. Таким образом, при приемке работ без разногласий ответчик обязан произвести ее оплату.

В связи с вышеизложенным, исковые требования в части взыскания долга и неустойки подлежат удовлетворению.

В силу части 1 статьи 66 АПК РФ лица, участвующие в деле, обязаны представлять доказательства. Эта обязанность основана на статье 65 АПК РФ, в соответствии с которой каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

В соответствии с частью 1 статьи 9 АПК РФ судопроизводство в арбитражном суде осуществляется на основе состязательности. Следовательно, нежелание представить доказательства должно квалифицироваться исключительно как отказ от опровержения того факта, на наличие которого аргументированно, со ссылкой на конкретные документы, указывает процессуальный оппонент. Участвующее в деле лицо, не совершившее процессуальное действие, несет риск наступления последствий такого своего поведения. Правовая позиция об этом сформулирована в Постановлениях Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 06.03.2012 N 12505/11, от 08.10.2013 N 12857/12.

Принцип диспозитивности, характерный для гражданских правоотношений, распространяет свое действие и на процессуальные отношения; в арбитражном процессе диспозитивность означает, что процессуальные отношения возникают, изменяются и прекращаются, главным образом, по инициативе непосредственных участников спорных правоотношений, которые имеют возможность с помощью суда распоряжаться процессуальными правами и спорным материальным правом.

Арбитражным судом при рассмотрении настоящего дела были созданы условия для установления фактических обстоятельств, имеющих существенное значение для правильного разрешения спора (часть 3 статьи 9, статья 66 АПК РФ).

В соответствии со ст. 110 АПК РФ расходы по оплате госпошлины возлагаются на ответчика пропорционально размеру удовлетворенных требований.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 110, 167-170, 171 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

РЕШИЛ:

Взыскать с ООО "РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС" (ИНН 

<

***>) в пользу ООО "КАПИТАЛСТРОЙ" (ИНН 

<

***>):

- задолженность в размере 542 972,47 рублей (Пятьсот сорок две тысячи девятьсот семьдесят два рубля 47 коп.), в том числе НДС 20% - 90495,41 рублей за выполненные Контракту № РиР-05-08-19 от 05 августа 2019 года работы;

- сумму неустойки в размере 517 696,36 рублей (Пятьсот семнадцать тысяч шестьсот девяносто шесть рублей 36 коп.) за просрочку обязательств по оплате, предусмотренных Контрактом №РиР-05-08-19 от 05 августа 2019 года;

- задолженность в размере 701 163,29 рублей (Семьсот одна тысяча сто шестьдесят три рубля 29 коп.), в том числе НДС 20% - 116 860,55 рублей, за выполненные по Контракту № РиР-12-09-19 от 12 февраля 2019 года работы;

- неустойку в размере 70 116,33 рублей (Семьдесят тысяч сто шестнадцать рублей 33 коп.) по Контракту № РиР-12-09-19 от 12 февраля 2019 года;

- задолженность в размере 6 504 098,38 рублей (Шесть миллионов пятьсот четыре тысячи девяносто восемь рублей 38 коп.), в том числе НДС 20% - 1084016,40 рублей, за работы, выполненные по Контракту № РиР-19-08-19 от 19 августа 2019 года (без учета стоимости работ, выполненных по дополнительным соглашениям);

- задолженность в размере 328 048,44 рублей (Триста двадцать восемь тысяч сорок восемь рублей 44 коп.) в части платы за предоставление рассрочки по Контракту № РиР-19-08-19 от 19 августа 2019 года;

- сумму неустойки за просрочку платежей по Контракту №РиР-19-08-19 от 19 августа 2019 года в размере 801 656,41 (Восьмисот одной тысячи шестисот пятидесяти шести рублей 41 коп.) (без учета неустойки за нарушение сроков оплаты работ по дополнительным соглашениям);

- задолженность в размере 357 213,78 рублей (Триста пятьдесят семь тысяч двести тринадцать рублей 78 коп.), в том числе НДС 20% - 59535,63 рублей, за работы, выполненные по Дополнительному соглашению №1 от 19 декабря 2019 года к Контракту № РиР-19-08-19 от 19 августа 2019 года;

- неустойку в размере 57 868,63 рублей (Пятьдесят семь тысяч восемьсот шестьдесят восемь рублей 63 коп.) за нарушение обязательств в части оплаты задолженности по Дополнительному соглашению №1 от 19 декабря 2019 года к Контракту № РиР-19-08-19 от 19 августа 2019 года;

- задолженность в размере 342 870,37 рублей (Триста сорок две тысячи восемьсот семьдесят рублей 37 коп.), в том числе НДС 20% - 57145,06 рублей, за работы, выполненные по Дополнительному соглашению №2 от 20 декабря 2019 года к Контракту № РиР-19-08-19 от 19 августа 2019 года;

- неустойку в размере 44 916,02 рублей (Сорок четыре тысячи девятьсот шестнадцать рублей 02 коп.) за нарушение обязательств в части оплаты задолженности по Дополнительному соглашению №2 от 20 декабря 2019 года к Контракту № РиР-19-08-19 от 19 августа 2019 года;

- задолженность в размере 281 657,47 рублей (Двести восемьдесят одна тысяча шестьсот пятьдесят семь рублей 47 коп.), с учетом НДС 20% - 46 942,91 рублей, за работы, выполненные по Дополнительному соглашению №3 от 07 июля 2020 года к Контракту №РиР-19-08-19 от 19 августа 2019 года;

- неустойку в размере 19 997,68 рублей (Девятнадцать тысяч девятьсот девяносто семь рублей 68 коп.), за нарушение обязательств в части оплаты задолженности по Дополнительному соглашению №3 от 07 июля 2020 года к Контракту № РиР-19-08-19 от 19 августа 2019 года;

- расходы по оплате государственной пошлины в сумме 75 851 руб. 

Возвратить ООО "КАПИТАЛСТРОЙ" (ИНН 

<

***>) из федерального бюджета государственную пошлину в  размере 1 250 руб.

Решение может быть обжаловано в течение месяца после его принятия путем подачи апелляционной жалобы в Девятый арбитражный апелляционный суд.

 

Судья                                                                П.С.  Гутник