312/2022-246518(1) 

 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 410002, г. Саратов, ул. Бабушкин взвоз, д. 1; тел/ факс: (8452) 98-39-39; 

http://www.saratov.arbitr.ru; e-mail: info@saratov.arbitr.ru  

Именем Российской Федерации 

Р Е Ш Е Н И Е (резолютивная часть)

Дело № А57-12552/2022

город Саратов

21 октября 2022 года

Руководствуясь статьями 49, 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации, арбитражный суд  

Р Е Ш И Л:

Обязать общество с ограниченной ответственностью Специализированный Застройщик  «Межрегионстрой» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>), город Энгельс, Саратовская  область в течение 30 дней с момента вступления решения суда в законную силу безвозмездно  устранить недостатки, по государственному контракту № 0860500000221000022 от 01 июня  2021 года на объекте: «Областная инфекционная больница на 400 коек, расположенная по  адресу: г.Саратов, Ленинский район, Московское шоссе, б/н, на земельном участке с  кадастровым номером 64:48:040209:8», выполнив следующие виды работ согласно перечня:  

Перечень работ 

Объем работ 

1. Произвести заделку отверстий в противопожарных стенах в  подвале корпуса № 6 после прокладки коммуникаций  

1,8 м3  

2. Произвести окраску технологических отверстий на фасаде  корпуса № 2  

1,2 м2  

3. Произвести повторные пусконаладочные работы слаботочных  систем (СКУД, часофикация и др.) и в корпусах № 2 и № 6  

10 систем  

4. Произвести повторные пусконаладочные работы и повторное  испытание противопожарной сигнализации, системы оповещения  людей о пожаре, противодымной вентиляции в корпуса № 2 и № 6  

6 систем  

5. Произвести демонтаж и устройство напольного покрытия на  консолях, торцевых лестницах и лифтовых холлах в лечебных  

221 м2  

 

корпусах № 2 и № 6, а также в районе температурных швов 

 

6. Произвести заделку щелей под порогами наружных дверей  ПВХ из палат в корпусах № 2 и № 6  

54 м.п.  

7. Произвести монтаж дополнительного уплотнения для плотного  прилегания дверей снизу в корпусах № 2 и № 6  

72 м.п.  

8. Произвести ремонт петель дверей в корпусах № 2 и № 6 

2 шт. 

9. Произвести регулировку запорной арматуры дверей в корпусах   № 2 и № 6 (замки)  

42 шт.  

10. Произвести окраску участков в районе температурных швов  на фасаде лечебных корпусов № 2 и № 6  

6 м2. 

11. Произвести монтаж трубопроводов системы сброса  конденсата с вентиляционных установок в подвале корпуса № 2  

11 м.п.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью Специализированный  Застройщик «Межрегионстрой» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>), город Энгельс,  Саратовская область в доход федерального бюджета государственную пошлину в размере 6 000  руб.  

Решение арбитражного суда вступает в законную силу по истечении месячного срока со  дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба.  

Исполнительный лист выдать взыскателю после вступления решения в законную силу. 

Решение арбитражного суда может быть обжаловано в апелляционную или  кассационную инстанции в порядке, предусмотренном главами 34, 35 раздела VI Арбитражного  процессуального кодекса Российской Федерации. Соответствующая жалоба подается через  принявший решение в первой инстанции арбитражный суд.  

Направить копии решения арбитражного суда лицам, участвующим в деле, в  соответствии с требованиями статьи 177 Арбитражного процессуального кодекса Российской  Федерации.  

Судья А.В. Кузьмин 

Электронная подпись действительна.Данные ЭП:Удостоверяющий центр Федеральное казначействоДата 15.12.2021 9:55:51

 Кому выдана Кузьмин Андрей Викторович