Арбитражный суд Амурской области

675023, г. Благовещенск, ул. Ленина, д. 163

тел. (4162) 59-59-00, факс (4162) 51-83-48

http://www.amuras.arbitr.ru

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

Дело  №

А04-6478/2024

г. Благовещенск

09 октября 2024 года

В соответствии с частью 2 статьи 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации решение изготовлено 09.10.2024. Резолютивная часть решения объявлена 07.10.2024.

Арбитражный суд Амурской области в составе судьи О.В. Швец,

при ведении протокола с использованием средств аудиозаписи секретарем судебного заседания Е.Б. Воропаевой,

рассмотрев в открытом судебном заседании исковое заявление Управления записи актов гражданского состояния Амурской области (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) к обществу с ограниченной ответственностью «Амурдом» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) об обязании выполнить работы,

при участии в заседании:

от истца: ФИО1, по доверенности № 49 от 02.07.2024, паспорт, диплом;от ответчика: не явился, извещен,

установил:

в Арбитражный суд Амурской области обратилось Управление записи актов гражданского состояния Амурской области (далее – истец, Управление ЗАГС Амурской области) к обществу с ограниченной ответственностью «Амурдом» (далее – ответчик, ООО «Амурдом») с исковым заявлением об обязании в срок до 01.10.2024 безвозмездно устранить недостатки работ по государственному контракту на выполнение работ № 0379 от 04.04.2022, а именно:

- заменить поврежденные гранитные плиты, расположенные по адресу на центральном крыльце здания в количестве 13 шт.;

- заменить поврежденную гранитную плиту, расположенную на пандусе, примыкающем к центральному крыльцу в количестве 1 шт.;

- заменить плиты облицовочные типа «ФАССТ», размещенные по фасаду здания в количестве 4 шт.;

- произвести ремонт отливов в количестве 2 шт.

Заявленные требования обоснованы тем, что ответчик в рамках гарантийных обязательств по государственному контракту на выполнение работ № 0379 от 04.04.2022 обязан устранить недостатки выявленных работ.

Представитель истца в судебном заседании 07.10.2024 заявил ходатайство об уточнении исковых требований, по которым просил обязать ответчика в рамках исполнения гарантийных обязательств по государственному контракту в течение 14 дней с момента вступления решения суда в законную силу:

- заменить поврежденные гранитные плиты, расположенные по адресу на центральном крыльце здания в количестве 13 шт.;

- заменить поврежденную гранитную плиту, расположенную на пандусе, примыкающем к центральному крыльцу в количестве 1 шт.;

- заменить плиты облицовочные типа «ФАССТ», размещенные по фасаду здания в количестве 4 шт.;

- произвести ремонт отливов в количестве 2 шт.

Судом в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ) приняты уточненные требования к рассмотрению.

Ответчик в судебное заседание не явился, о времени и месте рассмотрения дела извещен надлежащим образом, в соответствии со статьями 121, 123 АПК РФ, отзыв и запрошенные судом документы не представил.

Ответчик извещен о рассмотрении дела заказными письмами с уведомлениями с почтовыми идентификаторами № 67503098418566 (адрес: 675004, 

<

...>), письмо возвращено в суд; № 67503099432844 (адрес: 675004, 

<

...>), письмо возвращено в суд; № 67503099432851 (адрес: 675004, 

<

...>), письмо возвращено в суд с отметкой организации почтовой связи «истек срок хранения».

Кроме того, судом в ходе рассмотрения дела удовлетворено ходатайство ответчика об ознакомлении с материалами дела в электронном виде (вх. № 66566 от 01.08.2024). При указанных обстоятельствах суд признает ответчика надлежащим образом уведомленным о начавшемся судебном разбирательстве.

Дело рассматривалось в отсутствие представителя ответчика на основании статьи 156 АПК РФ.

Рассмотрев материалы дела, изучив позицию истца, суд установил следующие обстоятельства.

Между истцом (заказчик) и ответчиком (подрядчик) заключен государственный контракт на выполнение работ № 0379 от 04.04.2022 (далее – контракт), по условиям пункта 1.1. которого, подрядчик обязуется по заданию заказчика выполнить работы по текущему ремонту главного входа, боковых крылец, цокольного этажа и подвала отдела ЗАГС по г. Благовещенск и Благовещенскому району (далее – работы) в соответствии с техническим заданием (приложение № 1), и сдать их результат заказчику, а заказчик обязуется принять выполненные работы и оплатить их в порядке и на условиях, предусмотренных контрактом.

В соответствии с пунктом 2.1. контракта, цена контракта составляет 2 526 258,38 руб., без НДС.

В силу пункта 3.1. контракта, работы, предусмотренные настоящим контрактом, выполняются подрядчиком в соответствии с техническим заданием (приложение № 1) в следующие сроки:

- начало работ: с момента заключения контракта в течение одного дня;

- окончание работ: в течение 30 календарных дней с момента заключения контракта.

Пунктом 5.11. контракта предусмотрено, что гарантийный срок на выполненные работы составляет не менее 36 месяцев с даты подписания сторонами акта о приемке.

06.06.2022 сторонами подписаны акты о приемке выполненных работ по форме № КС-2 на сумму 1 771 066 руб.

06.06.2022 сторонами подписана справка о стоимости выполненных работ и затрат № 1 по форме № КС-2 на сумму 1 771 066 руб.

Истец платежным поручением № 907 от 10.06.2022 произвел оплату по контракту на сумму 1 771 066 руб.

Истцом утвержден локальный сметный расчет № 1-Д на сумму 4 448 766 руб.

Истец платежным поручением № 1211 от 26.07.2022 произвел оплату по контракту на сумму 4 448 766 руб.

В соответствии с пунктом 5.12. контракта, в течение гарантийного срока подрядчик обязан устранять за свой счет все неисправности, недостатки, дефекты в течение 14 дней с момента получения письменного требования заказчика.

Гарантийный срок продлевается до тех пор, пока подрядчик не устранит все недостатки и дефекты, что должно быть подтверждено актом об их устранении.

Истцом в адрес ответчика 19.04.2023 направлено требование № 03-22/499 от 18.04.2023 об устранении недостатков в рамках гарантийных обязательств.

Истцом в адрес ответчика 15.06.2023 направлено требование № 03-22/747 от 13.06.2023 об устранении недостатков в рамках гарантийных обязательств.

Истцом в адрес ответчика 19.10.2023 направлено требование № 03-19/1409 от 13.10.2023 об устранении недостатков в рамках гарантийных обязательств.

Ответчик в ответ на требование № 03-19/1409 от 13.10.2023 письмом № 333 от 07.11.2023 указал о том, что для всестороннего понимания, являются ли повреждения виной ООО «АмурДом», необходимо организовать встречу в более теплый период на май 2024 года. В случае, если данные повреждения будут относиться в гарантийным обязательствам, готов заменить плиты в сроки, установленные контрактом.

Истцом в адрес ответчика 26.04.2024 направлено требование № 03-22/612 от 26.04.2024 об устранении недостатков в рамках гарантийных обязательств.

Оставленные ответчиком без удовлетворения требования послужили основанием для подачи настоящего искового заявления в суд.

Сложившиеся между сторонами правоотношения подлежат регулированию нормами главы 37 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) о подряде.

В соответствии со статьями 309, 310 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями; односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются.

В соответствии с пунктом 1 статьи 702 ГК РФ по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

К отдельным видам договора подряда (бытовой подряд, строительный подряд, подряд на выполнение проектных и изыскательских работ, подрядные работы для государственных нужд) положения, предусмотренные настоящим параграфом, применяются, если иное не установлено правилами настоящего Кодекса об этих видах договоров (пункт 2 статьи 702 ГК РФ).

В соответствии с пунктом 1 статьи 763 ГК РФ подрядные строительные работы (статья 740), проектные и изыскательские работы (статья 758), предназначенные для удовлетворения государственных или муниципальных нужд, осуществляются на основе государственного или муниципального контракта на выполнение подрядных работ для государственных или муниципальных нужд.

По государственному или муниципальному контракту на выполнение подрядных работ для государственных или муниципальных нужд подрядчик обязуется выполнить строительные, проектные и другие связанные со строительством и ремонтом объектов производственного и непроизводственного характера работы и передать их государственному или муниципальному заказчику, а государственный или муниципальный заказчик обязуется принять выполненные работы и оплатить их или обеспечить их оплату (пункт 2 статьи 763 ГК РФ)

В силу пункта 1 статьи 753 ГК РФ заказчик, получивший сообщение подрядчика о готовности к сдаче результата выполненных по договору строительного подряда работ либо, если это предусмотрено договором, выполненного этапа работ, обязан немедленно приступить к его приемке.

Согласно пункту 4 статьи 753 ГК РФ сдача результата работ подрядчиком и приемка его заказчиком оформляются актом, подписанным обеими сторонами. При отказе одной из сторон от подписания акта в нем делается отметка об этом и акт подписывается другой стороной. Односторонний акт сдачи или приемки результата работ может быть признан судом недействительным лишь в случае, если мотивы отказа от подписания акта признаны им обоснованными.

Пунктом 1 статьи 721 ГК РФ установлено, что качество выполненной подрядчиком работы должно соответствовать условиям договора подряда, а при отсутствии или неполноте условий договора - требованиям, обычно предъявляемым к работам соответствующего рода.

В соответствии с частью 1 статьи 722 ГК РФ в случае, когда законом, иным правовым актом, договором подряда или обычаями делового оборота предусмотрен для результата работы гарантийный срок, результат работы должен в течение всего гарантийного срока соответствовать условиям договора о качестве.

Гарантия качества результата работы, если иное не предусмотрено договором подряда, распространяется на все, составляющее результат работы (часть 2 статьи 722 ГК РФ).

Заказчик вправе предъявить требования, связанные с недостатками результата работы, обнаруженными в течение гарантийного срока (пункт 3 статьи 724 ГК РФ).

Абзацем 2 части 1 статьи 723 ГК РФ установлено, что в случаях, когда работа выполнена подрядчиком с отступлениями от договора подряда, ухудшившими результат работы, заказчик вправе потребовать от подрядчика безвозмездного устранения недостатков в разумный срок.

Согласно пункту 2 статьи 755 ГК РФ подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в пределах гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа объекта или его частей, неправильной его эксплуатации или неправильности инструкций по его эксплуатации, разработанных самим заказчиком или привлеченными им третьими лицами, ненадлежащего ремонта объекта, произведенного самим заказчиком или привлеченными им третьими лицами.

Судом установлено, что гарантийный срок на работы составляет не менее 36 месяцев с даты подписания сторонами акта о приемке (пункт 5.11. контракта). Факт выявления недостатков в пределах гарантийного срока подтверждается требованиями  03-22/499 от 18.04.2023, № 03-22/747 от 13.06.2023, № 03-19/1409 от 13.10.2023, № 03-22/612 от 26.04.2024.

Разногласий относительно качества выполненных подрядчиком работ, ответчик при рассмотрении спора в суде не заявил, ходатайство о назначении по делу судебной экспертизы также ответчиком не заявлено.

Судом установлено, что в рамках гарантийного обязательства по государственному контракту истцом выявлены дефекты:

- поврежденные гранитные плиты, расположенные по адресу на центральном крыльце здания в количестве 13 шт.;

- поврежденная гранитная плита, расположенная на пандусе, примыкающем к центральному крыльцу в количестве 1 шт.;

- плиты облицовочные типа «ФАССТ», размещенные по фасаду здания в количестве 4 шт.;

- ремонт отливов в количестве 2 шт.

Суды пришел к выводу о том, что материалами дела подтвержден факт наличия недостатков, допущенных при выполнении работ.

Доказательств устранения недостатков, выявленных истцом, не представлено.

Поскольку ответчик не устранил недостатки по контракту, суд считает требование обоснованными и подлежащим удовлетворению.

Исходя из разъяснений, данных в пункте 27 постановления Пленума Верховного суда РФ от 24.03.2016 № 7 «О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса РФ об ответственности за нарушение обязательств», удовлетворяя требование кредитора о понуждении к исполнению обязательства в натуре, суд обязан установить срок, в течение которого вынесенное решение должно быть исполнено (часть 2 статьи 174 АПК РФ). При установлении указанного срока, суд учитывает возможности ответчика по его исполнению, степень затруднительности исполнения судебного акта, а также иные заслуживающие внимания обстоятельства.

В соответствии с пунктом 5.12. контракта, в течение гарантийного срока подрядчик обязан устранять за свой счет все неисправности, недостатки, дефекты в течение 14 дней с момента получения письменного требования заказчика.

При таких обстоятельствах, суд обязывает ООО «Амурдом» в течение 14 дней со дня вступления решения в законную силу безвозмездно устранить недостатки работ по государственному контракту на выполнение работ № 0379 от 04.04.2022.

В соответствии со статьей 333.21 Налогового кодекса Российской Федерации, размер государственной по заявленным требованиям составляет 6 000 руб.

Истец на основании статьи 333.37 Налогового кодекса Российской Федерации освобожден от уплаты государственной пошлины.

На основании статьи 110 АПК РФ, расходы по уплате государственной пошлины в размере 6 000 руб. подлежат отнесению на ответчика и подлежат взысканию в доход федерального бюджета.

Руководствуясь статьями 49, 110, 167-170, 180 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,

решил:

обязать общество с ограниченной ответственностью «Амурдом»  (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) в течение 14 дней со дня вступления решения в законную силу безвозмездно устранить недостатки работ по государственному контракту на выполнение работ № 0379 от 04.04.2022, а именно:

- заменить поврежденные гранитные плиты, расположенные по адресу на центральном крыльце здания в количестве 13 шт.;

- заменить поврежденную гранитную плиту, расположенную на пандусе, примыкающем к центральному крыльцу в количестве 1 шт.;

- заменить плиты облицовочные типа «ФАССТ», размещенные по фасаду здания в количестве 4 шт.;

- произвести ремонт отливов в количестве 2 шт.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Амурдом» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) в доход федерального бюджета государственную пошлину в размере 6000 руб.

Исполнительный лист выдается по ходатайству взыскателя или по его ходатайству направляется для исполнения непосредственно арбитражным судом.

Для направления исполнительного листа на взыскание денежных средств в доход бюджета ходатайство взыскателя не требуется.

Решение вступает в законную силу по истечении месяца со дня его принятия,  если не подана апелляционная жалоба.

Решение может быть обжаловано в течение месяца со дня его принятия в Шестой арбитражный апелляционный суд (г. Хабаровск) через Арбитражный суд Амурской области.

 

Судья                                                                                         О.В. Швец