4/2020-58355(1) 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ Именем Российской Федерации 

Р Е Ш Е Н И Е  резолютивная часть

Дело № А34-13814/2019

г. Курган

18 августа 2020 года

Арбитражный суд Курганской области 

в составе: судьи Т.Г. Крепышевой, при ведении протокола судебного  заседания в письменном виде секретарём ФИО1, с  использованием средства аудиозаписи, рассмотрев в судебном заседании  дело по исковому заявлению Некоммерческой организации «Региональный  фонд капитального ремонта многоквартирных домов Курганской области»  (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) к Обществу с ограниченной  ответственностью «Арагацстрой» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>)  об обязании устранить недостатки и взыскании штрафа в размере 45885  рублей 90 копеек.  

Руководствуясь статьями 167 – 170, 171, 176 Арбитражного  процессуального кодекса Российской Федерации, суд  

решил:

Иск удовлетворить частично. 

Обязать Общество с ограниченной ответственностью «Арагацстрой»  (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) в течение одного месяца с даты  вступления решения в законную силу за свой счёт устранить выявленные  недостатки в выполненных работах по договору подряда от 26.04.2016 № КР- 033/16, установленные актом от 08.04.2019 по многоквартирному дому по  адресу 

<

...>: - по периметру здания выполнить  герметизацию водосточных настенных желобов; - по периметру здания  восстановить снегозадержание; - по периметру здания выполнить  герметизацию примыкания вентиляционных труб; - со стороны торцевого  фасада по ул. Пролетарской, 59 в осях Б-В на цокольной части здания на  расстоянии 3,5 метра от правого угла высотой 1 метр от уровня земли  восстановить штукатурный и окрасочный слои по подготовленной  поверхности, площадью 2 кв.м; - со стороны торцевого фасада по ул. Гоголя  в осях 5-2 на расстоянии 7 метров от правого угла высотой 2 метра от уровня  земли восстановить штукатурный и окрасочный слой по подготовленной  поверхности, площадью 20 кв.м.  

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью  «Арагацстрой» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) в пользу  

Некоммерческой организации «Региональный фонд капитального ремонта  многоквартирных домов Курганской области» (ОГРН 1134500000623, ИНН  4501177616) штраф в размере 45885 рублей 90 копеек, расходы по уплате  государственной пошлины 8000 рублей, всего 53885 рублей 90 копеек.  

В остальной части иска отказать. 

Решение может быть обжаловано в порядке апелляционного  производства в Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение  месяца со дня его принятия (изготовления его в полном объёме).  

Апелляционная жалоба подаётся через Арбитражный суд Курганской  области.  

Судья Т.Г. Крепышева  

Электронная подпись действительна.Данные ЭП:Удостоверяющий центр ФГБУ ИАЦ СудебногодепартаментаДата 14.07.2020 7:04:35

Кому выдана Крепышева Татьяна Геннадьевна