4494/2022-518433(1) 

 

Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области  

191124, Санкт-Петербург, ул. Смольного, д.6 

http://www.spb.arbitr.ru 

Именем Российской Федерации 

РЕШЕНИЕ

Дело № А56-74736/2021

01 сентября 2022 года

г.Санкт-Петербург

 

Резолютивная часть решения объявлена 19 августа 2022 года.  Полный текст решения изготовлен 01 сентября 2022 года.  

Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области в составе: судьи Суркова А. А., 

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1,  

рассмотрев в судебном заседании дело по иску: 

истец: ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СИЛОВЫЕ МАШИНЫ - ЗТЛ,  ЛМЗ, ЭЛЕКТРОСИЛА, ЭНЕРГОМАШЭКСПОРТ"  

ответчик: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОРПОРАЦИЯ  АКЦИОНЕРНОЙ КОМПАНИИ "ЭЛЕКТРОСЕВКАВМОНТАЖ"  

о взыскании, при участии - от истца: ФИО2 (доверенность от 06.09.2021), - от ответчика: не явился, извещен, 

установил:

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СИЛОВЫЕ МАШИНЫ - ЗТЛ, ЛМЗ,  ЭЛЕКТРОСИЛА, ЭНЕРГОМАШЭКСПОРТ" (далее – Общество, АО  «СИЛОВЫЕ МАШИНЫ») обратилось в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области с иском к ОБЩЕСТВО С  ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОРПОРАЦИЯ АКЦИОНЕРНОЙ  КОМПАНИИ "ЭЛЕКТРОСЕВКАВМОНТАЖ" (далее – Корпорация, ООО  «Корпорация АК «ЭСКМ») о взыскании по Договору №  00000000725956180123/18376/131178 от 07.12.2016 на изготовление и поставку в Место  поставки для энергоблоков № 1 и № 2 Курской АЭС-2 комплектное Оборудование в  объеме, сроки, по ценам и на условиях, указанных в Приложениях №№ 1.1 и № 1.2 к  Договору, в соответствии с Техническими требованиями к основному и  вспомогательному Оборудованию машзала энергоблоков № 1 и № 2 Курской АЭС-2 и  указанными в них объемом, границами проектирования и поставки, разделением работ  и прочими требованиями, указанными в Договоре (далее – Договор) неустоек за  нарушение:  

- срока предоставления обеспечений, указанных в Приложении № 30 к  

Договору, в соответствии с п. 10.2 Договора в размере 987 152,83 руб.; 

- сроков поставки Оборудования для энергоблока № 1 Курской АЭС-2,  

указанного в Приложении № 1.1 к Договору, в соответствии с п. 10.5 Договора  

в размере 1 581 139,09 руб.; 

- срока исполнения п. 4.2.2 Договора в соответствии с п. 10.8 Договора в  

размере 975 000,00 руб. 

Решением от 03.07.2022 заявленные требования удовлетворены частично: с  общества с ограниченной ответственностью "КОРПОРАЦИЯ АКЦИОНЕРНОЙ  КОМПАНИИ "ЭЛЕКТРОСЕВКАВМОНТАЖ" в пользу акционерного общества  "СИЛОВЫЕ МАШИНЫ - ЗТЛ, ЛМЗ, ЭЛЕКТРОСИЛА, ЭНЕРГОМАШЭКСПОРТ"  взыскано 1 581 139,09 руб. пени за просрочку поставки, в остальной части в иске  отказано.  

Между тем при внесении указанного решения не были рассмотрены требования  истца о взыскании 26 364,24 руб. неустойки за нарушение срока предоставления  обеспечения надлежащего исполнения в части гарантийных обязательств, блок № 1 (п.  7.2.1 Договора), а также о распределении государственной пошлины.  

В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 178 Арбитражного процессуального  кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ) арбитражный суд, принявший  решение, до вступления этого решения в законную силу по своей инициативе вправе  принять дополнительное решение, в случае если по какому-либо требованию, в  отношении которого лица, участвующие в деле представили доказательства, судом не  было принято решение.  

В судебном заседании представитель истца поддержал заявленные требования.  

Ответчик, извещенный надлежащим образом о времени и месте судебного  разбирательства, в судебное заседание своих представителей не направил, что в силу  части 3 статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации  (далее – АПК РФ) не является препятствием для рассмотрения дела в их отсутствие.  

Оценив материалы дела в порядке, предусмотренном статьей 71 АПК РФ,  арбитражный суд пришел к следующим выводам.  

В силу статей 309 и 310 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК  РФ) обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с  условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при  отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота  или иными обычно предъявляемыми требованиями. Односторонний отказ от  исполнения обязательства не допускается.  

В соответствии со статьей 506 ГК РФ по договору поставки поставщик-продавец,  осуществляющий предпринимательскую деятельность, обязуется передать в  обусловленный срок или сроки производимые или закупаемые им товары покупателю  для использования в предпринимательской деятельности или в иных целях, не  связанных с личным, семейным, домашним и иным подобным использованием.  

Согласно статье 702 ГК РФ по договору подряда одна сторона (подрядчик)  обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и  сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить  его.  

Таким образом, сторонами заключен смешанный договор, содержащий элементы  договора поставки и договора подряда.  

В соответствии с пунктом 1 статьи 708 ГК РФ в договоре подряда указываются  начальный и конечный сроки выполнения работы; по согласованию между сторонами в  договоре могут быть предусмотрены также сроки завершения отдельных этапов работы  (промежуточные сроки). Если иное не установлено законом, иными правовыми актами  или не предусмотрено договором, подрядчик несет ответственность за нарушение как  начального и конечного, так и промежуточных сроков выполнения работы.  

В силу статьи 65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать  обстоятельства, на которые оно ссылается в обоснование своих требований и  возражений.  

Согласно пункту 1 статьи 330 ГК РФ неустойкой (штрафом, пеней) признается  определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан  уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения  обязательства, в частности в случае просрочки исполнения.  

Против требования о взыскании 26 364,24 руб. неустойки за нарушение срока  предоставления обеспечения надлежащего исполнения в части гарантийных  обязательств, блок № 1 (п. 7.2.1 Договора), ответчик каких-либо возражений не заявил,  обоснованность такого требования подтверждается материалами дела.  

Согласно части 1 статьи 65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно  доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований  и возражений.  

В соответствии с частью 3.1 статьи 70 АПК РФ обстоятельства, на которые  ссылается сторона в обоснование своих требований или возражений, считаются  признанными другой стороной, если они ею прямо не оспорены или несогласие с  такими обстоятельствами не вытекает из иных доказательств, обосновывающих  представленные возражения относительно существа заявленных требований.  

В силу закрепленного в статье 9 АПК РФ принципа состязательности  арбитражного судопроизводства, лица, участвующие в деле, несут риск наступления  последствий совершения или не совершения ими процессуальных действий.  

С учетом изложенного, названное требование надлежит удовлетворить.  

В соответствии с пунктом 1 статьи 110 АПК РФ судебные расходы, понесенные  лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются  арбитражным судом со стороны.  

Руководствуясь статьями 167-170 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации, Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской  области  

решил:

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "КОРПОРАЦИЯ  АКЦИОНЕРНОЙ КОМПАНИИ "ЭЛЕКТРОСЕВКАВМОНТАЖ" в пользу  акционерного общества "СИЛОВЫЕ МАШИНЫ - ЗТЛ, ЛМЗ, ЭЛЕКТРОСИЛА,  ЭНЕРГОМАШЭКСПОРТ" 26 364,24 руб. неустойки за нарушение срока  предоставления обеспечения надлежащего исполнения в части гарантийных  обязательств, блок № 1 (п. 7.2.1 Договора), 18 326,48 руб. в возмещение судебных  расходов на уплату государственной пошлины.  

Решение может быть обжаловано в Тринадцатый арбитражный апелляционный  суд в течение месяца со дня принятия Решения.  

Судья Сурков А. А. 

Электронная подпись действительна.Данные ЭП:Удостоверяющий центр Федеральное казначействоДата 22.12.2021 8:20:06

 Кому выдана Сурков Андрей Александрович