АРБИТРАЖНЫЙ СУД КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

 

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

РЕШЕНИЕ

02 декабря 2022 года

Дело № А33-21594/2022

Красноярск

Резолютивная часть решения объявлена в судебном заседании 25 ноября 2022 года.

В полном объёме решение изготовлено 02 декабря 2022 года.

Арбитражный суд Красноярского края в составе судьи Антроповой О.А., рассмотрев в судебном заседании дело по иску краевого государственного казённого учреждения «Управление автомобильных дорог по Красноярскому краю» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>)

к закрытому акционерному обществу «Базилик» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>)

о взыскании неустойки,

в присутствии в судебном заседании:

от истца: ФИО1, действующего на основании доверенности от 05.07.2022 № 66;

от ответчика: ФИО2, действующей на основании доверенности от 26.10.2021;

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО3,

установил:

краевое государственное казённое учреждение «Управление автомобильных дорог по Красноярскому краю» (далее – истец) обратилось в Арбитражный суд Красноярского края с иском к закрытому акционерному обществу «Базилик» (далее – ответчик) о взыскании неустойки за нарушение обязательств по государственному контракту от 29.03.2021 № ПТР-51/21 в размере 976 128 руб.

 Исковое заявление принято к производству суда. Определением от 05.09.2022 возбуждено производство по делу.

Представитель истца исковые требования поддержал в полном объеме по основаниям, изложенным в исковом заявлении.

Представитель ответчика возражал против удовлетворения исковых требований по доводам, изложенным в отзыве на исковое заявление.

В судебном заседании, состоявшемся 17.11.2022, на основании статьи 163 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, объявлен перерыв до 23.11.2022.

В судебном заседании, состоявшемся 23.11.2022, на основании статьи 163 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, объявлен перерыв до 25.11.2022.

При рассмотрении дела установлены следующие, имеющие значение для рассмотрения спора, обстоятельства.

Между краевым государственным казённым учреждением «Управление автомобильных дорог по Красноярскому краю» (заказчик) и закрытым акционерным обществом «Базилик» (исполнитель) заключен государственный контракт от 29.03.2021 № ПТР-51/21, по условиям которого исполнитель принимает на себя обязательства по организации и выполнению всего комплекса работ на разработку проекта архитектурно-художественного оформления элементов благоустройства участков автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения Красноярского края, в соответствии с условиями контракта, техническим заданием заказчика, документацией о закупке и передать результаты качественно выполненных работ в полном объёме заказчику, а заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его в порядке и на условиях, предусмотренных контрактом.

Согласно пункту 2.1 цена контракта составляет 12 300 000 руб., НДС не облагается.

В соответствии с пунктом 2.3 контракта цена каждого этапа устанавливается в размере, сниженном пропорционально снижению начальной (максимальной) цены контракта согласно Графику финансирования (приложение 1).

В пункте 3.1 контракта указаны следующие сроки действия контракта: начало - с момента заключения контракта; окончание - 30.09.2021.

В пункте 3.2 контракта указаны сроки выполнения работ по контракту: начало - с момента заключения контракта; окончание - не более 90 календарных дней с момента заключения контракта. Сроки выполнения конкретных видов работ определяются Календарным планом выполнения работ (приложение 2).

В пункте 4.2.1 контракта предусмотрена обязанность исполнителя своевременно и качественно выполнить работы, предусмотренные контрактом, в соответствии с утвержденным Заданием, Календарным планом выполнения работ (приложение 2), Графиком финансирования (приложение 1), Перечнем нормативно-технических документов, обязательных при выполнении работ (приложение 5) и другими действующими нормативно-техническими документами.

В соответствии с пунктом 4.2.2 контракта исполнитель обязан в срок до первого числа месяца, следующего за отчетным, в соответствии с Календарным планом выполнения работ (приложение 2), предъявлять и сдавать выполненные объемы работ с оформлением акта выполненных работ (Приложение 4). При необходимости по требованию заказчика представить документы, подтверждающие выполнение предъявляемых к сдаче объемов работ. Вышеуказанное требование заказчика оформляется в письменной форме с указанием перечня документов и срока их предоставления.

В силу пункта 4.2.10 государственного контракта исполнитель обязан отчитываться перед заказчиком о выполнении работы по каждому этапу Календарного плана выполнения работ (приложение 2), путем составления акта выполненных работ (приложение 4), в котором отмечаются все выполненные по этапу работы и предъявляются все полученные по данному этапу материалы.

Согласно пункту 4.2.13 контракта исполнитель обязан немедленно письменно известить заказчика и, до получения от него указаний, приостановить работы по разработке документации при обнаружении, независящих от исполнителя обстоятельств, создающих невозможность завершения работ в срок, установленный контрактом.

Исполнитель в соответствии с условиями контракта обязан своевременно предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении контракта, а также к установленному контрактом сроку обязан предоставить заказчику результаты выполнения работ, предусмотренные контрактом, при этом заказчик обязан обеспечить приемку выполненных работ в соответствии с условиями Контракта (пункт 6.1 контракта).

Под отдельным этапом работ понимается комплекс работ по разработке проекта архитектурно-художественного оформления элементов благоустройства участков автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения Красноярского края, установленный Календарным планом выполнения работ (приложение 2).

Передача выполненных работ заказчику осуществляется в соответствии с Календарным планом выполнения работ (приложение 2). Фактом передачи в адрес заказчика готовой документации или ее отдельной части, предусмотренной Календарным планом выполнения работ (Приложение 2), считается передача готовой документации или ее отдельных частей с сопроводительным письмом или накладной, в которых указывается дата передачи (пункт 6.2 контракта).

В пункте 6.3 государственного контракта указано, что одновременно с передаваемой в адрес заказчика готовой документацией, либо отдельной ее части, исполнитель направляет заказчику подписанный со своей стороны акт выполненных работ (приложение 4), в котором указывается дата его направления в адрес заказчика, и счет-фактуру, оформленный в соответствии с действующим законодательством. В том случае, если к оплате предъявляется часть работ, предусмотренных контрактом, то их оплата осуществляется в соответствии с Ведомостью стоимости работ (приложение 3).

Пунктом 11.2.1 контракта предусмотрено, что в случае просрочки исполнения исполнителем обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения исполнителем обязательств, предусмотренных контрактом, заказчик направляет исполнителю требование об уплате неустоек (штрафов, пеней). Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение исполнителем обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

Согласно пункту 11.2.2 контракта пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения исполнителем обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта (отдельного этапа исполнения контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения контракта) и фактически исполненных исполнителем, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

В Календарном плане выполнения всего комплекса работ на разработку проекта архитектурно-художественного оформления элементов благоустройства участков автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения Красноярского края (приложение № 2 к государственному контракту) указаны следующие сроки выполнения работ:

1.Исходные данные - 10 календарных дней с момента подписания контракта;

2.Анализ существующих объектов дорожного сервиса - 25 календарных дней с момента подписания контракта;

3.Эскизные решения - 25 календарных дней с момента согласования части 1, но не более 70 календарных дней с момента подписания контракта

4. Стандарт организации объектов дорожного сервиса - 20 календарных дней с момента согласования части 2, но не более 90 календарных дней с момента подписания контракта.

В приложении № 3 к государственному контракту указана стоимость работ по выполнению всего комплекса работ на разработку проекта архитектурно-художественного оформления элементов благоустройства участков автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения Красноярского края на сумму 12 500 000 руб., учетом  коэффициента снижения К =0,984, стоимость работ составляет 12 300 000 руб., в том числе:

1.Анализ существующих объектов дорожного сервиса -2 500 000 руб.;

2.Эскизные решения -5 000 000 руб.;

3.Стандарт организации объектов дорожного сервиса - 5 000 000 руб.

Исполнителем выполнены, а заказчиком приняты следующие работы по государственному контракту от 29.03.2021 № ПТР-51/21:

- исходные данные по акту выполненных работ № 1 на сумму 0 руб. (работы сданы исполнителем 24.05.2021, приняты заказчиком 28.05.2021); 

- анализ существующих объектов дорожного сервиса по акту выполненных работ № 2 на сумму 2 460 000 руб. (работы сданы исполнителем 02.07.2021, приняты заказчиком 06.07.2021);

- эскизные решения по акту выполненных работ № 3 на сумму 4 920 000 руб. (работы сданы исполнителем 17.12.2021, приняты заказчиком 17.12.2021);

- стандарт организации объектов дорожного сервиса по акту выполненных работ № 4 на сумму 4 920 000 руб. (работы сданы исполнителем 17.12.2021, приняты заказчиком 17.12.2021).

Обществом «Базилик» обязательство, предусмотренное пунктом 2 Календарного плана, исполнено 02.07.2021, о чем указано в акте выполненных работ № 2; обязательство, предусмотренное пунктом 3 Календарного плана, исполнено 17.12.2021, о чем указано в акте выполненных работ № 3; обязательство, предусмотренное пунктом 4 Календарного плана, исполнено 17.12.2021, о чем указано в акте выполненных работ № 4.

В связи с нарушением сроков выполнения работ заказчик привлек исполнителя к гражданско-правовой ответственности в виде пени в размере 976 128 руб.

Претензией от 20.12.2021 с исх. № 83/2-3203 истец предложил ответчику произвести оплату пени в размере 1 037 136  руб. в течение 14 дней со дня получения претензии путем перечисления на расчетный счет истца.

Поскольку требования претензии в добровольном порядке подрядчиком выполнены не были, учреждение «Управление автомобильных дорог по Красноярскому краю» обратилось в арбитражный суд с иском к обществу «Базилик» о взыскании неустойки за нарушение обязательств по государственному контракту от 29.03.2021 № ПТР-51/21 в размере 976 128 руб.

Ответчик, возражая против удовлетворения исковых требований, указывает, что сроки выполнения конкретных видов работ определяются Календарным планом (приложение № 2), расчет неустойки следует производить от стоимости каждого отдельного этапа исполнения обязательств, заявил о применении положений статьи 333 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Исследовав представленные доказательства, оценив доводы присутствующих в заседании лиц, арбитражный суд пришел к следующим выводам.

В соответствии со статьей 307 Гражданского кодекса Российской Федерации, в силу обязательства одно лицо (должник) обязано совершить в пользу другого лица (кредитора) определенное действие, как-то: передать имущество, выполнить работу, уплатить деньги и т.п., либо воздержаться от определенного действия, а кредитор имеет право требовать от должника исполнения его обязанности. Согласно статье 309 Гражданского кодекса Российской Федерации, обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями и требованиями закона, иных  правовых актов, а при  отсутствии таких - условий и требований – в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями.

Отказ от исполнения обязательств, изменение условий обязательств в одностороннем порядке статьей 310 Гражданского кодекса Российской Федерации не допускается.

Из материалов дела  следует, что сторонами заключен государственный контракт от 29.03.2021 № ПТР-51/21. Отношения сторон, возникшие вследствие заключения названного договора, регулируются положениями главы 37 Гражданского кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Закон № 44-ФЗ).

В силу пункта 1 статьи 702 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

В соответствии со статьей 708 Гражданского  кодекса Российской Федерации в договоре подряда указываются начальный и конечный сроки выполнения работы. По согласованию между сторонами в договоре могут быть предусмотрены также сроки завершения отдельных этапов работы (промежуточные сроки). Если иное не установлено законом, иными правовыми актами или не предусмотрено договором, подрядчик несет ответственность за нарушение как начального и конечного, так и промежуточных сроков выполнения работы.

В пункте 3.1 контракта указаны следующие сроки действия контракта: начало - с момента заключения контракта; окончание - 30.09.2021.

В пункте 3.2 контракта указаны сроки выполнения работ по контракту: начало - с момента заключения контракта; окончание - не более 90 календарных дней с момента заключения контракта. Сроки выполнения конкретных видов работ определяются Календарным планом выполнения работ (приложение 2).

Общество «Базилик» уведомило заказчика о приостановлении исполнения обязательств по государственному контракту от 29.03.2021 № ПТР-51/21 до возобновления переправ через реки Енисей, Ангара или до содействия заказчика в части обеспечения возможности переправы работников исполнителя в Северо-Енисейск и иные недоступные для передвижения из г. Красноярска автомобильные дороги (письмо от 16.04.2021 с исх. № 119 получено заказчиком 19.04.2021 согласно штампу входящей корреспонденции от 19.04.2021 № 2910).

В письме от 22.04.2021 с исх. № 08/2057 заказчик указывает, что приостановка является необоснованной, поскольку на реках Енисей, Ангара транспортное сообщение по ледовым переправам осуществлялось до 6-9 апреля 2021 года, 4,5 апреля открылись паромные переправы.

08 июня 2021 года общество «Базилик» направило в адрес заказчика выполненный этап «Часть 1. Анализ существующих объектов дорожного сервиса», акт выполненных работ № 2 (письмо от 08.06.2021 с исх. № 141).

09 июня 2021 года исполнитель обращался к заказчику с письмом от 09.06.2021 № 142 о согласовании концепции комплексных предложений по пространственной организации, благоустройству и архитектуре объектов дорожного сервиса.

11 июня 2021 года общество «Базилик» направило в адрес заказчика выполненный этап «Часть 2. Анализ существующих объектов дорожного сервиса», акт выполненных работ № 3 (письмо от 11.06.2021 с исх. № 145).

В письме от 17.06.2021 с исх. № 83/2-747 заказчик указал на выявленные в части 1 недостатки, обратился к исполнителю с предложением устранить указанные недостатки.

В ответ на указанное письмо заказчик сообщил, что рассмотрение 2 этапа возможно лишь после согласования 1 этапа работ (письма от 22.06.2021 с исх. № 83/2-792, от 22.06.2021 с исх. № 83/2-784).

21 июня 2021 года общество «Базилик» письмом от 21.06.2021 с исх. № 149 направило в адрес заказчика акты выполненных работ № 2, № 3. Согласно штампу входящей корреспонденции письмо получено заказчиком 21.06.2021.

Письмом от 25.06.2021 с исх. № 134 общество «Базилик» уведомило заказчика о приостановлении исполнения обязательств по государственному контракту от 29.03.2021 № ПТР-51/21 по организации и выполнению всего комплекса работ на разработку проекта архитектурно-художественного оформления элементов благоустройства участков автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения до предоставления заказчиком подписанного акта выполненных работ № 2, а также выдачи адресов для реализации пилотных проектов. Уведомление о приостановлении работ направлено заказчику по электронной почте 28.06.2021.

В Календарном плане выполнения всего комплекса работ на разработку проекта архитектурно-художественного оформления элементов благоустройства участков автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения Красноярского края (приложение № 2 к государственному контракту) указаны следующие сроки выполнения работ:

1.Исходные данные - 10 календарных дней с момента подписания контракта;

2.Анализ существующих объектов дорожного сервиса - 25 календарных дней с момента подписания контракта;

3.Эскизные решения - 25 календарных дней с момента согласования части 1, но не более 70 календарных дней с момента подписания контракта

4. Стандарт организации объектов дорожного сервиса - 20 календарных дней с момента согласования части 2, но не более 90 календарных дней с момента подписания контракта.

Срок выполнения обязательства, предусмотренного пунктом 2 Календарного плана - 25 календарных дней с момента подписания контракта, то есть не позднее 23.04.2021, обществом «Базилик» исполнено 02.07.2021, принято заказчиком 06.07.2021.

Срок выполнения обязательства, предусмотренного пунктом 3 Календарного плана - 25 календарных дней с момента согласования части 1, но не более 70 календарных дней с момента подписания контракта, то есть не позднее 07.06.2021, обществом «Базилик» исполнено 17.12.2021, принято заказчиком 17.12.2021.

Срок выполнения обязательства, предусмотренного пунктом 3 Календарного плана - 20 календарных дней с момента согласования части 2, но не более 90 календарных дней с момента подписания контракта, то есть не позднее 27.06.2021, обществом «Базилик» исполнено 17.12.2021, принято заказчиком 17.12.2021.

В приложении № 3 к государственному контракту указана стоимость работ по выполнению всего комплекса работ на разработку проекта архитектурно-художественного оформления элементов благоустройства участков автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения Красноярского края на сумму 12 500 000 руб., учетом  коэффициента снижения К =0,984, стоимость работ составляет 12 300 000 руб., в том числе:

1.Анализ существующих объектов дорожного сервиса -2 500 000 руб.;

2.Эскизные решения -5 000 000 руб.;

3.Стандарт организации объектов дорожного сервиса - 5 000 000 руб.

С учетом изложенного, проверив расчеты сторон, суд приходит к выводу о правомерности начисления неустойки от стоимости каждого отдельного этапа исполнения обязательств, указанных в Ведомости стоимости работ по выполнению всего комплекса работ на разработку проекта архитектурно-художественного оформления элементов благоустройства участков автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения Красноярского края (приложение № 3) и принимает расчет в качестве правильного расчет ответчика как произведенный в соответствии с условиями контракта  и соответствующий фактическим объемам выполненных работ в данной части.

Таким образом, размер пени в соответствии с пунктом 11.2.2 государственного контракта от 29.03.2021 № ПТР-51/21 составляет 483 554 руб.

Частью 4 статьи  34 Федерального закона № 44-ФЗ в контракт включается обязательное условие об ответственности заказчика и поставщика (подрядчика, исполнителя) за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных контрактом.

Исполнение обязательств может обеспечиваться неустойкой (статья 329 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Согласно статье 330 Гражданского кодекса Российской Федерации неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения. По требованию об уплате неустойки кредитор не обязан доказывать причинение ему убытков.

Отношения, направленные на обеспечение государственных и муниципальных нужд в целях повышения эффективности, результативности осуществления закупок товаров, работ, услуг, обеспечения гласности и прозрачности осуществления таких закупок, предотвращения коррупции и других злоупотреблений в сфере таких закупок регулируются Законом № 44-ФЗ.

В силу пункта 6 статьи 34 Закона № 44-ФЗ в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств (в том числе гарантийного обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, заказчик направляет поставщику (подрядчику, исполнителю) требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

Пунктом 11.2.1 контракта предусмотрено, что в случае просрочки исполнения исполнителем обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения исполнителем обязательств, предусмотренных контрактом, заказчик направляет исполнителю требование об уплате неустоек (штрафов, пеней). Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение исполнителем обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

Согласно Постановлению Правительства Российской Федерации от 04.07.2018 № 783 «О списании начисленных поставщику (подрядчику, исполнителю), но не списанных заказчиком сумм неустоек (штрафов, пеней) в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств, предусмотренных контрактом» (вместе с «Правилами списания сумм неустоек (штрафов, пеней), начисленных поставщику (подрядчику, исполнителю), но не списанных заказчиком в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств, предусмотренных контрактом») (в ред. от 15.10.2022) списание начисленных и неуплаченных сумм неустоек (штрафов, пеней) осуществляется по контрактам, обязательства по которым исполнены в полном объеме, за исключением контрактов, по которым:

а) в 2015, 2016 и 2020 годах изменены по соглашению сторон условия о сроке исполнения контракта, и (или) цене контракта, и (или) цене единицы товара, работы, услуги, и (или) количестве товаров, объеме работ, услуг, предусмотренных контрактами;

б) в 2020 году обязательства не были исполнены в полном объеме в связи с возникновением не зависящих от поставщика (подрядчика, исполнителя) обстоятельств, повлекших невозможность исполнения контракта в связи с распространением новой коронавирусной инфекции;

в) в 2021 и 2022 годах обязательства не были исполнены в полном объеме в связи с существенным увеличением в 2021 и 2022 годах цен на строительные ресурсы, повлекшем невозможность исполнения контракта поставщиком (подрядчиком, исполнителем);

г) обязательства не были исполнены в полном объеме по причине возникновения при исполнении контракта не зависящих от сторон контракта обстоятельств, влекущих невозможность его исполнения без изменения условий, в связи с мобилизацией в Российской Федерации, введением политических или экономических санкций иностранными государствами, совершающими недружественные действия в отношении Российской Федерации, граждан Российской Федерации или российских юридических лиц (далее - санкции), и (или) с введением иностранными государствами, государственными объединениями и (или) союзами и (или) государственными (межгосударственными) учреждениями иностранных государств или государственных объединений и (или) союзов мер ограничительного характера (далее - меры ограничительного характера).

Списание начисленных и неуплаченных сумм неустоек (штрафов, пеней) осуществляется заказчиком в следующих случае и порядке:

а) если общая сумма начисленных и неуплаченных неустоек (штрафов, пеней) не превышает 5 процентов цены контракта, заказчик осуществляет списание начисленных и неуплаченных сумм неустоек (штрафов, пеней) за исключением случаев, предусмотренных подпунктами «в» – «д» настоящего пункта;

б) если общая сумма начисленных и неуплаченных неустоек (штрафов, пеней) превышает 5 процентов цены контракта, но составляет не более 20 процентов цены контракта, заказчик осуществляет списание 50 процентов начисленных и неуплаченных сумм неустоек (штрафов, пеней) при условии уплаты 50 процентов начисленных и неуплаченных сумм неустоек (штрафов, пеней), за исключением случаев, предусмотренных подпунктами «в» – «д» настоящего пункта;

в) если неуплаченные неустойки (штрафы, пени) начислены вследствие неисполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств по контракту в связи с возникновением не зависящих от него обстоятельств, повлекших невозможность исполнения контракта в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, заказчик осуществляет списание начисленных и неуплаченных сумм неустоек (штрафов, пеней);

г) если неуплаченные неустойки (штрафы, пени) начислены вследствие неисполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств по контракту в связи с существенным увеличением в 2021 и 2022 годах цен на строительные ресурсы, повлекшем невозможность исполнения контракта поставщиком (подрядчиком, исполнителем), заказчик осуществляет списание начисленных и неуплаченных сумм неустоек (штрафов, пеней) в период с даты заключения контракта до даты представления предусмотренного абзацем пятым подпункта «а» пункта 2 постановления Правительства Российской Федерации от 9 августа 2021 г. N 1315 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» предложения поставщика (подрядчика, исполнителя) об изменении существенных условий контракта в связи с существенным увеличением цен на строительные ресурсы, подлежащие поставке и (или) использованию при исполнении такого контракта, с приложением информации и документов, обосновывающих такое предложение;

д) если неуплаченные неустойки (штрафы, пени) начислены вследствие неисполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств по контракту в связи с возникновением не зависящих от него обстоятельств, повлекших невозможность исполнения контракта в связи с мобилизацией в Российской Федерации, введением санкций и (или) мер ограничительного характера, заказчик осуществляет списание начисленных и неуплаченных сумм неустоек (штрафов, пеней).

Списание начисленных и неуплаченных сумм неустоек (штрафов, пеней) осуществляется на основании учетных данных заказчика, имеющих документальное подтверждение. Заказчик в целях списания начисленных и неуплаченных сумм неустоек (штрафов, пеней) обеспечивает сверку расчетов с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) по начисленным и неуплаченным суммам неустоек (штрафов, пеней) (пункт 4).

Подпунктом «а» пункта 5 Постановления № 783 установлено, что при наличии документа о подтвержденных сторонами контракта расчетах по начисленной и неуплаченной сумме неустоек (штрафов, пеней) основанием для принятия решения о списании начисленной и неуплаченной суммы неустоек (штрафов, пеней) является в случае, предусмотренном подпунктом «а» пункта 3 настоящих Правил, - исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств (за исключением гарантийных обязательств) по контракту в полном объеме, подтвержденное актом приемки или иным документом.

Из материалов дела следует, что ответчик исполнил обязательства по контракту в полном объеме, размер штрафа не превышает 5% цены контракта (615 000 руб. (12 300 000 руб. х 5%)), в связи с чем,  суд приходит к выводу о том, что к сложившимся между сторонами отношениям подлежат применению положения Постановления № 783, начисленный ответчику штраф подлежит списанию.

Таким образом, суд не установил оснований для удовлетворения заявленных требований.

В соответствии с частью 2 статьи 168 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при принятии решения арбитражный суд распределяет судебные расходы. 

Согласно части 1 статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны.

Государственная пошлина по иску о взыскании неустойки в размере 976 128 руб. составляет 22 523 руб.

Истцом при обращении в арбитражный суд с настоящим исковым заявлением оплачена государственная  пошлина в указанном размере, что подтверждается платежным поручением  от 05.08.2022 № 1101979.

Учитывая результат рассмотрения спора (отказ в удовлетворении  исковых требований), суд приходит к выводу о наличии оснований  для отнесения расходов по уплате государственной  пошлины на истца.

Настоящее решение выполнено в форме электронного документа, подписано усиленной квалифицированной электронной подписью судьи и считается направленным лицам, участвующим в деле, посредством его размещения в установленном порядке в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в режиме ограниченного доступа (код доступа - ). 

По ходатайству лиц, участвующих в деле, копии решения на бумажном носителе могут быть направлены им в пятидневный срок со дня поступления соответствующего ходатайства заказным письмом с уведомлением о вручении или вручены им под расписку.

Руководствуясь статьями 167 – 170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Красноярского края

РЕШИЛ:

в удовлетворении иска отказать. 

 Разъяснить лицам, участвующим в деле, что настоящее решение может быть обжаловано в течение месяца после его принятия путём подачи апелляционной жалобы в Третий арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Красноярского края.

 

Судья

О.А. Антропова