1109_405304  

 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ  Л. Павличенко ул., д. 5, Севастополь, 299011, www.sevastopol.arbitr.ru  

Именем Российской Федерации РЕШЕНИЕ Резолютивная часть

Дело № А84-4246/2019

27 декабря 2022 г.

г. Севастополь

 

руководствуясь статьями 110, 167 - 170 Арбитражного  процессуального кодекса Российской Федерации,  

РЕШИЛ:

признать решение Государственного казенного учреждения города  Севастополя «Единая дирекция капитального строительства» от 21.08.2019   № 5720 об отказе от исполнения государственного контракта от 27.11.2017 №  21-ПИР/2017 (РНК 2920400768117000087) недействительным.  

Взыскать с Государственного казенного учреждения города  Севастополя «Единая дирекция капитального строительства», ОГРН  

<

***>, ИНН 

<

***>, в пользу Общества с ограниченной  ответственностью «Стройпроект», ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>,  9263598,86 рублей, в том числе:  

- 2 736 924,00 руб. - 50% стоимости инженерных изысканий, проектной  документации;  

- 2 819 306 руб. - стоимость дополнительных расходов по повторной  разработке проектной документации, вызванных изменением исходных  данных вследствие обстоятельств, не зависящих от ООО «Стройпроект»;  

- 215 307 руб. - стоимость разработки раздела ОВОС; 

- 476 625,00 руб. - фактической стоимости проведения  государственной экологической экспертизы (первичной и повторной);  

Код доступа к материалам дела: 

 

- 2 396 742,00 руб. - стоимость разработанной рабочей документации.  

- 359 038,81 руб. - неустойки (пени) за нарушение срока оплаты 50%  стоимости инженерных изысканий, проектной документации;  

- 259656,05 руб. - неустойки (пени) срока оплаты дополнительных  расходов по повторной разработке проектной документации, вызванных  изменением исходных данных, по разработке, раздела ОВОС, фактической  стоимости государственной экологической экспертизы.  

В удовлетворении иска в остальной части требований отказать. В удовлетворении встречного иска отказать. 

Взыскать с Государственного казенного учреждения города  Севастополя «Единая дирекция капитального строительства», ОГРН  

<

***>, ИНН 

<

***>, в пользу Общества с ограниченной  ответственностью «Стройпроект», ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>,  74 912,18 руб. расходов на уплату государственной пошлины  и 146 887,10 руб. расходов на оплату судебной экспертизы.  

Взыскать с Государственного казенного учреждения города  Севастополя «Единая дирекция капитального строительства», ОГРН  

<

***>, ИНН 

<

***>, в доход федерального бюджета 36 685  рублей государственной пошлины.  

Решение суда вступает в законную силу по истечении месяца со дня  его принятия (изготовления в полном объеме) и может быть обжаловано  через Арбитражный суд города Севастополя в Двадцать первый  арбитражный апелляционный суд в месячный срок со дня его принятия.  

Судья А.Ю. Смоляков  

Электронная подпись действительна.

Данные ЭП:Удостоверяющий центр Федеральное казначейство 

Дата 30.12.2021 5:30:47

Кому выдана Смоляков Алексей Юрьевич