Арбитражный суд Челябинской области

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

Дело № А76-20890/2022

06 сентября 2022 г.

г. Челябинск

 

Резолютивная часть решения вынесена 30 августа 2022 г.

Решение в полном объеме изготовлено 06 сентября 2022 г.     

 

Судья Арбитражного суда Челябинской области Малыхина В.В., при ведении протокола судебного заседания секретарем ФИО1, рассмотрев в открытом судебном заседании 

дело по иску общества с ограниченной ответственностью «Златоустгазстрой», ОГРН 

<

***>, г. Златоуст Челябинской области, к Администрации Укского сельского поселения, ОГРН 

<

***>, п. Ук Челябинской области, о взыскании 4 431 137 руб.

при участии в судебном заседании:

от истца: директор ФИО2, паспорт, выписка из ЕГРЮЛ; представитель ФИО3, паспорт, диплом о высшем юридическом образовании, доверенность № 19 от 09.08.2022; представить ФИО4, паспорт, доверенность от 23.08.2022.

УСТАНОВИЛ:

общество с ограниченной ответственностью «Златоустгазстрой» (далее – истец, ООО «Златоустгазстрой») 19.01.2022 обратилось в Арбитражный суд Челябинской области с исковым заявлением к Администрации Укского сельского поселения (далее – ответчик), о взыскании долга за выполненные работы в размере 7 728 760 руб. 55 коп.

Определением от 26.01.2022 исковое заявление по делу № А76-1380/2022 принято к производству.

Определением от 14.06.2022 исковые требования общества с ограниченной ответственностью «Златоустгазстрой» к Администрации Укского сельского поселения по взысканию задолженности по контракту на выполнение работ по устранению дефектов газораспределительной сети в размере 1 902 826 руб. и по контракту на выполнение работ по отчистке от воды и испытание газопровода в размере 2 528 311 руб. выделены в отдельное производство с присвоением номера А76-20890/2022.

В обоснование заявленных требований истец ссылается на статьи 12, 154, 309, 310, 330, 702, 711 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) и на то обстоятельство, что ответчик, оплату выполненных работ по договорам подряда  надлежащим образом не исполнил. 

Определением суда от 29.06.2022 предварительное судебное заседание по делу № А76-20890/2022 назначено на 23.08.2022.

В определении суда от 29.06.2022 имеется ссылка на пункт 27 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 20.12.2006 № 65, согласно которому в случае, если лица, участвующие в деле, не явились в предварительное судебное заседание и не заявили возражения против рассмотрения дела в их отсутствие, суд, признав дело подготовленным к судебному разбирательству, может завершить предварительное судебное заседание и начать рассмотрение дела в судебном заседании арбитражного суда первой инстанции. 

Ответчик надлежащим образом извещен о назначении предварительного судебного заседания на 23.08.2022, что подтверждается почтовым уведомлением.

Возражений против продолжения рассмотрения дела в судебном заседании арбитражного суда первой инстанции непосредственно после окончания предварительного судебного заседания, в том смысле, который этому придается ч. 4 ст. 137 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ), ответчик не заявил. 

Статьей 9 АПК РФ судопроизводство в арбитражном суде осуществляется на основе состязательности; лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или несовершения ими процессуальных действий. 

Ответчик не воспользовался предоставленными ему процессуальными правами, представителя в судебное заседание не направил. Фактически ответчик, следуя своему усмотрению, отказался от реализации процессуального права на непосредственное участие в судебном разбирательстве. 

В порядке реализации прав, предусмотренных ст. 41 АПК РФ, действуя добросовестно и разумно, ответчик имел возможность ознакомиться с материалами дела и заявить мотивированное ходатайство об отложении судебного заседания.

В предварительном судебном заседании 23.08.2022 суд завершил предварительное судебное заседание и начал рассмотрение дела по существу в судебном заседании непосредственно после предварительного судебного заседания.

Отзыв с указанием возражений по иску в нарушение ч. 1 ст. 131 АПК РФ ответчиком не представлен. В силу ч. 4 ст. 131 и ч. 1 ст. 168 АПК РФ арбитражный суд рассмотрел дело по имеющимся в деле доказательствам без каких-либо возражений ответчика. 

При этом в силу ч. 3.1 ст. 70 АПК РФ обстоятельства, на которые ссылается сторона в обоснование своих требований или возражений, считаются признанными другой стороной, если они ею прямо не оспорены или несогласие с такими обстоятельствами не вытекает из иных доказательств, обосновывающих представленные возражения относительно существа заявленных требований.

В судебном заседании в соответствии со ст. 163 АПК РФ объявлялся перерыв с 23.08.2022 по 30.08.2022. Сведения об объявленном перерыве были размещены на сайте Арбитражного суда Челябинской области.

В судебном заседании представитель истца заявленные требования поддержал в полном объеме, по основаниям, указанным в исковом заявлении, ответчик представителя в судебное заседание не направил.

Исследовав и оценив доказательства, представленные в материалы дела в соответствии со статьями 71, 162 АПК РФ, арбитражный суд приходит к выводу об удовлетворении исковых требований по следующим основаниям.  

Как следует из материалов дела, между Администрацией Укского сельского поселения Ашинского муниципального района (муниципальный заказчик) и ООО «Златоустгазстро» (подрядчик) заключен муниципальный контракт, по условиям которого подрядчик обязуется течение 20 рабочих дней с момента заключения контракта выполнить работы по устранению дефектов газораспределительной сети «Газоснабжение жилых домов в  п. Ук Ашинского муниципального района Челябинской области» в соответствии с Локальной сметой № 02-04, которая является неотъемлемой частью контракта. Цена составляет 1 902 826 руб. (п. 3.1 контракта). К контракту стороны подписали локальную смету № 02-04 на сумму 1 902 826 руб.

Действительность и заключенность контракта сторонами не оспариваются (часть 3.1. статьи 70 АПК РФ).

Истец во исполнение условий контракта выполнил и сдал ответчику работы, что подтверждается актом о приемке выполненных работ КС-2 и Справкой о стоимости выполненных работ и затрат КС-3 на сумму 1 902 826 руб., которые подписаны со стороны заказчика Главой Укского сельского поселения Ашинского муниципального района ФИО5 и согласованы Главой Ашинского муниципального района ФИО6 Письмом № 157 от 04.08.2021 в адрес заказчика направлен счет на оплату № 30 от 04.08.2021, счет-фактура № 108 от 04.08.2021, акт № 1043 от 04.08.2021. 

Между Администрацией Укского сельского поселения Ашинского муниципального района (муниципальный заказчик) и ООО «Златоустгазстро» (подрядчик) заключен муниципальный контракт, по условиям которого подрядчик обязуется в срок до 01.10.2021 выполнить работы по отчистке от воды и испытание газопровода 315 диаметра, на объекте «Газоснабжение жилых домов п. Ук Ашинского муниципального района Челябинской области» в соответствии с Локальной сметой № 02-05-1, которая является неотъемлемой частью контракта. Цена составляет 2 528 311 руб. (п. 3.1 контракта). К контракту стороны подписали локальную смету № 02-05-1 на сумму 2 528 311 руб.

Действительность и заключенность контракта сторонами не оспариваются (часть 3.1. статьи 70 АПК РФ).

Истец во исполнение условий контракта выполнил и сдал ответчику работы, что подтверждается актом о приемке выполненных работ КС-2 и Справкой о стоимости выполненных работ и затрат КС-3 на сумму 2 528 311 руб., которые подписаны со стороны заказчика Главой Укского сельского поселения Ашинского муниципального района ФИО5 и согласованы Главой Ашинского муниципального района ФИО6 Письмом № 157 от 04.08.2021 в адрес заказчика направлен счет на оплату № 75 от 09.08.2021, счет-фактуру № 202 от 09.08.2021

Истцом в адрес ответчика направлена претензия с требованием оплаты задолженности по спорным контрактам в сумме 4 431 137 руб., которая оставлена без ответа и удовлетворения.

Отсутствие оплаты выполненных работ послужило основанием для обращения истца в арбитражный суд с настоящим иском.

Между сторонами сложились подрядные отношения, которые регулируются нормами гл. 37 ГК РФ.

В силу ст. 309, 310 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона; односторонний отказ от исполнения обязательства не допускается.

В силу пункта 1 статьи 702 ГК РФ по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

В соответствии со статьей 711 ГК РФ заказчик обязан уплатить подрядчику обусловленную цену после окончательной сдачи результатов работы при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в согласованный срок, либо с согласия заказчика досрочно.

Таким образом, основанием для возникновения обязательства заказчика по оплате выполненных работ является факт передачи результата работ подрядчиком заказчику.

Заказчик обязан в сроки и в порядке, которые предусмотрены договором подряда, с участием подрядчика осмотреть и принять выполненную работу (ее результат), а при обнаружении отступлений от договора, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе немедленно заявить об этом подрядчику. Заказчик, обнаруживший недостатки в работе при ее приемке, вправе ссылаться на них в случаях, если в акте либо в ином документе, удостоверяющем приемку, были оговорены эти недостатки либо возможность последующего предъявления требования об их устранении (пункты 1, 2 статьи 720 ГК РФ).

В силу п. 4 ст. 753 ГК РФ сдача результата работ подрядчиком и приемка его заказчиком оформляются актом, подписанным обеими сторонами; при отказе одной из сторон от подписания акта в нем делается отметка об этом и акт подписывается другой стороной.

Односторонний акт сдачи или приемки результата работ может быть признан судом недействительным лишь в случае, если мотивы отказа от подписания акта признаны им обоснованными.

Пунктом 6 статьи 753 ГК РФ специально предусмотрены основания, по которым заказчик вправе уклониться от приемки: если обнаруженные недостатки исключают возможность использовать результат работы для цели, которая указана в договоре, и к тому же ни подрядчик, ни сам заказчик не могут устранить недостатки. При этом под невозможностью устранить недостатки заказчиком подразумеваются случаи, когда не только он сам или подрядчик не могут произвести соответствующие работы, но и те, при которых ему не удается найти третью сторону, готовую принять на себя устранение недостатков.

В силу части 1 статьи 65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

В подтверждение факта выполнения работ истец представил в материалы дела подписанные сторонами акты о приемке выполненных работ и справки о стоимости выполненных работ. 

Данное обстоятельство ответчиком не оспорено.

В соответствии с частью 3.1. статьи 70 АПК РФ обстоятельства, на которые ссылается сторона в обоснование своих требований или возражений, считаются признанными другой стороной, если они ею прямо не оспорены или несогласие с такими обстоятельствами не вытекает из иных доказательств, обосновывающих представленные возражения относительно существа заявленных требований.

Поскольку ответчиком в нарушение статьи 65 АПК РФ не представлены доказательства оплаты выполненной работы в полном объеме, суд приходит к выводу об удовлетворении требований в части взыскания с ответчика основного долга по контрактам в сумме 4 431 137 руб.

В соответствии со ст. 112 АПК РФ вопросы распределения судебных расходов, разрешаются арбитражным судом, рассматривающим дело, в судебном акте, которым заканчивается рассмотрение дела по существу. 

В соответствии с Постановлением Пленума ВАС РФ от 11.07.2014 № 46 «О применении законодательства о государственной пошлине при рассмотрении дел в арбитражных судах» в случае если после возбуждения производства по делу арбитражный суд выделил одно из предъявленных требований в отдельное производство (часть 3 статьи 130 АПК РФ), то расходы по уплате государственной пошлины, понесенные при предъявлении данного требования, взыскиваются со стороны, против которой принят судебный акт по делу, образованному в результате выделения требования в отдельное производство, по правилам статьи 110 АПК РФ. Расходы по уплате государственной пошлины, понесенные в связи с предъявлением остальных заявленных требований, распределяются между лицами, участвующими в деле, по правилам статьи 110 АПК РФ по итогам разрешения дела, в рамках которого эти требования рассмотрены.

В соответствии с п.п. 1 п.1 ст. 333.21 Налогового кодекса Российской Федерации при цене иска 4 431 137 руб. государственная пошлина подлежит уплате в размере 45 156 руб. 

Истцом при подаче иска уплачена государственная пошлина в размере 61 929 руб. платежным поручением № 50 от 18.01.2022 в деле № А76-1380/2022.

Учитывая, что в рамках дела № А76-1380/2022 истцом оплачена государственная пошлина в размере 61 929 руб., а также что после выделения требований в отдельные производства истец не доплачивал государственную пошлину, то расходы по уплате государственной пошлины в рамках настоящего выделенного требования не подлежат возмещению истцу, поскольку в рамках выделенных дел № А76-20889/2022, № А76-20888/2022, № А76-20891/2022 возмещены в полном объеме – 61 929 руб.  

В связи с тем, что ответчик на основании ст. 333.37 Налогового кодекса Российской Федерации освобождён от уплаты государственной пошлины, то государственная пошлина  в размере 45 156 руб. не подлежит взысканию с ответчика в доход федерального бюджета.  

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

РЕШИЛ:

Исковые требования удовлетворить.

Взыскать с Администрации Укского сельского поселения в пользу общества с ограниченной ответственностью «ЗлатоустГазСтрой» задолженность в размере 4 431 137 руб.

Решение может быть обжаловано в течение месяца после его принятия (изготовления в полном объеме) в апелляционную инстанцию – Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд путем подачи жалобы через Арбитражный суд Челябинской области.

Решение вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его принятия (изготовления в полном объеме), если не подана апелляционная жалоба. В случае подачи апелляционной жалобы решение, если оно не отменено и не изменено, вступает в законную силу со дня принятия постановления арбитражного суда апелляционной инстанции.

 

Судья                                                                                                                 В.В. Малыхина

Информацию о времени, месте и результатах рассмотрения апелляционной жалобы можно получить на интернет-сайте Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда http://18aas.arbitr.ru.