1189/2017-165538(1) 

РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ

 

 24 июля 2017 года 

по делу А33-28796/2016 Красноярск 

24 июля 2017 года 

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Руководствуясь статьями 110, 167 – 170 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации, Арбитражный суд Красноярского края  

РЕШИЛ:

иск удовлетворить.  

Обязать общество с ограниченной ответственностью «АнГор» в течение 30 дней после  

вступления в законную силу решения суда устранить строительные недостатки по д. № 63-А  

по ул. 9 Мая в г. Красноярске, а именно: 

* выполнить устройство гидроизоляции стен жилого дома ниже нулевого уровня по  

периметру дома с выполнением перечня работ, указанного в Заключении эксперта № 788 от  

01.06.2017г. Таблица № 3 «Виды работ по устранению выявленных недостатков в жилом  

здании по адресу: 

<

...>, пункты 1-10: 

- демонтаж асфальто-бетонной отмостки – 4,8 куб. м.; - демонтаж бетонной армированной плиты - 6,9 куб.м.; - разработка траншеи глубиной 190 см и шириной 100 см – 104, 3 куб.м.; 

- устройство гидроизоляции обмазочной на всю глубину цокольного этажа – 130,3  

куб.м.; - обратная засыпка с уплотнением грунта в плотную к стене цоколя – 96, 1 куб.м.; - устройство насыпи из ПГС (в соответствии с проектом) – 8,2 куб. м.; 

- устройство асфальта-бетонной отмостки с устройством примыкания к стене – 2,1  

куб.м.; - очистка оштукатуренной поверхности стен в цокольном этаже – 62,4 кв.м.; 

- удаление плесени и грибка на стенах цокольного этажа – 62,4 кв.м.;  - нанесение штукатурного слоя с окраской – 62, 4 кв.м.  

* выполнить ремонт мягкой кровли с выполнением перечня работ, указанного в  

Заключении эксперта № 788 от 01.06,2017г. Таблица № 3 «Виды работ по устранению  

выявленных недостатков в жилом здании по адресу: 

<

...>», пункты  

11-14: - ремонт примыкания кровельного крова к стенам, парапетам, шахтам – 68,6 м.; 

- ремонт кровельного крова в осях В-4 в переходе между вентиляционной шахтой и  

помещением под лифтовую шахту – 10,0 кв.м.; 

- устранение деформации кровельного ковра в осях В-10 – 4,0 кв.м.;  - установка отдушин в осях А1 и А13 (для осуществления сушки) – 2,0 шт.  

* выполнить работы по устройству вертикальной планировки территории, с  выполнением перечня работ, указанного в Заключении эксперта № 788 от 01.06.2017г.  Таблица № 3 «Виды работ по устранению выявленных недостатков в жилом здании по  адресу: г. Красноярск, ул. 9 Мая, 63», пункты 15-17:  

- устранение деформации дорожной одежды асфальтобетонного проезда между осями А- 2 и А-4 около бордюрного камня – 10,0 кв.м.;  

- устройство водоотводящего канала (желоба) в дорожном проезде от организованного  водоотвода дома к границам придомовой территории с укрытием его металлической  решеткой – 17,3 м.;  

- увеличение длины трубопровода организованного водоотвода дома (находящегося на  улице) – 0,5 м.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «АНГОР» (ИНН 

<

***>,  ОГРН 

<

***>, г. Красноярск) в пользу общества с ограниченной ответственностью  Управляющая компания «Граджилсервис» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>,  г. Красноярск) 6 000 руб. судебных расходов по уплате государственной пошлины, 118 000  руб. расходов за проведение судебной строительной технической экспертизы.  

Разъяснить лицам, участвующим в деле, что настоящее решение может быть обжаловано  в течение месяца после его принятия путём подачи апелляционной жалобы в Третий  арбитражный апелляционный суд.  

Апелляционная жалоба на настоящее решение подаётся через Арбитражный суд  Красноярского края.  

Судья С.А. Красовская