6/2024-15647(1) 

 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

Именем Российской Федерации РЕШЕНИЕ 

(РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ)

Дело № А06-8942/2022

г. Астрахань

20 февраля 2024 года

Арбитражный суд Астраханской области в составе судьи Измайловой А.Э.,  

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Кубжасаровой Д.С., 

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации, арбитражный суд  

РЕШИЛ:

обязать публичное акционерное общество «Россети Юг» в течение 30 календарных  дней с момента вступления в законную силу судебного акта заключить с обществом с  ограниченной ответственностью «Рыбная ферма» договор об осуществлении  технологического присоединения к электрическим сетям энергопринимающих устройств,  расположенных по адресу: 

<

...> г, д. 5е,  на следующих условиях:  

«I. Предмет договора 

1. По договору сетевая организация принимает на себя обязательства по  осуществлению технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя  (далее - технологическое присоединение) административное/офисное здание, в том числе по  обеспечению готовности объектов электросетевого хозяйства (включая их проектирование,  строительство, реконструкцию) к присоединению энергопринимающих устройств,  урегулированию отношений с третьими лицами в случае необходимости строительства  (модернизации) такими лицами принадлежащих им объектов электросетевого хозяйства  (энергопринимающих устройств, объектов электроэнергетики), с учетом следующих  характеристик:  

- максимальная мощность энергопринимающих устройств (всего): 150 (сто пятьдесят)  кВт, в т.ч. по категориям надежности электроснабжения:  

150 кВт по третьей категории; 

- дополнительная мощность (без учёта существующей (ранее присоединённой)  мощности) энергопринимающих устройств: 150 (сто пятьдесят) кВт, в т.ч. по категориям  надежности электроснабжения:  

150 кВт по третьей категории; 

- существующая (ранее присоединённая) мощность энергопринимающих устройств:  15 (пятнадцать) кВт, в т.ч. по категориям надежности электроснабжения:  

15 кВт по третьей категории. 

- класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется технологическое  присоединение 0,4 кВ.  

2. Заявитель обязуется оплатить расходы на технологическое присоединение в  соответствии с условиями настоящего договора.  

3. Технологическое присоединение необходимо для электроснабжения холодильника,  расположенного (которые будут располагаться) по адресу: 414052, Астраханская область,  

г. Астрахань, р-н Ленинский, ул. Августовская, 1 г, д. 5е. 

4. Точка (точки) присоединения указана в технических условиях для присоединения к  электрическим сетям (далее - технические условия).  

5. Технические условия являются неотъемлемой частью настоящего договора и  приведены в приложении.  

Срок действия технических условий составляет 2 года со дня заключения настоящего  договора.  

6. Срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению составляет не  более 6 месяцев со дня заключения настоящего договора.  

II. Обязанности сторон 

7. Сетевая организация обязуется: 

надлежащим образом исполнить обязательства по договору, в том числе по  выполнению возложенных на сетевую организацию мероприятий по технологическому  присоединению (включая урегулирование отношений с иными лицами) до границ участка,  на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства, указанные в  технических условиях;  

обеспечить установку и допуск в эксплуатацию приборов учета электрической  энергии и мощности;  

в течение 10 дней со дня уведомления заявителем сетевой организации о выполнении  им технических условий осуществить проверку выполнения технических условий  заявителем, провести с участием заявителя осмотр (обследование) присоединяемых  энергопринимающих устройств заявителя;  

не позднее 3 рабочих дней со дня проведения осмотра (обследования), указанного в  абзаце четвертом настоящего пункта, с соблюдением срока, указанного в п. 6 договора,  осуществить фактическое присоединение энергопринимающих устройств заявителя к  электрическим сетям, фактический прием (подачу) напряжения и мощности;  

составить по установленным формам, подписать и разместить в личном кабинете  потребителя акт о выполнении технических условий, содержащий перечень мероприятий,  реализованных в соответствии с техническими условиями, и акт об осуществлении  технологического присоединения;  

уведомить заявителя о составлении и размещении в личном кабинете потребителя  документов, подлежащих оформлению в процессе технологического присоединения  энергопринимающих устройств заявителя.  

8. Сетевая организация при невыполнении заявителем технических условий в  согласованный срок и наличии на дату окончания срока их действия технической  возможности технологического присоединения вправе по обращению заявителя продлить  срок действия технических условий. При этом дополнительная плата не взимается.  

9. Заявитель обязуется: 

надлежащим образом исполнить обязательства по настоящему договору, в том числе  по выполнению возложенных на заявителя мероприятий по технологическому  присоединению до точки присоединения энергопринимающих устройств заявителя,  указанной в технических условиях, за исключением урегулирования отношений с третьими  лицами до границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие  устройства заявителя, указанные в технических условиях;  

своими действиями осуществить фактическое присоединение собственных  энергопринимающих устройств к электрическим сетям, фактический прием (подачу)  напряжения и мощности;  

после выполнения мероприятий по технологическому присоединению до точки  присоединения энергопринимающих устройств, предусмотренных техническими условиями,  уведомить сетевую организацию о выполнении технических условий и представить копии  разделов проектной документации, предусматривающих технические решения,  

обеспечивающие выполнение технических условий, в том числе решения по схеме внешнего  электроснабжения (схеме выдачи мощности объектов по производству электрической  энергии), релейной защите и автоматике, телемеханике и связи, в случае если такая  проектная документация не была представлена заявителем в сетевую организацию до  направления заявителем в сетевую организацию уведомления о выполнении технических  условий (если в соответствии с законодательством Российской Федерации о  градостроительной деятельности разработка проектной документации является  обязательной);  

принять участие в осмотре (обследовании) присоединяемых энергопринимающих  устройств сетевой организацией;  

надлежащим образом исполнять указанные в разделе III настоящего договора  обязательства по оплате расходов на технологическое присоединение;  

в случае если установка приборов учета электрической энергии и (или) иного  оборудования возможна только в границах участка заявителя или на объектах заявителя,  обеспечить представление на безвозмездной основе мест установки приборов учета  электрической энергии и (или) иного оборудования и доступ к таким местам;  

уведомить сетевую организацию о направлении заявок в иные сетевые организации  при технологическом присоединении энергопринимающих устройств, в отношении которых  применяется категория надежности электроснабжения, предусматривающая использование 2  и более источников электроснабжения.  

Направить уведомление о готовности на ввод в эксплуатацию объектов и  прилагаемые к нему документы в отношении построенных им объектов в адрес органа  федерального государственного энергетического надзора в течение 5 дней со дня  оформления акта о выполнении технических условий способом, позволяющим установить  дату отправки и получения уведомления о готовности на ввод в эксплуатацию объектов.  

10. Заявитель вправе при невыполнении им технических условий в согласованный  срок и наличии на дату окончания срока их действия технической возможности  технологического присоединения обратиться в сетевую организацию с просьбой о  продлении срока действия технических условий.  

III. Плата за технологическое присоединение и порядок расчетов 

11. Размер платы за технологическое присоединение определяется в соответствии с  постановлением Службы по тарифам Астраханской области от 27.12.2023 № 160 и составляет  1174715.55 (один миллион сто семьдесят четыре тысячи семьсот пятнадцать рублей  пятьдесят пять копеек), в том числе НДС (20%).  

12. Внесение платы за технологическое присоединение осуществляется заявителем  путем оплаты счёта в течение 5 рабочих дней со дня его выставления сетевой организацией.  Заявитель вносит плату за технологическое присоединение согласно п. 3.1 Договора в  следующем порядке:  

а) 10 процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 15 дней  со дня заключения Договора;  

б) 30 процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 60 дней  со дня заключения Договора;  

в) 20 процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 180 дней  со дня заключения Договора;  

г) 30 процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 15 дней  со дня фактического присоединения;  

д) 10 процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 10 дней  со дня подписания акта об осуществлении технологического присоединения.  

13. Заявителем при внесении платы за технологическое присоединение в назначении  платежа указываются реквизиты указанного счёта.  

14. Датой исполнения обязательства заявителя по оплате расходов на технологическое  присоединение считается дата внесения денежных средств на расчетный счёт сетевой  

организации 

IV. Разграничение балансовой принадлежности электрических сетей и  

эксплуатационной ответственности сторон 

15. Заявитель несет балансовую и эксплуатационную ответственность до точки  присоединения энергопринимающих устройств заявителя.  

V. Условия изменения, расторжения договора и ответственность сторон  

16. Договор может быть изменен по письменному соглашению Сторон или в  судебном порядке.  

17. Договор может быть расторгнут по требованию одной из Сторон по основаниям,  предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.  

18. Заявитель вправе при нарушении сетевой организацией указанных в настоящем  договоре сроков технологического присоединения в одностороннем порядке расторгнуть  настоящий договор.  

Нарушение заявителем установленного договором срока осуществления мероприятий  по технологическому присоединению на 12 и более месяцев при условии, что сетевой  организацией в полном объеме выполнены мероприятия по технологическому  присоединению, срок осуществления которых по договору наступает ранее указанного  нарушенного заявителем срока осуществления мероприятий по технологическому  присоединению, может служить основанием для расторжения договора по требованию  сетевой организации по решению суда.  

Сторона, нарушившая срок осуществления мероприятий по технологическому  присоединению, предусмотренный договором, обязана уплатить другой стороне неустойку,  равную 0,25 процента указанного общего размера платы за каждый день просрочки (за  исключением случаев нарушения выполнения технических условий заявителями,  технологическое присоединение энергопринимающих устройств которых осуществляется на  уровне напряжения 0,4 кВ и ниже). При этом совокупный размер такой неустойки при  нарушении срока осуществления мероприятий по технологическому присоединению  заявителем не может превышать размер неустойки, определенный в предусмотренном  настоящим абзацем порядке, за год просрочки.  

Сторона, нарушившая срок осуществления мероприятий по технологическому  присоединению, предусмотренный договором, обязана уплатить понесенные другой  стороной договора расходы в размере, определенном в судебном акте, связанные с  необходимостью принудительного взыскания неустойки, предусмотренной абзацем первым  или вторым настоящего пункта, в случае необоснованного уклонения либо отказа от ее  уплаты.  

19. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору  стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.  

20. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное  неисполнение обязательств по договору, если оно явилось следствием обстоятельств  непреодолимой силы, возникших после подписания сторонами договора и оказывающих  непосредственное воздействие на выполнение сторонами обязательств по договору.  

VI. Порядок разрешения споров 

21. Споры, которые могут возникнуть при исполнении, изменении и расторжении  договора, стороны разрешают в соответствии с законодательством Российской Федерации.  

VII. Заключительные положения 

21. Договор считается заключенным со дня оплаты заявителем счета на оплату  

технологического присоединения по договору.».  

Взыскать с публичного акционерного общества «Россети Юг» в пользу общества с  ограниченной ответственностью «Рыбная ферма» расходы на оплату услуг представителя в  размере 75 000 руб., расходы по уплате государственной пошлины в размере 6000 руб.  

В удовлетворении остальной части заявленных требований отказать. 

Решение по настоящему делу вступает в законную силу по истечении месячного срока  со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба. В случае подачи апелляционной  жалобы решение вступает в законную силу со дня принятия постановления арбитражного  суда апелляционной инстанции.  

Решение может быть обжаловано в порядке апелляционного производства в  Двенадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня его принятия, через  Арбитражный суд Астраханской области.  

Судья А.Э. Измайлова