АРБИТРАЖНЫЙ СУД КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

РЕШЕНИЕ

17 апреля 2025 года

Дело № А33-27851/2024

Красноярск

Резолютивная часть решения вынесена в судебном заседании 03 апреля 2025 года.

В полном объёме решение изготовлено 17 апреля 2025 года.

Арбитражный суд Красноярского края в составе судьи О.С. Щёлоковой, рассмотрев в судебном заседании дело по иску акционерного общества «ЭквитиПлюс» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>, Красноярский край, м.р-н. Емельяновский, г.п. поселок Емельяново, пгт. Емельяново, дата регистрации 02.04.2021)

к обществу с ограниченной ответственностью «СПЕЦСТРОЙ» (ИНН 2465341790, ОГРН 1212400021250, г. Красноярск, дата регистрации 17.08.2021)

о взыскании неустоек, стоимости давальческого материала, убытков, аванса,

в присутствии от истца: ФИО1, по доверенности от 20.12.2024 № 181/2025, 

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания С.В. Альтерготом, 

установил:

акционерное общество «ЭквитиПлюс» (далее – истец) обратилось в Арбитражный суд Красноярского края с иском к обществу с ограниченной ответственностью «СПЕЦСТРОЙ» (далее – ответчик) о взыскании 

суммы неустойки и штрафов (за ненадлежащее исполнение договорных обязательств в соответствии с пунктами 15.3, 15.3.1 и 15.3.2 договора): по состоянию на 02.09.2024 в размере 2 205 674,95 руб., за период с 03.09.2024 по день вынесения судом решения, исчисленную из расчета 0,1% от цены невыполненных или несвоевременно выполненных работ за каждый день просрочки, за период со дня, следующего за днем вынесения судом решения, по день фактической уплаты долга истцу, исчисленной из расчета 0,1% от цены невыполненных или несвоевременно выполненных работ за каждый день просрочки;

стоимости давальческого материала стоимостью 2 148 187,81 руб.;

убытков, связанных с устранением недостатков, в размере 280 706,40 руб.;

неосновательного обогащения в виде перечисленного аванса в размере 1 300 000,00 руб.,

суммы неустойки за нарушение срока возврата аванса (в соответствии с пунктом 15.8 договора) по состоянию на 02.09.2024 (дата подачи иска) в размере 65 000,00 руб., за период с 03.09.2024 по день вынесения судом решения, исчисленную из расчета 0,5 % от просроченной суммы за каждый день просрочки, за период со дня, следующего за днем вынесения судом решения, по день фактической уплаты волга истцу, исчисленной из расчета 0,5 % от просроченной суммы за каждый день просрочки.

Исковое заявление принято к производству суда. Определением от 13.09.2024 возбуждено производство по делу.

Ответчик, извещенный надлежащим образом о времени и месте судебного разбирательства, в судебное заседание не явился. Сведения о дате и месте слушания размещены на сайте Арбитражного суда Красноярского края. В порядке статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебное заседание проведено в отсутствие представителей ответчика.

Представитель истца в судебном заседании настаивала на исковых требованиях по основаниям, изложенным в исковом заявлении и пояснениях по делу.

В судебном заседании, состоявшемся 03.04.2025, на основании статьи 163 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации объявлен перерыв до 17 час. 25 мин. После перерыва стороны явку представителей не обеспечили. Сведения размещены в сети Интернет. 

При рассмотрении дела установлены следующие, имеющие значение для рассмотрения спора, обстоятельства.

Между акционерным обществом «ЭквитиПлюс» (заказчик) и обществом с ограниченной ответственностью «СПЕЦСТРОЙ» (подрядчик) заключен договор субподряда № ЭП-НК-23-Д251 от 13.12.2023, подписано дополнительное соглашение от 08.02.2024 № 1.

Согласно пункту 2.1 договора (в редакции дополнительного соглашения № 1) в порядке и на условиях, установленных договором, технической документацией, техническим заданием (приложение № 3 к дополнительному соглашению № 1 к договору), календарным графиком выполнения работ (приложение № 2 к дополнительному соглашению № 1 к договору), в соответствии с требованиями технических регламентов (СП, СНиП, ГОСТ, др.) и действующего законодательства Российской Федерации, подрядчик обязуется по заданию заказчика выполнить следующие работы: устройство керамогранитного покрытия пола (видовые зоны); устройство керамогранитного покрытия пола (служебные помещения); укладку керамогранита на площадках, ступенях и устройство плинтусов на Лестнице № 6 в осях Г-В/9-10, облицовка стен керамогранитом (видовые зоны), обеспечивающие ввод его в эксплуатацию, а заказчик обязуется принять результаты работ и оплатить их. 

Пунктом 3.1 договора (в редакции дополнительного соглашения) установлено, что сроки выполнения работ определяются в календарном графике выполнения работ (приложение № 2 к дополнительному соглашению №1 к договору). Дата начала работ – 20.11.2023; дата окончания работ (за исключением работ, выполняемых в гарантийный срок) – 31.03.2024.

На основании пункта 4.2 (в редакции дополнительного соглашения) максимальная цена работ по договору составляет 11 363 324,40 руб., в том числе НДС - 1 893 887,40 руб. и является приблизительной.

В силу пункта 15.3 договора за нарушение подрядчиком срока окончания выполнения работ, в том числе, промежуточных сроков выполнения работ, подрядчик по письменному требованию заказчика, уплачивает неустойку в размере 0,1 % от цены невыполненных или несвоевременно выполненных работ за каждый день просрочки.

В соответствии с пунктом 15.3.1 в случае превышения подрядчиком общего срока выполнения работ более чем на 30 календарных дней подрядчик по письменному требованию заказчика в дополнение к неустойке, предусмотренной пунктом 15.3. договора, уплачивает штраф в размере 2 % от максимальной цены работ по договору; пунктом 15.3.2 - в случае превышения подрядчиком общего срока выполнения работ по договору более чем на 60 календарных дней подрядчик по письменному требованию заказчика в дополнение к неустойке, предусмотренной пунктом 15.3 договора и штрафу, предусмотренному пунктом 15.3.1 договора, уплачивает штраф в размере 5 % от максимальной цены работ по договору.

Сторонами подписаны акты о приемке выполненных работ от 21.12.2023 № 1, №2, от 08.02.2024 № 3, № 4, № 5, № 6. 

За нарушение подрядчиком срока окончания выполнения работ, в том числе, промежуточных сроков выполнения работ заказчиком начислена неустойка в общей сумме 1 410 242,24 руб. (расчет неустойки является приложением к пояснениям истца от 14.02.2025 № ЭП-НК-25).

Заказчик на основании пункта 15.3.1 начислил штраф в сумме 227 266,49 руб. (11 363 324,40 руб. х 2%), пункта 15.3.2 – 568 166,22 руб. (11 363 324,40 руб. х 5 %).

Пунктом 7.5 договора установлено, что в случаях, когда договор предусматривает использование материалов и оборудования заказчика, соответствующие оборудование и материалы передаются заказчиком подрядчику для выполнения работ по договору в следующем порядке:

подрядчик самостоятельно рассчитывает количество материалов (оборудования),подлежащих использованию при производстве работ. Подрядчик предоставляет заказчикузаявку на получение материалов (оборудования) поставки заказчика не позднее, чем за 2 рабочих дня до необходимой даты передачи материалов (оборудования). Перечень материалов и оборудования, передаваемых заказчиком подрядчику для выполнения работ, срок их передачи согласовываются сторонами в приложении № 6 к договору. Заявка на предоставление материалов (оборудования) поставки заказчика, согласованных сторонами в приложении № 6 к договору, подается по форме, согласованной в приложении № 6/1 к договору (заявка на отпуск ТМЦ в адрес подрядчика), с указанием наименования, количества и срока предоставления. Подрядчик обязан обеспечить эффективное использование но назначению переданных заказчиком материалов и оборудования в период времени, указанный в заявке. До начала работ подрядчик назначает лицо, ответственное за получение материалов (оборудования) поставки заказчика и предоставляет заказчику оригинал доверенности, предоставляющей право ответственному липу осуществлять от имени подрядчика все действия. предусмотренные договором, по получению товарно-материальных ценностей и подписанию необходимых документов (подпункт 7.5.1),

подрядчик обязан произвести приемку, разгрузку, складирование, хранение и передачу для производства работ изделий, материалов, конструкций и оборудования поставки заказчика. В случае необоснованного отказа или уклонения в приемке имущества поставки заказчика подрядчик обязан возместить заказчику все возникшие, в связи с этим убытки, в том числе расходы по храпению такого имущества. Все расходы по получению, доставке со склада заказчика, хранению давальческих материалов и другие связанные с этим расходы несет подрядчик (подпункт 7.5.2),

подрядчик несет ответственность за сохранность, утрату или повреждение полученных согласно договору оборудования и материалов с момента подписания им накладной на отпуск материалов на сторону (формы М-15) до полного завершения работ (включая период времени, н течение которого подрядчик будет устранять выявленные в ходе приемки недостатки) по объекту. В случае повреждения либо утраты оборудования и/или материалов заказчика подрядчик обязан выполнить за свой счет их ремонт и/или поставить оборудование, материалы, аналогичные поврежденным либо утраченным, без увеличения сроков окончания строительства объекта и цены работ по договору (подпункт 7.5.3).

Приемка материалов и оборудования осуществляется подрядчиком от заказчика по накладной на отпуск материалов на сторону (формы М-15). Проверка соответствия показателей качества, передаваемых заказчиком подрядчику материалов и оборудования требованиям стандартов, технических условий и их комплектности (входной контроль качества) осуществляется подрядчиком до момента подписания накладной на отпуск материалов на сторону (формы М-15). При установлении подрядчиком ненадлежащего качества, некомплектности оборудования. конструкций, изделий, материалов поставки заказчика в ходе приемки их для монтажа, в производство работ, подрядчик обязан поставить об этом в известность заказчика и принять участие в составлении соответствующего акта. Подрядчик не вправе ссылаться на непригодность и недоброкачественность поставленных заказчиком изделий, материалов, конструкций и оборудования после их приемки и обязан заменить их за свой счет, если не докажет, что такая непригодность и недоброкачественность не могла быть выявлена в построечных условиях и требовала лабораторного обследования (скрытые дефекты). В случае выявления скрытых дефектов/недостатков материалов, оборудования, конструкций, изделий подрядчик обязан незамедлительно уведомить заказчика и но его указанию принять участие в составлении соответствующего акта. Заказчик обязан доукомплектовать (предоставить качественные) материалы, оборудование, конструкции, изделия взамен бракованных и срок, установленный соглашением сторон (подпункт 7.5.4).

Согласно подпункту 7.5.5 договора возврат заказчику материалов (оборудования), не использованных подрядчиком при строительстве объекта, остатков неизрасходованных давальческих материалов, иных годных отходов и материалов, осуществляется подрядчиком по накладной на отпуск материалов на сторону (формы М-15) в течение 5 рабочих дней с даты получения соответствующего письменного уведомления заказчика о готовности принять имущество либо в течение 5 рабочих дней с даты досрочного прекращения договора. Возврат означает полный комплекс работ но погрузке, транспортировке, разгрузке, определению количества возвращаемых материалов, оборудования и отходов. В случае невозврата заказчику имущества, не использованного подрядчиком при выполнении работ, остатков давальческих материалов, иных годных отходов в предусмотренный пунктом договора срок, а также в тех случаях, когда подрядчик допустит необоснованный перерасход материалов н оборудования при строительстве объекта, заказчик вправе потребовать от подрядчика возмещения стоимости невозвращенных и/или перерасходованных материалов и оборудования, а подрядчик обязуется оплатить заказчику их стоимость не позднее 5 рабочих дней с момента истечения вышеуказанного срока на основании документов на реализацию, указанных в данном пункте договора материалов и оборудования (накладная ТОРГ-12, счет-фактура или УПД) и счета на оплату, выставленного заказчиком. Размер оплаты определяется с учетом НДС по ставке, установленной законодательством Российской Федерации, на основании стоимости, по которой подрядчику передавались соответствующие давальческие материалы, оборудование заказчика. Подрядчик также компенсирует заказчику дополнительные транспортно-заготовительные расходы, в случае если они не были включены в стоимость передаваемых Давальческих материалов/оборудования заказчика, на основании документально подверженных расходов. Стоимость иных годных отходов оплачивается н размере, разумно определяемом заказчиком.

В силу подпункта 7.5.8 договора одновременно с актом о приемке выполненных работ (формы КС-2) подрядчик представляет заказчику отчет об использовании давальческих материалов (уложенных в дело), составленный по форме приложения № 6/2 к договору.

На основании заявок на отпуск ТМЦ за период 01.12.2023 – 07.03.2023 переданы давальческие материалы на сумму 6 553 621,47 руб. С учётом отчетов об использовании давальческого материала (уложенного в дело) остаток неиспользованных в ходе выполнения работ ТМЦ составил 1 790 156,51 руб. без НДС. Стоимость давальческих материалов, подлежащая оплате подрядчиком, с учетом НДС - 2 148 187,81 руб. (перечень материалов неиспользованных в работах является приложением к исковому заявлению).

Пунктом 13.2 договора предусмотрено, что гарантийный срок на результат выполненных работ исчисляется со дня передачи результата работ заказчику. Гарантийный срок на результат выполненных работ оканчивается по истечению 5 лет с даты подписания сторонами последнего по времени акта о приемке выполненных работ (форма КС-2), составленною в отношении соответствующего контрактного пакета. Если в течение Гарантийного срока будет обнаружен дефект работ, в том числе дефект поставленных подрядчиком оборудования и материалов. Гарантийный срок на результат выполненных работ, материалы и оборудование продлевается на период времени со дня обнаружения дефекта до дня устранения дефекта. Подрядчик не несет ответственности за дефекты материалов и оборудования, поставленных заказчиком, а несет ответственность только за работы, связанные с их установкой, монтажом или переработкой.

В разделе 4 общего журнала, в котором ведется учет выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства, отражены некачественно выполненные работы, а именно:

1)не выдержана перпендикулярность керамогранитных плит на отм. + 10.950 в/о 6-8/Д-Е относительно осей здания, нарушение требования таб. 7.6 СП 71.13330.2017;

2)имеется отклонение от плоскости на отм. +10.950 в/о 6-8/Д-Е, перепад превышает максимально допустимые значения, нарушение требования таб. 7.6 СП 71.13330.2017;

3) на отм. +10.950 в/о 6-8/Д-Е не выдержаны требование по ширине швов (при допуске 2,5 мм, фактически до 5мм), нарушение требования таб. 7.6 СП 71.13330.2017.

Срок устранения выявленных недостатков установлен до 01.05.2024.

Между акционерным обществом «ЭквилитиПлюс» (заказчик) и обществом с ограниченной ответственностью «СТартАФФ» (исполнитель) 05.09.2023 заключен договор № ЭП-НК-23-Д209 о предоставлении труда работников (персонала). 

Согласно наряду-заказу от 25.04.2024 № 19/02 акционерным обществом «ЭквилитиПлюс» поручено обществу с ограниченной ответственностью «СТартАФФ» выполнить работы за общество с ограниченной ответственностью «СПЕЦСТРОЙ» на общую сумму 280 706,40 руб.   

Согласно акту об оказании услуг от 16.07.2024 № 202324 обществом с ограниченной ответственностью «СТартАФФ» в период с 16.05.2024 по 31.05.2024 оказаны услуги на общую сумму 8 221 101,60 руб., которые оплачены акционерным обществом «ЭквилитиПлюс» платежным поручением от 19.07.2024 № 1787.

В ходе исполнения договора подрядчиком выставлен счет от 29.02.2024 № 3 на перечисление аванса на работы по устройству керамогранитного покрытия пола (служебные помещения и видовые зоны) на сумму 1 300 000,00 руб.

Заказчик платежным поручением от 29.02.2024 № 499 произвел перечисление аванса в сумме 1 300 000,00 руб.

В соответствии с пунктом 4.5 договора обязательным условием для выплаты заказчиком аванса является предоставление подрядчиком следующих документов:

-оригинала безусловной и безотзывной банковской гарантии на сумму авансового платежа;

-уведомления банка-гаранта, подтверждающего подлинность банковской гарантии;

-счета на оплату аванса.

Подпунктом 4.5.1 договора предусмотрено, что документы, необходимые для перечисления аванса, должны быть предоставлены подрядчиком за 10 рабочих дней до согласованной даты перечисления аванса. Заказчик вправе не перечислять аванс до момента получения от подрядчика всех необходимых документов, при этом все обязательства подрядчика по выполнению работ по договору сохраняются в силе.

Подрядчик обязан выставить заказчику счет-фактуру на сумму перечисленного аванса в течение 5 (пяти) календарных дней с момента получения аванса (подпункт 4.5.2 договора)

В пункте 4.6 договора установлено, что заказчик имеет право требовать от подрядчика возврата суммы аванса (полностью или частично), непогашенной выполненными работами в случае:

-нарушения подрядчиком сроков выполнения работ (начального, промежуточных. конечного срока) более чем на 10 (Десять) календарных дней, при отсутствии вины Заказчика в просрочке выполнения работ;

-несоблюдения подрядчиком требований к качеству работ, если исправление соответствующих некачественно выполненных работ влечет задержку даты окончания работ более чем на 10 календарных дней;

-в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации или Договором.

Сумма аванса должна быть возвращена подрядчиком в течение 5 рабочих дней с даты получения письменного требования заказчика о возврате аванса, если иной срок или порядок возврата аванса не предусмотрен соответствующим разделом договора.

Возврат суммы аванса не освобождает подрядчика от исполнения обязательств по договору и от ответственности за нарушение обязательств.

Согласно пункту 17.1 договора обеспечением исполнения обязательств подрядчика по возврату аванса или иных обязательств по договору являются банковские гарантии, удовлетворяющие требованиям, предусмотренными разделом договора.

На основании пункта 17.2 договора финансовые средства обеспечения исполнения обязательств по договору подлежат выплате заказчику в качестве компенсации в случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения подрядчиком обязательств по возврату аванса или иных обязательств по договору, обеспеченных банковскими гарантиями.

Для перечисления подрядчику аванса согласно пункту 4.5. договора подрядчик обязан предоставить заказчику безотзывную и безусловную банковскую гарантию на сумму аванса, обеспечивающую обязательство подрядчика по возврату авансового платежа (пункт 17.3 договора).

В силу пункта 17.4 договора банковская гарантия возврата авансового платежа, предусмотренная в пункте 4.5. договора, должна быть предоставлена подрядчиком в течение 40 календарных дней с даты заключения договора.

В претензии от 17.06.2024 № ЭП-НК-24-2024 заказчик 

указал, что работы выполнены подрядчиком с существенными недостатками, отраженными в общем журнале, в связи с чем потребовал устранения недостатков в срок до 20.07.2024 и отметил, что приблизительная стоимость убытков заказчика, связанных с устранением недостатков силами третьих лиц, составит 300 000,00 руб.,

просил оплатить сумму неустоек, начисленных в соответствии с пунктами 15.3, 15.3.1, 15.3.2 договора, в общей сумме 1 596 325,32 руб. в течение 5 рабочих дней с момента получения претензии,

потребовал возврата авансового платежа в сумме 1 300 000,00 руб. в течение 5 рабочих дней с момента получения претензии,

потребовал в течение 5 рабочих дней с момента получения претензии предоставить заказчику отчеты об использовании давальческих материалов на общую сумму 1 790 156,51 руб. без НДС с доказательствами выполнения договорного объема работ из материалов, обозначенных в отчетах (акты по форме КС-2, справки по форме КС-3, журналы выполнения работ по форме КС-6 и КС-6а, полный комплект исполнительной документации и др. по условиям договора), вернуть давальческие материалы на сумму 1 790 156,51 руб. либо возместить заказчику стоимость давальческих материалов в размере 2 148 187,81 руб. с НДС.

Претензия направлена подрядчику Почтой России 20.06.2024 и 29.07.2024 возвращена отправителю за истечением срока хранения (опись, отчет об отслеживании отправления с почтовым идентификатором 80088697237592). 

Заказчик на основании пункта 15.8 договора, в соответствии с которым за просрочку возврата денежных средств, когда такой возврат предусмотрен договором, подрядчик уплачивает неустойку в размере 0,5 % от просроченной суммы за каждый день просрочки, начислил неустойку за просрочку возврата аванса за период с 23.08.2024 по 02.09.2024 в сумме 65 000,00 руб. (1 300 000,00 руб. * 0,5% * 10 дней) (расчет приведен в приложении к пояснениям истца от 14.02.2025 № ЭП-НК-25).

Поскольку претензия оставлена без исполнения, заказчик обратился в суд с настоящим иском.

Исследовав представленные доказательства, оценив доводы лиц, участвующих в деле, арбитражный суд пришел к следующим выводам.

Статьями 8, 307 Гражданского кодекса Российской Федерации предусмотрено, что права и обязанности возникают из оснований, предусмотренных законом и иными правовыми актами, в том числе из договоров и иных сделок, предусмотренных законом, а также из договоров и иных сделок, хотя и не предусмотренных законом, но не противоречащих ему. На основании статьи 309 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями.

В соответствии с частью 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

Между акционерным обществом «ЭквитиПлюс» (заказчик) и обществом с ограниченной ответственностью «СПЕЦСТРОЙ» (подрядчик) заключен договор субподряда № ЭП-НК-23-Д251 от 13.12.2023, подписано дополнительное соглашение от 08.02.2024 № 1.

Согласно пункту 2.1 договора (в редакции дополнительного соглашения № 1) в порядке и на условиях, установленных договором, технической документацией, техническим заданием (приложение № 3 к дополнительному соглашению № 1 к договору), календарным графиком выполнения работ (приложение № 2 к дополнительному соглашению № 1 к договору), в соответствии с требованиями технических регламентов (СП, СНиП, ГОСТ, др.) и действующего законодательства Российской Федерации, подрядчик обязуется по заданию заказчика выполнить следующие работы: устройство керамогранитного покрытия пола (видовые зоны); устройство керамогранитного покрытия пола (служебные помещения); укладку керамогранита на площадках, ступенях и устройство плинтусов на Лестнице № 6 в осях Г-В/9-10, облицовка стен керамогранитом (видовые зоны), обеспечивающие ввод его в эксплуатацию, а заказчик обязуется принять результаты работ и оплатить их. 

Правоотношения сторон регулируются нормами главы 37 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

 В силу статьи 702 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его. 

Сдача результата работ подрядчиком и приемка его заказчиком оформляются актом, подписанным обеими сторонами. При отказе одной из сторон от подписания акта в нем делается отметка об этом и акт подписывается другой стороной. Односторонний акт сдачи или приемки результата работ может быть признан судом недействительным лишь в случае, если мотивы отказа от подписания акта признаны им обоснованными (пункт 4 статьи 753 Гражданского кодекса Российской Федерации). 

Основанием для возникновения обязательства заказчика по оплате выполненных работ является сдача результата работ заказчику. Статья 753 Гражданского кодекса Российской Федерации предусматривает возможность составления одностороннего акта. Названная норма защищает интересы подрядчика, если заказчик необоснованно отказался от надлежащего оформления документов, удостоверяющих приемку (пункт 8 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 24.01.2000 № 51 «Обзор практики разрешения споров по договору строительного подряда»).

Гражданско-правовое регулирование отношений сторон в сфере подряда и сложившаяся в правоприменительной практике правовая позиция позволяют заключить следующее: сдача заказчику результата работ является основанием для возникновения обязательства его оплатить. Акты выполненных работ хотя и являются наиболее распространенными в гражданском обороте документами, фиксирующими выполнение подрядчиком работ, однако не выступают единственным средством доказывания соответствующих обстоятельств (определение Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации от 30.07.2015 № 305-ЭС15-3990 по делу № А40-46471/2014; определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации от 12.11.2019 № 77-КГ19-17, 2-971/2018). 

Исполнение обязательств может обеспечиваться неустойкой, залогом, удержанием имущества должника, поручительством, банковской гарантией, задатком и другими способами, предусмотренными законом или договором (пункт 1 статьи 329 Кодекса). Пунктом 1 статьи 330 Гражданского кодекса Российской Федерации предусмотрено, что неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения. В силу статьи 331 Гражданского кодекса Российской Федерации соглашение о неустойке должно быть совершено в письменной форме.

Из приведенных положений статей 329, 330 Гражданского кодекса Российской Федерации следует, что под неустойкой законодатель понимает денежную сумму, являющуюся мерой гражданско-правовой ответственности и одним из способов обеспечения обязательств, основанием для исчисления и последующего взыскания которой является неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, в частности просрочка исполнения обязательства. При этом законом предусмотрено, что соглашение о неустойки подлежит заключению сторонами в письменной форме.

Согласно правовой позиции, изложенной в пункте 65 постановление Пленума Верховного суда Российской Федерации от 24.03.2016 № 7 "О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств" по смыслу статьи 330 Гражданского кодекса Российской Федерации, истец вправе требовать присуждения неустойки по день фактического исполнения обязательства (в частности, фактической уплаты кредитору денежных средств, передачи товара, завершения работ). 

Как разъяснено в абзаце 2 пункта 65 Постановления Пленума Верховного суда Российской Федерации № 7 присуждая неустойку, суд по требованию истца в резолютивной части решения указывает сумму неустойки, исчисленную на дату вынесения решения и подлежащую взысканию, а также то, что такое взыскание производится до момента фактического исполнения обязательства. В абзаце 3 пункта 65 Постановления Пленума Верховного суда Российской Федерации № 7 разъяснено, что расчет суммы неустойки, начисляемой после вынесения решения, осуществляется в процессе исполнения судебного акта судебным приставом-исполнителем, а в случаях, установленных законом, - иными органами, организациями, в том числе органами казначейства, банками и иными кредитными организациями, должностными лицами и гражданами (часть 1 статьи 7, статья 8, пункт 16 части 1 статьи 64 и часть 2 статьи 70 Закона об исполнительном производстве). В случае неясности судебный пристав-исполнитель, иные лица, исполняющие судебный акт, вправе обратиться в суд за разъяснением его исполнения, в том числе по вопросу о том, какая именно сумма подлежит взысканию с должника (статья 202 ГПК РФ, статья 179 АПК РФ).

Пунктом 3.1 договора (в редакции дополнительного соглашения) установлено, что сроки выполнения работ определяются в календарном графике выполнения работ (приложение № 2 к дополнительному соглашению №1 к договору). Дата начала работ – 20.11.2023; дата окончания работ (за исключением работ, выполняемых в гарантийный срок) – 31.03.2024.

На основании пункта 4.2 (в редакции дополнительного соглашения) максимальная цена работ составляет 11 363 324,40 руб., в том числе НДС 1 893 887,40 руб. и является приблизительной.

В силу пункта 15.3 договора за нарушение подрядчиком срока окончания выполнения работ, в том числе, промежуточных сроков выполнения работ, подрядчик по письменному требованию заказчика, уплачивает неустойку в размере 0,1 % от цены невыполненных или несвоевременно выполненных работ за каждый день просрочки.

В соответствии с пунктом 15.3.1 в случае превышения подрядчиком общего срока выполнения работ более чем на 30 календарных дней подрядчик по письменному требованию заказчика в дополнение к неустойке, предусмотренной пунктом 15.3. договора, уплачивает штраф в размере 2 % от максимальной цены работ по договору; пунктом 15.3.2 - в случае превышения подрядчиком общего срока выполнения работ по договору более чем на 60 календарных дней подрядчик по письменному требованию заказчика в дополнение к неустойке, предусмотренной пунктом 15.3 договора и штрафу, предусмотренному пунктом 15.3.1 договора, уплачивает штраф в размере 5% от максимальной цены работ по договору.

Сторонами подписаны акты о приемке выполненных работ от 21.12.2023 № 1, №2, от 08.02.2024 № 3, № 4, № 5, № 6. 

За нарушение ответчиком срока окончания выполнения работ, в том числе, промежуточных сроков выполнения работ истцом начислена неустойка по состоянию на 02.09.2024 в общей сумме 1 410 242,24 руб. (расчет неустойки является приложением к пояснениям истца от 14.02.2025 № ЭП-НК-25).

Кроме того, истец на основании пункта 15.3.1 начислил штраф в сумме 227 266,49 руб. (11 363 324,40 руб. х 2%), пункта 15.3.2 – 568 166,22 руб. (11 363 324,40 руб. х 5 %).

Материалами дела подтверждено наличие со стороны ответчика просрочка исполнения обязательств по выполнению работ, а также невыполнение работ на сумму 5 657 266,33 руб. (исходя из данных приведенных в расчете неустойки, в графе «просроченная сумма», согласно которой ответчиком не выполнены работ по укладке керамогранита (видовые зоны). Устройство пола и плинтусов из керамогранита на сумму 27 218,40 руб., по укладке керамогранита (служебные зоны). Устройство пола и плинтусов из керамогранита на сумму 43 652,40 руб., отделочные работы на лестнице № 6 на общую сумму 604 130,40 руб., по устройству керамогранитного покрытия пола (видовые зоны) на сумму 2 337 118,56 руб., по устройству керамогранитного покрытия пола (служебные помещения) на сумму 308 028,01 руб., по облицовке стен керамогранитом (видовые зоны) на сумму 2 337 118,56 руб.), что свидетельствует об обоснованности требования истца о взыскании пени по состоянию на 02.09.2024 и по день фактического исполнения обязательства, штрафов.

Требование в данной части является обоснованным.

Истцом также заявлено о взыскании с ответчика стоимости невозвращенных давальческих материалов в размере 2 148 187,81 руб. 

Подрядчик обязан использовать предоставленный заказчиком материал экономно и расчетливо, после окончания работы представить заказчику отчет об израсходовании материала, а также возвратить его остаток либо с согласия заказчика уменьшить цену работы с учетом стоимости остающегося у подрядчика неиспользованного материала (пункт 1 статьи 713 Гражданского кодекса Российской Федерации). Подрядчик несет ответственность за несохранность представленного заказчиком материала, оборудования, переданной для переработки (обработки) вещи или иного имущества, оказавшегося во владении подрядчика в связи с исполнением договора подряда (статьи 714 Гражданского кодекса Российской Федерации).

В пункте 7.5 договора стороны согласовали, что в случаях, когда договор предусматривает использование материалов и оборудования заказчика, соответствующие оборудование и материалы передаются заказчиком подрядчику для выполнения работ по договору в следующем порядке:

подрядчик самостоятельно рассчитывает количество материалов (оборудования),подлежащих использованию при производстве работ. Подрядчик предоставляет заказчикузаявку на получение материалов (оборудования) поставки заказчика не позднее, чем за 2 рабочих дня до необходимой даты передачи материалов (оборудования). Перечень материалов и оборудования, передаваемых заказчиком подрядчику для выполнения работ, срок их передачи согласовываются сторонами в приложении № 6 к договору. Заявка на предоставление материалов (оборудования) поставки заказчика, согласованных сторонами в приложении № 6 к договору, подается по форме, согласованной в приложении № 6/1 к договору (заявка на отпуск ТМЦ в адрес подрядчика), с указанием наименования, количества и срока предоставления. Подрядчик обязан обеспечить эффективное использование но назначению переданных заказчиком материалов и оборудования в период времени, указанный в заявке. До начала работ подрядчик назначает лицо, ответственное за получение материалов (оборудования) поставки заказчика и предоставляет заказчику оригинал доверенности, предоставляющей право ответственному липу осуществлять от имени подрядчика все действия. предусмотренные договором, по получению товарно-материальных ценностей и подписанию необходимых документов (подпункт 7.5.1),

подрядчик обязан произвести приемку, разгрузку, складирование, хранение и передачу для производства работ изделий, материалов, конструкций и оборудования поставки заказчика. В случае необоснованного отказа или уклонения в приемке имущества поставки заказчика подрядчик обязан возместить заказчику все возникшие, в связи с этим убытки, в том числе расходы по храпению такого имущества. Все расходы по получению, доставке со склада заказчика, хранению давальческих материалов и другие связанные с этим расходы несет подрядчик (подпункт 7.5.2),

подрядчик несет ответственность за сохранность, утрату или повреждение полученных согласно договору оборудования и материалов с момента подписания им накладной на отпуск материалов на сторону (формы М-15) до полного завершения работ (включая период времени, н течение которого подрядчик будет устранять выявленные в ходе приемки недостатки) по объекту. В случае повреждения либо утраты оборудования и/или материалов заказчика подрядчик обязан выполнить за свой счет их ремонт и/или поставить оборудование, материалы, аналогичные поврежденным либо утраченным, без увеличения сроков окончания строительства объекта и цены работ по договору (подпункт 7.5.3).

Приемка материалов и оборудования осуществляется подрядчиком от заказчика по накладной на отпуск материалов на сторону (формы М-15). Проверка соответствия показателей качества, передаваемых заказчиком подрядчику материалов и оборудования требованиям стандартов, технических условий и их комплектности (входной контроль качества) осуществляется подрядчиком до момента подписания накладной на отпуск материалов на сторону (формы М-15). При установлении подрядчиком ненадлежащего качества, некомплектности оборудования. конструкций, изделий, материалов поставки заказчика в ходе приемки их для монтажа, в производство работ, подрядчик обязан поставить об этом в известность заказчика и принять участие в составлении соответствующего акта. Подрядчик не вправе ссылаться на непригодность и недоброкачественность поставленных заказчиком изделий, материалов, конструкций и оборудования после их приемки и обязан заменить их за свой счет, если не докажет, что такая непригодность и недоброкачественность не могла быть выявлена в построечных условиях и требовала лабораторного обследования (скрытые дефекты). В случае выявления скрытых дефектов/недостатков материалов, оборудования, конструкций, изделий подрядчик обязан незамедлительно уведомить заказчика и но его указанию принять участие в составлении соответствующего акта. Заказчик обязан доукомплектовать (предоставить качественные) материалы, оборудование, конструкции, изделия взамен бракованных и срок, установленный соглашением сторон (подпункт 7.5.4).

Согласно подпункту 7.5.5 договора возврат заказчику материалов (оборудования), не использованных подрядчиком при строительстве объекта, остатков неизрасходованных давальческих материалов, иных годных отходов и материалов, осуществляется подрядчиком по накладной на отпуск материалов на сторону (формы М-15) в течение 5 рабочих дней с даты получения соответствующего письменного уведомления заказчика о готовности принять имущество либо в течение 5 рабочих дней с даты досрочного прекращения договора. Возврат означает полный комплекс работ но погрузке, транспортировке, разгрузке, определению количества возвращаемых материалов, оборудования и отходов. В случае невозврата заказчику имущества, не использованного подрядчиком при выполнении работ, остатков давальческих материалов, иных годных отходов в предусмотренный пунктом договора срок, а также в тех случаях, когда подрядчик допустит необоснованный перерасход материалов н оборудования при строительстве объекта, заказчик вправе потребовать от подрядчика возмещения стоимости невозвращенных и/или перерасходованных материалов и оборудования, а подрядчик обязуется оплатить заказчику их стоимость не позднее 5 рабочих дней с момента истечения вышеуказанного срока на основании документов на реализацию, указанных в данном пункте договора материалов и оборудования (накладная ТОРГ-12, счет-фактура или УПД) и счета на оплату, выставленного заказчиком. Размер оплаты определяется с учетом НДС по ставке, установленной законодательством Российской Федерации, на основании стоимости, по которой подрядчику передавались соответствующие давальческие материалы, оборудование заказчика. Подрядчик также компенсирует заказчику дополнительные транспортно-заготовительные расходы, в случае если они не были включены в стоимость передаваемых Давальческих материалов/оборудования заказчика, на основании документально подверженных расходов. Стоимость иных годных отходов оплачивается н размере, разумно определяемом заказчиком.

В силу подпункта 7.5.8 договора одновременно с актом о приемке выполненных работ (формы КС-2) подрядчик представляет заказчику отчет об использовании давальческих материалов (уложенных в дело), составленный по форме приложения № 6/2 к договору.

Передача истцом ответчику давальческих материалов оформлена накладными на отпуск материалов на сторону по форме М-15.

На основании заявок на отпуск ТМЦ за период 01.12.2023 – 07.03.2023 переданы давальческие материалы на сумму 6 553 621,47 руб. С учётом отчетов об использовании давальческого материала (уложенного в дело) (прил. к иску №8,№15).остаток неиспользованных в ходе выполнения работ ТМЦ составил 1 790 156,51 руб. без НДС. Стоимость давальческих материалов, подлежащая оплате подрядчиком, с учетом НДС - 2 148 187,81 руб. (перечень материалов неиспользованных в работах является приложением к исковому заявлению).

В отсутствие доказательств использования ответчиком давальческих материалов на заявленную истцом сумму, требование о взыскании 2 148 187,81 руб. является правомерным.

Истцом заявлено о взыскании с ответчика 280 706,40 руб. убытков в виде расходов по оплате услуг устранения недостатков выполненных ответчиком работ силами третьего лица. 

Статьей 721 Гражданского кодекса Российской Федерации предусмотрено, что качество выполненной подрядчиком работы должно соответствовать условиям договора подряда, а при отсутствии или неполноте условий договора требованиям, обычно предъявляемым к работам соответствующего рода. Если иное не предусмотрено законом, иными правовыми актами или договором, результат выполненной работы должен в момент передачи заказчику обладать свойствами, указанными в договоре или определенными обычно предъявляемыми требованиями, и в пределах разумного срока быть пригодным для установленного договором использования, а если такое использование договором не предусмотрено, для обычного использования результата работы такого рода.

В силу пункта 3 статьи 723 Гражданского кодекса Российской Федерации, если отступления в работе от условий договора подряда или иные недостатки результата работы в установленный заказчиком разумный срок не были устранены либо являются существенными и неустранимыми, заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения причиненных убытков. 

Абзацем четвертым пункта 1 статьи 723 Гражданского кодекса Российской Федерации предусмотрено право заказчика потребовать от подрядчика возмещения своих расходов на устранение недостатков, когда право заказчика устранять их предусмотрено в договоре подряда. 

Таким образом, заказчик вправе потребовать от подрядчика возмещения своих расходов на устранение недостатков выполненных работ при уведомлении об этом подрядчика в разумный срок после обнаружения недостатков, а также при наличии в договоре права заказчика на устранение недостатков выполненных подрядчиком работ.

В силу пункта 10.5 договора, если подрядчик в течение установленного договором или актом о выявлении нарушению не устранит выявленные дефекты, заказчик вправе устранить их своими силами или привлеченными силами с отнесением расходов на устранение дефектов на счет подрядчика. 

В разделе 4 общего журнала, в котором ведется учет выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства, отражены некачественно выполненные работы, а именно:

1)не выдержана перпендикулярность керамогранитных плит на отм. + 10.950 в/о 6-8/Д-Е относительно осей здания, нарушение требования таб. 7.6 СП 71.13330.2017;

2)имеется отклонение от плоскости на отм. +10.950 в/о 6-8/Д-Е, перепад превышает максимально допустимые значения, нарушение требования таб. 7.6 СП 71.13330.2017;

3) на отм. +10.950 в/о 6-8/Д-Е не выдержаны требование по ширине швов (при допуске 2,5 мм, фактически до 5мм), нарушение требования таб. 7.6 СП 71.13330.2017.

Срок устранения выявленных недостатков установлен до 01.05.2024.

Заказчик вправе предъявить требования, связанные с недостатками результата работ, обнаруженными в течение гарантийного срока (пункт 3 статьи 724 ГК РФ). Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в пределах гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа объекта или его частей, неправильной его эксплуатации или неправильности инструкций по его эксплуатации, разработанных самим заказчиком или привлеченными им третьими лицами, ненадлежащего ремонта объекта, произведенного самим заказчиком или привлеченными им третьими лицами (пункт 2 статьи 755 ГК РФ).

Приведенные нормы права устанавливают презумпцию вины подрядчика за недостатки (дефекты) выполненных работ, выявленных в пределах гарантийного срока. Соответственно заказчик обязан доказать наличие недостатков работ, а на подрядчика возлагается обязанность доказать наличие обстоятельств, освобождающих его от ответственности за такие недостатки.

Между акционерным обществом «ЭквилитиПлюс» (заказчик) и обществом с ограниченной ответственностью «СТартАФФ» (исполнитель) 05.09.2023 заключен договор № ЭП-НК-23-Д209 о предоставлении труда работников (персонала). 

Согласно наряду-заказу от 25.04.2024 № 19/02 акционерным обществом «ЭквилитиПлюс» поручено обществу с ограниченной ответственностью «СТартАФФ» выполнить работы за общество с ограниченной ответственностью «СПЕЦСТРОЙ» на общую сумму 280 706,40 руб.   

Согласно акту об оказании услуг от 16.07.2024 № 202324 обществом с ограниченной ответственностью «СТартАФФ» в период с 16.05.2024 по 31.05.2024 оказаны услуги на общую сумму 8 221 101,60 руб., которые оплачены акционерным обществом «ЭквилитиПлюс» платежным поручением от 19.07.2024 № 1787.

Истец в отношении данного требования пояснил следующее.

Недостатки в выполненных работах обнаружены специалистом строительного контроля истца ФИО2 в ходе проверки в апреле 2024 года. В Журнале общих работ были записаны выявленные недостатки и сроки их устранения. Часть замечаний устранена в срок до 30.04.2024, а остальные 3 замечания (№№ 3, 4, 5) не устранены ответчиком в установленный срок. После получения замечаний в апреле 2024 года от ответчика получена информация о том, что замечания №№ 3-5 не будут устраняться в связи с отсутствием ресурсов. Об этом представитель ответчика лично сообщил в телефонном разговоре специалисту отдела строительного контроля истца ФИО2 

 В связи с указанным 25.04.2024 составлен заказ-наряд № 19/02 на выполнение работ с обществом с ограниченной ответственностью «СТартАФФ» по договору № ЭП-НК-23-Д209 от 05.09.2023 о предоставлении труда работников (персонала), в том числе, работ по устранению замечаний. 

Фактически работы выполнены в мае 2024 года, о чем свидетельствует резолюция «Устранить замечания в следующие отчетные периоды апреля-мая 2024 года». Дата резолюции указана 16.05.2024. 

Однако документы на оплату от ООО «СТартАфф» получены 16.07.2024, а именно: акт об оказании услуг № 202324 от 16.07.2024, счет-фактура № 47 от 16.07.2024. Оплата произведена платежным поручением № 1787 от 19.07.2024. 

В связи с чем истец просил ранее приобщенные документы: акт об оказании услуг № 202428 от 31.03.2024, счет-фактура № 117 от 31.03.2024, счет на оплату № 121 от 31.03.2024, платежное поручение № 1239 от 23.05.2024, исключить из числа доказательств по делу, поскольку они не имеют отношения к спорному периоду.

В претензии истца от 17.06.2024 исх. № ЭН-НК-24-2024 указано об устранении недостатков в срок до 20.07.2024 вместо требования о возмещении убытков, понесенных на их устранение, поскольку информация со строительной площадки поступает несвоевременно и общество с ограниченной ответственностью «СТартАфф» представляет документы для оплаты с большой задержкой. Как следует из представленных документов, акт об оказании услуг получен истцом только 16.07.2024, оплата была произведена 19.07.2024, то есть через месяц после направления ответчику претензии, поэтому требования о возмещении убытков еще не было сформировано, так как фактически убытки понесены после оплаты 19.07.2024. При подготовке претензии юридический отдел не располагал информацией об устранении недостатков другим подрядчиком и о предстоящих расходах.

Указанная в наряде-заказе от 25.04.2024 № 19/02 сумма предъявлена ко взысканию с ответчика.

Суд, оценив в совокупности представленные истцом доказательства и пояснения, считает требование истца о взыскании с ответчика 280 706,40 руб. обоснованным.

Истцом также заявлено требование о взыскании неосновательного обогащения в виде перечисленного аванса и неустойки за нарушение срока возврата аванса.

В соответствии с пунктом 4.5 договора обязательным условием для выплаты заказчиком аванса является предоставление подрядчиком следующих документов:

-оригинала безусловной и безотзывной банковской гарантии на сумму авансового платежа;

-уведомления банка-гаранта, подтверждающего подлинность банковской гарантии;

-счета на оплату аванса.

Подпунктом 4.5.1 договора предусмотрено, что документы, необходимые для перечисления аванса, должны быть предоставлены подрядчиком за 10 рабочих дней до согласованной даты перечисления аванса. Заказчик вправе не перечислять аванс до момента получения от подрядчика всех необходимых документов, при этом все обязательства подрядчика по выполнению работ по договору сохраняются в силе.

Подрядчик обязан выставить заказчику счет-фактуру на сумму перечисленного аванса в течение 5 календарных дней с момента получения аванса (подпункт 4.5.2 договора)

В пункте 4.6 договора установлено, что заказчик имеет право требовать от подрядчика возврата суммы аванса (полностью или частично), непогашенной выполненными работами в случае:

-нарушения подрядчиком сроков выполнения работ (начального, промежуточных. конечного срока) более чем на 10 календарных дней, при отсутствии вины заказчика в просрочке выполнения работ;

-несоблюдения подрядчиком требований к качеству работ, если исправление соответствующих некачественно выполненных работ влечет задержку даты окончания работ более чем на 10 календарных дней;

-в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации или Договором.

Сумма аванса должна быть возвращена подрядчиком в течение 5 рабочих дней с даты получения письменного требования заказчика о возврате аванса, если иной срок или порядок возврата аванса не предусмотрен соответствующим разделом договора.

Возврат суммы аванса не освобождает подрядчика от исполнения обязательств по договору и от ответственности за нарушение обязательств.

Согласно пункту 17.1 договора обеспечением исполнения обязательств подрядчика по возврату аванса или иных обязательств по договору являются банковские гарантии, удовлетворяющие требованиям, предусмотренными разделом договора.

На основании пункта 17.2 договора финансовые средства обеспечения исполнения обязательств по договору подлежат выплате заказчику в качестве компенсации в случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения подрядчиком обязательств по возврату аванса или иных обязательств по договору, обеспеченных банковскими гарантиями.

Для перечисления подрядчику аванса согласно пункту 4.5. договора подрядчик обязан предоставить заказчику безотзывную и безусловную банковскую гарантию на сумму аванса, обеспечивающую обязательство подрядчика по возврату авансового платежа (пункт 17.3 договора).

В силу пункта 17.4 договора банковская гарантия возврата авансового платежа, предусмотренная в пункте 4.5. договора, должна быть предоставлена подрядчиком в течение 40 календарных дней с даты заключения договора.

В соответствии с пунктом 15.8 договора за просрочку возврата денежных средств, когда такой возврат предусмотрен договором, подрядчик по требованию заказчика уплачивает неустойку в размере 0,5 % от просроченной суммы за каждый день просрочки.

Из указанных положений договора следует, что перечисление суммы аванса и предоставление банковской гарантии подрядчиком для наличия у заказчика возможности возврата суммы аванса фактически представляет собой обеспечение исполнения подрядчиком обязательства по качественному выполнению работ и в согласованные сторонами сроки. При этом аванс может быть истребован у подрядчика в качестве гарантийного платежа.

Ответчиком не исполнено обязательство по перечислению истцу банковской гарантии возврата авансового платежа, что исключает внесудебное взыскание истцом перечисленной ответчику суммы аванса. 

В ходе исполнения договора подрядчиком выставлен счет от 29.02.2024 № 3 на перечисление аванса на работы по устройству керамогранитного покрытия пола (служебные помещения и видовые зоны) на сумму 1 300 000,00 руб.

Заказчик платежным поручением от 29.02.2024 № 499 произвел перечисление подрядчику аванса в сумме 1 300 000,00 руб. Материалы дела не содержат доказательств выполнения работ на указанную сумму (актов о приемке выполненных работ, подписанных сторонами после перечисления суммы аванса).

В претензии от 17.06.2024 № ЭП-НК-24-2024 заказчик потребовал возврата авансового платежа в сумме 1 300 000,00 руб. в течение 5 рабочих дней с момента получения претензии.

Претензия направлена подрядчику Почтой России 20.06.2024 и 29.07.2024 возвращена отправителю за истечением срока хранения (опись, отчет об отслеживании отправления с почтовым идентификатором 80088697237592). 

Истец на основании пункта 15.8 договора начислил неустойку за просрочку возврата аванса за период с 23.08.2024 по 02.09.2024 в сумме 65 000,00 руб. (1 300 000,00 руб. * 0,5% * 10 дней) (расчет приведен в расчете неустойки, приложенном к пояснениям истца от 14.02.2025 № ЭП-НК-25).

С учетом изложенного, требования истца о возврате аванса и взыскании неустойки по состоянию на 02.09.2024 и по день фактического исполнения обязательства по возврату аванса являются правомерными.

Таким образом, иск подлежит удовлетворению полностью, с ответчика подлежит взысканию:

1 410 242,24 руб. неустойки по состоянию на 02.09.2024,

1 204 997,73 руб. неустойки по состоянию на 03.04.2025 (с 03.09.2024 по 03.04.2025 5 657 266,33 руб. x 0,1% x 213 дней),

а также неустойка из расчета 0,1 % за каждый день просрочки, подлежащую начислению на сумму в размере 5 657 266,33 руб., начиная с 04.04.2025 по день фактического исполнения обязательства, 

795 432,71 руб. штрафов, 

2 148 187,81 руб. стоимости давальческого материала,

280 706,40 руб. убытков,

1 300 000,00 руб. аванса,

65 000,00 руб. неустойки по состоянию на 02.09.2024,

1 384 500,00 руб. неустойки по состоянию на 03.04.2025 (с 03.09.2024 по 03.04.2025 1300000 x 0,5% x 213 дней),

а также неустойка из расчета 0,5 % за каждый день просрочки, подлежащую начислению на сумму в размере 1 300 000,00 руб., начиная с 04.04.2025 по день фактического исполнения обязательства.

 В силу пункта 1 статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны. 

Государственная пошлина за рассмотрение иска составляет 65 945,00 руб.

Истец при обращении в суд уплатил государственную пошлину в сумме 52 998,00 руб.

Принимая во внимание результат рассмотрения иска, с ответчика в пользу истца подлежит взысканию 52 998,00 руб. судебных расходов по уплате государственной пошлины, в доход федерального бюджета – 12 947,00 руб. государственной пошлины.

Настоящее решение выполнено в форме электронного документа, подписано усиленной квалифицированной электронной подписью судьи и считается направленным лицам, участвующим в деле, посредством его размещения в установленном порядке в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в режиме ограниченного доступа. 

По ходатайству лиц, участвующих в деле, копии решения на бумажном носителе могут быть направлены им в пятидневный срок со дня поступления соответствующего ходатайства заказным письмом с уведомлением о вручении или вручены им под расписку.

Руководствуясь статьями 110, 167 – 170, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Красноярского края

РЕШИЛ:

иск удовлетворить.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «СПЕЦСТРОЙ» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>, г. Красноярск, дата регистрации 17.08.2021) в пользу акционерного общества «ЭквитиПлюс» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>, Красноярский край, м.р-н. Емельяновский, г.п. поселок Емельяново, пгт. Емельяново, дата регистрации 02.04.2021)

1 410 242,24 руб. неустойки по состоянию на 02.09.2024,

1 204 997,73 руб. неустойки по состоянию на 03.04.2025 (с 03.09.2024 по 03.04.2025 (5 657 266,33 руб. x 0,1% x 213 дней),

а также неустойки из расчета 0,1 % за каждый день просрочки, подлежащую начислению на сумму в размере 5 657 266,33 руб., начиная с 04.04.2025 по день фактического исполнения обязательства, 

795 432,71 руб. штрафов, 

2 148 187,81 руб. стоимости давальческого материала,

280 706,40 руб. стоимости устранения недостатков,

1 300 000,00 руб. аванса,

65 000,00 руб. неустойки по состоянию на 02.09.2024,

1 384 500,00 руб. неустойки по состоянию на 03.04.2025 (с 03.09.2024 по 03.04.2025 1300000 x 0,5% x 213 дней),

а также неустойки из расчета 0,5 % за каждый день просрочки, подлежащую начислению на сумму в размере 1 300 000,00 руб., начиная с 04.04.2025 по день фактического исполнения обязательства,

52 998,00 руб. судебных расходов по уплате государственной пошлины.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «СПЕЦСТРОЙ» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>, г. Красноярск, дата регистрации 17.08.2021) в доход федерального бюджета 12 947,00 руб. государственной пошлины.

 Разъяснить лицам, участвующим в деле, что настоящее решение может быть обжаловано в течение месяца после его принятия путём подачи апелляционной жалобы в Третий арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Красноярского края.

Судья

О.С. Щёлокова