Арбитражный суд Волгоградской области

 

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

г. Волгоград                                                                                            Дело №А12-24287/2022

«17» января 2023 года

Резолютивная часть решения оглашена 11 января 2023 г.

Полный текст решения изготовлен 17 января 2023 г.

Арбитражный суд Волгоградской области в составе судьи Напалковой Л.В. при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Ремизовой О.В. рассмотрел в судебном заседании дело по исковому заявлению общества с ограниченной ответственностью «Энергия Юга» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) к обществу с ограниченной ответственностью «ЮгБурСтрой» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) о взыскании неотработанного аванса по договору субподряда от 15.06.2021г. №9898/15-06 в размере 202 600 руб., а также судебных расходов по оплате государственной пошлины в размере 7 052 руб.,

при участии в судебном заседании:

от истца – ФИО1, по доверенности;

от ответчика - не явился, извещен.

В Арбитражный суд Волгоградской области обратилось общество с ограниченной ответственностью «Энергия Юга» (далее – ООО «Энергия Юга», истец) к обществу с ограниченной ответственностью «ЮгБурСтрой» (далее – ООО «ЮгБурСтрой», ответчик) с иском о взыскании неотработанного аванса по договору субподряда от 15.06.2021г. №9898/15-06 в размере 202 600 руб. 

Истец в судебном заседании поддержал предъявленный иск.

Ответчик в судебное заседание не явился, отзыв на иск в порядке ст. 131 АПК РФ не представил. 

Изучив основания исковых требований, возражений ответчика, исследовав письменные доказательства, арбитражный суд

установил:

В обоснование предъявленного иска истец указывает, что между ООО «Энергия Юга» (Подрядчик) и ООО «ЮгБурСтрой» (Субподрядчик) был заключен договор субподряда № 9898/15-06 от 15 июня 2021 г. (далее - Договор).

В соответствии с п. 1.1. Договора Субподрядчик обязуется по заданию Подрядчик выполнить работы по бестраншейной прокладке защитного футляра для линии электропереда1 участка общей длиной 91м, методом ГНБ, с укладкой ПНД трубы 0-110 мм., на объекте «Строительство ПС 220/35/6 кВ Ильская с заходами ВЛ 220 кВ. Корректировка. Реконструкция В 220 кВ Кубанская - Афипская (участок от опоры №2 до ПС 220 кВ Афипская) (диспетчерско наименование ВЛ 220 кВ Кубанская - Афипская) в объеме строительства двух новых участков с ПС 220 кВ Ильская до места врезки ВЛ 220 кВ с образованием ВЛ 220 кВ Афипская - Ильска (диспетчерское наименование ВЛ 220 кВ Афипская - Ильская) и ВЛ-220 кВ Кубанская - Ильска (участок от опоры №2 до ПС 220 кВ Ильская) (диспетчерское наименование ВЛ 220 кВ Кубанская Ильская) (3-й этап)», в объеме, указанном Подрядчиком, и сдать по Актам сдачи-приемк выполненных работ по форме КС-2 и Справкам о стоимости выполненных работ по форме КС-3.

29.07.2021 г. ООО «Энергия Юга» на основании п. 3.1. Договора произвело оплату авансового платежа в размере 202 600 (Двести две тысячи шестьсот) рублей, включая НДС 20% - 33 766 (тридцать три тысячи семьсот шестьдесят шесть) рублей 67 копеек (платежное поручена № 11750 от 29.07.2021 г.).

Согласно п. 4.1. Договора срок начала выполнения работ установлен в течение 5 суток с момента получения авансового платежа.

Однако, Субподрядчик после получения авансового платежа от Подрядчика не приступил к выполнению работ по Договору.

Субподрядчик не выполнил работы, являющиеся предметом Договора, как это предусмотрело п. 5.3,5.

Согласно пунктам 6.9., 23.6. Договора Подрядчик вправе в любое время отказаться от исполнения Договора, направив об этом Субподрядчику соответствующее уведомление

На основании ст. 717 ГК РФ если иное не предусмотрено договором подряда, заказчик может в любое время до сдачи ему результата работы отказаться от исполнения договора.

Предоставленное Гражданским кодексом, другими законами, иными правовыми актами или договором право на односторонний отказ от договора (исполнения договора) (статья 310) может быть осуществлено управомоченной стороной путем уведомления другой стороны об отказе от договора (исполнения договора). Договор прекращается с момента получения данного уведомления, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом, другими законами, иными правовыми актами или договором (п. 1 ст. 450.1 Гражданского кодекса РФ).

В связи с тем, что предусмотренные Договором работы не были выполнены ООО «ЮгБурСтрой», ООО «Энергия Юга» утратило интерес в исполнении договора и воспользовалось предоставленным п. 6. 9., 23.6 Договора, статей 450.1, 717 ГК РФ правом на односторонний отказ от исполнения Договора путем направления уведомления об отказе от исполнения Договора исх. № 1908-ПУ от 29.04.2022 г. по адресу ООО «ЮгБурСтрой», указанному в ЕГРЮЛ.

Указанное уведомление прибыло на адрес места вручения 12 мая 2022 г., однако не было вручено получателю, вернувшись к отправителю в связи с истечением срока хранения, что подтверждается прилагаемым отчетом об отслеживании почтового отправления,

В силу п. 1 ст. 165.1 ГК РФ заявления, уведомления, извещения, требования или иные юридически значимые сообщения, с которыми закон или сделка связывает гражданско-правовые последствия для другого лица, влекут для этого лица такие последствия с момента доставки соответствующего сообщения ему или его представителю.

Сообщение считается доставленным и в тех случаях, если оно поступило лицу; которому оно направлено (адресату), но по обстоятельствам, зависящим от него, не было ему вручено или адресат не ознакомился с ним.

В силу п. 3 ст. 54 ГК РФ юридическое лицо несет риск последствии неполучения юридически значимых сообщений (статья 165.1), доставленных по адресу, указанному в едином государственном реестре юридических лиц, а также риск отсутствия по указанному адресу своего органа или представителя. Сообщения, доставленные по адресу, указанному в едином государственном реестре юридических лиц, считаются полученными юридическим лицом, даже если оно не находится по указанному адресу. а

В случае одностороннего отказа от исполнения договорного обязательства договор считается соответственно расторгнутым (п. 2 ст. 450.1 ГК РФ).

В силу п. 13 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 22.11.2016 N 54 договор прекращается с момента, когда уведомление доставлено или считается доставленным , по правилам статьи 165.1 ГК РФ.

В силу пункта 67 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.06.2015 N 25 сообщение считается доставленным, если адресат уклонился от получения корреспонденции в отделении связи, в связи с чем она была возвращена по истечении срока хранения.

Риск неполучения поступившей корреспонденции несет адресат.

Как разъяснил Пленум Верховного Суда РФ в третьем абзаце п. 67 Постановления от 23.06.2015 г. № 25, если в юридически значимом сообщении содержится информация об односторонней сделке, то при невручении сообщения по обстоятельствам, зависящим от адресата, считается, что содержание сообщения было им воспринято, и сделка повлекла соответствующие последствия (например, договор считается расторгнутым вследствие одностороннего отказа от его исполнения).

Таким образом, договор субподряда № 9898/15-06 от 15 июня 2021 г. является расторгнутым вследствие одностороннего отказа ООО «Энергия Юга» от его исполнения.

В связи с расторжением Договора у Субподрядчика возникла обязанность по возврату авансового платежа в размере 202 600 (Двести две тысячи шестьсот) рублей, о чем Подрядчик указал в уведомлении об одностороннем отказе от исполнения Договора исх. № 1908-ПУ от 29,04.2022 г., предъявив требование о его возврате.

На основании п. 4 ст. 753 ГК РФ сдача результата работ подрядчиком и приемка его заказчиком оформляются актом, подписанным обеими сторонами.

В соответствии с условиями п. 3.3 Договора подтверждением выполнения работ и условием проведения платежей также является наличие подписанного Сторонами Договора акта о приемке выполненных работ по форме КС-2 и иных документов.

Истец указывает, что работы по Договору не выполнялись, акт приемки выполненных работ по Договору Субподрядчиком не предоставлялся и Сторонами Договора не подписывался.

Требование о возврате неосвоенной суммы аванса по Договору является следствием расторжения Договора и прекращением обязательств сторон. Основания для удержания перечисленных ООО «Энергия Юга» денежных средств отпали при расторжении договора, поскольку в связи с этим прекратилась обязанность Субподрядчика по выполнению работ. 

В силу абз. 2 п. 4 ст. 453 ГК РФ в случае, когда до расторжения или изменения договора одна из сторон, получив от другой стороны исполнение обязательства по договору, не исполнила свое обязательство либо предоставила другой стороне неравноценное исполнение, к отношениям сторон применяются правила об обязательствах вследствие неосновательного обогащения (глава 60), если иное не предусмотрено законом или договором либо не вытекает из существа обязательства.

На основании п. 1 ст. 1102 ГК РФ лицо, которое без установленных законом, иными правовыми актами или сделкой оснований приобрело или сберегло имущество (приобретатель) за счет другого лица (потерпевшего), обязано возвратить последнему неосновательно приобретенное или сбереженное имущество (неосновательное обогащение),

Согласно п. 18.2. Договора споры, разногласия или претензии, связанные с исполнением настоящего договора, передаются на рассмотрение в Арбитражный суд Волгоградской области.

В силу ч. 3.1. ст. 70 АПК РФ обстоятельства, на которые ссылается сторона в обоснование своих требований или возражений, считаются признанными другой стороной, если они ею прямо не оспорены или несогласие с такими обстоятельствами не вытекает из иных доказательств, обосновывающих представленные возражения относительно существа заявленных требований.

Ответчиком вышеизложенные обстоятельства дела не оспорены. Следовательно, иск подлежит удовлетворению.   

В силу ч. 1 ст. 110 АПК РФ судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны.

Руководствуясь ст.ст. 110, 167-170, 176, 177 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

решил:

Иск удовлетворить.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «ЮгБурСтрой» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью «Энергия Юга» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) денежные средства  в размере 202600 руб., а также 7 052 руб. в счёт возмещения судебных расходов по оплате государственной пошлины.  

Решение может быть обжаловано в арбитражный суд апелляционной инстанции в течение месяца со дня его принятия через Арбитражный суд Волгоградской области.

Судья                                                                                                     Л.В. Напалкова