Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области

191124, Санкт-Петербург, ул. Смольного, д.6

http://www.spb.arbitr.ru

 

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

Дело № А56-52887/2019

11 ноября 2019 года

г.Санкт-Петербург

 

Резолютивная часть решения объявлена  08 ноября 2019 года.

Полный текст решения изготовлен  11 ноября 2019 года.

 

Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области в составе:судьи  Яценко О.В.,

 

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1

 

рассмотрев в судебном заседании дело по иску:

истец: общество с ограниченной ответственностью "РосСтройНева" (адрес:  191124 

<

...>, ОГРН:  

<

***>)

ответчик: общество с ограниченной ответственностью  "Меандр" (адрес:  197022, 

<

...>, литера А, помещение 15Н, ОГРН:  

<

***>)

о взыскании 2 554 467,91 руб.

 

при участии

- от истца: ФИО2 (генеральный директор, протокол от 09.10.2014 № 5/13), ФИО3 (доверенность от 03.10.2019)

- от ответчика: не явился (извещен) 

 

установил:

Общество с ограниченной ответственностью "РосСтройНева" (далее – ООО "РосСтройНева") обратилось в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области с иском к обществу с ограниченной ответственностью "Меандр" (далее – ООО "Меандр") о взыскании 2 420 201,18 руб. задолженности по оплате работ, выполненных по договорам подряда от 06.02.2017 № 20/2017-ЧБ, от 22.05.2018 № 69/2018-ЧБ, от 22.05.2018 № 70/2018-БР (далее – Договоры), и 134 266,73 руб. неустойки за нарушение срока оплаты за период с 11.09.2017 по 15.11.2018.

Истец в судебном заседании поддержал исковые требования.

Ответчик в судебное заседание не явился, о времени и месте его проведения извещен надлежащим образом.

В отзыве на исковое заявление ответчик возражает против удовлетворения иска.

В соответствии со статьей 156 АПК РФ дело рассматривается в отсутствие ответчика.

Исследовав материалы дела, заслушав представителя истца, суд  установил следующее.

На основании Договоров ООО "РосСтройНева" (подрядчик) выполнило реставрационные работы на объектах культурного наследия «Часовая башня, XV-XVII вв.», расположенном по адресу: 

<

...>, и «Башня Ратуши, XV-XVII вв.», расположенного по адресу: 

<

...>, и сдало результат выполненных работ ответчику, а ООО "Меандр" (генеральный подрядчик) – приняло выполненные работы по актам о приемке выполненных работ от 06.08.2017 № 1 и № 2, от 25.05.2018 № 1, № 2, № 3, и обязалось произвести их окончательную оплату в течение 35 календарных дней с даты подписания сторонами актов о приемке выполненных работ и справок о стоимости выполненных работ и затрат, указанных в пунктах 2.3.1 и 2.3.2 Договоров.

Работы частично оплачены ответчиком, вместе с тем доказательств оплаты работ в полном объеме ответчиком суду не представлено, задолженность составляет 2 420 201,18 руб., в связи с чем иск на основании пункта 1 статьи 330, пункта 1 статьи 740, пункта 1 статьи 746 Гражданского кодекса Российской Федерации подлежит удовлетворению в части взыскания 2 420 201,18 руб. задолженности и 134 266,73 руб. неустойки, начисленной в соответствии с пунктами 8.4.2 и 8.7 Договоров в размере одной трёхсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от неуплаченной в срок суммы за каждый день просрочки оплаты.

В соответствии со статьей 110 АПК РФ расходы истца по уплате государственной пошлины подлежат взысканию в его пользу с ответчика.

Руководствуясь статьями 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области 

решил:

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Меандр" в пользу общества с ограниченной ответственностью "РосСтройНева" 2 590 239,91 руб., в том числе 2 420 201,18 руб. задолженности, 134 266,73 руб. неустойки и 35 772 руб. расходов по уплате государственной пошлины.

На решение может быть подана апелляционная жалоба в Тринадцатый арбитражный апелляционный суд  в течение месяца со дня принятия решения.

 

Судья                                                                            Яценко О.В.